АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

600025, г. Владимир, Октябрьский проспект, д. 14

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело №  А11-9898/2019

г. Владимир

26 февраля 2020 года

В соответствии со статьей 176 Арбитражного процессуального  кодекса  Российской Федерации резолютивная часть объявлена 18.02.2020. Полный текст решения изготовлен 26.02.2020.

Арбитражный суд Владимирской области в составе: 

судьи Киселевой М.Ф.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по иску

акционерного общества "Объединенные региональные электрические сети Владимирской области", 

<

...>;                   ОГРН 

<

***>,   ИНН 

<

***>,

к обществу с ограниченной ответственностью "Р.К. Инвестиционная славянская риэлторская компания", г. Владимир, мкр. Юрьевец, Строительный  

<

...>; ОГРН 

<

***>,                              ИНН 

<

***>,

о взыскании 56 152 руб. 25 коп.,

при участии:

от истца – представитель не явился, извещен;

от ответчика - представитель не явился, извещен.

Акционерное общество "Объединенные региональные электрические сети Владимирской области", г. Владимир (далее – АО «ОРЭС Владимирской области», истец), обратилось в Арбитражный суд Владимирской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Р.К. Инвестиционная славянская риэлторская компания", г. Владимир, мкр. Юрьевец (далее – ООО "Р.К. Инвестиционная славянская риэлторская компания", ответчик), о взыскании неустойки за нарушение срока выполнения мероприятий по технологическому присоединению по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 26.07.2017      № 36/131/ВЛ в сумме 69 382 руб. 64 коп. за период с 27.11.2017 по 28.02.2019.

Впоследствии истец уточнял исковые требования и в заявлении от 22.01.2020 № 113-38-0164 просит взыскать с ответчика неустойку за нарушение срока выполнения  мероприятий по технологическому присоединению по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 26.07.2017 № 36/131/ВЛ в сумме  56 152 руб. 25 коп. за период с 28.11.2017 по 27.11.2018.                       

Поскольку в силу статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде первой инстанции до принятия судебного акта изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований, отказаться от иска полностью или частично, арбитражный суд принимает уточнение исковых требований.

Дело подлежит рассмотрению по уточненным требованиям истца.

Ответчик (ООО "Р.К. Инвестиционная славянская риэлторская компания") отзыв на иск не представил, в судебное заседание не явился.

Исследовав материалы дела, арбитражный суд установил следующее.

Между ОАО «Владимирская областная электросетевая компания» ( в настоящее время АО «ОРЭС Владимирской области») (сетевая организация) и ООО "Р.К. Инвестиционная славянская риэлторская компания" (заявитель) заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 26.07.2017 № 36/131/ВЛ (далее -договор), в соответствии с пунктом 1 которого сетевая организация на основании поданной заявителем заявки (приложение № 1 к настоящему договору) принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя (далее - технологическое присоединение) жилищно-гостиничного комплекса (административного здания), в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению  энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя: 75 (кВт); категория надежности: вторая; класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 0,4 (кВ); максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств 0 кВт. Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора.

Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения жилищно-гостиничного комплекса (административного здания), расположенного на земельном участке с кадастровым номером: 33:22:032033:17 по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилое здание. Участок находится примерно в 30 м от ориентира по направлению на юго-запад. Адрес ориентира: 

<

...> (пункт 2 договора).

Согласно пункту 5 договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет четыре месяца с момента подписания сторонами настоящего договора.

В силу пункта 10 договора размер платы за технологическое присоединение рассчитан в соответствии с Постановлением Департамента цен и тарифов администрации Владимирской области от 20.12.2016 г. № 47/55, и составляет 61 536 (Шестьдесят одна тысяча пятьсот тридцать шесть) рублей 71 копейка, в том числе НДС 18% - 9 386 (Девять тысяч триста восемьдесят шесть) рублей 96 копеек.

Пунктом 17 договора предусмотрено, что сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25 процента от указанного общего размера платы за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки. Сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить понесенные другой стороной договора расходы, связанные с необходимостью принудительного взыскания неустойки, предусмотренной абзацем первым настоящего пункта, в случае необоснованного уклонения либо отказа от ее уплаты.

Настоящий договор считается заключенным с даты поступления подписанного заявителем экземпляра настоящего договора в сетевую организацию (пункт 22 договора).

В соответствии с пунктом 23 договора все приложения к договору являются его неотъемлемой частью, в том числе приложение № 2 «Технические условия для технологического присоединения энергоустановок заявителя к электрическим сетям Сетевой организации».  

В уведомлении от 26.07.2017 № 113-07-2627 истец сообщил ответчику о том, что сетевая организация выполнила все необходимые мероприятия по технологическому присоединению, необходимые для осуществления энергоснабжения; для осуществления сетевой организацией фактического присоединения указал на необходимость направить в адрес сетевой организации уведомление о выполнении технических условий, с приложением следующих документов: копии сертификатов соответствия на электрооборудование (если оборудование подлежит обязательной сертификации) и (или) сопроводительной технической документации (технические паспорта оборудования), содержащей сведения о сертификации; копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения,   обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по схеме внешнего электроснабжения (схеме выдачи мощности объектов по производству электрической энергии), релейной защите и автоматике, телемеханике и связи, в случае если такая проектная документация не была представлена заявителем в сетевую организацию до направления заявителем в сетевую организацию уведомления о выполнении технических условий (если в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации является обязательной).

Уведомление о выполнении технических условий ответчиком (заявителем) в адрес истца (сетевой организации) не представлено.

В связи с нарушением ответчиком срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению истцом была направлена претензия от 28.03.2019 № 113-38-1249 с предложением в срок до 21.04.2019, оплатить неустойку, которую ответчик оставил без удовлетворения.

Нарушение ответчиком срока выполнения мероприятий по технологическому присоединению, установленного договором,  послужило основанием для обращения     АО «ОРЭС Владимирской области» в арбитражный суд с настоящим иском.

Оценив в совокупности представленные в материалы дела доказательства, арбитражный суд считает исковое заявление АО «ОРЭС Владимирской области» подлежащим удовлетворению, по следующим основаниям.

В соответствии со статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом, в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных нормативных правовых актов.

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. Односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, и одностороннее изменение условий такого обязательства допускаются также в случаях, предусмотренных договором, если иное не вытекает из закона или существа обязательства (статья 310 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике", пунктом 6 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861, технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

К правоотношениям сторон по договору технологического присоединения применяются помимо специальных норм положения главы 39 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также общие положения об обязательствах и о договоре (раздел III Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии с пунктом 1 статьи 779 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер (статья 26 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике").

Сторонами достигнуты соглашения по всем существенным условиям договора, в связи с чем, договор от 26.07.2017 № 36/131/ВЛ об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям является заключенным.

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям представляет собой комплекс мероприятий и осуществляется на основании возмездного договора, заключаемого сетевой организацией с обратившимся к ней лицом (заявителем).

По условиям этого договора сетевая организация обязана реализовать мероприятия, необходимые для осуществления такого технологического присоединения (в том числе разработать технические условия), а заявитель обязан помимо прочего внести плату за технологическое присоединение (пункт 4 статьи 23.1, пункт 2 статьи 23.2, пункт 1 статьи 26 Закона об электроэнергетике, подпункт "е" пункта 16, пункты 16 (2), 16 (4), 17, 18 Правил технологического присоединения).

Процедура технологического присоединения включает в себя, в том числе и выполнение мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных договором.

Порядок выполнения мероприятий по технологическому присоединению определен пунктом 18 Правил. 

Перечень мероприятий по технологическому присоединению, которые необходимо выполнить сетевой организации и заявителю, определен техническими условиями, которые являются неотъемлемой частью договора.

Согласно разделу 2 технических условий для временного присоединения к электрическим сетям от 26.07.2017 № 278, являющихся приложением к договору от 26.07.2017 № 36/131/ВЛ, для энергоснабжения объекта заявитель обязан выполнить следующие технические условия:

 1)Электроснабжение жилищно-гостиничного комплекса (административное здание) по адресу 

<

...> (местоположение земельного участка примерно в 30 м по направлению на юго-запад от ориентира жилое здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 

<

...>) выполнить двумя КЛ-0,4 кВ с разных секций шин РУ-0,4 кВ ТП-728, марку и сечение кабелей выбрать проектированием.

2)Провести предпроектное согласование приборов учета с ОУЭЭ (отдел учета электрической энергии) ОАО "ВОЭК". Учет электроэнергии выполнить на границе балансовой принадлежности счетчиками адаптированными к АСКУЭ.

3)Монтаж электроустановок выполнить в соответствии с ПТЭЭП (Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей) и ПУЭ (Правила устройства электроустановок).

4)Проектную документацию согласовать с ОУЭЭ (отдел учета электрической энергии) ОАО "ВОЭК" и ПТС (производственно-техническая служба) РЭС г. Владимир ОАО "ВОЭК".

5)Перед включением в РЭС г. Владимир ОАО "ВОЭК" оформить акт о выполнении технических условий и разрешение на включение.

Срок действия технических условий – 2 года.

В пункте 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации определено, что исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.

Согласно пункту 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

В пункте 17 договора от 26.07.2017 № 36/131/ВЛ предусмотрено, что сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25 процента от указанного общего размера платы за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки. 

Из материалов дела следует, что ответчиком нарушен срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 26.07.2017 № 36/131/ВЛ. Следовательно, истцом обоснованно заявлено требование о взыскании неустойки за период с 28.11.2017 по 27.11.2018.

Расчет неустойки судом проверен, признан верным, не противоречащим требованиям действующего законодательства. Доказательства оплаты неустойки в добровольном порядке ответчиком суду не представлены.

При указанных обстоятельствах требование АО «ОРЭС Владимирской области» о взыскании с ООО Р.К. Инвестиционная славянская риэлторская компания" неустойки в сумме  56 152 руб. 25 коп. за период с 28.11.2017 по 27.11.2018 подлежит удовлетворению.

Согласно части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с ООО Р.К. Инвестиционная славянская риэлторская компания" в пользу АО «ОРЭС Владимирской области» подлежит взысканию государственная пошлина в размере 2246 руб.

В силу статьи 104 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации истцу из федерального бюджета подлежит возврату государственная пошлина в сумме 529 руб., оплаченная по платежному поручению от 07.06.2019 № 5519. Подлинное платежное поручение от 07.06.2019 № 5519 остается в материалах дела, так как государственная пошлина возвращается частично.

  Руководствуясь статьями 4, 11, 12, 17, 49, 65, 104, 110, 167-171, 176, 318, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд                               

Р Е Ш И Л:

1.Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Р.К. Инвестиционная славянская риэлторская компания", г. Владимир,                     мкр. Юрьевец, в пользу акционерного общества "Объединенные региональные электрические сети Владимирской области", г. Владимир, неустойку в сумме 56 152 руб. 25 коп., государственную пошлину в сумме 2246 руб.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.

2.Возвратить акционерному обществу "Объединенные региональные электрические сети Владимирской области", г. Владимир, из федерального бюджета государственную пошлину в сумме 529 руб., оплаченную по платежному поручению от 07.06.2019 № 5519 при подаче искового заявления в суд. 

Основанием для возврата государственной пошлины является настоящее решение.

Подлинное платежное поручение от 07.06.2019 № 5519 остается в материалах дела, так как государственная пошлина возвращается частично.

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд, г. Владимир, через Арбитражный суд Владимирской области в течение месяца с момента принятия решения.

В таком же порядке решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемого судебного акта, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.    

 

Судья

     М.Ф. Киселева