685/2023-88227(1) 

 

ДЕСЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД 

117997, г. Москва, ул. Садовническая, д. 68/70, стр. 1, www.10aas.arbitr.ru 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 10АП-12512/2023

Дело № А41-50783/22

14 сентября 2023 года

г. Москва

 

Резолютивная часть постановления объявлена 11 сентября 2023 года.  

В полном объёме постановление изготовлено 14 сентября 2023 года.  

Десятый арбитражный апелляционный суд в составе председательствующего судьи  Стрелковой Е.А., судей Иевлева П.А., Немчиновой М.А.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, при участии в судебном заседании: 

от АО «Арсенал» – ФИО2 представитель по доверенности от 31.01.2023 года,  диплом о высшем юридическом образовании (представитель участвует в судебном  заседании посредством веб-конференции);  

от ООО «Связь Проектирование Строительство» – ФИО3 представитель по  доверенности от 01.09.2023 года, диплом о высшем юридическом образовании  

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества 

с ограниченной ответственностью «Связь Проектирование Строительство» на решение  Арбитражного суда Московской области от 15 мая 2023 года по делу № А41-50783/22  

по иску акционерного общества «Арсенал» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 

к обществу с ограниченной ответственностью «Связь Проектирование Строительство»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

о взыскании, 

встречному исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Связь  Проектирование Строительство»  

к акционерному обществу «Арсенал» о взыскании, 

УСТАНОВИЛ:

акционерное общество «Арсенал» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд  Московской области к обществу с ограниченной ответственностью «Связь  Проектирование Строительство» (далее – ответчик) с окончательно уточненными  требованиями в порядке ст. 49 АПК РФ о взыскании:  

 по Договору № МФ/СПС-02/2018КФ от 01.02.2018 - основной долг 6 960 399,86  руб., неустойка 667 093, 42 руб. (Договорная неустойка п. 7.6 Договора);  

по Договору № МТС/СПС_02/2018 от 01.02.2018 - основной долг 3 436 868,50 руб.,  проценты 413 504,97 руб. (ст. 395 ГК РФ по день фактического исполнения обязательств  по оплате) по заказам:  

1.  № 9000411от 01.01.2020, № 9000464 (СМР АМС) с 24.09.2020 по день  фактического исполнения обязательств по оплате  

2.  № 9000451 с. Началово (СМР АМС), с 24.09.2020 по день фактического  исполнения обязательств по оплате  

3. 9000424 (СМР) с 24.11.2020 по день фактического исполнения обязательств  по оплате  

4. 9000456 (ПИР, Р1) с 18.12.2019 по день фактического исполнения  обязательств по оплате  

5. 9000456 (СМР) с 01.12.2020 по день фактического исполнения обязательств  по оплате  

6. 9000459 ул. Курманова (СМР АМС) с 06.07.2020 по день фактического  исполнения обязательств по оплате;  

по Договору № МФ/СПС-02/2018ДВФ от 01.02.2018 - основной долг 865 833,13  руб., неустойка 86 583,33 руб. (Договорная неустойка п. 7.6 Договора);  

по Договору № МТС/СПС_12/2018КФ от 03.12.2018 - основной долг 527 156,02 руб.,  проценты 86 380, 69 руб. (ст. 395 ГК РФ):  

1.  № 610047 сл. Дегтево (ПИР L18) с 26.11.2019 по день фактического  исполнения обязательств по оплате  

2.  № 6102368 ул. им ФИО4, д. 9. (ПИР ПШ1), с 02.09.2020 по день  фактического исполнения обязательств по оплате  

3.  № 6102632 (ПИР GU21-3OUT) Счет № 7551 от 31.07.2020; № 6102632  (СМР) с 05.09.2020 по день фактического исполнения обязательств по оплате  

4. 610437 (СМР L18-4MOD) с 26.02.2021 по день фактического исполнения  обязательств по оплате  

5. 9500526 ул. Магистральная 25а (СМР ВЭС) с 04.03.2020 по день  фактического исполнения обязательств по оплате  

6.  № 610770 ст-ца Боковская (ПИР L18) счет № 9898 от 12.11.2020; № 611092  рп Жирнов (ПИР L18) счет № 9899 от 12.11.2020; № 611135 ул. Колхозная, д. 2 (ПИР L18)  с 18.12.2020 по день фактического исполнения обязательств по оплате;  

по Дополнительному соглашению № MRB00RUKRA069831 ЦЕНТР Города/ПИР,  СМР, ВЭС от 11.10.2020 - основной долг 644 126,95 руб., неустойка 64 426 руб. 69 коп.  

с 28.12.2020 по 13.03.2023 Договорная неустойка п. 7.2 Договора; 91 762 руб. расходов по государственной пошлине. К совместному рассмотрению с первоначальным иском принято применительно 

к нормам ст. 132 АПК РФ встречное окончательно уточненное в порядке ст. 49 АПК РФ  исковое заявление ООО «СПС» о взыскании с АО «Арсенал» 549 332, 41 руб.  задолженности за работы, не выполненные в срок по договору № МФ/СПС-02/2018КФ  

от 01.02.2018; 104 166,66 руб. расходов ООО «СПС» на устранение недостатков  собственными силами по договору № МФ/СПС-02/2018КФ от 01.02.2018; 56 522, 88 руб.  переплаты по договору № МФ/СПС-02/2018КФ от 01.02.2018.  

От АО «Арсенал» поступили уточнения исковых требований, в которых истец  просил:  

Взыскать с ООО «СПС» в пользу АО «Арсенал» сумму основного долга в размере  12 434 384,46 руб., и проценты в размере 1 329 623,06 руб. за неисполнение ООО «СПС»  договорных обязательств, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от  28.03.2022 № 497 «О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по  заявлениям, подаваемым кредиторами»:  

Договор № МФ/СПС-02/2018КФ от 01.02.2018 - основной долг 6 960 399,86 руб.,  неустойка 667 093, 42 руб. (Договорная неустойка п. 7.6 Договора) по следующим  заказам:  

1. 05-30 Махачкала-Метла 85909 (ПИР, СЭЗ, СМР), с 17.06.2019 по 06.03.2022,  

2. 15-6213 Владикавказ-АланияМОЛЛ-МТС 79079 (ПИР, СМР ВЛЭС), с 28.01.2019  по 06.03.2023,  

3. 23-2259 ФИО5 81648 (ПИР, СМР ВЭС) с 11.04.2019. по  06.03.2023,  

4. 36-4241 Бутурлиновка-Энерго 78334 (СМР, ДЕМ) с 05.04.2019  по 06.03.2023.,  

5. 61-10437 ФИО6 80773 (ПИР, СЭЗ, СМР), с 20.01.2019 по 06.03.2023, 

6. 61-5943 ФИО7 83248 (ПИР, СЭЗ, СМР) с 25.07.2019 по 06.03.2023,  

7. 61-704 Лихая-Центр 86931 (ПИР, СЭЗ, СМР LTE) с 30.06.2019  по 06.03.2023,  

8. 61-841 ФИО8 89302 (ПИР, СЭЗ, СМР) LTE, с 08.09.2019 по 06.03.2023, 

9. 05-12106 Уйташ-Indoor 78857 (ПИР, СЭЗ, СМР, РРЛ) 3G, 4G 1800;09-48  Черкесск-Техно 79574 (ПИР, СЭЗ, СМР LTE1800); 26-3429 Невинномысск-Эконом 80541  (ПИР, СЭЗ, СМР) с 30.01.2019 по 06.03.2023  

10. 05-12129 Хасавюрт-БП4 81706 (ПИР, СЭЗ, СМР); 05-6002 Махачкала-  ФИО5 85220 (ПИР, СЭЗ, СМР) переоборудование; 36-4066 Воронеж-Рудгормаш 83912  (ПИР, СЭЗ, СМР LTE), 06-2712 Назрань-МК 77709 (ПИР, СМР РРЛ), с. 31.05.2019  

по 13.03.2023 11. 05-13 Аглоби 85905 (ПИР, СМР); 05-3844 ФИО9 86642 (ПИР, СЭЗ, СМР); 05-5086 Тпиг 98 (ПИР, СМР ВЛЭС), 17.06.2019 по 06.03.2023 

12. 36-4198 ВО-Ольховатка 80675 (ПИР, СМР SWAP); 05-2701 Буйнакск-Новый Кумух 86059 (ПИР, СМР), с 02.07.2019 по 06.03.2023  

13. 05-5106 Хамаматюрт 83 (ПИР ВЭС, СМР ВЭС); 61-4862 Лихая-Мечта 86943  (ПИР, СЭЗ, СМР) LTE, 21.07.2019 по 06.03.2023  

14. 05-3704 Байрамаул 86109 (ПИР, СЭЗ, СМР); 05-6050 Буйнакск-МК 85342  (ПИР, СЭЗ, СМР); 23-15492 Геленджик-И1 84026 (ПИР, СЭЗ, СМР) LTE, с 02.06.2019 по  06.03.2023  

15. 05-930 Дербент-Газпромбанк ТУ 88319 (ПИР, СЭЗ, СМР) LTE; 23-15532  Краснодар-Знаменский-Шоссейная ТУ 88948 (ПИР, СЭЗ, СМР) LTE; 23-15833 Анапа-  Супсех-2 ТУ 90327 (ПИР, СЭЗ, СМР) LTE; 61-10391 Островского ТУ 90207 (ПИР, СЭЗ,  СМР) LTE; 61-10538 Целина-Элеватор ТУ 89379 (ПИР, СЭЗ, СМР) LTE; 61-375  Миллерово- Толстого ТУ 89266 (ПИР, СЭЗ, СМР) LTE; 61-4944 Верхнесоленый 89680  (ПИР, СЭЗ, СМР) LTE; 61-833 Гигант-Север ТУ 89285 (ПИР, СЭЗ, СМР) LTE, с  31.08.2019 по 06.03.2023  

16. 61-750 Шахты-Ленина 80772 (ПИР, СЭЗ, СМР); 05119 Акуша-МК 79829  (ПИР, СЭЗ, СМР) LTE; 055233 Айникаб 79430 (ПИР, СЭЗ, СМР) РРЛ; 31-5300 Белгород-  Мега Гринн-indoor 54942 (ПИР, СЭЗ, СМР); 36-4028 Воронеж-Подстанция 45 81363 (СЭЗ,  СМР АФУ); 36-4034 Воронеж-Россия 81472 (СЭЗ, СМР АФУ, LTE); 36-4039 Воронеж- РИФ 81260 (СЭЗ, СМР АФУ); 36-4086 Воронеж-Пивзавод 80444 (ПИР, СЭЗ, СМР); 23- 2901 Краснодар-Филип Моррис-репитер 82158 (ПИР, СЭЗ, СМР); 36-4509 Воронеж-Сити  Град 81296 (СЭЗ, СМР) РРЛ; 36-4564 Воронеж-Миронова 80507 (СЭЗ, СМР); 36-4628  Воронеж- Морозова 80680 (СЭЗ, СМР); 36-5060 Воронеж-Молодежный 81215 (СЭЗ, СМР  LTE); 6110433 Шахты-Грушевка-2 80725 (ПИР, СЭЗ, СМР); 61-242 Шахты-Маяковского  80770 (ПИР, СЭЗ, СМР); 61-244 Шахты-Александрова 80679 (ПИР, СЭЗ, СМР); 61-4963  Шахты- Мясо 80771 (ПИР, СЭЗ, СМР); 61-63 Шахты-Советская 80683 (ПИР, СЭЗ, СМР),  3-15510 Лазаревское-Дельфинарий 82773 (ПИР, СЭЗ, СМР) 2G, 3G, 4G, 31.12.2018 по  06.03.2023  

17. 06-5922 Магас-МВД 79557 (ПИР, СМР); 61-12092 Ростов-МегаМаг indoor  82270 (ПИР, СЭЗ, СМР) 2G, 3G, 4G; 07-166 ФИО12 83780 (ПИР, СЭЗ, СМР)  LTE, 30.04.2019 по 06.03.2023  

18. 23-13694 Красноармеец 00508 (ПИР, СМР ВЭС); 23-13748  Новотитаровская- ВК 679 (ПИР, СМР ВЭС), с 13.04.2019 по 06.03.2023  

19. 23-14135 Славянск-Прикубанский 01371-16 (ПИР ВЭС, СМР ВЭС); 

23-14771 Тимашевск-ФИО16 659-18 (ПИР, СМР ВЭС), с 11.05.2019 по 06.03.2023  

20. 23-3241 Адлер-Авиационная 76442 (ПИР, СЭЗ, СМР) монтаж РРС; 23-2550  Тимашевск-МК 76515 - 23-2899 Старовеличковская-МК 76518 (ПИР, СЭЗ, СМР) Монтаж  РРС, с 13.12.2018 по 06.03.2023  

21. 36-4164 Лазовое ОРТПЦ ТУ, с 29.03.2019 по 06.03.2023 

22. 36-4244 ВО-Грибановский Котельная 88479 (ПИР, СЭЗ, СМР LTE); 36-4257 ВО- Борисоглебск-Обувь 83995-87027 (ПИР, СЭЗ, СМР LTE); 36-4433 ВО-Борисоглебск-ЦРБ  83994-87006 (ПИР, СЭЗ, СМР) LTE; 61-10585 Лихой (РО) 86917 (ПИР, СЭЗ, РНС, СМР)  LTE; 61-12250 Донецк-Школа 86871-88076 (ПИР, СЭЗ, СМР) с 29.07.2019 по 06.03.2023  

23. 61-4940 Шахты-ГРЭС 87453 (ПИР, СЭЗ, СМР) LTE; 61-504 Лихая 86951 (ПИР,  СЭЗ, СМР) LTE, с 28.07.2019 по 06.03.2023  

24. 61-10621 Чичерино 86923 (ПИР, СЭЗ, СМР) LTE; 61-10424 ФИО13  84066 (ПИР, СЭЗ, СМР) LTE, 26.07.2019 по 06.03.2023  

1) Договор № МТС/СПС_02/2018 от 01.02.2018 - основной долг 3 436 868,50 руб.,  проценты 413 504,97 руб. (ст. 395 ГК РФ по день фактического исполнения обязательств  по оплате) По заказам  

1.  № 9000411от 01.01.2020, № 9000464 (СМР АМС) с 24.09.2020 по день  фактического исполнения обязательств по оплате  

2.  № 9000451 с. Началово (СМР АМС), с 24.09.2020 по день фактического  исполнения обязательств по оплате  

3. 9000424 (СМР) с 24.11.2020 по день фактического исполнения обязательств  по оплате  

4. 9000456 (ПИР, Р1) с 18.12.2019 по день фактического исполнения обязательств по  оплате  

5. 9000456 (СМР) с 01.12.2020 по день фактического исполнения обязательств  по оплате  

5. 9000459 ул. Курманова (СМР АМС) с 06.07.2020 по день фактического  

исполнения обязательств по оплате Договор № МФ/СПС-02/2018ДВФ от 01.02.2018 -  основной долг 865 833,13 руб., неустойка 86 583,33 руб. (Договорная неустойка п. 7.6  Договора)  

1) 00801 ДВФ (ХРО) ПИР, СЭЗ, СМР мод с 23.01.2019 по 13.03.2023 2) 07038 ДВФ (ИО) ПИР, СЭЗ, СМР 2G.4G с 28.01.2018 по 13.03.2023 3) 25-08343 ДВФ (ПРО) 08343.12 (ПИР, СЭЗ, СМР 4G) с 29.07.2019 по 13.03.2023 

4) 25-5212 ДВФ (ПРО) 05212.14 (ПИР, СЭЗ, СМР мод 4G); № 25-8091 ДВФ (ПРО)  

08091.15 ПИР, СЭЗ, СМР 4G; № 65-4544 ДВФ (СО) ТЗ 04526.12 (ПИР, СЭЗ, СМР 4G);  

 № 75-2475 ДВФ (Чита) ТЗ 02475.19 (ПИР, СЭЗ, СМР 4G), 31.08.2019 по 13.03.2023  

5) 75-9383 ДВФ (Чита) ТЗ 09648.10 (ПИР, СЭЗ, СМР 4G), с 31.08.2019 по 13.03.2023  

Договор № МТС/СПС_12/2018КФ от 03.12.2018 - основной долг 527 156,02 руб., проценты  

86 380, 69 руб. (ст. 395 ГК РФ) 

1.  № 610047 сл. Дегтево (ПИР L18) с 26.11.2019 по день фактического  

исполнения обязательств по оплате 

2.  № 6102368 ул. им ФИО4, д. 9. (ПИР ПШ1), с 02.09.2020 по день  

фактического исполнения обязательств по оплате 

3.  № 6102632 (ПИР GU21-3OUT) Счет № 7551 от 31.07.2020; № 6102632  

(СМР) с 05.09.2020 по день фактического исполнения обязательств по оплате 

4. 610437 (СМР L18-4MOD) с 26.02.2021 по день фактического исполнения  

обязательств по оплате 

5. 9500526 ул. Магистральная 25а (СМР ВЭС) с 04.03.2020 по день  

фактического исполнения обязательств по оплате 

6.  № 610770 ст-ца Боковская (ПИР L18) счет № 9898 от 12.11.2020; № 611092  

рп Жирнов (ПИР L18) счет № 9899 от 12.11.2020; № 611135 ул. Колхозная, д. 2 (ПИР L18)  

с 18.12.2020 по день фактического исполнения обязательств по оплате  

6) Дополнительное соглашение № MRB00RUKRA069831 ЦЕНТР Города/ПИР,  

СМР, ВЭС от 11.10.2020 - основной долг 644 126,95 руб., неустойка 76 060,65 руб. с  

28.12.2020 по 13.03.2023 Договорная неустойка п. 7.2 Договора. 

Указанные уточнения приняты к рассмотрению в порядке ст. 49 АПК РФ.  С учётом уточнения исковых требований госпошлина составляет 91 623 руб.  

АО «Арсенал» уменьшило сумму исковых требований на 56 522 руб. 88 коп.  Истец по встречному иску просил 549 332 руб. 41 коп. за работы, не выполненные  

в срок, 104166 руб. 66 коп. за устранение недостатков. Убытки, понесённые ООО «СПС»  

по оплате неустойки за просрочку выполнения работ, оплаченную в пользу ПАО «МТС».  ООО «СПС» наличие задолженности по 4 спорным договорам и дополнительному  

соглашению не оспаривало. 

По подписанным актам по закрытию заказов просрочек по спорным заказам не было.  ООО «СПС» в отношении штрафных санкций просило применить статью 333  

ГК РФ. 

Первоначальный истец уточнил исковое заявление до суммы 56522 руб. 88 коп. -  

переплаты неустойки по дополнительному соглашению. Уточнения приняты судом  

первой инстанции к рассмотрению в порядке ст. 49 АПК РФ. 

ООО «СПС» представил доказательства направления претензии.  Решением Арбитражного суда Московской области от 15 мая 2023 года по делу  

 № А41-50783/22 первоначальный иск удовлетворен полностью, встречный иск  

удовлетворен частично: с АО «Арсенал» в пользу ООО «СПС» взысканы 56 522 руб. 88  коп. переплаты, 1 369 руб. расходов по государственной пошлине, в остальной части  встречного иска отказано.  

Не согласившись с принятым по делу судебным актом ООО «Связь Проектирование  Строительство» обратилось в Десятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной  жалобой, в которой просит решение суда первой инстанции отменить в части  удовлетворения требований АО «Арсенал» по взысканию санкций с ООО «Связь  Проектирование Строительство» и в части отказа в удовлетворении требований ООО  «Связь Проектирование Строительство» по мотивам, изложенным в жалобе, и принять  новый судебный акт об удовлетворении требований ООО «Связь Проектирование  Строительство».  

АО «Арсенал» представило письменный отзыв на апелляционную жалобу, 

в котором просит решение Арбитражного суда Московской области от 15.05.2023 по делу   № А41-50783/22 оставить без изменения, апелляционную жалобу ООО «Связь  Проектирование Строительство» без удовлетворения.  

Законность и обоснованность принятого судом первой инстанции решения  проверены арбитражным апелляционным судом в порядке, установленном статьями 258,  266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в обжалуемой  части.  

Присутствующий в судебном заседании апелляционного суда представитель  ответчика поддержал доводы апелляционной жалобы.  

Представитель истца в судебном заседании суда апелляционной инстанции возражал  против апелляционной жалобы по основаниям, изложенным в отзыве, не возражал против  проверки законности и обоснованности решения суда первой инстанции в обжалуемой  части.  

Исследовав и оценив в совокупности представленные в материалы дела письменные  доказательства, обсудив доводы апелляционной жалобы, заслушав объяснения  представителей сторон, арбитражный апелляционный суд не находит оснований для  отмены решения суда первой инстанции в обжалуемой части, исходя из следующего.  

Как усматривается из материалов дела, между АО «Арсенал» (далее по тексту - Субподрядчик ) и ООО «СПС» (далее по тексту - Подрядчик) заключены Договоры  субподряда № МФ/СПС-02/2018КФ от 01.02.2018, № МТС/СПС_02/2018 от 01.02.2018; №  МФ/СПС-02/2018ДВФ от 01.02.2018; № МТС/СПС_12/2018КФ от 03.12.2018, и  дополнительное соглашение № MRB00RUKRA069831 ЦЕНТР Города/ПИР, СМР, ВЭС от  11.10.2020 к Генеральному договору № 07/2020/ВК от 01.07.2020 на выполнение  землеустроительных, проектно-изыскательских, проектных, строительно-монтажных и  иных работ по сооружения (монтажу/строительству) объектов связи (далее по тексту —  Договор), в соответствии с которыми Субподрядчик обязуется выполнять Заказы на  Работы в сроки, указанные в Графике выполнения работ, по ценам, указанным в  соответствующем Заказе.  

1. В рамках Договора субподряда № МФ/СПС-02/2018КФ от 01.02.2018 между  сторонами подписано 72 Заказа:  

1) 05-12129 Хасавюрт-БП4 81706 (ПИР, СЭЗ, СМР) срок выполнения работ31.05.2019, на сумму 450 578,58 руб., Акт сдачи- приемки подписан 30.04.2019.  

2) 05-13 Аглоби 85905 (ПИР, СМР), дата окончания работ - 30.06.2019, на  сумму 221 638, 25 руб., Акт сдачи- приемки подписан 16.05.2019.  

3) 05-2701 Буйнакск-Новый Кумух 86059 (ПИР, СМР) срок выполнения работ30.06.2019, на сумму -230 351,33 руб., Акт сдачи- приемки подписан 01.07.2019.  

4) 05-30 Махачкала-Метла 85909 (ПИР, СЭЗ, СМР) переоборудование, срок  окончания работ - 30.06.2019, на сумму 288 567,00 руб., Акт сдачи- приемки подписан  17.05.2019.  

5) 05-3704 Байрамаул 86109 (ПИР, СЭЗ, СМР) срок выполнения работ30.06.2019, на сумму -239 526,16 руб., Акт сдачи- приемки подписан 31.05.2019.  

6) 05-3844 ФИО9 86642 (ПИР, СЭЗ, СМР) срок выполнения работ30.06.2019, на сумму 276 012,00 руб., Акт сдачи- приемки подписан 16.05.2019.  

7) 05-5086 Тпиг 98 (ПИР, СМР ВЛЭС) срок выполнения работ-30.06.2019, на  сумму 111 547,36 руб., Акт сдачи- приемки подписан 16.05.2019.  

8) 05-5106 Хамаматюрт 83 (ПИР ВЭС, СМР ВЭС) срок выполнения работ31.05.2019, на сумму 190 870,76 руб., Акт сдачи- приемки подписан 20.06.2019.  

9) 05-6002 ФИО14 85220 (ПИР, СЭЗ, СМР) переоборудование  срок выполнения работ-31.05.2019, на сумму 287 590,50 руб., Акт сдачи- приемки  подписан 30.04.2019.  

10) 05-6050 Буйнакск-МК 85342 (ПИР, СЭЗ, СМР) срок выполнения работ30.06.2019, на сумму- 351 684,43 руб., 31.05.2019.  

11) 05-930 Дербент-Газпромбанк ТУ 88319 (ПИР, СЭЗ, СМР) LTE, срок  выполнения работ-31.07.2019, на сумму -271 661,40 руб., Акт сдачи- приемки подписан  30.07.2019.  

12) 05119 Акуша-МК 79829 (ПИР, СЭЗ, СМР) LTE срок выполнения работ31.01.2019, на сумму 437 462, 03 руб., Акт сдачи- приемки подписан 30.11.2018.  

13) 055233 Айникаб 79430 (ПИР, СЭЗ, СМР) РРЛ срок выполнения работ31.01.2019, на сумму 233 102, 01 руб., Акт сдачи- приемки подписан 30.11.2018.  

14) 06-5922 Магас-МВД 79557 (ПИР, СМР) срок выполнения работ-31.03.2019,  на сумму 164 108,64 руб., Акт сдачи- приемки подписан 29.03.2019.  

15) 09-48 Черкесск-Техно 79574 (ПИР, СЭЗ, СМР LTE1800) срок выполнения  работ-31.12.2018, на сумму 182 196,68 руб., Акт сдачи- приемки подписан 29.12.2018.  

16) 15-6213 Владикавказ-АланияМОЛЛ-МТС 79079 (ПИР, СМР ВЛЭС) срок  выполнения работ-31.12.2018, на сумму 350 940,68 руб., Акт сдачи- приемки подписан  28.12.2018.  

17) 23-13694 Красноармеец 00508 (ПИР, СМР ВЭС) срок выполнения работ31.03.2019, на сумму 120 934,73 руб., Акт сдачи- приемки подписан 12.03.2019.  

18) 05-12106 Уйташ-Indoor 78857 (ПИР, СЭЗ, СМР, РРЛ) 3G, 4G 1800 срок  выполнения работ-31.01.2019, на сумму 695 185,09 руб., Акт сдачи- приемки подписан  29.12.2018.  

19) 23-13748 Новотитаровская-ВК 679 (ПИР, СМР ВЭС) срок выполнения  работ-31.03.2019, на сумму 123 273,42 руб., Акт сдачи- приемки подписан 12.03.2019.  

20) 23-14135 Славянск-Прикубанский 01371-16 (ПИР ВЭС, СМР ВЭС) срок  выполнения работ-30.04.2019, на сумму 143 379,61 руб., Акт сдачи- приемки подписан  10.04.2019.  

21) 23-2550 Тимашевск-МК 76515 - 23-2899 Старовеличковская-МК 76518  (ПИР, СЭЗ, СМР) Монтаж РРС, срок выполнения работ 06.03.2018, на сумму 187 502, 32  руб., Акт сдачи- приемки подписан 12.11.2018.  

22) 06-2712 Назрань-МК 77709 (ПИР, СМР РРЛ), срок выполнения работ  31.05.2019, на сумму 129 028, 30 руб., Акт сдачи- приемки подписан 30.04.2019.  

23) 07-166 ФИО12 83780 (ПИР, СЭЗ, СМР) LTE, срок выполнения  работ - 31.03.2019, на сумму 340 786, 75 руб., Акт сдачи- приемки подписан 29.03.2019.  

24) 3-15510 Лазаревское-Дельфинарий 82773 (ПИР, СЭЗ, СМР) 2G, 3G, 4G, дата  окончания работ 31.12.2018, на сумму 367 507, 68 руб. Акт сдачи- приемки подписан  30.11.2018.  

25) 23-14771 Тимашевск-ФИО16 659-18 (ПИР, СМР ВЭС) срок  выполнения работ-30.04.2019, на сумму 159 083,90 руб., Акт сдачи- приемки подписан  10.04.2019.  

26) 23-15492 Геленджик-И1 84026 (ПИР, СЭЗ, СМР) LTE срок выполнения  работ- 30.06.2019, на сумму 370 530,07 руб., Акт сдачи- приемки подписан 31.05.2019.  

27) 23-15532 Краснодар-Знаменский-Шоссейная ТУ 88948 (ПИР, СЭЗ, СМР)  LTE срок выполнения работ-31.07.2019, на сумму 606 423,88 руб., Акт сдачи- приемки  подписан 30.07.2019.  

28) 23-15833 Анапа-Супсех-2 ТУ 90327 (ПИР, СЭЗ, СМР) LTE срок выполнения  работ- 31.07.2019, на сумму 498 304,54 руб., Акт сдачи- приемки подписан 30.07.2019.  

29) 23-2259 ФИО5 81648 (ПИР, СМР ВЭС) срок выполнения работ31.03.2019, на сумму 133 215,58 руб., Акт сдачи- приемки подписан 11.03.2019.  

30) 23-2901 Краснодар-Филип Моррис-репитер 82158 (ПИР, СЭЗ, СМР) срок  выполнения работ-31.12.2018, на сумму 416 881,39 руб., Акт сдачи- приемки подписан  30.11.2018.  

31) 23-3241 Адлер-Авиационная 76442 (ПИР, СЭЗ, СМР) монтаж РРС срок  выполнения работ-31.12.2018, на сумму 231 503,12 руб., Акт сдачи- приемки подписан  12.11.2018.  

32) 26-3429 Невинномысск-Эконом 80541 (ПИР, СЭЗ, СМР) срок выполнения  работ-31.01.2019, на сумму 251 880,66 руб., Акт сдачи- приемки подписан 29.12.2018.  

33) 31-5300 Белгород-Мега Гринн-indoor 54942 (ПИР, СЭЗ, СМР) срок  выполнения работ-31.12.2018, на сумму 1 425 104,47 руб., Акт сдачи- приемки подписан  30.11.2018.  

34) 36-4028 Воронеж-Подстанция 45 81363 (СЭЗ, СМР АФУ) срок выполнения  работ- 31.01.2019, на сумму 189 402,46 руб., Акт сдачи- приемки подписан 30.11.2018.  

35) 36-4034 Воронеж-Россия 81472 (СЭЗ, СМР АФУ, LTE) срок выполнения  работ- 31.01.2019, на сумму 357 683,16 руб., Акт сдачи- приемки подписан 30.11.2018.  

36) 36-4039 Воронеж-РИФ 81260 (СЭЗ, СМР АФУ) срок выполнения работ31.12.2018, на сумму 165 355,69 руб., Акт сдачи- приемки подписан 30.11.2018.  

37) 36-4066 Воронеж-Рудгормаш 83912 (ПИР, СЭЗ, СМР LTE) срок выполнения  работ- 30.06.2019, на сумму 162 621,31 руб., Акт сдачи- приемки подписан 30.04.2019.  

38) 36-4086 Воронеж-Пивзавод 80444 (ПИР, СЭЗ, СМР) срок выполнения работ31.12.2018, на сумму 156 319,27 руб., Акт сдачи- приемки подписан 30.11.2018.  

39) 36-4164 Лазовое ОРТПЦ ТУ 80438 (РНС, СМР, ДЕМ SWAP 2G) срок  выполнения работ-31.03.2019, на сумму 209 135,05руб., Акт сдачи- приемки подписан  28.02.2019.  

40) 36-4198 ВО-Ольховатка 80675 (ПИР, СМР SWAP) срок выполнения работ31.08.2019, на сумму 237 686,96 руб., Акт сдачи- приемки подписан 01.07.2019.  

41) 36-4241 Бутурлиновка-Энерго 78334 (СМР, ДЕМ) срок выполнения работ31.03.2019, на сумму 107 758,67 руб., Акт сдачи- приемки подписан 04.03.2019.  

42) 36-4244 ВО-Грибановский Котельная 88479 (ПИР, СЭЗ, СМР LTE) срок  выполнения работ-30.06.2019, на сумму 134 614,26 руб., Акт сдачи- приемки подписан  28.06.2019.  

43) 36-4249 ВО-Углянец ТУ 81264 (ПИР, СЭЗ, СМР) SWAP 2G срок  выполнения работ- 31.03.2019, на сумму 150 264,53 руб., Акт сдачи- приемки подписан  28.02.2019.  

44) 36-4257 ВО-Борисоглебск-Обувь 83995-87027 (ПИР, СЭЗ, СМР LTE) срок  выполнения работ-30.06.2019, на сумму 199 810,45 руб., Акт сдачи- приемки подписан  28.06.2019.  

45) 36-4433 ВО-Борисоглебск-ЦРБ 83994-87006 (ПИР, СЭЗ, СМР) LTE срок  выполнения работ-30.06.2019, на сумму 199 691,75 руб., Акт сдачи-приемки подписан  28.06.2019.  

46) 36-4509 Воронеж-Сити Град 81296 (СЭЗ, СМР) РРЛ срок выполнения работ31.12.2018, на сумму 323 027,83 руб., Акт сдачи- приемки подписан 30.11.2018.  

47) 36-4564 ФИО10 80507 (СЭЗ, СМР) срок выполнения работ31.12.2018, на сумму 161 087,81 руб., Акт сдачи- приемки подписан 30.11.2018.  

48) 36-4628 ФИО15 80680 (СЭЗ, СМР) срок выполнения работ31.12.2018, на сумму 151 757,77 руб., Акт сдачи- приемки подписан 30.11.2018.  

49) 36-5060 Воронеж-Молодежный 81215 (СЭЗ, СМР LTE) срок выполнения  работ-31.01.2019, на сумму 155 242,43 руб., Акт сдачи- приемки подписан 30.11.2018.  

50) 61-10391 Островского ТУ 90207 (ПИР, СЭЗ, СМР) LTE срок выполнения  работ- 30.06.2019, на сумму 163 415, 68 руб., Акт сдачи- приемки подписан 30.07.2019.  

51) 61-10424 ФИО13 84066 (ПИР, СЭЗ, СМР) LTE срок выполнения  работ- 30.06.2019, на сумму 140 837, 62 руб., Акт сдачи- приемки подписан 25.06.2019.  

52) 61-10433 Шахты-Грушевка-2 80725 (ПИР, СЭЗ, СМР) срок выполнения  работ- 31.12.2018, на сумму 137 642, 55 руб., Акт сдачи- приемки подписан 30.11.2018.  

53) 61-10437 ФИО6 80773 (ПИР, СЭЗ, СМР) срок выполнения  работ-31.12.2018, на сумму 179 440, 22 руб., Акт сдачи- приемки подписан 19.12.2018.  

54) 61-10538 Целина-Элеватор ТУ 89379 (ПИР, СЭЗ, СМР) LTE срок  выполнения работ-30.06.2019, на сумму 212 900, 54 руб., Акт сдачи- приемки подписан  30.07.2019.  

55) 61-10585 Лихой (РО) 86917 (ПИР, СЭЗ, РНС, СМР) LTE срок выполнения  работ- 30.06.2019, на сумму 194 849, 41 руб., Акт сдачи- приемки подписан 28.06.2019.  

56) 61-10621 Чичерино 86923 (ПИР, СЭЗ, СМР) LTE срок выполнения работ30.06.2019, на сумму 154 699, 56 руб., Акт сдачи- приемки подписан 25.06.2019.  

57) 61-12092 Ростов-МегаМаг indoor 82270 (ПИР, СЭЗ, СМР) 2G, 3G, 4G срок  выполнения работ-31.03.2019, на сумму 610 105, 60 руб., Акт сдачи- приемки подписан  29.03.2019.  

58) 61-12250 Донецк-Школа 86871-88076 (ПИР, СЭЗ, СМР) срок выполнения  работ- 30.06.2019, на сумму 541 693, 98 руб., Акт сдачи- приемки подписан 28.06.2019.  

59) 61-242 Шахты-Маяковского 80770 (ПИР, СЭЗ, СМР) срок выполнения  работ- 31.12.2018, на сумму 123 160,75 руб., Акт сдачи- приемки подписан 30.11.2018.  

60) 61-244 ФИО7 80679 (ПИР, СЭЗ, СМР) срок выполнения  работ-31.12.2018, на сумму 140 571,02 руб., Акт сдачи- приемки подписан 30.11.2018.  

61) 61-375 Миллерово-Толстого ТУ 89266 (ПИР, СЭЗ, СМР) LTE срок  выполнения работ-31.07.2019, на сумму 162 172,02 руб., Акт сдачи- приемки подписан  30.07.2019.  

62) 61-4862 Лихая-Мечта 86943 (ПИР, СЭЗ, СМР) LTE срок выполнения работ30.06.2019, на сумму 157 721, 14 руб., Акт сдачи- приемки подписан 20.06.2019.  

63) 61-4940 Шахты-ГРЭС 87453 (ПИР, СЭЗ, СМР) LTE срок выполнения работ30.06.2019, на сумму 155 378, 24 руб., Акт сдачи- приемки подписан 27.06.2019.  

64) 61-4944 Верхнесоленый 89680 (ПИР, СЭЗ, СМР) LTE срок выполнения  работ- 31.07.2019, на сумму 184 512, 86 руб., Акт сдачи- приемки подписан 30.07.2019.  

65) 61-4963 Шахты-Мясо 80771 (ПИР, СЭЗ, СМР) срок выполнения работ31.12.2018, на сумму 158 427, 99 руб., Акт сдачи- приемки подписан 30.11.2018.  

66) 61-504 Лихая 86951 (ПИР, СЭЗ, СМР) LTE срок выполнения работ30.06.2019, на сумму 191 986, 87руб., Акт сдачи- приемки подписан 27.06.2019.  

67) 61-5943 ФИО7 83248 (ПИР, СЭЗ, СМР) срок выполнения работ31.06.2019, на сумму 143 981,10 руб., Акт сдачи- приемки подписан 24.06.2019.  

68) 61-63 Шахты-Советская 80683 (ПИР, СЭЗ, СМР) срок выполнения работ31.12.2018, на сумму 163 610,39 руб., Акт сдачи- приемки подписан 30.11.2018.  

69) 61-704 Лихая-Центр 86931 (ПИР, СЭЗ, СМР LTE) срок выполнения работ30.06.2019, на сумму 159 820, 08 руб., Акт сдачи- приемки подписан 29.05.2019.  

70) 61-750 ФИО7 80772 (ПИР, СЭЗ, СМР) срок выполнения работ31.12.2018, на сумму 125 947, 47 руб., Акт сдачи- приемки подписан 30.11.2018.  

71) 61-833 Гигант-Север ТУ 89285 (ПИР, СЭЗ, СМР) LTE срок выполнения  работ- 31.07.2019, на сумму 162 431, 24 руб., Акт сдачи- приемки подписан 30.07.2019.  

72) 61-841 ФИО8 89302 (ПИР, СЭЗ, СМР) LTE срок выполнения работ31.07.2019, на сумму 176 704,21 руб., Акт сдачи- приемки подписан 07.08.2019.  

В соответствии с п. 2.1 Договора Субподрядчик обязуется выполнять Заказы  на Работы в сроки, указанные в Графике выполнения работ, по ценам, указанным  

в соответствующем Заказе, а Подрядчик, обязуется при отсутствии недостатков принять  надлежащим образом выполненные Работы и уплатить установленную Стоимость Работ.  

Руководствуясь п. 4.2.1. и п. 4.3.1. Договора Подрядчик оплачивает Субподрядчику  Работы, указанные в Заказах на производство Работ, в соответствии с условиями  Договора. Согласно ст. 4 Договора обязанность по оплате стоимости выполненных Работ,  у Подрядчика возникла по истечении тридцати календарных дней с даты подписания  Актов сдачи-приемки выполненных работ.  

Так, работы АО «Арсенал» выполнены в установленные в Заказах сроки и в объеме,  предусмотренном соответствующим Заказом, в связи с чем, после подписания Актов  сдачи- приемки работ ООО «СПС» обязано было исполнить взятые на себя обязательства  и произвести окончательный расчет по выполненным и принятым Работам  

в размере 6 960 399,86 руб. Данная обязанность Подрядчиком, не была исполнена в срок, в связи с чем, 

АО «Арсенал» потребовало оплаты неустойки за несвоевременную оплату выполненных  в установленный срок и принятых в надлежащем порядке строительно-монтажных работ,  в соответствии с п. 7.6 Договора, и в размере 1/365 Ключевой ставки ЦБ РФ от суммы  задолженности за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы задолженности:  

1. 05-30 Махачкала-Метла 85909 (ПИР, СЭЗ, СМР), Акт сдачи- приемки подписан  17.05.2019. Подрядчик обязан был произвести окончательный расчет до 17.06.2019  

на сумму 86 570,10 руб., Проценты 8 657,01 руб. 

2. 15-6213 Владикавказ-АланияМОЛЛ-МТС 79079 (ПИР, СМР ВЛЭС), Акт сдачи- приемки подписан 28.12.2018. Подрядчик обязан был произвести окончательный расчет  до 28.01.2019 на сумму 122 829,23 руб., Проценты 12 282,93 руб.  

3. 23-2259 ФИО5 81648 (ПИР, СМР ВЭС), Акт сдачи- приемки  подписан 11.03.2019. Подрядчик обязан был произвести окончательный расчет до  11.04.2019 на сумму 133 215,58 руб., Проценты 13 321,56 руб.  

4. 36-4241 Бутурлиновка-Энерго 78334 (СМР, ДЕМ) Акт сдачи- приемки  подписан 04.03.2019. Подрядчик обязан был произвести окончательный расчет до  04.04.2019 на сумму 107 758,67 руб., Проценты 10 775,87 руб.  

5. 61-10437 ФИО6 80773 (ПИР, СЭЗ, СМР), Акт сдачи- приемки  подписан 19.12.2018. Подрядчик обязан был произвести окончательный расчет до  19.01.2019 на сумму 179 440,22 руб., проценты 17 944,02 руб.  

6. 61-5943 ФИО7 83248 (ПИР, СЭЗ, СМР), Акт сдачи- приемки  подписан 24.06.2019. Подрядчик обязан был произвести окончательный расчет до  24.07.2019 на сумму 43 194,33 руб., проценты 4 319,43 руб.  

7. 61-704 Лихая-Центр 86931 (ПИР, СЭЗ, СМР LTE) срок выполнения работ30.06.2019, на сумму 159 820, 08 руб., Акт сдачи- приемки подписан 29.05.2019.  Подрядчик обязан был произвести окончательный расчет до 29.06.2019 на сумму  

47 946,02 руб. проценты 4 794,60 руб. 

8. 61-841 ФИО8 89302 (ПИР, СЭЗ, СМР) LTE, Акт сдачи- приемки подписан  07.08.2019. Подрядчик обязан был произвести окончательный расчет до 07.09.2019  

на сумму 53 011,26 руб., проценты 5 301,13 руб. 

9. Акты сдачи- приемки подписаны 29.12.2018 и Подрядчик обязан был произвести  окончательный расчет до 29.01.2019 на сумму 349 929,05 руб. по следующим Заказам:  

0512106 Уйташ-Indoor 78857 (ПИР, СЭЗ, СМР, РРЛ) 3G, 4G 1800;09-48 Черкесск-Техно  79574 (ПИР, СЭЗ, СМР LTE1800); 26-3429 Невинномысск-Эконом 80541 (ПИР, СЭЗ,  СМР), проценты 34 992,91 руб.  

10. Акты сдачи- приемки подписаны 30.04.2019, Подрядчик обязан был  произвести окончательный расчет до 30.05.2019 на сумму 308 945,6 руб. по следующим  Заказам: 05-12129 Хасавюрт-БП4 81706 (ПИР, СЭЗ, СМР); 05-6002 ФИО14  85220 (ПИР, СЭЗ, СМР) переоборудование; 36-4066 Воронеж-Рудгормаш 83912 (ПИР,  СЭЗ, СМР LTE), 06-2712 Назрань-МК 77709 (ПИР, СМР РРЛ), проценты 30 894, 5 руб.  

11. Акты сдачи- приемки подписаны 16.05.2019, Подрядчик обязан был произвести  окончательный расчет до 16.06.2019 на сумму 260 842,43 руб. по следующим Заказам:  05-13 Аглоби 85905 (ПИР, СМР); 05-3844 ФИО9 86642 (ПИР, СЭЗ, СМР);  

05-5086 Тпиг 98 (ПИР, СМР ВЛЭС), проценты 26 084,24 руб.  

12. Акты сдачи- приемки подписаны 16.05.2019, Подрядчик обязан был произвести  окончательный расчет до 01.07.2019 на сумму 140 411,40 руб. по следующим Заказам:  

36- 4198 ВО-Ольховатка 80675 (ПИР, СМР SWAP); 05-2701 Буйнакск-Новый Кумух 86059 (ПИР, СМР), проценты 14 041,14 руб. 

13. Акты сдачи- приемки подписаны 20.06.2019, Подрядчик обязан был произвести  окончательный расчет до 20.07.2019 на сумму 238 187,10 руб. по следующим Заказам:  

055106 Хамаматюрт 83 (ПИР ВЭС, СМР ВЭС); 61-4862 Лихая-Мечта 86943  

(ПИР, СЭЗ, СМР) LTE, проценты 23 818,71 руб. 

14. Акты сдачи- приемки подписаны 31.05.2019, Подрядчик обязан был произвести  окончательный расчет до 01.06.2019 на сумму 288 522,20 руб. по следующим Заказам:  

05 - 3704 Байрамаул 86109 (ПИР, СЭЗ, СМР); 05-6050 Буйнакск-МК 85342 (ПИР, СЭЗ,  СМР); 23-15492 Геленджик-И1 84026 (ПИР, СЭЗ, СМР) LTE, проценты 28 852,22 руб.  

15. Акты сдачи- приемки подписаны 30.07.2019, Подрядчик обязан был произвести  окончательный расчет до 30.08.2019 на сумму 678 546,65 руб. по следующим  

Заказам 05 - 930 Дербент-Газпромбанк ТУ 88319 (ПИР, СЭЗ, СМР) LTE; 23-15532  Краснодар- Знаменский-Шоссейная ТУ 88948 (ПИР, СЭЗ, СМР) LTE; 23-15833 Анапа- Супсех-2 ТУ 90327 (ПИР, СЭЗ, СМР) LTE; 61-10391 Островского ТУ 90207 (ПИР, СЭЗ,  СМР) LTE; 61-10538 Целина-Элеватор ТУ 89379 (ПИР, СЭЗ, СМР) LTE; 61-375  Миллерово-Толстого ТУ 89266 (ПИР, СЭЗ, СМР) LTE; 61-4944 Верхнесоленый 89680  (ПИР, СЭЗ, СМР) LTE; 61-833 Гигант-Север ТУ 89285 (ПИР, СЭЗ, СМР) LTE, проценты  67 854,67 руб.  

16. Акты сдачи- приемки подписаны 30.11.2018, Подрядчик обязан был произвести  окончательный расчет до 30.12.2018 на сумму 2 148 610,36 руб. по следующим Заказам:  61750 ФИО7 80772 (ПИР, СЭЗ, СМР); 05119 Акуша-МК 79829 (ПИР, СЭЗ, СМР)  LTE; 055233 Айникаб 79430 (ПИР, СЭЗ, СМР) РРЛ; 31-5300 Белгород-Мега Гринн-indoor  54942 (ПИР, СЭЗ, СМР); 36-4028 Воронеж-Подстанция 45 81363 (СЭЗ, СМР АФУ); 36- 4034 Воронеж-Россия 81472 (СЭЗ, СМР АФУ, LTE); 36-4039 Воронеж-РИФ 81260 (СЭЗ,  СМР АФУ); 36-4086 Воронеж-Пивзавод 80444 (ПИР, СЭЗ, СМР); 23-2901 Краснодар- Филип Моррис-репитер 82158 (ПИР, СЭЗ, СМР); 36-4509 Воронеж-Сити Град 81296  (СЭЗ, СМР) РРЛ; 36-4564 ФИО10 80507 (СЭЗ, СМР); 36-4628 Воронеж- ФИО11 80680 (СЭЗ, СМР); 36-5060 Воронеж-Молодежный 81215 (СЭЗ, СМР LTE); 61- 10433 Шахты- Грушевка-2 80725 (ПИР, СЭЗ, СМР); 61-242 Шахты-Маяковского 80770  (ПИР, СЭЗ, СМР); 61-244 ФИО7 80679 (ПИР, СЭЗ, СМР); 61-4963 Шахты- Мясо 80771 (ПИР, СЭЗ, СМР); 61-63 Шахты-Советская 80683 (ПИР, СЭЗ, СМР), 3-15510  Лазаревское- Дельфинарий 82773 (ПИР, СЭЗ, СМР) 2G, 3G, 4G, проценты 214 861,04 руб.  

17. Акты сдачи- приемки подписаны 29.03.2019, Подрядчик обязан был произвести  окончательный расчет до 29.04.2019 на сумму 352 161,52 руб. по следующим Заказам: 06  - 5922 Магас-МВД 79557 (ПИР, СМР); 61-12092 Ростов-МегаМаг indoor 82270 (ПИР,  СЭЗ, СМР) 2G, 3G, 4G; 07-166 ФИО12 83780 (ПИР, СЭЗ, СМР) LTE,  проценты 35 216,16 руб.  

18. Акты сдачи- приемки подписаны 12.03.2019, Подрядчик обязан был произвести  окончательный расчет до 12.04.2019 на сумму 241 869,46 руб. по следующим Заказам:  

23 - 13694 Красноармеец 00508 (ПИР, СМР ВЭС); 23-13748 Новотитаровская-ВК 679  (ПИР, СМР ВЭС), проценты 24 186,95 руб.  

19. Акт сдачи- приемки подписан 10.04.2019, Подрядчик обязан был произвести  окончательный расчет до 10.05.2019 на сумму 287 126,98 руб. по следующим Заказам:  

23-14135 Славянск-Прикубанский 01371-16 (ПИР ВЭС, СМР ВЭС); 23-14771 Тимашевск-  ФИО16 659-18 (ПИР, СМР ВЭС), проценты 28 712, 67 руб.  

20. Акт сдачи- приемки подписан 12.11.2018, Подрядчик обязан был произвести  окончательный расчет до 12.12.2018 на сумму 98 710,53 руб. по следующим Заказам: 233241 Адлер-Авиационная 76442 (ПИР, СЭЗ, СМР) монтаж РРС; 23-2550 Тимашевск-МК  

76515 - 23-2899 Старовеличковская-МК 76518 (ПИР, СЭЗ, СМР) Монтаж РРС, проценты  9 871,06 руб.  

21. Акт сдачи-приемки подписан 28.02.2019, Подрядчик обязан был произвести  окончательный расчет до 28.03.2019 на сумму 216 163,85 руб. по следующим Заказам:  

36 - 4164 Лазовое ОРТПЦ ТУ, проценты 21 616,39 руб. 36-4249 ВО-Углянец ТУ 81264  (ПИР, СЭЗ, СМР) SWAP 2G, проценты 21 616,39 руб.  

22. Акты сдачи- приемки подписаны 28.06.2019, Подрядчик обязан был произвести  окончательный расчет до 28.07.2019 на сумму 381 197,94 руб. по следующим Заказам:  

36 - 4244 ВО-Грибановский Котельная 88479 (ПИР, СЭЗ, СМР LTE); 36-4257 

ВО-Борисоглебск- Обувь 83995-87027 (ПИР, СЭЗ, СМР LTE); 36-4433 ВО-Борисоглебск- ЦРБ 83994-87006 (ПИР, СЭЗ, СМР) LTE; 61-10585 Лихой (РО) 86917 (ПИР, СЭЗ, РНС,  СМР) LTE; 61-12250 Донецк-Школа 86871-88076 (ПИР, СЭЗ, СМР), проценты  

38 119,8 руб. 

23. Акты сдачи- приемки подписаны 27.06.2019, Подрядчик обязан был произвести  окончательный расчет до 27.07.2019 на сумму 104 209,53 руб. по следующим Заказам:  

614940 Шахты-ГРЭС 87453 (ПИР, СЭЗ, СМР) LTE; 61-504 Лихая 86951 (ПИР, СЭЗ, СМР)  LTE, проценты 10 420, 96 руб.  

24. Акты сдачи- приемки подписаны 25.06.2019, Подрядчик обязан был произвести  окончательный расчет до 25.07.2019 на сумму 88 661,16 руб. по следующим Заказам:  

61-10621 Чичерино 86923 (ПИР, СЭЗ, СМР) LTE; 61-10424 ФИО13 84066 (ПИР,  СЭЗ, СМР) LTE, проценты 8 866,12 руб.  

Сумма основного долга по договору № МФ/СПС-02/2018КФ от 01.02.20186 960 399,86 руб., проценты - 667 093, 42 руб.  

2. К Договору № МТС/СПС_02/2018 от 01.02.2018 между сторонами подписано  7 Заказов:  

1)  № 9000411от 01.01.2020 срок выполнения работ-31.10.2020, на сумму 1 150 085,16 руб., Акт сдачи- приемки подписан 19.08.2020, на сумму 1 150 085,16 руб. 

2) 9000424 (СМР) срок выполнения работ-31.12.2020 Акт сдачи- приемки подписан  16.10.2020, на сумму 1 200 198,26 руб.  

3) 9000451 с. Началово (СМР АМС) срок выполнения работ-31.10.2020, Акт сдачи- приемки подписан от 19.08.2020, на сумму 1 205 338,81 руб.  

4) 9000456 (ПИР, Р1) срок выполнения работ-31.12.2019, Акт сдачи- приемки  подписан 12.11.2019, на сумму 380 400,76 руб.  

5) 9000456 (СМР) срок выполнения работ-31.12.2020, Акт сдачи- приемки подписан  23.10.2020, на сумму 1 170 846,98 руб.  

6) 9000459 ул. Курманова (СМР АМС) срок выполнения работ-31.03.2020,  Акт сдачи- приемки подписан 27.05.2020, на сумму 1 070 477, 09 руб.  

7) 9000464 (СМР АМС) срок выполнения работ-31.10.2020, Акт сдачи- приемки  подписан 19.08.2020, на сумму 1 302 860,60 руб.  

Согласно п. 3.1.2 Договора Подрядчик обязан обеспечить финансирование Работ  в порядке, предусмотренном разделом 5 «Стоимость Работ, порядок оплаты», а именно  

в течение 25 рабочих дней с момента получения счета, выставленного на основании  подписанного Заказа.  

В связи с тем, что обязательства по Договору АО «Арсенал» исполнило в полном  объеме, у ООО «СПС» возникла обязанность произвести окончательный расчет по  выполненным и принятым Работам. Так как, ООО «СПС» своевременно и в полном  

объеме не исполнило своих обязательств по уплате Работ, то АО «Арсенал» выставлены  требования о выплате процентов в рамках статьи 395 ГК РФ.  

В соответствии, с п. 10.9 Договора Условия об уплате неустойки, возмещении  убытков вступают в силу момента предъявления письменного требования одной из  Сторон, при этом неустойка будет начислена с момента ненадлежащего исполнения  обязательств по Договору, а убытки возмещаются в срок, указанный в письменно  требовании об их возмещении.  

В силу пункта 1 статьи 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом или  сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого  лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или  сбереженное имущество (неосновательное обогащение).  

Правила, предусмотренные главой 60 ГК РФ, применяются независимо от того,  явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя  имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли (пункт 2  статьи 1102 ГК РФ).  

Из п. 4 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 11.01.2000 № 49  

"Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением норм о  неосновательном обогащении" следует, что правила об обязательствах вследствие  неосновательного обогащения подлежат применению также к требованиям одной  стороны в обязательстве к другой о возврате ошибочно исполненного.  

Согласно положениям п. 2 статьи 1107 ГК РФ о начислении процентов в порядке  статьи 395 ГК РФ на сумму неосновательного обогащения с того момента, когда лицо  узнало или должно было узнать о неосновательности приобретения денежных средств,  проценты начисляются с момента получения денежных средств, ибо весь период имеет  место неосновательное пользование денежными средствами АО «Арсенал».  

Расчет процентов за пользование денежными средствами по правилам ст. 395 ГК РФ  приведен АО «АРСЕНАЛ» в приложении к уточнению исковых требований:  

1. По заказам № № 9000411от 01.01.2020 (счет № 8171 от 19.08.2020); № 9000464  (СМР АМС) (счет № 8173 от 19.08.2020); № 9000451 с. Началово (СМР АМС),  

(счет № 8172 от 19.08.2020), в соответствии с Договором, Подрядчик обязан был  произвести окончательный расчет до 23.09.2020 на сумму 731 656,91 руб., Проценты 97  422,65 руб. (см. Приложение № 1 таб. 25)  

2. 9000424 (СМР) (счет № 9407 от 16.10.2020), в соответствии с Договором,  Подрядчик обязан был произвести окончательный расчет до 23.11.2020 на сумму 1 178  743,26 руб., Проценты- 148 604,29 руб. (см. Приложение № 1 таб. 26)  

3. 9000456 (ПИР, Р1) (счет № 11085 от 12.11.2019), в соответствии с Договором,  Подрядчик обязан был произвести окончательный расчет до 17.12.2019, на сумму 52  910,04 руб., Проценты 9 236,72 руб. (см. Приложение № 1 таб. 27)  

4. 9000456 (СМР) (счет № 9485 от 23.10.2020), в соответствии с Договором,  Подрядчик обязан был произвести окончательный расчет до 30.11.2020, на сумму 1 170  846,98 руб., Проценты - 146 657,08 руб. (см. Приложение № 1 таб. 28)  

5. 9000459 ул. Курманова (СМР АМС) (счет № 4562 от 27.05.2020), в соответствии с  Договором, Подрядчик обязан был произвести окончательный расчет до 06.07.2020, на  сумму 214 095,52 руб., Проценты - 30 500,79 руб. (см. Приложение № 1 таб. 29).  

Основной долг по Договору № МТС/СПС_02/2018 от 01.02.2018 - 3 436 868,50 руб.,  проценты 413 504,97 руб.  

К Договору № МФ/СПС-02/2018ДВФ от 01.02.2018 между сторонами подписано 9  Заказов:  

1) 00801 ДВФ (ХРО) ПИР, СЭЗ, СМР мод от 21.03.2018 срок выполнения работ31.12.2018, Акт сдачи- приемки подписан 23.12.2018, на сумму 201 448,62 руб.  

2) 07038 ДВФ (ИО) ПИР, СЭЗ, СМР 2G.4G от 19.09.2018 срок выполнения работ31.12.2018, Акт сдачи- приемки подписан 27.12.2018, на сумму 380 218, 02 руб.  

3) 25-08343 ДВФ (ПРО) 08343.12 (ПИР, СЭЗ, СМР 4G) от 01.05.2019 

срок выполнения работ- 30.06.2019, Акт сдачи- приемки подписан 28.06.2019, на сумму  187 083, 17 руб.  

4) 25-5212 ДВФ (ПРО) 05212.14 (ПИР, СЭЗ, СМР мод 4G) от 01.06.2019 срок  выполнения работ-Акт сдачи- приемки подписан 30.07.2019, на сумму 164 259,77 руб.  

5) 25-8091 ДВФ (ПРО) 08091.15 ПИР, СЭЗ, СМР 4G от 01.06.2019 срок выполнения  работ-3.07.2019, срок выполнения работ-Акт сдачи- приемки подписан 30.07.2019,  

на сумму 238 942,70 руб. 

6) 65-4544 ДВФ (СО) ТЗ 04526.12 (ПИР, СЭЗ, СМР 4G) от 01.06.2019 срок  выполнения работ-31.07.2019, Акт сдачи- приемки подписан 30.07.2019, на сумму  

222 352,08 руб. 

7) 75-2475 ДВФ (Чита) ТЗ 02475.19 (ПИР, СЭЗ, СМР 4G) от 01.06.2019 срок  выполнения работ-31.07.2019, Акт сдачи- приемки подписан 30.07.2019, на сумму  

136 443, 64 руб. 

8) Комплекс/Технич. СПС ДВФ Технический Сентябрь от 01.08.2018 срок  выполнения работ- 31.10.2018, Акт сдачи- приемки подписан 27.09.2018, на сумму  

1 697 646,83 руб. 

9) 75-9383 ДВФ (Чита) ТЗ 09648.10 (ПИР, СЭЗ, СМР 4G) от 01.06.2019, срок  выполнения работ - 31.07.2019, на сумму 571 904, 45 руб., Акт сдачи- приемки подписан  30.07.2019.  

В соответствии с п. 2.1 Договора Субподрядчик обязуется выполнять Заказы  

на Работы в сроки, указанные в Графике выполнения работ, по ценам, указанным в  соответствующем Заказе, а Подрядчик, обязуется при отсутствии недостатков принять  надлежащим образом выполненные Работы и уплатить установленную Стоимость Работ.  

Руководствуясь п. 4.2.1. и п. 4.3.1. Договора Подрядчик оплачивает Субподрядчику  Работы, указанные в Заказах на производство Работ, в соответствии с условиями  Договора.  

В соответствии со ст. 4 Договора ООО «СПС» обязанность по оплате стоимости  выполненных Работ возникла в ближайший платежный день по истечении тридцати  календарных дней с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.  

Данная обязанность Подрядчиком, не была исполнена, в связи с чем, 

АО «АРСЕНАЛ» выставлены требования об оплате неустойки за несвоевременную  оплату выполненных в установленный срок и принятых в надлежащем порядке  Строительно-монтажных работ, в соответствии с п. 7.6 Договора, и в размере  

1/365 Ключевой ставки ЦБ РФ от суммы задолженности за каждый день просрочки, но не  более 10% от суммы задолженности.  

1. 00801 ДВФ (ХРО) ПИР, СЭЗ, СМР мод - Акт сдачи- приемки подписан23.12.2018, Задолженность на сумму 201 448,62 руб. Подрядчик обязан был произвести  окончательный расчет до 22.01.2019, Сумма неустойки 20 144,87 руб. (см. Приложение   № 1 таб. 30)  

2. 07038 ДВФ (ИО) ПИР, СЭЗ, СМР 2G.4G - Акт сдачи- приемки подписан  27.12.2018, Задолженность на сумму 5 000,00 руб. Подрядчик обязан был произвести  окончательный расчет до 28.01.2019. Сумма неустойки 500 руб. (см. Приложение № 1  

таб. 31) 

3. 25-08343 ДВФ (ПРО) 08343.12 (ПИР, СЭЗ, СМР 4G) - Акт сдачи- приемки  подписан 28.06.2019, Задолженность на сумму 56 124,95 руб. Подрядчик обязан был  произвести окончательный расчет до 29.07.2019. Сумма неустойки 5 612,50 руб. (см.  Приложение № 1 таб. 32)  

4. Акты сдачи- приемки подписаны 30.07.2019 и Подрядчик обязан был произвести  окончательный расчет до 30.08.2019 в размере 598 259,56 руб. по следующим Заказам:   № 25-5212 ДВФ (ПРО) 05212.14 (ПИР, СЭЗ, СМР мод 4G); № 25-8091 ДВФ (ПРО)  08091.15 ПИР, СЭЗ, СМР 4G; № 65-4544 ДВФ (СО) ТЗ 04526.12 (ПИР, СЭЗ, СМР 4G);   № 75-2475 ДВФ (Чита) ТЗ 02475.19 (ПИР, СЭЗ, СМР 4G), Сумма неустойки 59 825,96 руб.  (см. Приложение № 1 таб. 33)  

5. Комплекс СПС ДВФ Технический Сентябрь 2018, Акт сдачи- приемки подписан  27.09.2018, на сумму 195 056,07 руб. Подрядчик обязан был произвести окончательный  расчет до 29.10.2018. Сумма неустойки 19 505,607руб. (см. Приложение № 1 таб. 34)  

6. 75-9383 ДВФ (Чита) ТЗ 09648.10 (ПИР, СЭЗ, СМР 4G), Акт сдачи- приемки  подписан 30.07.2019. Подрядчик обязан был произвести окончательный расчет 30.08.2019  в размере 5 000 руб., сумма неустойки 500 руб. (см. Приложение № 1 таб. 35)  

Основной долг по Договору № МФ/СПС-02/2018ДВФ от 01.02.2018- основной долг  865 833,13 руб., неустойка 86 583,33 руб.  

4. К Договору № МТС/СПС_12/2018КФ от 03.12.2018 между сторонами подписано  10 Заказов:  

1) 610047 сл. Дегтево (ПИР L18) от 01.09.2019 срок выполнения работ- 30.11.2019,  Акт сдачи- приемки подписан 18.10.2019, на сумму 64 742,22 руб.  

2) 6102368 ул. им ФИО4, д. 9. (ПИР ПШ1) от 01.06.2020, срок выполнения  работ-31.08.2020, Акт сдачи- приемки подписан 28.07.2020, на сумму 316 094, 40 руб.  

3) 6102632 (ПИР GU21-3OUT) от 01.07.2020 срок выполнения работ- 30.09.2020,  Акт сдачи- приемки подписан 31.07.2020, на сумму 354 573, 73 руб.  

4) 6102632 (СМР) от 01.07.2020 срок выполнения работ- 31.08.2020, Акт сдачи- приемки подписан 31.07.2020, на сумму 366 573,84 руб.  

5) 610437 (СМР L18-4MOD) от 01.12.2020 срок выполнения работ- 31.01.2021, Акт  сдачи- приемки подписан 20.01.2021, на сумму 101 948,68 руб.  

6) 610770 ст-ца Боковская (ПИР L18) от 11.10.2020 срок выполнения работ31.12.2020, Акт сдачи- приемки подписан 12.11.2020, на сумму 51 005,24 руб.  

7) 611092 рп Жирнов (ПИР L18) от 11.10.2020 срок выполнения работ- 31.12.2020,  Акт сдачи- приемки подписан 12.11.2020, на сумму 51 005,24 руб.  

8) 611135 ул. Колхозная, д. 2 (ПИР L18) от 11.10.2020 срок выполнения работ31.12.2020, Акт сдачи- приемки подписан 12.11.2020, на сумму 51 005 24 руб.  

9) 611135 ул. Колхозная, д. 2 (СМР L18) от 11.10.2020 срок выполнения работ31.12.2020, Акт сдачи- приемки подписан 12.11.2020, на сумму 69 306,22 руб.  

10) 9500526 ул. Магистральная 25а (СМР ВЭС) от 09.01.2020 срок выполнения  работ- 31.01.2020, Акт сдачи- приемки подписан 27.01.2020, на сумму 96 547, 87 руб.  

Согласно п. 3.1.2 Договора Подрядчик обязан обеспечить финансирование Работ  в порядке, предусмотренном разделом 5 «Стоимость Работ, порядок оплаты», а именно  

в течение 25 рабочих дней с момента получения счета, выставленного на основании  подписанного Заказа.  

В связи с тем, что обязательства по Договору АО «Арсенал» исполнило в полном  объеме, соответственно, у ООО «СПС» возникла обязанность произвести окончательный  расчет по выполненным и принятым Работам. Так как, ООО «СПС» своевременно и в  полном объеме не исполнило своих обязательств по уплате Работ, то АО «Арсенал»  выставлены требования по выплате процентов в рамках статьи 395 ГК РФ.  

1.  № 610047 сл. Дегтево (ПИР L18) счет № 9587 от 18.10.2019, срок исполнения  обязательств по окончательному расчету наступил 25.11.2019, сумма задолженности  

64 742,22 руб. Проценты 11 555,08 руб. (см. Приложение № 1 таб. 36)  

2.  № 6102368 ул. им ФИО4, д. 9. (ПИР ПШ1), счет № 7370 от 28.07.2020, срок  исполнения обязательств по окончательному расчету наступил 01.09.2020, сумма 63  218,88 руб. Проценты 8 579,31 руб. (см. Приложение № 1 таб. 37)  

3. Акты сдачи- приемки подписаны 31.07.2020 и Подрядчик обязан был произвести  окончательный расчет 04.09.2020 в размере 144 230,52 руб. по следующим Заказам:   № 6102632 (ПИР GU21-3OUT) Счет № 7551 от 31.07.2020; № 6102632 (СМР) Счет № 7552  от 31.07.2020, Проценты 19 523,00 руб. (см. Приложение № 1 таб. 38)  

4. 610437 (СМР L18-4MOD) Акт сдачи- приемки подписан 20.01.2021 (счет № 25  

от 20.01.2021), срок исполнения обязательств по окончательному расчету наступил  25.02.2021, сумма задолженности 101 948,68 руб. Проценты 11 749,95 руб.  

(см. Приложение № 1 таб. 39) 

5. 9500526 ул. Магистральная 25а (СМР ВЭС) Акт сдачи- приемки подписан  27.01.2020, счет от 27.01.2020. Подрядчик обязан был произвести окончательный расчет  до 03.03.2020 в размере 19 309,57 руб. Проценты 3 119,96 руб. (см. Приложение № 1  

таб. 40) 

6. Акты сдачи- приемки подписаны 12.11.2020 и Подрядчик обязан был произвести  окончательный расчет 17.12.2020 в размере 222 321,94 руб. по следующим Заказам:   № 610770 ст-ца Боковская (ПИР L18) счет № 9898 от 12.11.2020; № 611092 рп Жирнов  (ПИР L18) счет № 9899 от 12.11.2020; № 611135 ул. Колхозная, д. 2 (ПИР L18) счет №  9900 от 12.11.2020; № 611135 ул. Колхозная, д. 2 (СМР L18) счет № 9902 от 12.11.2020,  срок исполнения обязательств по окончательному расчету наступил 17.12.2020, на общую  сумму задолженности по 4 Заказам 222 321,94 руб. Проценты 27 434,37 руб. (см.  Приложение № 1 таб. 41).  

Основной долг по Договору № МТС/СПС_12/2018КФ от 03.12.2018 составляет  527 156,02 руб., проценты 86 380, 69 руб.  

5. Дополнительное соглашение № MRB00RUKRA069831 ЦЕНТР Города/ПИР, СМР,  ВЭС от 11.10.2020 к Генеральному договору № 07/2020/ВК от 01.07.2020,  

срок выполнения работ- 31.12.2020, Акт сдачи- приемки подписан 27.10.2020 на сумму 

3 220 634,77 руб., счет № 9770 от 27.10.2020. Частичная оплата на сумму 2 576 507,82 руб.  Неоплаченная часть работ составила 644 126,95 руб. Срок исполнения обязательств  

по окончательному расчету наступил 27.12.2020. 

В соответствии с п. 2.4. Договора, Подрядчик обязан принять и оплатить  выполненные Субподрядчиком с надлежащим качеством и в обусловленный срок работы  в порядке и на условиях, определённых настоящим Договором и/или соответствующим  Дополнительным соглашением.  

Так, согласно п.6.5 и п. 6.6. Договора оставшуюся невыплаченную часть Подрядчик  переводит на счет по окончании комплекса работ/услуг, предусмотренных  соответствующим Дополнительным соглашением, Подрядчик переводит на счет  Субподрядчика сумму, отраженную в соответствующем Акте о приемке выполненных  работ, в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты получения Подрядчиком  счета.  

Данная обязанность Подрядчиком, не исполнена, в связи с чем, АО «Арсенал»  потребовало уплаты неустойки за несвоевременную оплату выполненных  

в установленный срок и принятых в надлежащем порядке Строительно-монтажных работ,  в соответствии с п. 7.2 Договора, и в размере 1/360 Ключевой ставки ЦБ РФ от суммы  задолженности за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы задолженности. (см.  Приложение № 1 таб. 42)  

По дополнительному соглашению № MRB00RUKRA069831 ЦЕНТР Города/ПИР,  СМР, ВЭС от 11.10.2020 Сумма основного долга 644 126,95 руб., сумма неустойки  

64 426,69 руб. 

ООО «СПС» не согласилось с доводами АО «Арсенал» в части исчисления сроков  оплаты выполненных и принятых работ. Для расчета сроков, ООО «СПС» приведен  порядок оплаты, указанный в договоре МФ/СПС-02/2018ДВФ, в свою очередь, порядок  оплаты выполненных работ в договорах № МТС/СПС_02/2018 от 01.02.2018,  

 № МТС/СПС_12/2018КФ от 03.12.2018, Дополнительное соглашение 

 № MRB00RUKRA069831 ЦЕНТР Города/ПИР, СМР, ВЭС от 11.10.2020 к Генеральному  договору № 07/2020/ВК от 01.07.2020 отличен от порядка, указанного в договорах  МФ/СПС-02/2018ДВФ и № МФ/СПС-02/2018КФ от 01.02.2018.  

Удовлетворяя иск акционерного общества «Арсенал» и частично удовлетворяя  встречный иск ООО «Связь Проектирование Строительство», суд первой инстанции  установил факт просрочки ответчиком оплаты выполненных истцом работ, расчёт истца  признан судом правильным.  

Судом первой инстанции отклонены доводы ООО «СПС» о нарушении 

АО «Арсенал» порядка расчета сроков оплаты выполненных работ, поскольку доводы  ответчика противоречат материалам дела.  

Наличие задолженности по указанным в исковом заявлении АО «Арсенал» Заказам  дополнительно подтверждается подписанным сторонами Актом сверки взаимных  расчетов за 4 квартал 2020 г. между АО «Арсенал» и ООО «СПС».  

Судом первой инстанции установлено, что АО «Арсенал» соблюден обязательный  досудебный порядок урегулирования спора, путем направления в адрес ООО «СПС»  претензий с требованием о погашении задолженности исх. № 752/1/05/22 от 15.07.2022  

(трек 12741072009885, получено 22.07.2022), исх. № 752/05/22 от 15.07.2022  

(трек 12741072009892, получено 22.07.2022). Претензии оставлены без внимания,  денежные средства в добровольном порядке уплачены не были. В соответствии со ст.  165.1 ГК РФ сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило  лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не  было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.  

Так же, в отзыве на первоначальное исковое заявление ООО «СПС» утверждает, 

что документы, подтверждающие выполнение работ не представлены АО «Арсенал»  

по заказам: 23-15532 Краснодар-Знаменский-Шоссейная ТУ 88948 (ПИР, СЭЗ, СМР) LTE,  

2315833 Анапа-Супсех-2 ТУ 90327 (ПИР, СЭЗ, СМР) LTE, 23-2259 Краснодар-Седин  81648 (ПИР, СМР ВЭС).  

Данные доводы не нашли подтверждение, так акты сдачи- приемки выполненных  работ подписаны сторонами без недостатков: 1) 23-15532 Краснодар-Знаменский-  Шоссейная ТУ 88948 (ПИР, СЭЗ, СМР) LTE срок выполнения работ-31.07.2019, на сумму  606 423,88 руб., Акт сдачи- приемки подписан 30.07.2019. 2) 23-15833  

Анапа-Супсех-2 ТУ 90327 (ПИР, СЭЗ, СМР) LTE срок выполнения работ-31.07.2019, на  сумму 498 304,54 руб., Акт сдачи- приемки подписан 30.07.2019.  

3) 23-2259 ФИО5 81648 (ПИР, СМР ВЭС) срок выполнения работ31.03.2019, на сумму 133 215,58 руб., Акт сдачи- приемки подписан 11.03.2019.  

Таким образом, у ООО «СПС» отсутствуют основания утверждать, что работы по  вышеуказанным заказам не выполнены и не приняты.  

Доводы ООО «СПС» о невозможности начисления неустойки в период действия  моратория на применение финансовых санкций (неустойки, процентов, пеней штрафов) с  01.04.2022г. в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от  28.03.2022г. № 497 «О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по  заявлениям, подаваемым кредиторами» судом проверены.  

АО «Арсенал» осуществлен расчет неустойки с учетом действия моратория, что  подтверждается приложенным первоначальным Истцом расчетом неустойки.  

Суд первой инстанции отклонил доводы ООО «СПС» о несоразмерности неустойки  последствиям нарушения обязательств.  

В соответствии с ч. 1 ст. 330 ГК РФ, неустойкой (штрафом, пеней) признается  определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить  кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства,  

в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки  кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.  

В договорах № МФ/СПС-02/2018КФ от 01.02.2018 (п.7.6), № МФ/СПС-02/2018ДВФ  от 01.02.2018 (п.7.6), Дополнительное соглашение № MRB00RUKRA069831 ЦЕНТР  Города/ПИР, СМР, ВЭС от 11.10.2020 (п.7.2), в договорах ограничен размер  максимальной суммы неустойки, не более 10 % от цены договора. Проценты по  договорам № МТС/СПС_12/2018КФ от 03.12.2018, № МТС/СПС_02/2018 от 01.02.2018  рассчитаны в соответствии со ст. 395 ГК РФ. Расчет пени проверен судом и признан  верным.  

Доводы апелляционной жалобы о неприменении судом первой инстанции  «ковидного» моратория за период с 06.04.2020 по 07.01.2021 проверен судом  апелляционной инстанции и признан несостоятельным. Применение моратория,  введённого постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 428  распространяется на отдельные категории лиц, соответствующие указанным в нём  критериям. Ответчик не представил в материалы дела доказательства того, что в период  действия моратория входил в Перечень наиболее пострадавших отраслей, а также что  наличие задолженности по оплате непосредственно вызвано ограничительными мерами,  связанными с ковидом.  

Доводы апелляционной жалобы о том, что судом первой инстанции не учтён  мораторий, введённый постановлением Правительства Российской Федерации от  28.03.2022 № 497 отклоняется судом апелляционной инстанции, поскольку противоречит  материалам дела, так как период моратория исключён истцом при расчёте неустойки.  

Суд апелляционной инстанции принимает также во внимание, что максимальный  размер неустойки ограничен в соответствии с условиями договоров 10 процентами от  цены договора, в связи с чем исключение указанных периодов моратория не влияет на  окончательный размер неустойки.  

ООО «СПС» заявило о применении ст. 333 ГК РФ. 

Суд первой инстанции не нашёл оснований для снижения размера неустойки на  основании ст. 333 ГК РФ, обоснованно указав следующее.  

В соответствии с разъяснениями, данными в п.42 Постановления Пленума  Верховного Суда Российской Федерации № 6 и Пленума Высшего Арбитражного Суда  Российской Федерации № 8 от 01.07.1996 "О некоторых вопросах, связанных  

с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", п.п.2, 4  Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской  Федерации от 14.07.1997 No17 "Обзор практики применения арбитражными судами  статьи 333 ГК РФ" при решении вопроса об уменьшении неустойки (ст.333 ГК РФ) суду  необходимо иметь в виду, что размер неустойки может быть уменьшен судом только  

в том случае, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям  нарушения обязательства.  

Доказательства, подтверждающие явную несоразмерность неустойки последствиям  нарушения обязательств, представляются лицом, заявившим ходатайство об уменьшении  неустойки (п.3 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда  Российской Федерации от 14.07.1997).  

Решение вопроса о явной несоразмерности неустойки последствиям нарушения  обязательства производится на основании имеющихся в деле материалов и конкретных  обстоятельств дела.  

Каких-либо доказательств явной несоразмерности неустойки последствиям  нарушения обязательства, обосновывающих необходимость применения судом ст.333  

ГК РФ, ООО «СПС» не представило. Размер неустойки, установленный сторонами в  договоре, не является чрезмерно высоким, соответствует сложившейся практике  договорных отношений хозяйствующих субъектов и соразмерен последствиям  допущенного ответчиком по первоначальному иску нарушения, учитывая размер  основного долга ООО «СПС» перед АО «Арсенал».  

Вопреки требованиям ч.1 ст.65 АПК РФ, ответчиком по первоначальному иску не  представлены доказательства надлежащего исполнения обязательств по договору.  

В соответствии с ч.2 ст.9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск  наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий.  

В обоснование встречного иска указано следующее. 

ООО «СПС» сообщило, что 27.11.2020 в адрес ООО «СПС» поступила претензия от  ПАО «МТС» с протоколом совещания по договорной неустойке за нарушение срока  выполнения работ по Заказам, со списком просроченных заказов. В связи с тем, что часть  объектов, указанных в претензии, было построено силами АО «Арсенал», данное письмо  было направлено в адрес АО «Арсенал».  

11.12.2020 от АО «Арсенал» получен ответ с причинами нарушения сроков  выполнения работ. 15.09.2021 в адрес ООО «СПС», поступило письмо от ПАО «МТС» с  Уведомлением о требовании выплаты штрафной неустойки (Приложение 3.2) и список  заказов с суммами штрафов. 04.10.2021, ООО «СПС» посредством системы Электронного  Документооборота было получено Соглашение об урегулировании разногласий No  

D210334358-07 с суммой выплаты неустойки 840 633,06 руб. Из них штрафы по работам,  выполненным АО «Арсенал», составили 549 332,41 руб. Заказы и КЗД между ООО  «СПС» и АО «Арсенал» и между ПАО «МТС» и ООО «СПС».  

Судом первой инстанции проверены указанные обстоятельства, проанализирована  представленная ООО «СПС» переписка.  

Суд первой инстанции не нашел оснований для удовлетворения требований ООО  «СПС» в указанной части в силу следующего.  

АО «Арсенал» указало, что претензии о нарушении сроков выполнения работ от  ООО «СПС» не поступали. Судом установлено, что в возражениях ООО «СПС» не  указаны входящие и исходящие номера таких претензий и не приложены квитанции об их  направлении.  

В объяснениях ООО «СПС» в таблице отражены заказы, по которым, по мнению  ООО «СПС» у АО «Арсенал» имеется задолженность по оплате неустойки  

в размере 549 332,41 руб. 

АО «Арсенал» заявлено, что по указанным в таблице заказам ООО «СПС» утратило  право требования неустойки, в связи с истечением срока исковой давности,  

в соответствии со ст. 196 и ст. 200 ГК РФ. 

В столбце № 5 «Дата поставки по заказу» таблицы п.2 возражений ООО «СПС»  указано, что дата поставки по заказам - 2018 год, то есть, на дату подачи встречного  искового заявления срок исковой давности истек.  

Суд согласился с доводами АО «Арсенал» в силу следующего. В п. 3 Постановления  Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.09.2015 года № 43 «О некоторых  вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации  об исковой давности» разъяснено, что течение исковой давности по требованиям  юридического лица начинается со дня, когда лицо, обладающее правом самостоятельно  или совместно с иными лицами действовать от имени юридического лица, узнало или  должно было узнать о нарушении права юридического лица и о том, кто является  надлежащим ответчиком (п. 1 ст. 200 ГК РФ).  

В пунктах 23.5 и 25.3 Договора, заключенных между ООО «СПС»  и АО «Арсенал» определен порядок досудебного урегулирования спора.  

Согласно п.23.5 Договора уведомления и сообщения (в том числе юридически  значимые), направленные по электронной почте или факсу, действительны при условии  последующего предоставления оригинала за подписью уполномоченного представителя  Стороны. Датой получения таких уведомлений и сообщений по эл. почте будет являться  дата получения оригинала.  

В силу п. 25.3. Договора Стороны устанавливают обязательный претензионный  досудебный порядок урегулирования споров, вытекающих из настоящего Договора.  

Сторона, право которой нарушено, обязана выставить другой стороне претензию 

с приложением обосновывающих претензию документов, и обратиться в суд не ранее,  чем через 10 рабочих дней после истечения срока ответа на претензию. Досудебная  претензия направляется способом, обеспечивающим доказательство ее получения  (почтовое уведомление о вручении, расписка о вручении, подтверждение о получении  факсимильного сообщения). Срок ответа на претензию составляет 10 рабочих дней с даты  ее получения.  

Таким образом, в нарушение положений Договора, на юридический (официальный)  адрес АО «Арсенал» не поступали претензии ООО «СПС» с требованием об оплате  

неустойки, ответ на досудебную претензию АО «Арсенал» так же не поступал. Позиция  ООО «СПС», отраженная во встречном исковом заявлении представлена ООО «СПС»  впервые в рамках рассмотрения настоящего дела.  

Направление электронных писем в адреса инженеров и кураторов объектов  

АО «Арсенал» не могут свидетельствовать о соблюдении порядка взаимодействия  сторон, установленного в Договоре.  

ООО «СПС» приложены к объяснениям Заказы, заключенные между ООО «СПС» и  ПАО «МТС». В свою очередь, в материалы дела не приложены заказы и КС, заключенные  между ООО «СПС» и АО «Арсенал» по тем же объектам, в связи с чем, невозможно  идентифицировать по каким заказам, АО «Арсенал» могли быть нарушены сроки сдачи  работ, в нарушение п. 4 ст. 65 АПК РФ.  

Лица, участвующие в деле, вправе ссылаться только на те доказательства, 

с которыми другие лица, участвующие в деле, были ознакомлены заблаговременно.  Согласно п. 3 ч. 1 ст. 126 АПК РФ и ч. 7 ст. 131 АПК РФ к исковому заявлению и отзыву  к исковому заявлению прилагаются документы, подтверждающие обстоятельства,  

на которых Сторона основывает свои требования. 

Представленные переписки ООО «СПС» с ПАО «МегаФон» (заказчик)  и ПАО «МТС» (Заказчик) не порождают возникновение новых обязанностей  

у АО «Арсенал» по исполнению требований ООО «СПС». 

Суд первой инстанции пришел к верному выводу, что представленные ООО «СПС»  переписки с кураторами, инженерами АО «Арсенал» не свидетельствуют  

о возникновении обязанностей у АО «Арсенал» по их исполнению. 

Представленные ООО «СПС» возражения и документы к ним, не имеют отношения  к предмету рассматриваемого спора, договорные отношения ООО «СПС» (подрядчика)  

с Заказчиками, не распространяются на правоотношения ООО «СПС» и АО «Арсенал»,  соответственно, доводы ООО «СПС» не подлежат удовлетворению.  

Таким образом, представленные ООО «СПС» в материалы дела электронные письма  не могут являться относимым доказательством, так как условиями договоров не  предусмотрен обмен официальными документами посредством электронной почты, равно  как и направление претензий, и согласование отдельных вопросов по взаимодействию  сторон в адреса конкретных сотрудников АО «Арсенал».  

ООО «СПС» не соблюден досудебный порядок урегулирования спора, не  представлены документы, на которых ООО «СПС» основывает свои требования. Так же,  требования ООО «СПС» предъявлены по истечению срока исковой давности.  

В объяснениях ООО «СПС» от 22.02.2023 ООО «СПС» подтвердило факт  выполнения работ АО «Арсенал» в полном объеме по договору 07/2020/ВК от 01.07.2020  (в части дополнительного соглашения № MRB00RUKRA069831 от 11.10.2020).  

Судом проверены доводы ООО «СПС» о том, что АО «Арсенал» не устранены  замечания по заказу 23-15833 / ТУ 90327 / ПИР, СЭЗ, СМР LTE от 01.06.2019 (акт сдачи- приемки подписан 30.07.2019 № 6187) и Заказу 23-15587 / ТУ 87218 / ПИР, СЭЗ, СМР LTE  от 01.05.2019 (акт сдачи-приемки подписан № 4655 от 28.06.2019) к договору  

 № МФ/СПС- 02/2018КФ от 01.02.2018. 

Требования ООО «СПС» о взыскании задолженности в размере 104 166, 66 руб.  

за некачественное выполнение Работ АО «Арсенал», не подлежат удовлетворению, в силу  недоказанности самого факта недостатков, затрат ООО «СПС» на их устранение  

и не соблюдения ООО «СПС» порядка возмещения расходов, установленных в договоре. 

В соответствии с п. 8.6, 8.7, 8.14 Договора МТС/СПС_02/2018КФ от 01.02.2018  Сдача строительно-монтажных работ Субподрядчиком и приемка их Подрядчиком  оформляется «Актом о приемке выполненных работ» (КС-2). КС-2 может быть подписан  Подрядчиком с Ведомостью недостатков в случае, если недостатки, по мнению  Подрядчика, являются несущественными. При наличии существенных недостатков  

«Акт о приемке выполненных работ» (КС- 2) Подрядчиком не подписывается,  а Субподрядчику передается Ведомость замечаний, в связи с чем, приемка считается  

не состоявшейся. 

В соответствии с п. 3.4.11 Договора, устранение недостатков, выполненных СМР,  указанных в АВН и ВВН, осуществляется Субподрядчиком за его счет и в срок не более  14 календарных дней с момента подписания Акта/Ведомости Подрядчиком либо иной  срок, указанный в АВН.  

Согласно п. 3.4.12, в случае если Субподрядчик в срок, установленный п. 3.4.11  Договора, не устранил недостатки, отклонения, несоответствия в выполненных СМР,  Подрядчик имеет право самостоятельно, а также с Привлечением другого Субподрядчика,  без согласования с Субподрядчиком осуществить работы по устранению  недостатков/дефектов или организовать работы по устранению таких недостатков,  отклонений, несоответствий по стоимости, не выше стоимости, согласованной в  настоящем Договоре для соответствующих работ; по работам, цены на которые не  установлены Договором - по среднерыночной стоимости, применяемой в таком  региональном отделении.  

Таким образом, в нарушение положений пунктов 23.5, 25.3 Договора, на  официальный адрес АО «Арсенал» не поступали претензии ООО «СПС» о наличии  недостатков, равно как и Акты выявленных недостатков/ ведомости выявленных  недостатков, более того, в адрес АО «Арсенал» не поступали претензии с требованием о  возмещении расходов, понесенных ООО «СПС», в связи с устранением недостатков.  Направление электронных писем в адреса инженеров и кураторов объектов АО  «Арсенал» не могут свидетельствовать о соблюдении порядка взаимодействия сторон,  установленного в Договоре. Акты выполненных работ подписаны ООО «СПС» без  замечаний.  

В материалы дела ООО «СПС» приложена Ведомость выявленных недостатков, по  объекту Анапа - Супсех подписанная АО «МегаФон» и неподписанная ООО «СПС»  (прил. № 275 пояснений ООО СПС). В данном акте отсутствуют данные о договоре,  заключенном между ПАО «МегаФон» и ООО «СПС», дата составления данной  ведомости. В ведомости выявленных недостатков по объекту Новороссийск-Южрайон от  30.06.2019 - отсутствует подпись ООО «СПС» (прил.276 пояснений ООО СПС).  Приложенные в материалы АВН/ВВН, составленные между ПАО «МегаФон»  

и ООО «СПС» не подписаны ООО «СПС». Так как, АВН/ВВН, составлены между  ПАО «МегаФон» и ООО «СПС», они не являются для АО «АРСЕНАЛ» обязательными  

к исполнению документами. В адрес АО «Арсенал» ООО «СПС» не направлялись  АВН/ВВН и Сторонами не подписывались, тем самым, ООО «СПС» не соблюден  порядок, регламентированный Договором МТС/СПС_02/2018КФ от 01.02.2018  

о возмещении расходов за устранение недостатков работ. 

Также, в материалах дела отсутствуют платежные поручения об оплате ООО «СПС»  работ по устранению недостатков и документы, подтверждающие расходы ООО «СПС»  на устранение таких недостатков.  

Таким образом, требования ООО «СПС» о взыскании задолженности в размере 

104 166, 66 руб. за некачественное выполнение Работ АО «Арсенал», правильно признано  судом первой инстанции не подлежащим удовлетворению в силу недоказанности самого  факта недостатков, затрат ООО «СПС» на их устранение и не соблюдения ООО «СПС»  порядка возмещения расходов, связанных с устранением выявленных недостатков работ,  установленных в договоре. Из представленных ООО «СПС» электронных писем,  невозможно однозначно определить (прил. № 268 объяснений), какие требования, по  мнению ООО «СПС», АО «Арсенал» должно было выполнить и на основании каких  документов.  

Суд апелляционной инстанции соглашается с выводами суда первой инстанции,  поскольку они соответствуют материалам дела и основаны на законодательстве  Российской Федерации  

Доводы апелляционной жалобы в указанной части аналогичны доводам, которые  приводились ответчиком во встречном иске, были оценены и обоснованно отклонены  судом первой инстанции. Оснований для переоценки выводов суда первой инстанции у  суда апелляционной инстанции не имеется.  

Доводы ООО «СПС» о наличии задолженности АО «Арсенал» в пользу ООО «СПС»  в рамках договора МФ/СПС-02/2018ДВФ от 01.02.2018 по заказу ДВФ Комплекс/Технич  от 01.08.2018 признаны судом первой инстанции обоснованными.  

АО «Арсенал», согласилось с доводами ООО «СПС» по факту наличия  задолженности АО «Арсенал» в пользу ООО «СПС» по заказу ДВФ комплекс/технич от  01.08.2018 к договору МФ/СПС-02/2018ДВФ от 01.02.2018 в размере 56 522,88 руб.  

Аналогично АО «Арсенал» согласилось с доводами ООО «СПС» в части размера  задолженности по заказу 06-2712 /ТУ 77709 / ПИР, СМР РРЛ к договору  

 № МФ/СПС- 02/2018КФ от 01.02.2018. 06.02.2023 в размере 38 708,49 руб., т.к. 22.06.2022  был проведен взаимозачет между ООО «СПС» и АО «Арсенал» на сумму 9 019,81 руб.,  что подтверждается актом о проведении взаимозачета.  

На основании изложенного суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу  

об удовлетворении искового заявления АО «Арсенал» и частичного удовлетворения  встречного искового заявления ООО «СПС».  

Доводы апелляционной жалобы не содержат фактов, которые не были бы проверены  и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела и опровергали бы выводы  суда первой инстанции, в связи с чем, признаются апелляционным судом  несостоятельными и не могут служить основанием для отмены или изменения  оспариваемого решения Арбитражного суда Московской области.  

Выводы суда первой инстанции основаны на полном и всестороннем исследовании  материалов дела, при правильном применении норм действующего законодательства.  

Нарушений норм процессуального права, являющихся безусловным основанием к  отмене судебного акта, судом первой инстанции не допущено.  

При таких обстоятельствах оснований для отмены или изменения решения суда  первой инстанции в обжалуемой части не имеется, апелляционная жалоба  удовлетворению не подлежит.  

Руководствуясь статьями 266, 268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Московской области от 15 мая 2023 года по делу  

 № А41-50783/22 в обжалуемой части оставить без изменения, апелляционную жалобу -  без удовлетворения.  

Постановление может быть обжаловано в кассационном порядке в течение двух  месяцев со дня его изготовления в полном объёме в Арбитражный суд Московского  округа через Арбитражный суд Московской области.  

Председательствующий Е.А. Стрелкова 

Судьи П.А. Иевлев  

 М.А. Немчинова