ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е

   г. Москва

Дело № А40-3500/20-126-26

«02» июля 2020 года

Резолютивная часть решения объявлена 17.06.2020  года, 

Решение в полном объёме изготовлено 02.07.2020 года

Арбитражный суд г. Москвы в составе:

председательствующего судьи Новикова М.С. 

протокол судебного заседания вел секретарь судебного заседания Остроушко В.П., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело 

по иску ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ" (115035, МОСКВА ГОРОД, НАБЕРЕЖНАЯ СОФИЙСКАЯ, 26/1, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 19.07.2002, ИНН: 

<

***>) 

к АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "БИОТЕХПРОГРЕСС" (188643, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 

<

...>, ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 301, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 11.12.2002, ИНН: 

<

***>) 

об обязании освободить строительную площадку и передать документацию

В судебное заседание явились:

от истца:  ФИО1, доверенность от 28.11.2018.

от ответчика: не явился, извещен 

УСТАНОВИЛ:

ПАО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ" (далее – истец, заказчик) обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с исковым заявлением к АО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "БИОТЕХПРОГРЕСС" (далее – ответчик, подрядчик) об обязании в течение месяца с момента вступления решения суда в законную силу освободить строительную площадку, переданную согласно договору № ВТП-0117/012 от 19.05.2017, от имущества ответчика и строительного мусора, а также передать строительную площадку и объект незавершенного строительства по акту приема-передачи ПУБЛИЧНОМУ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ", об обязании  в течение месяца с момента вступления решения суда в законную силу передать ПУБЛИЧНОМУ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ" по акту приема-передачи рабочую документацию согласно договору № ВТП-0П 7/012 от 19.05.2017г., а именно: Проект 5766687-2020-5601/2-1-ТИ изм.2; Проект 5766687-2020-000-ГТ1 изм.1; Проект 5766687-2020-5601-АД изм.0; Проект 5766687-2020-3600-НСС изм. 3; Альбом «Резервуар вертикальный стальной объемом 700 м3 для воды». КМ 5766687-1822-5601/3-2013-КМ изм.5; Техническая документация на РВС 100 м3 (инструкции, сертификаты, паспорта и т.д.); Техническая    документация    на   РВС    300 м3    (инструкции, сертификаты, паспорта и т.д.).         

          В силу п. 26.1 Договора споры, возникшие при исполнении Договора, рассматриваются, с соблюдением претензионного порядка рассмотрения споров, в арбитражном суде по месту нахождения Заказчика, настоящий спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.

        Ответчик  надлежащим образом извещенный  о месте и времени судебного заседания, в  заседание  не явился. Суд определил провести судебное заседание в отсутствие представителя ответчика на основании п. 3 ст. 156 АПК РФ.  От ответчика поступил отзыв.

          В судебном заседании истец исковые требования поддержал в полном объеме, в доводах отзыва просил суд отказать.

         Доводы истца рассматриваются по исковому заявлению и устным возражениям, доводы ответчика по отзыву.

         Выслушав представителя истца, изучив материалы дела, оценив относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности на основании ст. 71 АПК РФ, арбитражный суд установил, что требования истца заявлены обоснованно и подлежат удовлетворению в полном объеме по следующим основаниям. 

         Как установлено судом,  решением Арбитражного суда  города Санкт-Петербурга и Ленинградской области  от 11.03.2020 года,  по делу №А56-81401/19 АО НПП «Биотехпрогресс» прекращена процедура наблюдения в отношении ответчика и признано несостоятельным (банкротом) и открыто конкурсное производство сроком на  шесть месяцев до 03.09.2020.

         Между ПАО «НК «Роснефть» (далее - Заказчик) и АО «НПП «Биотехпрогресс» (далее - Подрядчик) заключен договор подряда № ВТП-0117/012 от 19.05.2017г. (далее - Договор).

      В соответствии с условиями Договора (пункт 2.1 договора) Подрядчик обязался выполнить работы по строительству объекта «Комплекс гидрокрекинга. ОЗХ комплекса гидрокрекинга. Биологическая очистка стоков» в соответствии с Проектной и Рабочей документацией, Техническим Заданием и передать Заказчику завершенный строительством объект,  Заказчик обязался принять результат Работ и оплатить его.

       В пункте 5.1 Договора стороны установили сроки выполнения работ: начало - 01.07.2017, окончание - 31.12.2019. Работы, предусмотренные Договором по объекту, выполняются Подрядчиком согласно Графику производства Работ (приложение № 4 к Договору) по законченным этапам и Оперативному графику производства работ.

     Согласно Графику производства Работ (приложение № 4 к договору в редакции дополнительного соглашения № 7 от 03.09.2018г.) в период выполнения работ, установленный пунктом 5.1. Договора, Подрядчик должен выполнить 29 этапов на общую сумму 1 973 425 583,97 рублей.

       Во исполнение п. 11.4 Договора, Истец согласно акту приема-передачи строительной площадки от 17.08.2017 г. передал Ответчику строительную площадку для производства работ по Договору.

Кроме того, для выполнения работ по договору, Истец передал Ответчику утвержденную Рабочую документацию с отметкой «В производство работ».

14.12.2018 в связи с существенным отставанием от графика производства работ, которое делает невозможным окончание работ в установленный срок, ПАО «НК Роснефть» направило в адрес АО «НПП «Биотехпрогресс» уведомление № ОПОБ/1955 от 13.12.2018 об одностороннем отказе от исполнения договора № ВТП-0117/012 от 19.05.2017 на основании ст. 715 ГК РФ. Указанное уведомление получено АО «НПП «Биотехпрогресс» 14.01.2019.

Согласно п. 27.5 Договора уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора вручается Подрядчику за 30 календарных дней до планируемой даты одностороннего отказа от исполнения договора.

Таким образом, договор № ВТП-0117/012 от 19.05.2017 г. считается расторгнутым с 14.02.2019.

Пунктом 27.5 Договора предусмотрено, что подрядчик при получении уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора, до даты одностороннего отказа от исполнения договора (в данном случае до 14.02.2019 г.), обязан прекратить выполнение работ на Объекте, передать Заказчику Объекты незавершенного строительства, Рабочую и Исполнительную документацию, неиспользованные материально-технические ресурсы, вывезти со Строительной Площадки собственную Строительную технику неиспользованные Расходные Материалы.

     Исходя из положений указанного пункта Договора, в срок до 14.02.2019 г. АО «НПП «Биотехпрогресс» было обязано прекратить выполнение работ на Объекте, передать заказчику объекты незавершенного строительства, рабочую и исполнительную документацию, неиспользованные материально-технические ресурсы, вывезти со строительной площадки собственную строительную технику неиспользованные расходные материалы.

В соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В соответствии со ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В нарушение условий Договора Ответчик обязательств, предусмотренных п. 27.5 Договора до настоящего времени не исполнил, а именно: не обеспечил вывоз имущества АО «НПП «Биотехпрогресс» (неиспользованных материалов и других товарно-материальных ценностей) со строительной площадки, по акту приема-передачи Заказчику не передал объект незавершенного строительства и освобожденная от имущества АО «НПП Биотехпрогресс» и строительного мусора строительная площадка; Заказчику, в полном объёме, не возвращена рабочая документация, которая ранее передавалась в адрес АО «НПП «Биотехпрогресс», а именно: Проект 5766687-2020-5601/2-1-ТИ изм.2 (передан письмом № 9821 от 22.08.2018 г.); Проект 5766687-2020-000-ГП изм.1 (передан письмом № 16193 от 26.12.2017 г.); Проект 5766687-2020-5601-АД изм.О (передан письмом № 1/7890 от 13.07.2017 г.); Проект 5766687-2020-3600-НСС изм.3 (передан письмом № 3671 от 02.04.2018г.). Альбом «Резервуар вертикальный стальной объемом 700 м3 для воды». КМ 5766687-1822-5601/3-2013-КМ изм.5 (передан письмом № 18/11249 от 22.09.2017.); Техническая документация на РВС 1000м3 (инструкции, сертификаты, паспорта и т.д.) (передана письмом № 15889 от 20.12.2017 г. Техническая документация на РВС 300м3 (инструкции, сертификаты, паспорта и т.д.) (передана письмом № 15889 от 20.12.2017 г.).

       Истец  направил  претензию № ОПОБ/530 от 06.05.2019в адрес ответчика, которая была получена 13.05.2019 и оставлена без удовлетворения, а именно  строительную площадку не освободило, рабочую документацию заказчику не передало.

         При таких обстоятельствах суд приходит к выводу об удовлетворении заявленных исковых требований в полном объеме, поскольку истцом представлены все необходимые доказательства  подтверждающие требования.

          В силу части 1 статьи 64 и статей 71, 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, на основании представленных доказательств, при оценке которых он руководствуется правилами статей 67 и 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации об относимости и допустимости доказательств.

         Согласно ст. 65 АПК РФ, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражении; обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, определяются арбитражным судом на основании требований и возражений лиц, участвующих в деле.

             В соответствии с частью 1 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности. Каждому лицу, участвующему в деле, гарантируется право представлять доказательства арбитражному суду и другой стороне по делу, обеспечивается право заявлять ходатайства, высказывать свои доводы и соображения, давать объяснения по всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам, связанным с представлением доказательств. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий.

         Доводы ответчика, изложенные  в отзыве на исковое заявление, судом проверены в полном объеме, однако не могут быть приняты во внимание, поскольку не влекут иных выводов суда, чем  те которые  суд изложил в настоящем решении.

     Ответчиком также было заявлено ходатайство об оставлении исковых требований без рассмотрения, поскольку данные требования  об освобождении и передачи строительной техники должно рассматриваться в рамках дела о банкротстве. Суд рассмотрев данное требования не находит оснований для его удовлетворения, поскольку по смыслу положений ГК РФ, Закона «О несостоятельности (банкротстве)»,  заявленные требования должны рассматриваться вне рамок дела о банкротстве по общим правилам искового.

              В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по государственной пошлине относятся на ответчика. 

            Руководствуясь ст. ст. 4, 16,  71, 75, 110, 156, 167-175, 176, 180, 181 АПК РФ, арбитражный суд,

РЕШИЛ:

Обязать АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "БИОТЕХПРОГРЕСС" (188643, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 

<

...>, ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 301, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 11.12.2002, ИНН: 

<

***>) в течение месяца с момента вступления решения суда в законную силу освободить строительную площадку, переданную согласно договору № ВТП-0117/012 от 19.05.2017г, от имущества ответчика и строительного мусора, а также передать строительную площадку и объект незавершенного строительства по акту приема-передачи ПУБЛИЧНОМУ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ" (115035, МОСКВА ГОРОД, НАБЕРЕЖНАЯ СОФИЙСКАЯ, 26/1, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 19.07.2002, ИНН: 

<

***>).

Обязать АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "БИОТЕХПРОГРЕСС" (188643, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 

<

...>, ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 301, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 11.12.2002, ИНН: 

<

***>) в течение месяца с момента вступления решения суда в законную силу передать ПУБЛИЧНОМУ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ" (115035, МОСКВА ГОРОД, НАБЕРЕЖНАЯ СОФИЙСКАЯ, 26/1, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 19.07.2002, ИНН: 

<

***>) по акту приема-передачи рабочую документацию согласно договору № ВТП-0П 7/012 от 19.05.2017г., а именно:

-Проект 5766687-2020-5601/2-1-ТИ изм.2;

-Проект 5766687-2020-000-ГТ1 изм.1;

-Проект 5766687-2020-5601-АД изм.0;

-Проект 5766687-2020-3600-НСС изм. 3;

-Альбом «Резервуар вертикальный стальной объемом 700 м3 для воды». КМ 5766687-1822-5601/3-2013-КМ изм.5;

-Техническая документация на РВС 100 м3 (инструкции, сертификаты, паспорта и т.д.);

- Техническая    документация    на   РВС    300 м3    (инструкции, сертификаты, паспорта и т.д.).

Взыскать c АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "БИОТЕХПРОГРЕСС" (188643, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 

<

...>, ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 301, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 11.12.2002, ИНН: 

<

***>) в пользу ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ" (115035, МОСКВА ГОРОД, НАБЕРЕЖНАЯ СОФИЙСКАЯ, 26/1, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 19.07.2002, ИНН: 

<

***>) 6 000 (шесть тысяч) руб. расходов по оплате государственной пошлины.   

Взыскать c АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "БИОТЕХПРОГРЕСС" (188643, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 

<

...>, ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 301, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 11.12.2002, ИНН: 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 6 000 (шесть тысяч) руб.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья:

М.С. Новиков