ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

г. Москва                                                                    Дело № А40-227861/16-91-2068

03.07.2017 г.                                 

Решение изготовлено в полном объеме 03.07.2017 г.

Резолютивная часть решения объявлена 31.05.17 г.

Арбитражный суд в составе судьи Шудашовой Я.Е.

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1 

рассмотрел в судебном заседании дело по иску 

Общества с ограниченной ответственностью "СТРОЙ-МОДА" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, дата регистрации от 25.02.2005, адрес: 105062, 

<

...>) 

к Закрытому акционерному обществу "Торговый дом "Перекресток " (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, адрес: 103473, г. Москва, пл-дь, Суворовская, д. 1 )

о взыскании 1 025 899,46 руб.

В судебное заседание явились:

от истца – ФИО2 доверенность б/н от 19.04.2017 г. 

от ответчика – ФИО3 доверенность № 4536517/2016 от 27.09.2016 г.       

УСТАНОВИЛ:

Иск заявлен ООО "СТРОЙ-МОДА"  к ЗАО "Торговый дом "Перекресток " о взыскании 1 025 899,46 руб.

Рассмотрев материалы дела, оценив представленные доказательства, выслушав представителей сторон, суд считает требования подлежащими удовлетворению.

Как усматривается из материалов дела, 10 июня 2014 года между "СТРОЙ-МОДА"  к ЗАО "Торговый дом "Перекресток ") был заключен Договор № ШОС-2014.

В соответствии с п. 2.1 указанного Договора Ответчик поручает, а Истец принимает па себя обязательства в сроки и па условиях, оговоренных в Договоре своими силами и средствами, а также силами привлеченных Субподрядчиков выполнить работы на объекте, расположенном по адресу: 

<

...>. а Ответчик обязуется принять результат работ, а также оплатим, надлежаще выполненные работы в соответствии с условиями договора.

В соответствии с п. 3.1 Договора «Стоимость работ определена Сторонами в Сметном расчете, являющемся Приложением № 2 к Договору, и составляет 8 807 145 рублей, в том числе НДС в размере 1 343 462,80 рублей.

В соответствии с п. 8.3 Договора Истец в течение пяти рабочих дней со дня выполнения каждого этапа работ представляет Ответчику 3 (три) экземпляра Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. 2 оригинала счета па оплату и 2 оригинала счета-фактуры.

В соответствии с п. 8.3.1. Заказчик т. течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения документов, указных и п. 8.3 Договора. Обязан направить Подрядчику подписанный Акт о приёмке выполненных работ, Справку о стоимости выполненных работ и затрат или мотивированный отказ от приемки работ с указанием подлежащих устранению недостатков: отступлений от условий Договора, Технического задания. дефектов, нарушений действующих норм и правил, ухудшивших качество работ.

В соответствии с п. 4.1 Договора платежи за выполненные работы по Договору производятся Ответчиком в рублях в форме банковского перевода па указанные в Договоре реквизиты Истца.

В соответствии с п. 4.2 Оплата работ производится но панно за выполненные по пану работы с учетом гарантийных удержаний, предусмотренных п. 4.9 4.10 Договора, в течение 10 банковских дней с момента подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ и Справки о стоимости выполненных работ и затрат.

Во исполнение условий Договора № ШОС-2104 от 10 июня 2014г. Истец выполнял для ответчика работы, а ответчик принимал и оплачивал их.

В период с 2.7.08.2014 года по 03.04.2015 года Истец выполнил для Ответчика работы на сумму 1 070 894.20 рублей, что подтверждается Справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № 4 от 03.04.2015 года и Актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 4 от 03.04.2015г.  на сумму 1 070 894, 20 рублей.

Данные документы в соответствии с условиями Договора были переданы Истцом Ответчику на подпись, что подтверждается Актом приемки исполнительной документации в эксплуатацию при производстве ремонтно-строительных работ от 03 апреля 201 5 года.

Однако от оформления Акта о приемке выполненных работ от 03.04.2015 года и Справки о стоимости выполненных работ 03.04.2015 гола Ответчик, в нарушение условий Договора, необоснованно уклонился, мотивированного отказа от приемки работ не представил, оплату выполненных работ не произвел.

В силу ст. 309, 310 Кодекса обязательства должны исполняться надлежащим образом. Односторонний отказ от исполнения обязательства или одностороннее изменение его условий не допускаются.

В силу статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров.

Согласно части 1 статьи 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору Строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

На основании п. 4 ст. 753 ГК РФ, сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной.

В соответствии с п. 4 ст. 755 ГК РФ «Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об ном и акт подписывается другой стороной.

Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.

Ответчик с исковыми требованиями не согласился, представил письменный отзыв, в соответствии с которым, истцом в нарушение п.6.1.20 Договора не получен кадастровый паспорт на объект. Подрядчиком не были выполнены работы по проектированию и согласованию в рамках Договора, в связи с чем  полагает, что исковые требования не подлежат удовлетворению.

Истцом, в опровержение доводов отзыва представлено: платёжные поручения по оплате оформления перепланировки помещений и выполнению работ по оформлению проектной документации, акт приёмки исполнительной документации  принятых ответчиком 03.04.15г., описи передачи  ответчику технической документации от 03.10.14г., копия поэтажного плана по состоянию на 18.12.14г., поэтажный план, экспликацию.

 Таким образом, работы выполненные истцом по Справке о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № 4 от 03.04.2015 года и Акту о, приемке выполненных работ по форме КС-2 4 от 03.04.2015 года на сумму 1 079 894, 20 рублей являются принятыми и подлежат оплате в размере 1 025 899,49 рублей (за вычетом гарантийного удержания в размере 5%).

           Судебные расходы по уплате госпошлины относятся на ответчика в соответствии со ст. 110 АПК РФ. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 309, 310, 330, ГК РФ, ст.ст. 101-103,110,167-171 АПК РФ, суд

Р Е Ш И Л :

Взыскать с Закрытого акционерного общества "Торговый дом "Перекресток" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, адрес: 103473, г. Москва, пл-дь, Суворовская, д. 1) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "СТРОЙ-МОДА" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, дата регистрации от 25.02.2005, адрес: 105062, 

<

...>) задолженность в размере 1 025 899 (Один миллион двадцать пять тысяч восемьсот девяносто девять) руб. 49 коп.; расходы по оплате государственной пошлины в размере 23 259 (Двадцать три тысячи двести пятьдесят девять) руб.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья: Шудашова Я.Е.