1109_349268  

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ  Л. Павличенко ул., д. 5, Севастополь, 299011, www.sevastopol.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ Резолютивная часть

Дело № А84-5440/22

22 сентября 2022 г.

город Севастополь

 

Руководствуясь статьями 3, 110, 167-170, Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

обязать индивидуального предпринимателя ФИО1 ОГРНИП  317920400003755, в течение 10 календарных дней со дня вступления решения суда  в законную силу, безвозмездно устранить недостатки в рамках гарантийных обязательств  по договору подряда от 11.02.2019 года № 110219/1 на выполнение подрядных работ  по строительству объекта «Строительство и обслуживание рекреационного комплекса  по Фиолентовскому шоссе, участок 134 г. Севастополь» по адресу: Фиолентовское шоссе,  участок 134 г. Севастополь, по гидроизоляции эксплуатируемых террас на мансардных  этажах помещений № 97, № 98, № 99, № 100, № 101А; № 102, № 103, № 110 в корпусе   № 7; № 104,105,106А, № 107, № 108 в корпусе № 8 объекта, путем выполнения  следующих видов работ:  

 № п/п 

Наименование вида работ 

Ед.изм. 

Объем 

1 

Демонтаж плитки пола 

м/п 

667,7 

2 

Демонтаж плинтуса плитки 

м2 

167 

3 

Обеспыливание воднодисперсионной  грунтовкой  

м2 

667,7 

4 

Устройство наливного пола 

м2 

667,7 

5 

Обеспыливание воднодисперсионной  грунтовкой  

м2 

684,4 

6 

Устройство двухкомпонентной гидроизоляции  

м2 

684,4 

7 

Обеспыливание воднодисперсионной  грунтовкой  

м2 

684,4 

8 

Устройство плитки пола на клею  

м2 

667,7 

9 

Устройство плинтуса плиткой на клею 

м2 

167 

10 

Расшивка плитки 

м/п 

684,4 

Код доступа к материалам дела: 

 

- в случае неисполнения решения суда в части исполнения гарантийных  обязательств по договору подряда от 11.02.2019 года № 110219/1 на выполнение  подрядных работ по строительству объекта «Строительство и обслуживание  рекреационного комплекса по Фиолентовскому шоссе, участок 134 г. Севастополь» по  адресу: Фиолентовское шоссе, участок 134 г. Севастополь, взыскать с индивидуального  предпринимателя ФИО1, ОГРНИП 317920400003755, в пользу  общества с ограниченной ответственностью «Порфир» ОГРН 

<

***>, 1000 руб.  судебной неустойки за каждый день просрочки по день фактического исполнения  решения суда.  

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1,  ОГРНИП 317920400003755, в пользу общества с ограниченной ответственностью  "ПОРФИР", ОГРН 

<

***>, 6000 рублей расходов на уплату государственной  пошлины.  

Решение суда вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия  (изготовления в полном объеме) и может быть обжаловано через Арбитражный суд города  Севастополя в Двадцать первый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня  его принятия.  

Судья А.Ю. Смоляков  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначействоДата 30.12.2021 5:30:47

Кому выдана Смоляков Алексей Юрьевич