АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Большая Московская улица, дом 73, Великий Новгород, 173020

http://novgorod.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Великий Новгород

Дело № А44-6551/2024

Резолютивная часть решения объявлена 11 марта 2025 года

Решение в полном объеме изготовлено 11 марта 2025 года

Арбитражный суд Новгородской области в составе:

судьи   Аксенова И.С.,

при ведении протокола судебного заседания

помощником судьи Глинкиной М.В.

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению:

общества с ограниченной ответственностью "СТК- 53" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

к публичному акционерному обществу "Россети Северо-Запад" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

об исполнении обязательства

при участии

от истца: ФИО1, по доверенности от 01.10.2024

от ответчика: ФИО2, по доверенности от 07.10.2024

установил:

общество с ограниченной ответственностью «СТК- 53» (далее- Общество) обратилось в Арбитражный суд Новгородской области с иском к публичному акционерному обществу «Россети Северо-Запад» в лице Новгородского филиала (далее- Сетевая организация) об обязании в течение 10 календарных дней с момента вступления в законную силу решения суда исполнить предусмотренные договором №НОВ-04385-Э-И/23 от 15.12.2023 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, по осуществлению необходимого для электроснабжения ВРУ нежилого строения по адресу: 173507, Новгородская область, Новгородский район, дер. Сырково, кадастровый номер земельного участка: 53:11:1700204:3354, технологического присоединения энергопринимающих устройств истца: энергопринимающие установки (АВ, линейное ответвление-0,4 кВ) (для подключения ЗУ с кадастровым номером 53:11:1700204:3354)

в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), ус учетом следующих характеристик:

- максимальная мощность энергопринимающих устройств: 15 кВт, в том числе: максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств: 0 кВТ; максимальная мощность вновь присоединяемых энергопринимающих устройств: 15 кВт; категория надежности электроснабжения: Третья;

- класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 0,4 кВ; точки присоединения:

источник питания: проектируемая ВЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ от ВЛ-10 кВ Л-10 ПС Западная (ФИО3) (ПС 110/10 кВ Западная 110/10 кВ).

Описание точки присоединения: нижние контакты прибора учета на опоре проектируемой ВЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ от ВЛ-10 кВ Л-10 ПС Западная.

Категория надежности: третья

Максимальная мощность 15 кВТ

Вид питания: основное.

в соответствии с условиями договора от 15.12.2023 г. №НОВ-04385-Э-И/23 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям и техническими условиями № №НОВ-04385-Э-И/23-001 от 05.12.2023;

- взыскать с ПАО «Россети Северо-Запад» в пользу ООО «СТК-53» договорную неустойку за нарушение срока исполнения обязательства за период с 17.06.2024 по 08.10.2024 в размере 14 678 рублей 01 копейка, а также неустойку за период с 09.10.2024 по день фактического исполнения обязательства, рассчитанную от общего размера платы по договору (51 501,82 руб.).

- взыскать с ПАО «Россети Северо-Запад» в пользу ООО «СТК -53» расходы по уплате государственной пошлины в размере 60 000 рублей.

- в случае неисполнения решения суда в части исполнения ПАО «Россети Северо-Запад» обязательства по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих установок (АВ, линейное ответвление-0,4 кВ) (для подключения ЗУ с кадастровым номером 53:11:1700204:3354) взыскать с ПАО «Россети Северо-Запад» в пользу ООО «СТК-53» судебный штраф (астрент) в размере 5000 (пять тысяч) рублей за каждый календарный день неисполнения решения суда по истечении 10 календарных дней со дня вступления решения суда в законную силу по день его фактического исполнения. (с учетом принятого судом к рассмотрению уточнения иска от 10.01.2025)

В дополнительно представленных письменных пояснениях Сетевая организация указала на полное исполнение взятых на себя договорных обязательств по технологическому присоединению.

Истец уточнил размер взыскиваемой неустойки, определенной в сумме 29 871 руб. 05 коп., начисленной за период с 17.06.2024 по 03.02.2025.

В судебном заседании представитель истца заявленные требования поддержал, с учетом их уточнения.

Представитель ответчика в судебном заседании пояснила, что расчет неустойки произведен арифметически верно.

В порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в судебном заседании был объявлен перерыв до 15 час. 45 мин. 11.03.2025.

После завершения перерыва представители сторон в судебное заседание не явились, что не является препятствием для продолжения рассмотрения дела в их отсутствие.

Исследовав материалы дела, арбитражный суд пришел к следующему.

Как следует из материалов дела, между ПАО «Россети Северо-Запад», как сетевой организацией, и Обществом, как заявителем, был заключен договор №НОВ-04385-Э-И/23 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения ВРУ нежилого строения по адресу: 173507, Новгородская область, Новгородский район, дер. Сырково, кадастровый номер земельного участка: 53:11:1700204:3354.

Согласно пункту 16.3 Правил №861 обязательства сторон по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в случае заключения договора с лицами, указанными в пунктах 12(1), 14 и 34 Правил №861, распределяются следующим образом: заявитель исполняет указанные обязательства в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя; сетевая организация исполняет указанные обязательства (в том числе в части урегулирования отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя.

Неотъемлемой частью заключенного сторонами договора являются технические условия №НОВ-04385-Э-И/23, в которых стороны согласовали объем необходимых к выполнению мероприятий (пункт 10 - для сетевой организации, пункт 11 - для заявителя).

Стоимость работ по технологическому присоединению определена сторонами в 51 501 руб. 82 коп.

Согласно пункту 1.5 договора, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет шесть месяцев со дня его заключения, т.е. Сетевая организация должна была исполнить принятые на себя обязательства в срок до 15.06.2023 включительно.

Ссылаясь на длительное неисполнение Сетевой организацией обязательств по договору, Общество обратилось в суд настоящим исковым заявлением.

Отношения, связанные с технологическим присоединением энергопринимающих устройств юридических лиц и физических лиц к электрическим сетям, которые являются неотъемлемой частью процесса передачи электрической энергии на розничном рынке электрической энергии, регулируются Федеральным законом от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее- Закон №35-ФЗ).

Согласно абзацу 5 части 1 статьи 21 указанного Закона порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств юридических лиц и физических лиц к электрическим сетям устанавливается Правительством Российской Федерации в соответствии с законодательством об электроэнергетике. Во исполнение положений вышеназванной статьи постановлением Правительством Российской Федерации от 27.12.2004 №861 утверждены Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (далее - Правила технологического присоединения, Правила №861), согласно пункту 2 которых Правила распространяются на случаи присоединения впервые вводимых в эксплуатацию, ранее присоединенных реконструируемых энергопринимающих устройств, присоединенная мощность которых увеличивается, а также на случаи, при которых в отношении ранее присоединенных энергопринимающих устройств изменяются категория надежности электроснабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр величины присоединенной мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения таких энергопринимающих устройств.

Согласно пункту 3 Правил №861 сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения. Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании (далее - заявка), а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.

В соответствии со статьей 26 Закона №35-ФЗ, с пунктом 6 Правил №861 технологическое присоединение осуществляется на основании договора об оказании услуг по технологическому присоединению. Сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им Правил №861 и наличии технической возможности технологического присоединения. Заключение договора является обязательным для сетевой организации, поскольку данный вид договора на основании абзаца 2 части 1 статьи 26 Закона №35-ФЗ является публичным договором (статья 426 Гражданского кодекса Российской Федерации). При этом при заключении с заявителем договора технологического присоединения сетевая организация обязана совершить мероприятия по установлению обстоятельств, свидетельствующих о наличии технической возможности технологического присоединения лица, к ней обратившегося. Из анализа указанных норм права следует, что технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям сетевой компании производится на основе договора, который является публичным и носит возмездный характер. При этом отказ в технологическом присоединении при наличии технической возможности и соблюдении заявителем Правил технологического присоединения не допускается.

Статьями 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов; односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается.

Статьей 779 Гражданского кодекса Российской Федерации определено, что по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязан по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик - оплатить эти услуги.

В соответствии с пунктом 1 статьи 781 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.

Под технологическим присоединением в соответствии с пунктом 7 Правил №861 понимается состоящий из нескольких этапов процесс, целью которого является создание условий для получения электрической энергии потребителем через энергоустановки сетевой организации, завершающийся фактической подачей напряжения и составлением актов разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и разграничения эксплуатационной ответственности сторон, а также акта об осуществлении технологического присоединения.

Пунктом 18 Правил №861 определено, что мероприятия по технологическому присоединению включают в себя выполнение технических условий сетевой организацией и заявителем, включая проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических условий.

В соответствии с пунктом 2 Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 №861 документами, подтверждающими надлежащее технологическое присоединение, являются: акт об осуществлении технологического присоединения (документ, составленный по окончании процедуры технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям и подтверждающий технологическое присоединение в установленном порядке), акт разграничения балансовой принадлежности электросетей; акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон.

Следовательно, технологическое присоединение это комплекс правовых мероприятий, устанавливающих: а) класс надежности подключения; б) границу разделения балансовой принадлежности между абонентом и сетевой организаций; в) пределы разграничения эксплуатационной ответственности между абонентом и сетевой организаций; г) максимальную мощность такого подключения и т.д.

Отсутствие всех указанных выше документов свидетельствует об отсутствии совершения такого комплекса юридических действий, по результатам которых происходит именно надлежащее технологическое присоединение.

В рассматриваемом случае, ответчик в подтверждение исполнения договорных обязательств представил в материалы дела уведомление заказчика от 06.02.2025 об обеспечении Сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям, а также акт допуска в эксплуатацию прибора учета от 04.02.2025.

При установлении факта исполнения ответчиком договорных обязательств суд исходит из следующего.

Общество представило в материалы дела заявление об отказе от иска, в части возложения на ответчика обязанности по технологическому присоединению, в связи с завершением Сетевой организацией объема работ, предусмотренного договором №НОВ-04385-Э-И/23 от 15.12.2023.

В соответствии с частью 2 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец вправе при рассмотрении дела в Арбитражном суде любой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в суде соответствующей инстанции, отказаться от иска полностью или частично.

Изучив материалы дела, учитывая, что отказ от иска в части не противоречит законам и иным нормативным правовым актам, не нарушает права и законные интересы сторон и других лиц, арбитражный суд считает, что отказ от иска в части является правомерным и принимается арбитражным судом.

Согласно подпункту 4 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд прекращает производство по делу, если истец отказался от иска и отказ принят арбитражным судом.

При разрешении вопроса о взыскании с ответчика неустойки в сумме 29 871 руб. 05 коп., за период с 17.06.2024 по 03.02.2025, суд приходит к следующему.

В соответствии со статьями 329, 330 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой; неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Согласно подпункту "в" пункта 16 Правил №861 при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренного договором сторона должна уплатить другой стороне договора неустойку, равную 0,25 процента общего размера платы за технологическое присоединение за каждый день просрочки, при этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке, за год просрочки.

Указанное условие изложено в пункте 5.4 заключенного сторонами договора.

Неустойка, указанная в подпункте "в" пункта 16 Правил №861 и пункте 5.4 заключенного сторонами договора, по своей правовой природе является законной.

Общество начислило Сетевой организации 29 871 руб. 05 коп. неустойки за период с 17.06.2024 по 03.02.2025.

Арифметических возражений по расчету взысканной неустойки ответчик не заявил.

Расчет неустойки проверен судом и признан обоснованным.

Оснований для снижения взыскиваемой неустойки применительно к положениям статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации,  судом не установлено.

Согласно статье 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при вынесении решения суд распределяет судебные расходы.

Не подлежит возврату уплаченная государственная пошлина при добровольном удовлетворении ответчиком требований истца после его обращения в арбитражный суд и вынесения определения о принятии искового заявления к производству.

С учетом результатов рассмотрения дела и положений статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при наличии добровольного удовлетворения ответчиком требований истца в части выполнения работ в соответствии с условиями договора №НОВ-04385-Э-И/23 от 15.12.2023, понесенные истцом расходы по уплате госпошлины подлежат отнесению на ответчика в полном объеме.

Руководствуясь статьями 110, 150, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Взыскать с публичного акционерного общества "Россети Северо-Запад" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "СТК- 53" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) законную неустойку в сумме 29 871 руб. 05 коп., судебные расходы по оплате государственной пошлины в сумме 10 902 руб.

Производство по делу в части возложения на публичное акционерное общество "Россети Северо-Запад" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) обязанности в течение 10 календарных дней с момента вступления в законную силу решения суда исполнить предусмотренные договором №НОВ-04385-Э-И/23 от 15.12.2023 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, по осуществлению необходимого для электроснабжения ВРУ нежилого строения по адресу: 173507, Новгородская область, Новгородский район, дер. Сырково, кадастровый номер земельного участка: 53:11:1700204:3354, технологическое присоединение энергопринимающих устройств истца: энергопринимающие установки (АВ, линейное ответвление-0,4 кВ) (для подключения ЗУ с кадастровым номером 53:11:1700204:3354)

в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), ус учетом следующих характеристик:

- максимальная мощность энергопринимающих устройств: 15 кВт, в том числе: максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств: 0 кВТ; максимальная мощность вновь присоединяемых энергопринимающих устройств: 15 кВт; категория надежности электроснабжения: Третья;

- класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 0,4 кВ; точки присоединения:

источник питания: проектируемая ВЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ от ВЛ-10 кВ Л-10 ПС Западная (ФИО3) (ПС 110/10 кВ Западная 110/10 кВ).

Описание точки присоединения: нижние контакты прибора учета на опоре проектируемой ВЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ от ВЛ-10 кВ Л-10 ПС Западная.

Категория надежности: третья

Максимальная мощность 15 кВТ

Вид питания: основное.

в соответствии с условиями договора от 15.12.2023 г. №НОВ-04385-Э-И/23 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям и техническими условиями № №НОВ-04385-Э-И/23-001 от 05.12.2023, прекратить.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения.

Судья

И.С. Аксенов