4100/2017-57897(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Логинова, д. 17, г. Архангельск, 163000, тел. (8182) 420-980, факс (8182) 420-799 

E-mail: info@arhangelsk.arbitr.ru, http://arhangelsk.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации  

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) 

г. Архангельск Дело № А05-5058/2017  

от 29 июня 2017 года 

Руководствуясь статьями 110, 156, 167-173, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, Арбитражный суд Архангельской области  

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить. 

Изменить пункты 1.3., 13.1. муниципального контракта на оказание услуг по разработке  проекта автомобильной дороги общего пользования местного значения на территории МО  "Павловское" № 0824300003116000011-0677264-01 от 24.10.2016, заключенного между  муниципальным казенным учреждением муниципального образования "Каргопольский  муниципальный район" "Управление дорожного хозяйства и инвестиционной деятельности"  (ОГРН 

<

***>) и обществом с ограниченной ответственностью "Энерком-строй"  (ОГРН 

<

***>), изложив их в следующей редакции:  

- пункт 1.3. «Сроки оказания услуг: 

С момента заключения муниципального контракта до «31» декабря 2016 года – сбор  исходных данных, производство инженерных изысканий; с «01» января 2017 года по «30»  сентября 2017 года – разработка проектной документации (в том числе рассмотрение и  согласование проектной документации Заказчиком), государственная экспертиза инженерных  изысканий и проектной документации (согласно Приложения № 4 к Контракту).  

Датой оказания услуг по Контракту считается дата подписания обеими Сторонами акта  приемки оказанных услуг».  

- пункт 13.1. «Настоящий контракт вступает в силу и становится обязательным для  сторон с момента его подписания и действует до «30» октября 2017 года, а в части всех  взаиморасчетов по Контракту до полного их завершения, в части исполнения гарантийных  обязательств – до срока их истечения согласно разделу 10 настоящего контракта».  

Изменить приложение № 4 к муниципальному контракту № 08243000031160000110677264-01 от 24.10.2016, заменив дату во второй строке столбца «дата окончания работ»  20.04.2017 на дату 30.09.2017.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Энерком-строй" (ОГРН  

<

***>) в доход федерального бюджета 6000 руб. государственной пошлины.  

Настоящее решение может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный  апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд  Архангельской области в срок, не превышающий одного месяца со дня его принятия.  

Судья М.В. Распопин