19199/2023-209473(2) 

 

 АРБИТРАЖНЫЙ СУД НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е резолютивная часть Дело № А43-6259/2022 

г. Нижний Новгород 10 ноября 2023 года  

Арбитражный суд Нижегородской области в составе: судьи Исайчевой Натальи  Евгеньевны (шифр 23-86), при ведении протокола судебного заседания секретарем  ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело  

по иску Администрации Павловского муниципального округа Нижегородской  области (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), г. Павлово, Нижегородская область,  

к ответчику: обществу с ограниченной ответственностью «Нижегородстройпроект»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), г. Нижний Новгород,  

при участии в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных  требований относительно предмета спора: 1) общества с ограниченной ответственностью  «РегионРесурс» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), г. Горбатов, Нижегородская  область, 2) Министерства строительства Нижегородской области (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>), 

<

...>) ФИО2, г. Горбатов  Нижегородской области, 4) ФИО3, г. Горбатов Нижегородской  области, 5) ФИО4, 

<

...>) ФИО5, г. Горбатов Нижегородской области, 7) ФИО6, 

<

...>) ФИО7, г. Горбатов  Нижегородской области, 9) ФИО8, г. Горбатов Нижегородской  области, 10) ФИО9, г. Горбатов Нижегородской области,  11) ФИО10, г. Горбатов Нижегородской области, 12) Комитета по  управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Администрации  Павловского муниципального округа Нижегородской области (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>), г. Павлово, Нижегородская область,  

об обязании устранить недостатки, при участии представителей: 

от истца - ФИО11 по доверенности от 16.01.2023 № 1/11-9, после перерыва –  не явился;  

от ответчика - не явился; от третьих лиц - не явились; 

Руководствуясь статьями 110, 167 - 171, 176, 180-182, 319 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Нижегородстройпроект»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), г. Нижний Новгород, в течение шести  месяцев с момента вступления решения суда в законную силу безвозмездно устранить  недостатки, допущенные при строительстве многоквартирного жилого дома,  расположенного по адресу: 

<

...>,  указанные в заключении АНО «Центр экспертиз ТПП НО» № 0050100097д от  16.06.2023, а именно:  

- в квартирах №№ 6, 7, 8 устранить вертикальные и горизонтальные трещины в  межкомнатных перегородках в местах сопряжения с межэтажным перекрытием и  стенами, трещины с повторением контуров элементов кладки данных перегородок,  горизонтальные трещины в местах сопряжения межкомнатных перегородок и  межэтажного перекрытия, отклонение перегородок от вертикальной и горизонтальной  плоскостей, просадка пола;  

- в квартирах №№ 5, 10, 26, 27 устранить горизонтальные и вертикальные трещины  в местах примыкания стен и перегородок к перекрытиям, вентиляционным шахтам и к  несущим нагрузку стенам, трещины с повторением контуров элементов кладки;  

- в квартире № 17 устранить наличие пятен темного цвета на поверхности потолка  в помещении кухни в месте примыкания межэтажного перекрытия к наружной стене;  

- по кровле установить по фасаду Г/8-1 металлическое ограждение кровли на  участке длиной 7,0 м.;  

- по внутренней канализации объединить вентиляционные стояки канализации  (фоновые трубы) в отдельный вытяжной стояк и вывести выше уровня кровли;  

- по техническому подполью разработать и согласовать проектную документацию,  на основании которой выполнить работы по обеспечению легкого доступа к  расположенным в техническом подполье общедомовым трубопроводам холодного  водоснабжения и канализации.  

В случае неисполнения решения Арбитражного суда Нижегородской области в  установленный срок, взыскать с общества с ограниченной ответственностью  «Нижегородстройпроект» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), г. Нижний  Новгород, в пользу Администрации Павловского муниципального округа  Нижегородской области (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), г. Павлово,  Нижегородская область, неустойку в размере 10 000 руб. за каждый календарный день  просрочки до момента фактического исполнения решения.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Нижегородстройпроект»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), г. Нижний Новгород, в пользу Администрации  Павловского муниципального округа Нижегородской области (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>), г. Павлово, Нижегородская область, 288 000 руб. расходов по оплате  судебной экспертизы.  

Исполнительные листы выдать поле вступления решения в законную силу по  заявлению взыскателя.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Нижегородстройпроект»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), г. Нижний Новгород, в доход федерального  бюджета 6 000 руб. государственной пошлины.  

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.  

Перечислить после вступления в законную силу судебного акта автономной  некоммерческой организации «Центр экспертиз Торгово-промышленной палаты  Нижегородской области» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), г. Нижний Новгород  с депозитного счета Арбитражного суда Нижегородской области 288 000 руб. в счет  оплаты судебной экспертизы по реквизитам, указанным в счете.  

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через  Арбитражный суд Нижегородской области в течение месяца с момента его принятия.  

Решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в срок,  не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемого  судебного акта, при условии, что оно было предметом рассмотрения Первого  арбитражного апелляционного суда апелляционной инстанции или Первый арбитражный  апелляционный суд отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной  жалобы.  

Судья   Исайчева Н.Е.