ДВЕНАДЦАТЫЙ  АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

410002, г. Саратов, ул. Лермонтова д. 30 корп. 2 тел: (8452) 74-90-90, 8-800-200-12-77; факс: (8452) 74-90-91,

http://12aas.arbitr.ru; e-mail: info@12aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

арбитражного суда апелляционной инстанции

Дело №А06-3184/2020

г. Саратов

02 августа 2024 года

Резолютивная часть постановления объявлена 29 июля 2024 года.

 

Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в составе: 

председательствующего судьи Жаткиной С.А., 

судей Заграничного И.М., Романовой Е.В., 

при ведении протокола судебного заседания 

секретарем судебного заседания Ардабацким А.Д.,

рассмотрев в открытом судебном заседании сельскохозяйственного сбытового потребительского кооператива «Каспий» 

на решение Арбитражного суда Астраханской области от 29 мая 2024 года по делу №А06-3184/2020

по исковому заявлению Министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

к сельскохозяйственному сбытовому потребительскому кооперативу «Каспий»(ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора:Контрольно-счетная палата Астраханской области (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Володарская строительно-торговая компания» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

о взыскании средств субсидии, 

 

УСТАНОВИЛ:

В Арбитражный суд Астраханской области обратилось Министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области (далее – Министерство, истец) к сельскохозяйственному сбытовому потребительскому кооперативу «Каспий» (далее – ССПК «Каспий», кооператив, ответчик) о взыскании средств субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития сельскохозяйственной корпорации и малых форм хозяйствования по направлению на развитие материально-технической базы кооперативов – на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией мероприятий бизнес-плана кооператива, утвержденного в порядке, установленном Правительством Астраханской области, в размере 14 521 902, 56 рублей в бюджет Астраханской области.

Решением Арбитражного суда Астраханской области от 29 мая 2024 года по делу №А06-3184/2020 исковые требования удовлетворены в полном объеме.

Не согласившись с принятым по делу судебным актом, ответчик обратился с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда первой инстанции отменить как незаконное и необоснованное, отказать в удовлетворении исковых требований в полном объеме по основаниям, изложенным в жалобе.

Лица, участвующие в деле, явку своих представителей в суд апелляционной инстанции не обеспечили, о времени и месте судебного рассмотрения извещены надлежащим образом в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте Двенадцатого арбитражного апелляционного суда.

В соответствии с пунктом 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, дело рассматривается в отсутствие сторон, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного разбирательства.

Арбитражный апелляционный суд в порядке пункта 1 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации повторно рассматривает дело по имеющимся в деле и дополнительно представленным доказательствам.

Проверив обоснованность доводов, изложенных в апелляционной жалобе, с учётом отзыва на неё, исследовав материалы дела, арбитражный апелляционный суд считает, что обжалуемый судебный акт не подлежит отмене по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, постановлением Правительства Астраханской области от 10.09.2014 № 368-П утверждена государственная программа «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области» (далее - государственная программа).

В целях реализации мероприятий данной государственной программы постановлением Правительства Астраханской области от 08.02.2017 № 30-П утвержден Порядок предоставления субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития сельскохозяйственной кооперации и малых форм хозяйствования (далее - Порядок), в соответствии с пунктом 2.1 которого субсидия предоставляется, в том числе, на развитие материально-технической базы кооперативов - на финансовое обеспечение затрат (без учета налога на добавленную стоимость), связанных с реализацией мероприятий бизнес-плана кооператива, утвержденного в порядке, установленном Правительством Астраханской области.

Согласно пункту 2.2 Порядка субсидия предоставляется на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между заявителем и Министерством в соответствии с типовой формой, установленной Министерством финансов Астраханской области.

Субсидия на развитие материально-технической базы кооператива предоставляется в сумме, не превышающей 70 млн. руб., но не более 60 процентов затрат. Субсидия предоставляется в размере, указанном в бизнес-плане заявителя, утвержденном в порядке, установленном Правительством Астраханской области (пункт 2.14 Порядка).

Решением конкурсной комиссии (протокол от 13.11.2017 № 8) утвержден бизнес-план ССПК «Каспий» на общую сумму 24 615 000 руб., из которых собственные средства - 10 093 097 руб., средства гранта - 14 521 903 руб. В план включены расходы на строительство цеха по переработке и хранению овощной и рыбной продукции, оснащенного необходимым скороморозильным и холодильным оборудованием в селе Цветное Володарского района Астраханской области, а именно: расходы по строительству цеха с холодильными камерами по переработке и хранению овощей на сумму 19 100 000 руб. (средства гранта - 11 269 000 руб., собственные средства - 7 831 000 руб.).

Между Министерством и ССПК «Каспий» (получатель) 07.12.2017 заключено соглашение (договор) № 2 о предоставлении из бюджета Астраханской области субсидии на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг (далее - соглашение), предметом которого является предоставление из бюджета Астраханской области в 2017 году субсидий на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития сельскохозяйственной кооперации и малых форм хозяйствования в целях финансового обеспечения затрат получателя, утвержденного решением конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора заявителей в целях предоставления грантовой поддержки сельскохозяйственным потребительским кооперативам для развития материально-технической базы в 2017 году.

Согласно разделу II соглашения субсидия предоставляется в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными Министерству как получателю средств бюджета Астраханской области на цели, указанные в разделе I соглашения, в 2017 году в размере 14 521 902,56 руб.

Согласно подпунктам 4.1.5 соглашения о предоставлении субсидии министерство обязуется осуществлять контроль за соблюдением получателем порядка, целей и условий предоставления субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и соглашением, путем проведения плановых и (или) внеплановых проверок.

Согласно пункту 4.1.6 соглашения в случае установления Министерством или получения от органа государственного финансового контроля информации о факте (фактах) нарушения получателем порядка, целей и условий предоставления субсидии, предусмотренных Порядком предоставления субсидии и указанным соглашением, в том числе указания в документах, представленных получателем в соответствии с указанным соглашением, недостоверных сведений направлять получателю требование об обеспечении возврата субсидии в бюджет Астраханской области в размере и в сроки, определенные в указанном требовании.

В соответствии с пунктом 4.3.6 соглашения о предоставлении субсидии получатель субсидии обязуется направлять по запросу Министерства документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за соблюдением порядка, целей и условий предоставления субсидии в соответствии с пунктом 4.2.1, в течение 10 рабочих дней со дня получения указанного запроса.

В случае получения от Министерства требования в соответствии с подпунктом 4.1.6 указанного соглашения возвращать в бюджет Астраханской области субсидию в размере и в сроки, определенные в указанном требовании. Кроме того, получатель субсидии обязуется обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых в министерство в соответствии с данным соглашением.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по соглашению стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации (раздел 5 соглашения о предоставлении субсидии).

На основании распоряжения Министерства от 06.12.2017 № 162 «О предоставлении субсидии» в соответствии с пунктом 1.3 Порядка Министерством кооперату предоставлена субсидия в размере 14 521 902,56 руб., в том числе за счет средств федерального бюджета, поступающего в бюджет Астраханской области, в размере 13 795 808 руб. и бюджета Астраханской области в размере 726 095 руб.

Средства субсидии в сумме 14 521 902 руб. 56 коп. на развитие материально-технической базы кооперативов 21.12.2017 перечислены Министерством, что подтверждается платежным поручением от 21.12.2017 № 680876.

В соответствии с пунктом 2.2.2 плана работы Контрольно-счетной палаты на 2019 год на основании распоряжения от 27.05.2019 № 14 Контрольно-счетной палатой проведена проверка реализации отдельных мероприятий Государственной программы, включая проверку эффективности использования субсидий, выделенных кооперативу.

   Как указывает истец, проверкой установлено, что ССПК «Каспий» нарушено условие о санкционировании расходов получателя, поскольку в УФК по Астраханской области были предоставлены документы, которые содержали в себе недостоверную информацию о стоимости и объемах выполненных работ.

В акте проверки Контрольно-счетной палатой сделан вывод о том, что в нарушение п.15 Порядка от 28.12.2016 № 244н ССПК «Каспий» представил в УФК по Астраханской области недостоверные сведения, подтверждающие возникновение денежного обязательства, в связи с чем, возмещение части затрат по объекту «Цех по переработке овощной и рыбной продукции в с. Цветное Володарского района Астраханской области» произведено за фактически не выполненные работы на общую сумму 1 720 000 руб.

Министерством 25.12.2019 получено письмо Контрольно-счетной палаты Астраханской области «О результатах контрольного мероприятия» от 25.12.2019 № 04-02/П-1414.

Министерство 10.02.2020 выдало кооперативу требование  01-11-01-270 о возврате субсидии в бюджет Астраханской области в сумме 14 521 902,56 руб., в том числе, полученной за счет средств субсидии из федерального бюджета - 13 795 807,43 руб., за счет средств бюджета Астраханской области - 726 095 руб., в течение 14 рабочих дней со дня получения требования.

Данное требование получено ответчиком, вместе с тем до настоящего времени средства субсидии в размере 14 521 902 руб. 56 коп. ответчиком добровольно не возвращены.

Неисполнение требований, изложенных в претензии, послужило основанием для обращения истца в арбитражный суд с настоящим иском.

Суд первой инстанции, удовлетворяя исковые требования, правомерно руководствовался следующим. 

В соответствии со статьей 38 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - БК РФ) принцип адресности и целевого характера бюджетных средств означает, что бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств доводятся до конкретных получателей бюджетных средств с указанием цели их использования.

Абзацем 5 статьи 69 БК РФ определено, что предоставление бюджетных средств осуществляется в форме субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам.

Как следует из пункта 1 статьи 78 БК РФ, субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг.

Согласно пункту 3 статьи 78 БК РФ нормативные, правовые акты, муниципальные правовые акты, регулирующие предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, производителям товаров, работ, услуг, должны соответствовать общим требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, и определять (в частности):

- категории и (или) критерии отбора юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, физических лиц - производителей товаров, работ, услуг, имеющих право на получение субсидий;

- цели, условия и порядок предоставления субсидий.

Таким образом, предоставление субсидий осуществляется на основе реализации принципа адресности и целевого характера бюджетных средств. Нормы, определяющие категории и (или) критерии отбора юридических лиц - получателей субсидий цели, условия и порядок предоставления субсидий, расширенному толкованию не подлежат.

Предоставление субсидии оформляется договором, заключенным в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами бюджетного законодательства Российской Федерации; к правоотношениям сторон, вытекающим из договора о предоставлении субсидии, применяется гражданское законодательство Российской Федерации, если иное не предусмотрено Бюджетным кодексом Российской Федерации.

В целях реализации мероприятий государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области» постановлением Правительства Астраханской области от 08.02.2017 № 30-П утвержден Порядок предоставления субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития сельскохозяйственной кооперации и малых форм хозяйствования в соответствии с пунктом 2.1 которого субсидия предоставляется, в том числе, на развитие материально-технической базы кооперативов - на финансовое обеспечение затрат (без учета налога на добавленную стоимость), связанных с реализацией мероприятий бизнес-плана кооператива, утвержденного в порядке, установленном Правительством Астраханской области.

В соответствии с п. 4.2 названного Порядка, в случае установления министерством или получения от органа государственного финансового контроля Астраханской области информации о фактах нарушения заявителем условий предоставления субсидии, установленных настоящим Порядком и соглашением о предоставлении субсидии (в том числе указания в документах, представленных заявителем в соответствии с настоящим Порядком, недостоверных сведений), а также в случае недостижения показателей результативности использования субсидии, указанных в пункте 2.17 раздела 2 настоящего Порядка, министерство в течение 10 рабочих дней со дня выявления указанных фактов направляет заявителю требование об обеспечении возврата субсидии в бюджет Астраханской области.

   Материалами дела подтверждается, что ССПК «Каспий» нарушено условие о санкционировании расходов получателя, поскольку в УФК по Астраханской области были предоставлены документы, которые содержали в себе недостоверную информацию о стоимости и объемах выполненных работ.

Так, Контрольно-счетной палатой в ходе проверки реализации отдельных мероприятий Государственной программы, включая проверку эффективности использования субсидий, выделенных кооперативу, установлено, что 11.12.2017 между кооперативом (заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Володарская строительно-торговая компания» (далее – ООО «УК «ВСТК», подрядчик) был заключен договор подряда на выполнение строительных работ 0000000008217864002 №2, по условиям которого подрядчик принял на себя обязательство по выполнению строительных работ на объекте заказчика в соответствии с разработанной проектно-технической и сметной документацией, утвержденной заказчиком.

Согласно пункту 1.2 данного договора подрядчик обязался выполнить работы по строительству цеха с холодильными камерами по переработке и хранению овощной продукции общей площадью 1393 кв. м, находящегося по адресу: Астраханская обл., Володарский р-н, вдоль правого берега р. Сарбай примерно в 2,5 км севернее с. Цветное.

Общая стоимость работ согласована сторонами в пункте 2.1 договора и составила   19 100 000 руб.

В соответствии с подписанными сторонами актами (КС-2) и справками (КС-3) работы выполнены на сумму 19 974 454 руб.

Администрацией муниципального образования «Володарский район» кооперативу выдано разрешение № 30-30502000-621-2018 на ввод в эксплуатацию построенного объекта «Цех по переработке овощной и рыбной продукции в с. Цветное Володарского района Астраханской области».

Кооперативом зарегистрировано право собственности на указанный объект 27.09.2018.

Проверкой установлено, что проектно-сметная документация на объект разработана ООО «Проектсервис». В представленных локальных сметных расчетах и актах выполненных работ от 17.01.2018 № 1 (КС-2) на сумму 7 562 948 руб. отражены работы по устройству площадок П-1, П-2, П-3 из металлических решетчатых конструкций.

С целью установления фактически выполненных работ на спорном объекте Контрольно-счетной палаты организовано проведение контрольных замеров выполненных работ.

В ходе осуществления контрольного замера (осмотра) объекта председателем Кооператива представлена архитектурная часть проекта с отражением площадок П-1, П-2, выполненных из железобетона.

В ходе выборочного контрольного замера выполненных работ на объекте при сличении акта выполненных работ от 17.01.2018 № 1 (КС-2) с фактически выполненными работами установлено, что подрядчиком не выполнены работы на сумму 1 720 298 руб., что отражено в акте контрольного замера объемов работ от 19.07.2019.

В акте замера указано, что площадка П-3 к зданию цеха в проекте отсутствует, фактически не выполнялась, металлические конструкции площадок П -1, П-2 к зданию цеха фактически не выполнялись, основание пола площадок П-1, П-2 цеха выполнены из бетона.

Таким образом, проектом, разработанным ООО «Проектсервис» предусмотрено устройство площадок П-1, П-2, П-3 из металлических решетчатых конструкций, тогда как в ходе проверки Палатой установлено, что фактически осуществлено устройство площадок П-1, П-2, выполненных из железобетона.

Кооперативом документы, в том числе акт выполненных работ от 17.01.2018 № 1 (КС-2) направлены в Управление Федерального казначейства Астраханской области (далее - УФК Астраханской области) для возмещения расходов за счет субсидии.

Акт выполненных работ от 17.01.2018 № 1 (КС-2) оплачен УФК Астраханской области платежным поручением от 22.01.2018 № 1 в сумме 7 562 948 руб. за счет средств субсидии с указанием назначения платежа - оплата за строительные работы по договору от 11.12.2017 № 2, акту выполненных работ от 17.01.2018 № 1 (КС-2), справке от 17.01.2018 № 1 (КС-3), счету от 18.01.2018 № 1.

УФК по Астраханской области на запрос Контрольно-счетной палаты представлены документы, на основании которых произведено возмещение расходов за счет субсидии.

В ходе анализа данных документов Контрольно-счетной палаты установлено, что представленные документы идентичны документам, представленным Кооперативом, с отражением площадок П-1, П-2, П-3 из металлических решетчатых конструкций.

По результатам проверки Контрольно-счетной палатой составлен акт проверки № 2.2.2/2-2019 от 29.11.2019, в котором указано, что на основании представленных кооперативом документов, в том числе акта выполненных работ от 17.01.2018 № 1 (КС-2), в отношении которого установлен факт невыполнения работ на сумму 1 720 298 руб., УФК по Астраханской области в 2018 году произвело возмещение денежных средств за счет субсидии.

В этом же акте отражены виды работ, которые указаны в акте приемки выполненных работ от 17.01.2018 № 1 (КС-2) и фактически не выполнены.

25.07.2019 председателем кооператива представлен еще один пакет документов: оригинал раздела проекта «Цех по переработке овощной и рыбной продукции в с. Цветное Володарского района Астраханской области» № 14-12/2017 (проект изменен, площадки на объекте должны быть изготовлены не из металлических решеток, а из железобетона), копия договора от 11.12.2017 № 2, копия справки от 17.01.2018 № 1 (КС-3) на сумму 7 562 948 руб., копия справки от 02.03.2018 № 2 (КС-3) на сумму 4 171 258 руб., копия акта от 17.01.2018 № 1 (КС-2) на сумму 7 562 948 руб., копия справки от 02.03.2018 № 2 (КС-2) на сумму 4 171 258 руб.

Исправленный акт от 17.01.2018 N 1 (КС-2) был повторно представлен в УФК по Астраханской области письмом от 25.07.2019, однако последний письмом от 07.08.2019 № 25-22-30/3382 отказал заявителю в принятии исправленного документа по тем основаниям, что нормативными актами не предусмотрено последующее представление документов-оснований по исполненным платежным поручениям (субсидия выплачена).

При проверке документов установлено, что невыполненные работы, указанные в акте контрольного замера, исключены кооперативом из акта от 17.01.2018 № 1 (КС-2) и увеличены другие работы, часть из которых являются скрытыми и после завершения строительства объекта визуальной проверке не подлежат. Повторно представленный акт от 17.01.2018 № 1 (КС-2) с иными работами составил 7 562 948 руб.

Таким образом, кооперативом представлены два акта приемки выполненных работ от 17.01.2018 № 1 (КС-2) с разным текстовым содержанием.

Министерство 10.02.2020 выдало кооперативу требование  01-11-01-270 о возврате субсидии в бюджет Астраханской области в сумме 14 521 902,56 руб., в том числе, полученной за счет средств субсидии из федерального бюджета - 13 795 807,43 руб., за счет средств бюджета Астраханской области - 726 095 руб., в течение 14 рабочих дней со дня получения требования.

Не согласившись с данным требованием Министерства, ответчик обратился в арбитражный суд с заявлением к Министерству сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области о признании незаконным и отмене требования Министерства Сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области  №01-11-01-270 от 10.02.2020.

Решением Арбитражного суда Астраханской области от 28.08.2023, оставленным без изменения постановлением Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 05.12.2023 по делу №А06-1966/2020, в удовлетворении заявления кооператива отказано.

Постановлением Арбитражного суда Поволжского округа от 4 апреля 2024 г. решение Арбитражного суда Астраханской области от 28.08.2023 и постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 05.12.2023 по делу № А06-1966/2020 оставлены без изменения, кассационная жалоба ССПК «Каспий» - без удовлетворения.

В постановлении суда кассационной инстанции указано, что в рассматриваемом случае, кооперативом в УФК по Астраханской области для возмещения расходов за счет субсидии в виде грантовой поддержки сельскохозяйственным кооперативам для развития материально-технической базы был представлен недостоверный акт выполненных работ от 17.01.2018 N 1, то есть представлены документы на оплату работ, которые не выполнялись, что не оспаривалось заявителем. Указание в документах, которые представляются для получения субсидии, недостоверных сведений, что повлекло выплату из бюджета денежных средств, не может признаваться технической ошибкой. Измененный акт выполненных работ от 17.01.2018 № 1, представленный в палату письмом от 25.07.2019, предметом возмещения бюджетных средств не являлся.

При таких обстоятельствах, в деле №А06-1966/2020 суды пришли к выводу о том, что требование Министерства соответствует закону и не нарушает права кооператива, поскольку ССПК «Каспий» в УФК по Астраханской области были представлены недостоверные сведения, подтверждающие возникновение денежного обязательства, и субсидия предоставлена на основании недостоверных документов, что является нарушением и влечет обязанность по возврату в бюджет средств субсидии. 

Установленные по делу А06-1966/2020 обстоятельства согласно части 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации имеют преюдициальное значение для настоящего спора, в связи с чем, оспариванию и доказыванию вновь не подлежат.

Таким образом, оценив в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства по делу и представленные доказательства, доводы сторон, суд первой инстанции пришел к правомерному выводу об удовлетворении исковых требований в полном объеме.

Ссылка апеллянта на то, что выявленное Контрольно-счетной палатой Астраханской области нарушение не является неустранимым, не принимается судом апелляционной инстанции, поскольку предоставление ССПК «Каспий» недостоверных сведений повлекло выплату средств из бюджета Астраханской области.

Вопреки доводам апелляционной жалобы, условиями предоставления субсидии на развитие материально-технической базы кооперативов, в том числе являются соблюдение получателем субсидии на развитие материально-технической базы кооперативов требований порядка санкционирования ее расходования и согласие на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля Астраханской области проверок соблюдения им условий, целей и порядка предоставления субсидии на развитие материально-технической базы кооперативов (пункты 3.2, 3.3 раздела III «Условия и порядок предоставления Субсидии» Соглашения).

В рамках получения бюджетных средств в соответствии с Порядком и соглашением о предоставлении субсидии от 07.12.2017 № 2 ССПК «Каспий» обязался соблюдать цели, порядок и условия предоставления субсидии на развитие материально-технической базы кооперативов. 

Иные доводы апелляционной жалобы признаются судом апелляционной инстанции несостоятельными и не могут являться основанием для отмены обжалуемого судебного акта. Данная процессуальная позиция апеллянта направлена на преодоление вступившего в законную силу судебного акта по делу №А06-1966/2020, что недопустимо в силу статей 16 и 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Судебные расходы распределены судом в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Нарушений норм процессуального права, которые в силу статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации могут являться основанием для отмены судебного акта суда первой инстанции в любом случае, судом апелляционной инстанции не установлено. 

При таких обстоятельствах у арбитражного суда апелляционной инстанции не имеется правовых оснований для отмены обжалуемого судебного акта в соответствии с положениями статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

С учетом изложенного решение суда следует оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

В соответствии с частью 1 статьи 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации постановление, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.

Руководствуясь статьями 268 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный апелляционный суд 

 

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Астраханской области от 29 мая 2024 года по делу №А06-3184/2020 оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Постановление арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Арбитражный суд Поволжского округа в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме через арбитражный суд первой инстанции.

 

Председательствующий                                                                            С. А. Жаткина

 

Судьи                                                                                                           И.М. Заграничный

 

                                                                                                                      Е. В. Романова