И М Е Н Е М   Р О С С И Й С К О Й   Ф Е Д Е Р А Ц И И

Р Е Ш Е Н И Е

дело № А40-86260/21-151-591

г. Москва

09 августа 2021 года.

Резолютивная часть решения объявлена 15.07.2021

Решение в полном объеме изготовлено 09.08.2021

Арбитражный суд города Москвы в составе

Судьи Вольской К.В. 

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1

рассмотрев в открытом судебном заседании дело 

по исковому заявлению ООО «ЛАНДШАФТСИТИ» (ОГРН: 

<

***>)

к ответчику КП «ВДНХ» (ОГРН: 

<

***>)

о взыскании 2 092 227, 13 руб.

при участии от истца: ФИО2 по доверенности от 07.08.2020

от ответчика: ФИО3 по доверенности от 02.03.2021

У С Т А Н О В И Л:

Иск заявлен о взыскании задолженности по договору №Ф.2020.179 от 18.11.2020 в размере 2 092 227, 13 руб. с учетом уточнений требований в порядке ст. 49 АПК РФ. 

Истец требования поддержал. Ответчик против удовлетворения требований возражал по доводам, изложенным в отзыве. 

Рассмотрев материалы дела, суд пришел к следующим выводам. 

Между Казенным предприятием г. Москвы «Выставка достижений народного хозяйства (Далее по тексту - Ответчик) и ООО «Ландшафтсити» (далее по тексту - Истец) был заключен гражданско-правовой договор от 18.11.2020г. № Ф.2020.179, согласно которому Истец обязался выполнить по заданию Ответчика работы по разработке проектной и рабочей документации в объеме, необходимом для выполнения комплекса работ по реконструкции объекта: строение № 535 «Здание бывшего комбикормового завода», расположенного на территории достопримечательного места «ВСХВ-ВДНХ-ВВЦ» по адресу, 

<

...>, (далее работы) в объеме, установленном в Техническом задании (приложение № 1 к настоящему Контракту, являющееся его неотъемлемой частью) Далее - Техническое задание), а Ответчик обязался (в соответствии с разделом 2 Контракта) своевременно принять результат выполненных работ и надлежащим образом оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренным настоящим Контрактом. (Приложение №1)

Цена Контракта составляет 15 340 316 рублей 53 копеек, НДС не облагается в соответствии с положениями ст. ст. 346.12, 346.13 главы 26.2 НК РФ (далее - Цена Контракта) (п.2.1. Контракта).

В соответствии с п. 4.1. Контракта, в течение 5 (пяти) рабочих дней Истец уведомляет Ответчика о факте завершения работ и предоставляет Ответчику счет на оплату оказанных услуг и Акт сдачи-приемки услуг, подписанный Истцом в двух экземплярах.

В соответствии с п. 4.3. Контракта, не позднее 30 (тридцати) рабочих дней после получения от Истца комплекта отчётной документации, Ответчик обязан рассмотреть результаты и осуществить приёмку выполненных работ по настоящему Контракту на предмет соответствия их объёма, качества требованиям, изложенным в настоящем Контракте и Техническом задании. Срок исполнения Контракта с 18.11.2020г. до 11.06.2021г. 205 дней -(п.3.1, Контракта), выполнение этапов работ по Контракту осуществляется в промежуточные сроки, предусмотренные Календарным планом (Приложение № 3 к Контракту). Срок действия Контракта с 18.11.2020-30.08.2021г. (п. 12.1 Контракта)

В соответствии с п. 2.6.2 Контракта Ответчик поэтапно оплачивает работы, выполненные Истцом на соответствующем этапе Графика выполнения работ (Календарного плана), в безналичном порядке путём перечисления денежных средств с расчетного счета Ответчика на расчётный счёт Истца, на основании надлежаще оформленного и подписанного обоими Сторонами Акта сдачи приемки выполненных работ, составленного по форме, являющейся Приложением № 2 к настоящему Контракту, по соответствующему этапу, с приложением отчетных документов, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, с даты подписания Ответчиком Акта сдачи -приёмки выполненных работ, по соответствующему этапу.

Согласно п. 1.5. (раздел 2) Технического задания Истец, после получения части исходной документации приступил к Разработке предпроектного предложения (комплекс концептуальных решений в виде эскизов и моделей, включающих разработку общей концепции архитектуры здания, проработку общих вопросов стилистики, конструкции и функциональности здания).

22.01.2021 года исходящим письмом № 0015-ИСХ-ЛС/21 (вх. № вх-КП-9-222/21) Истец направил в адрес Ответчика буклет с предпроектными решениями с просьбой согласовать, либо направить замечания и предложения. Ответчик несколько раз выдавал замечания в рабочем порядке. 02.02.2021 было проведено онлайн совещание, в ходе которого были высказаны пожелания и замечания к представленным предпроектным решениям. По результатам буклет с предпроектными решениями был дополнен, откорректирован и направлен на повторное рассмотрение 09.02.2021 г. письмом № 0040-ИСХ-ЛС/21. 09.02.2021 года письмом № Исх-КП-9-477/21 КП «ВДНХ» направило замечания по переданной документации. Основные замечания касались функционального назначения помещений, данные функциональные особенности помещений Объекта не отражены в Техническом задании к Контракту, а также не были упомянуты в ранее направленном письме № Исх-КП-9-4173/20 от 29.12.2020 г. о функциональном назначении павильона № 535. 12.02.2021 письмом № Исх-КП-9-548/21 были получены конкретные замечания по оформлению представленного буклета. Срок для устранения был установлен до 15.02.2021. 15.02.2021 письмом № 0045-ИСХ-ЛС/21 ООО «ЛандшафтСити» направило исправленный в соответствии с замечаниями от 12.02.2021 буклет. 26.02.2021 состоялось онлайн совещание, на котором были даны дополнительные замечания (протокол №б/н от 26.02.2021 г.) и предложено направлять материалы на рассмотрение в рабочем порядке. 26.02.2021 года № исх-КП-9-778/21 Заказчик направил замечания по Буклету АХП. 25.03.2021 года № 0111-ИСХ-ЛС/21 повторная сдача концепции АХП здания. Ответа от Заказчика не последовало. 03.03.2021 отредактированный буклет был направлен на рассмотрение в рабочем порядке в группу. 11.03.2021 в рабочую группу отдельно было направлено решение по пожарной лестнице в открытом варианте. 16.03.2021 года получены не значительные замечания. 23.03.2021 года № 0104-ИСХ-ЛС/21 повторная сдача буклета по зданию на согласование с историей подробной переписки по данному разделу. 25.03.2021 года № 0110-ИСХ-ЛС/21 повторная сдача буклета. Ответа от Заказчика нет. 25.03.2021 года № 0111-ИСХ-ЛС/21 повторная сдача концепции АХП здания. Ответа от Заказчика нет. Вместе с тем, в соответствии с п.2.5 Технического задания к контракту Ответчик в течение 60 календарных дней с момента заключения Контракта (этап I Календарного плана) предоставляет исходную документацию, в том числе: -Доступ в Архив Ответчика для оцифровки архивной, проектной, изыскательской и исполнительной документации (в соответствии с заявкой); - Предоставление результатов обследования состояния (Отчет); - Предоставление результатов инженерных и археологических изысканий (Отчеты); - Положительное заключение государственной экспертизы по результатам инженерных изысканий; - Акт государственной историко-архивной экспертизы; -Копии уставных документов КП «ВДНХ» ; - Копии выписки из технического паспорта здания и поэтажных планов Объекта; -Выписка из единого государственного реестра юридических лиц. -Копия свидетельства о регистрации юридического лица; -Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН/КПП). - Копия Свидетельства о государственной регистрации права на Объект. 

Крайний срок предоставления Заказчиком исходной документации -16.01.2021.

17.12.2020 Ответчик передал часть ИРД (обмерные чертежи и инженерные сети из тех. заключения об обследовании зданий) в редактируемом формате по электронной почте. 26.01.2021 Ответчик на электронную почту направил геоподоснову. 05.02.2021   года  письмом  №  0037-ИСХ-ЛС/21   (вх.  Вх-КП-9-461/21 от 05.02.2021) Истец направил расчет нагрузок, необходимый для заказа ТУ по электроснабжению, водоснабжению, водоотведению и ливневой канализации. А также по электронной почте были направлены расчеты нагрузок для заказа ТУ на теплоснабжение. 10.02.2021 по эл. почте был передан ситуационный план. 12.02.2021 по эл. почте был передан Технический отчет о проведении археологической разведки участка. 16.02.2021 года № 0048-ИСХ-ЛС/21 Истцом был направлен повторный запрос о предоставлении части недостающей исходной документации для дальнейшей работы по контракту. В ответ 05.03.2021 года № Исх-КП-9-877/21 была предоставлена исходная документация не в полном объёме, необходимом для дальнейшего проектирования. Указанным письмом Ответчик подтвердил отсутствие согласования Московской государственной экспертизы на представленные изыскания, необходимые для подготовки проектной документации и отсутствие Акта государственной историко-культурной экспертизы, который был им предоставлен 12.03.2021 года № Исх-КП-9-972/21. 10.03.2021 по эл. почте было получено согласование Департамента культурного наследия археологической разведки. 

02.04.2021 Исх-КП-9-1291/21 Ответчик известил Истца о расторжении контракта в порядке, предусмотренном п.8.1.1.2, п.8.1.1.3, а также ст. 715, 717 ГК РФ.

В соответствии с п.8.1.1.2 Контракта Заказчик вправе расторгнуть договор в случае неоднократного (от двух и более раз) нарушения сроков и объемов выполнения работ, предусмотренных Контрактом, включая график выполнения работ (календарный план)

В соответствии с п.8.1.1.3 Контракта Заказчик вправе расторгнуть договор в случае если Подрядчик не приступает к исполнению Контракта в срок, установленный Контрактом, или нарушает график выполнения работ, предусмотренный Контрактом, или выполняет работы так, что окончание их выполнения к сроку, предусмотренному Контрактом, становится явно невозможно, либо в ходе выполнения работ стало очевидно, что они не будут выполнены надлежащим образом, в установленный Контрактом срок.

Ответчик требований об устранении недостатков в работе к истцу не предъявлял и сроков их устранения не устанавливал. При данных обстоятельствах следует считать, что здесь имел место односторонний отказ заказчика от исполнения договора подряда в порядке ст. 717 ГК РФ.

Пунктом 2.6.2. предусмотрено, что Заказчик поэтапно оплачивает работы, выполненные Подрядчиком на соответствующем этапе Графика выполнения работ (Календарного плана, на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ по соответствующему этапу, с приложением отчетных документов, в течение 15 рабочих дней с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ по соответствующему этапу.

Согласно п.2.6.3 в случае, если проектом контракта предусмотрены отдельные этапы его исполнения, цена каждого этапа устанавливается в размере, сниженном пропорционально снижению начальной (максимальной) цены контракта участником закупки, с которым заключается контракт.

Согласно смете № 1 к Контракту, письмом от 09.04.2021г. № 0154-Исх-ЛС/21 Ответчику сданы следующие работы: - Буклет с предпроектными решениями на 37 листах в 4х экз.; Диск с электронной версией буклета в 2х экз.; Сметный расчет выполненных работ на 1 листе; Акт № 3 в 2х экз.; Акт сдачи-приемки в 2х экз.; Счет № 3 в 1 экз.

Итого стоимость сданного материала, согласно переданных закрывающих документов 2 092 227,13 рублей.

Истец неоднократно, письмами от 02.12.2020г. № 1025-ЛС/20, от 16.02.2021г. № 0048-Исх-ЛС/21, от 25.03.2021г. № 0113-Исх-ЛС/21 просил Ответчика передать исходно - разрешительную документацию. На дату расторжения    контракта    02.04.2021 года    у    Заказчика отсутствуют согласования Московской государственной экспертизы на представленные изыскания, необходимые для подготовки проектной документации, а также ТУ на электроснабжение.

Указанные обстоятельства послужили основаниями для обращения в суд. 

Отказывая в удовлетворении требований, суд принимает во внимание положения ст. 8, 10, 12, 309, 310, 421, 431, 450, 450.1, 702, 708, 711, 715, 720, 746, 753 Гражданского кодекса, а также учитывает следующее. 

Суд соглашается с позицией ответчика, согласно которой срок исполнения Контракта, в соответствии с п.3.1 Контракта был установлен с 18.11.2020 до 11.06.2021 + 205 дней, выполнение этапов работ по Контракту осуществляется в промежуточные сроки, предусмотренные Календарным планом (Приложение № 3 к Контракту). Срок действия Контракта с 18.11.2020-30.08.2021г. (п. 12.1 Контракта).

В соответствии с Приложением № 3 к Контракту с момента заключения Контракта в течение 60 календарных дней (т.е. до 17 января 2021 года) должны быть выполнены следующие работы:

1.Получение исходно-разрешительной документации;

2.Разработка проектной документации;

3.Разработка сметной документации.

В соответствии с п.п. 2.6 п.2 Технического задания, являющегося неотъемлемым приложением к вышеуказанному контракту, Подрядчик обязан в течение одного рабочего дня с даты заключение контракта, а именно в срок до 20.11.2020, назначить ответственное контактное лицо, определить номер телефона, выделить адрес электронной почты для приема данных (запросов, писем) и направить информацию Заказчику.

Поскольку Подрядчик не исполнил в установленный срок указанное требование, Заказчик письмом № Исх-КП-9-3616/20 от 25.11.2020 запросил у него указанные сведения.

Заказчик письмом №1024-ЛС/20 от 02.12.2020 (per. № Вх-КП-9-5327/20 от 02.12.2020) предоставил запрашиваемые сведения.

Письмом № 1025-ЛС/20 от 02.12.2020 у Заказчика была затребована исходно-разрешительная документация, которая частично была предоставлена Заказчиком через 5 дней № Исх-КП-9-3765/20 от 07.12.2020.

Письмом № 1050-ЛС/20 от 18.12.2020 у Заказчика были запрошены уточняющие сведения о функциональном зонировании здания по этажам, которые Заказчик предоставил письмом № Исх-КП-9-4173/20 от 29.12.2020.

Письмом № Исх-КП-9-4149/20 от 28.12.2020 Подрядчику были переданы Технические условия на подключение строения №535 к сетям связи, на подключение к Централизованной объектовой системе оповещения ВДНХ системы оповещения, письмом № Исх-КП-9-59/21 от 14.01.2021 технические условия на системы безопасности.   

15 января 2021 года в связи с истечением срока исполнения Подрядчиком своих обязательств по первым трем этапам, Подрядчику было направлено письмо № Исх-КП-9-96/21 от 15.01.2021 с просьбой предоставить разъяснения о ходе и состоянии выполняемых работ, а также направить отчетную документацию на рассмотрение Заказчика. 

Письмом № Исх-КП-9-167/21 от 20.01.2021 Подрядчику была передана документация: технические условия подключения к системам радиофикации и оповещения о чрезвычайных ситуациях.

Только 22.01.2021 года, уже после истечения срока работ по трем этапам, исходящим письмом № 0015-ИСХ-ЛС/21 Подрядчик направил на согласование Заказчику буклет с предпроектными решениями.

09.02.2021 года письмом № Исх-КП-9-477/21 и 10.02.2021 письмом № Исх-КП-9-496/21 Заказчик направил замечания по переданной документации с просьбой внести изменения и представить повторно документы на согласование.

11.02.2021, в связи с неисполнением обязательств по Контракту Подрядчику была направлена претензия № Исх-КП-9-507/21 на сумму 56 710,60 рублей.

12.02.2021 года письмом № 0044-ИСХ-ЛС/21 Подрядчик повторно представил на согласование откорректированный состав рабочей и проектной документации.

15.02.2021 года письмами № 0045-ИСХ-ЛС/21 и № 0046-ИСХ-ЛС/21 Подрядчик представил на согласование проект архитектурно-художественной подсветки и новое предпроектное предложение.

26.02.2021 года письмами № Исх-КП-9-777/21 и № Исх-КП-9-778/21 были направлены повторные замечания Заказчика на предпроектные предложения с просьбой представить их в срок до 02.03.2021 года.

В связи с не предоставлением предпроектных предложений в указанный срок и нарушением сроков исполнения обязательств 15 марта 2021 года Подрядчику была направлена претензия № Исх-КП-9-988/21 о выплате неустойки в размере 155 473,20 рублей.

К указанному сроку Заказчику стало очевидным, что исполнение Контракта в сроки установленные Контрактом сорвано Подрядчиком.

02 апреля 2021 года Подрядчику, на основании ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» было направлено уведомление № Исх-КП-9-1291/21 об одностороннем отказе Заказчика от исполнения контракта, которое было получено адресатом 22 апреля 2021 года.

В силу п. 13 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Односторонний отказ Ответчика от контракта Истцом не оспорен.

Пунктом 23 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» установлено, что при расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

 В силу п. 18 ст. ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» если до расторжения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) частично исполнил обязательства, предусмотренные контрактом, при заключении нового контракта количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги должны быть уменьшены с учетом количества поставленного товара, объема выполненной работы или оказанной услуги по расторгнутому контракту.

Таким образом, необходимым условием для оплаты частично исполненных обязательств является возможность применения результатов работ Подрядчика при исполнении нового контракта.

Представленный буклет, который впервые был предоставлен Заказчику после истечения срока выполнения работ по 3 этапам Контракта (письмо от 22.01.2021 № 0015-ИСХ-ЛС/21) и являющийся первостепенным документом для дальнейшего формирования исходной документации, не содержит необходимых данных и до настоящего времени не согласован Казенным предприятием города Москвы «Выставка достижений народного хозяйства», в связи с чем оплата работ не может быть произведена.

Суд учитывает, что спорный договор расторгнут в порядке ст. 715 ГК РФ, что не предусматривает возмещение расходов подрядчика, при этом, в период действия договора истцом не сдавались заказчику предусмотренные договором работы, имеющие для него потребительскую цену, иное суду не доказано. 

Изучив материалы дела, в том числе предмет и основание заявленного иска, действуя в строгом соответствии со ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд, оценив представленные в материалы дела доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном их исследовании, оценив также относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности, находит требования истца не подлежащими удовлетворению.

Расходы по оплате государственной пошлины подлежат распределению в порядке ст. 110 АПК РФ. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 8, 10, 12, 309, 310, 421, 431, 450, 450.1, 702, 708, 711, 715, 720, 746, 753 ГК РФ, ст. 64-68, 71, 110, 167-170, 176, 180, 181 АПК РФ,

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении исковых требований отказать.

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путем подачи апелляционной жалобы в Девятый арбитражный апелляционный суд.

 

Судья             К.В. Вольская