АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ-ЧУВАШИИ

428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Ленина, 4 http://www.chuvashia.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А79-8708/2021

г. Чебоксары

02 ноября 2021 года

Резолютивная часть решения объявлена 28 октября 2021 года.

Арбитражный суд Чувашской Республики - Чувашии в составе судьи Владимировой О.Е.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Бондаревой Д.Н., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

общества с ограниченной ответственностью "Дортех" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 428024, 

<

...>

к администрации Шумерлинского района Чувашской Республики (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 429125, 

<

...>

о взыскании 8 548 093 руб. 48 коп.,

при участии

от истца: ФИО1 по доверенности от 17.12.2020 (сроком по 16.12.2021),

установил:

общество с ограниченной ответственностью "Дортех" обратилось в арбитражный суд с иском к администрации Шумерлинского района Чувашской Республики о взыскании 8 548 093 руб. 48 коп., в том числе 8443091 руб. 54 коп. долга, 105001 руб. 94 коп. пени за период с 03.08.2021 по 23.09.2021 и далее по день фактической оплаты долга.

Иск мотивирован ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств по оплате работ, выполненных истцом по муниципальному контракту №0115300002421000002_86420 от 27.03.2021 на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в Шумерлинском районе Чувашской Республики (Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, в том числе проходящих по улицам населенных пунктов, и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов) (ИКЗ: 213211800095421180100100300014211244).

В заседании суда представитель истца исковые требования поддержала по основаниям, изложенным в иске.

Ответчик явку представителя не обеспечил, в отзыве от 27.10.2021 указал, что истцом работы, предусмотренные на 2021 год, выполнены в соответствии с условиями контракта (в редакции дополнительного соглашения от 23.07.2021). Ответчиком произведена частичная оплата выполненных работ в общей сумме 2476200 руб. 89 коп., из них: за счет средств местного бюджета Шумерлинского района в сумме 545964 руб. 62 коп., за счет, средств поступивших в виде субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики, в сумме 1930236 руб. 27 коп. Оплата за счет средств местного бюджета Шумерлинского района произведена в полном объеме в соответствии с условиями контракта (в ред. дополнительного соглашения от 23.07.2021). Оплата за счет средств республиканского бюджета произведена частично в сумме 1930236 руб. 27 коп. Остаток задолженности за выполненные работы в размере 8443091 руб. 54 коп., подлежащий оплате за счет средств, поступающих из республиканского бюджета, в текущий момент не перечислен в связи с отсутствием финансирования из республиканского бюджета Чувашской Республики. В настоящий момент в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики на подписании находится дополнительное соглашение к соглашению от 15.03.2021 №016-14/18-2/9 о предоставлении в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджету Шумерлинского района Чувашской Республики на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, в соответствии с которым бюджету Шумерлинского района будут выделены средства на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, которые ответчик планирует направить на урегулирование задолженности истцу.

В соответствии с пунктом 4 статьи 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, если в предварительном судебном заседании присутствуют лица, участвующие в деле, либо лица, участвующие в деле, отсутствуют в предварительном судебном заседании, но они извещены о времени и месте судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия и ими не были заявлены возражения относительно рассмотрения дела в их отсутствие, суд вправе завершить предварительное судебное заседание и открыть судебное заседание в первой инстанции, за исключением случая, если в соответствии с настоящим Кодексом требуется коллегиальное рассмотрение данного дела.

О возможности перехода из предварительного судебного заседания в судебное заседание арбитражного суда первой инстанции указано в определении суда от 30.09.2021.

Копия определения суда от 30.09.2021, направленная ответчику по указанному в выписке из ЕГРЮЛ адресу, получена им 07.10.2021, что подтверждается почтовым уведомлением. 

В порядке статьи 137 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации суд признал дело подготовленным, завершил предварительное заседание и открыл судебное заседание в первой инстанции в отсутствие возражений сторон.

В силу положений статей 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено в отсутствие ответчика.

Выслушав пояснения представителя истца, исследовав материалы дела, суд установил следующее.

27.03.2021 администрация Шумерлинского района Чувашской Республики (заказчик) и общество с ограниченной ответственностью "Дортех" (подрядчик) заключили муниципальный контракт №0115300002421000002_86420 от 27.03.2021 на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в Шумерлинском районе Чувашской Республики (Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, в том числе проходящих по улицам населенных пунктов, и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов).

Согласно пункту 1.1 контракта заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательство по выполнению работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в Шумерлинском районе Чувашской Республики  (Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, в том числе проходящих по улицам населенных пунктов, и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов) (далее - Объект):

- участок автомобильной дороги общего пользования местного значения «ул. Кирова, ул. Заречная в д. Верхняя Кумашка"  км 0+000-км0+390;

- участок автомобильной дороги  «Чебоксары- Сурское» - д.Эшменейкино- д. Кадеркино-Пюкрей»  км  6+050 -км 5+505;

- участок автомобильной дороги  «Чебоксары - Сурское» - с. Ходары – д. Егоркино»  км 1+870-км1+740; км 1+540-км 0+848; км2,000-км1,900;

- участок автомобильной дороги  «Чебоксары - Сурское» - с.Туваны-Малые Туваны» км 0+770-км0+850; км0+900-км0+955; км1+900-км2+120; км2+277-км2+372;

- участок автомобильной дороги «Чебоксары - Сурское» - д.Молгачкино» км 1+050- км 0+826,

с надлежащим качеством в соответствии с условиями настоящего контракта, в сроки предусмотренные Контрактом, с учетом графика выполнения строительно-монтажных работ (приложение №1), техническим заданием (приложение №2), разработанной сметной документацией (приложение №3) и сдать их результат заказчику.

В соответствии с пунктом 2.1 контракта общая стоимость работ по настоящему контракту составляет 18494225 руб., включая НДС 20% - 3082370 руб. 83 коп.

Пунктом 2.9. контракта предусмотрено, что расчет за выполненные работы производится в соответствии с пунктом 2.7. настоящего Контракта (промежуточный платеж), после выполнения Подрядчиком работ в соответствии с графиком выполнения работ (приложение № 1 к Контракту), не более, чем в течение 30 (тридцати) дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), и устранения возможных замечаний, счетов, счетов-фактур, путем перечисления денежных средств по реквизитам, указанным в настоящем Контракте. Заказчик осуществляет текущие платежи не позднее, чем в течение 30 (тридцати) дней с момента подписания заказчиком актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и предоставлении счетов (счетов-фактур). Окончательная оплата выполненных Подрядчиком работ производится в течение 30 дней с момента подписания заказчиком актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), счета (счета-фактуры) на основании Акта приемочной комиссии.

Согласно пункту 2.7 контракта оплата работ в рамках настоящего контракта осуществляется заказчиком в соответствии с выделенными в установленными порядке бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств бюджетов на данные цели, в том числе:

1) в 2021 г. в сумме 4364816 руб. 04 коп., из них: за счет средств, поступивших в виде субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики, в размере 4146575 руб. по коду бюджетной классификации 9030409Ч2103S4181244; за счет средств бюджета Шумерлинского района Чувашской Республики в размере 218241 руб. 04 коп. по коду бюджетной классификации 9030409Ч2103S4181244; 

2) в 2022 г. в сумме 7081504 руб. 48 коп., из них: за счет средств, поступивших в виде субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики, в размере 6727428 руб. по коду бюджетной классификации 9030409Ч2103S4181244; за счет средств бюджета Шумерлинского района Чувашской Республики в размере 354076 руб. 48 коп. по коду бюджетной классификации 9030409Ч2103S4181244;

3) в 2023 г. в сумме 7047904 руб. 48 коп., из них: за счет средств, поступивших в виде субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики, в размере 6695509 руб. по коду бюджетной классификации 9030409Ч2103S4181244; за счет средств бюджета Шумерлинского района Чувашской Республики в размере 352395 руб. 48 коп. по коду бюджетной классификации 9030409Ч2103S4181244.

В соответствии с пунктом 4.1 контракта работы должны быть выполнены: в 2021 году: с 01.05.2021 по 18.06.2021; в 2022 году: с 01.05.2022 по 18.06.2022; в 2023 году: с 01.05.2023 по 18.06.2023. 

27.04.2021 сторонами подписано Дополнительное соглашение, согласно которому пункт 2.7 контракта изменен и изложен в следующей редакции: оплата работ в рамках настоящего контракта осуществляется заказчиком в соответствии с выделенными в установленными порядке бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств бюджетов на данные цели, в том числе:

1) в 2021 г. в сумме 10063862 руб. 01 коп., из них: за счет средств, поступивших в виде субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики, в размере 9560668 руб. 91 коп. по коду бюджетной классификации 903040942103S4181244; за счет средств бюджета Шумерлинского района Чувашской Республики в размере 503193 руб. 10 коп. по коду бюджетной классификации 903040942103S4181244;

2) в 2022 г. в сумме 8430362 руб. 99 коп., из них: за счет средств, поступивших в виде субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики, в размере 8008844 руб. 84 коп. по коду бюджетной классификации 903040942103S4181244; за счет средств бюджета Шумерлинского района Чувашской Республики в размере 421518 руб. 15 коп. по коду бюджетной классификации 903040942103S4181244.

Пункт 4.1 контракта согласно дополнительному соглашению от 27.04.2021 изложен в следующей редакции: работы, предусмотренные настоящим контрактом, должны быть выполнены: в 2021 г.: с 01.05.2021 по 18.06.2021; в 2022 г.: с 01.05.2022 по 18.06.2022.

23.07.2021 сторонами подписано Дополнительное соглашение, согласно которому пункт 2.1 контракта изменен и изложен в следующей редакции: общая стоимость работ по настоящему контракту составляет 17935071 руб. 05 коп., включая НДС 20% - 2989178 руб. 51 коп.

Пункт 2.7 контракта согласно дополнительному соглашению от 23.07.2021 изложен в следующей редакции: оплата работ в рамках настоящего контракта осуществляется заказчиком в соответствии с выделенными в установленными порядке бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств бюджетов на данные цели, в том числе:

1) в 2021 г. в сумме 10919292 руб. 43 коп., из них: за счет средств, поступивших в виде субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики, в размере 10373327 руб. 81 коп. по коду бюджетной классификации 903040942103S4181244; за счет средств бюджета Шумерлинского района Чувашской Республики в размере 545964 руб. 62 коп. по коду бюджетной классификации 903040942103S4181244;

2) в 2022 г. в сумме 7015778 руб. 62 коп., из них: за счет средств, поступивших в виде субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики, в размере 6664989 руб. 69 коп. по коду бюджетной классификации 9030409 42103S4181244; за счет средств бюджета Шумерлинского района Чувашской Республики в размере 350788 руб. 93 коп. по коду бюджетной классификации 903040942103S4181244.

Пункт 4.1 контракта согласно дополнительному соглашению от 23.07.2021 изложен в следующей редакции: работы, предусмотренные настоящим контрактом, должны быть выполнены: в 2021 г.: с 01.05.2021 по 30.07.2021; в 2022 г.: с 01.05.2022 по 18.06.2022.

Как следует из материалов дела, истцом выполнены работы согласно справке о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 №1 от 01.07.2021, актам выполненных работ по форме КС-2 №№1,2,3 от 01.07.2021 на сумму 10063862 руб. 01 коп., справке о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 №104 от 26.07.2021, актам выполненных работ по форме КС-2 №№4,5 от 26.07.2021 на сумму 855430 руб. 42 коп.

Работы, выполненные подрядчиком, оплачены заказчиком частично. По данным истца, задолженность ответчика по контракту составляет 8443091 руб. 54 коп. Ненадлежащее исполнение ответчиком обязательства по оплате работ явилось основанием для обращения истца в арбитражный суд с иском. 

Согласно статьям 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, односторонний отказ от исполнения обязательств допускается в исключительных случаях, прямо указанных в законе.

В соответствии со статьей 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

По правилам статьи 746 ГК РФ оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса.

Факт выполнения работ подтвержден материалами дела. 

Доказательства надлежащей оплаты выполненных работ ответчик суду не представил.

При таких обстоятельствах требование истца о взыскании долга в размере 8443091 руб. 54 коп. подлежит удовлетворению.

Истцом заявлено требование о взыскании 105001 руб. 94 коп. пени за период с 03.08.2021 по 23.09.2021 и далее по день фактической оплаты суммы долга.

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков (пункт 1 статьи 330 ГК РФ). 

Пунктом 9.2 контракта установлено, что в случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 

Проверив представленный истцом расчет пеней и учитывая сроки оплаты работ, установленные пунктом 2.9 контракта, суд удовлетворяет требование истца о взыскании пени в сумме 169638 руб. 80 коп. за период с 03.08.2021 по 28.10.2021 (день вынесения решения). Лимиты ежегодного финансирования, предусмотренные пунктом 2.7 контракта, не превышены, сроки оплаты не изменяют. 

По смыслу статьи 330 ГК РФ истец вправе требовать присуждения неустойки по день фактического исполнения обязательства. В этой связи суд считает правомерным требование истца о взыскании с ответчика неустойки по день фактической оплаты долга. 

Расходы по государственной пошлине на основании статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

Р Е Ш И Л:

Иск удовлетворить.

Взыскать с администрации Шумерлинского района Чувашской Республики в пользу общества с ограниченной ответственностью "Дортех" 8`443`091 (Восемь миллионов четыреста сорок три тысячи девяносто один) руб. 54 коп. долга, 169`638 (Сто шестьдесят девять тысяч шестьсот тридцать восемь) руб. 80 коп. пеней за период с 03.08.2021 по 28.10.2021, 65`740 (Шестьдесят пять тысяч семьсот сорок) руб. расходов по государственной пошлине, с 29.10.2021 начисление неустойки производить по день фактической уплаты долга в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на дату уплаты пеней. 

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд, г. Владимир, в течение месяца с момента его принятия.

Решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в кассационном порядке в Арбитражный суд Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, при условии, что оно было предметом рассмотрения Первого арбитражного апелляционного суда или Первый арбитражный апелляционный суд отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Кассационная жалоба может быть подана в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемых решения, постановления арбитражного суда.

Жалобы подаются через Арбитражный суд Чувашской Республики – Чувашии.

Судья

О.Е. Владимирова