ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А40-15200/20-151-120

г. Москва

20 июля 2020 года

Резолютивная часть решения объявлена 13 июля 2020 года 

Решение в полном объеме изготовлено 20 июля 2020 года

Арбитражный суд г. Москвы в составе: 

Судьи Вольской К.В.

при ведении протокола помощником судьи Поддубным Е.О.

рассмотрев в открытом судебном заседании дело

по исковому заявлению ООО «СТРОЙМАКС» (ОГРН: 

<

***>)

к ответчику ООО «СК «ВИК» (ОГРН: 

<

***>)

о взыскании 845 713, 42 руб.

при участии

от истца: ФИО1 по доверенности от 09.01.2020

от ответчика: ФИО2 по доверенности от 23.03.2020

У С Т А Н О В И Л:

ООО «СТРОЙМАКС» просит взыскать с ООО «СК «ВИК» задолженность по договорам: №17/01 от 01.01.2017;  №16/39 от 16.11.2016; №16/40 от 26.12.2016 в сумме 768 830, 39 руб., а также договорную неустойку в размере 76 883, 03 руб. 

Протокольным определением от 13.07.2020в удовлетворении ходатайства ответчика о выделении требований в отдельное производство отказано; в удовлетворении ходатайства ответчика о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора ООО «РИКС» - отказано. 

Выслушав представителя истца, ответчика, исследовав письменные доказательства, суд находит иск подлежащим удовлетворению.

Как следует из материалов дела и представленных доказательствах, между ООО «РИКС» (Подрядчик, Первоначальный кредитор) и ООО «СК «ВИК» (Ответчик) были заключены следующие договоры строительного подряда: 

1.Договор №17/01 от 01.01.2017г. (Приложение №6). Стоимость работ по договору, согласованная в Протоколе твердой договорной цены (Приложение №6)  составляет 524 881 руб. 41 коп. включая НДС 18%. Согласно п.12.1, 12.2 Договора, оплата выполненных работ производится в течение 90 дней после подписания акта приёмки в размере 95% от установленной стоимости работ (5% выплачиваются после оформления полиса страхования выполненных работ, в течение 90 банковских дней). Акт №1 приемки выполненных работ по форме КС-2 подписан Ответчиком 31.01.2017г. (Приложение №7), чем подтверждается надлежащее выполнение Подрядчиком своих обязательств по Договору. Тем самым Ответчик принял на себя обязательство уплатить Подрядчику 52 4881 руб. 41 коп., в том числе 95% не позднее 02 мая 2017г. (с учетом выходных и праздничных дней), а 5% - не позднее 06.06.2017г. Поскольку на настоящее время просрочка обязательства превышает 100 дней, согласно п.16.5 Договора максимальный размер договорной неустойки ограничен 10% от суммы задолженности и составляет 52 488 рублей 14 коп.

2.Договор №16/39 от 16.11.2016г. (Приложение №8). Стоимость работ по договору, согласованная в Протоколе твердой договорной цены (Приложение №8) составляет 973687 руб. 29 коп. включая НДС 18%. Согласно п.12.1, 12.2 Договора, оплата выполненных работ производится в течение 90 дней после подписания акта приёмки в размере 95% от установленной стоимости работ (5% выплачиваются после оформления полиса страхования выполненных работ, в течение 90 банковских дней). Акт №1 приемки выполненных работ по форме КС-2 подписан Ответчиком 30.11.2016г. (Приложение №9), чем подтверждается надлежащее выполнение Подрядчиком своих обязательств по Договору. Тем самым Ответчик принял на себя обязательство уплатить Подрядчику 973687 руб. 29 коп., в том числе 95% не позднее 28 февраля 2017г. (с учетом выходных и праздничных дней), а 5% - не позднее 05.04.2017г. Фактически Ответчик частично погасил задолженность на сумму 925 002 руб. 93 коп. 14.12.2016г. и 16.12.2016г. Остаток задолженности составляет 48 684 руб. 36 коп. Поскольку на настоящее время просрочка обязательства превышает 100 дней, согласно п.16.5 Договора максимальный размер договорной неустойки ограничен 10% от суммы задолженности и составляет 4 868 рублей 43 коп.

3.Договор №16/40 от 26.12.2016г. (Приложение №10). Стоимость работ по договору, согласованная в Протоколе твердой договорной цены (Приложение №10) составляет 177264 руб. 62 коп. включая НДС 18%. Согласно п.12.1, 12.2 Договора, оплата выполненных работ производится в течение 90 дней после подписания акта приёмки в размере 95% от установленной стоимости работ (5% выплачиваются после оформления полиса страхования выполненных работ, в течение 90 банковских дней). Акт №1 приемки выполненных работ по форме КС-2 подписан Ответчиком 31.12.2016г. (Приложение №11), чем подтверждается надлежащее выполнение Подрядчиком своих обязательств по Договору. Тем самым Ответчик принял на себя обязательство уплатить Подрядчику 177264 руб. 62 коп., в том числе 95% не позднее 31 марта 2017г. (с учетом выходных и праздничных дней), а 5% - не позднее 10.05.2017г. Поскольку на настоящее время просрочка обязательства превышает 100 дней, согласно п.16.5 Договора максимальный размер договорной неустойки ограничен 10% от суммы задолженности и составляет 17 726 рублей 46 коп.

Истцом в адрес ответчика была направлена претензия с требованием об оплате задолженности. Требования претензии не исполнены, задолженность не оплачена. 

Подрядчик заключил с ООО «Строймакс» (Истец) Договор уступки прав (цессии) №14/06-2019 от 14 июня 2019, согласно которому все обязательства Ответчика из перечисленных выше договоров строительного подряда перешли к Истцу. Ответчик был уведомлен первоначальным кредитором об уступке прав требования и перемене кредитора (уведомление №124 от 18.06.2019).

Невыполнение обязательств ответчика по оплате выполненных работ послужили основанием для обращения с указанным исковым заявлением. 

Удовлетворяя требования в полном объеме, суд учитывает следующее.

Согласно статьям 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются за исключением случаев, предусмотренных законом.

По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его (ст. 702 ГК РФ).

В договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки) (ст. 708 ГК РФ).

Оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса (ст. 746 ГК РФ).

Поскольку в материалы дела ответчиком не представлено доказательств оплаты задолженности, денежные средства в размере 768 830, 39 руб., подлежат взысканию в пользу истца. 

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков (ст. 330 ГК РФ).

Согласно п. 16.5 договоров, в случае просрочки оплаты выполненных подрядчиком работ, генподрядчик уплачивает неустойку в размере 0.1% от суммы задолженности за каждый день просрочки платежа, но не более 10% от суммы задолженности. 

Истцом произведен расчет, согласно которому, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию неустойка по договорам: №17/01 от 01.01.2017 - 52 488 рублей 14 коп; №16/39 от 16.11.2016 - 4 868 рублей 43 коп; №16/40 от 26.12.2016 - 17 726 рублей 46 коп. 

Рассмотрев представленный расчет, суд признает его методологически и арифметически верным, контррасчет ответчиком не представлен, возражений по расчету истца не заявлено, как и ходатайство о применении положений ст. 333 ГК РФ. 

Изучив материалы дела, в том числе предмет и основание заявленного иска, действуя в строгом соответствии со ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд, оценив представленные в материалы дела доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном их исследовании, оценив также относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности, находит требования истца подлежащими удовлетворению в полном объеме.

Судебные расходы подлежат распределению в порядке ст. 110 АПК РФ. 

На основании статей 307-309, 330, 702, 708, 711, 746 Гражданского кодекса Российской Федерации руководствуясь ст. ст. 110, 167, 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать с ООО «СК «ВИК» (ОГРН: 

<

***>) в пользу ООО «СТРОЙМАКС» (ОГРН: 

<

***>) задолженность в размере 768 830 руб. 39 коп., неустойку в размере 76 883 руб. 03 коп., а также расходы на оплату госпошлины в размере 19 914 рублей.

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путем подачи апелляционной жалобы в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья       К.В. Вольская