АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А76-18940/2016

05 июля 2019 года

г. Челябинск

Резолютивная часть решения подписана 05 июля 2019 года

Решение изготовлено в полном объеме 05 июля 2019 года

Судья Арбитражного суда Челябинской области Костарева И.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Челябспецстрой», г.Челябинск,

к акционерному обществу «Челябинский радиозавод «Полет», г. Челябинск, 

о взыскании 10 358 499 рублей 44 копеек,

при участии в судебном заседании:

от истца: ФИО2, представителя, действующего на основании доверенности от 01.08.2016, представлен паспорт, ФИО3, представителя, действующей на основании доверенности от 12.01.2017, представлен паспорт, ФИО4, директора, действующего на основании протокола № 4 от 24.04.2017, представлен паспорт, 

от ответчика: ФИО5, представителя, действующей на основании доверенности от 09.01.2019, представлен паспорт, 

УСТАНОВИЛ:

В Арбитражный суд Челябинской области 09.08.2016 обратилось общество с ограниченной ответственностью «Челябспецстрой», г.Челябинск, с исковым заявлением к акционерному обществу «Челябинский радиозавод «Полет», г. Челябинск, о взыскании 10 358 499 рублей 44 копеек.

Определением Арбитражного суда Челябинской области от 09.02.2017 произведена замена судьи Сафронова М.И. судьей Костаревой И. В. и передано дело № А76-18940/2016 на рассмотрение судье Костаревой И. В.

Определением Арбитражного суда Челябинской области от 23.03.2017 назначена по делу судебная экспертизу. Производство экспертизы поручено Южно-Уральской торгово- промышленной палате, г. Челябинск, экспертам ФИО6, ФИО7. Производство по делу приостановлено.

Определением Арбитражного суда Челябинской области от 26.01.2018 производство по делу возобновлено.

Определением Арбитражного суда Челябинской области от 21.08.2018 назначена по делу повторная судебная экспертизу. Производство экспертизы поручено ООО «Стандарт оценки», г. Челябинск, эксперту ФИО8. Производство по делу приостановлено.

Определением Арбитражного суда Челябинской области от 27.03.2019 производство по делу возобновлено. В порядке ст. 49 АПК РФ принято от истца уточнение в части взыскания с ответчика основного долга – 9 101 808 руб. 20 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 2 750 691 руб. 72 коп. по день фактической оплаты.

В судебном заседании 03.07.2019 в порядке ст. 163 АПК РФ,  был объявлен перерыв до 04.07.2019 до 11 час. 30 мин.

О перерыве в судебном заседании лица, участвующие в деле,  извещены путем размещения публичного объявления на официальном сайте суда в сети Интернет (Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25.12.2013 № 99 «О процессуальных сроках»).

Судебное заседание продолжено после перерыва 04.07.2019.

В судебном заседании 04.07.2019 в порядке ст. 163 АПК РФ,  был объявлен перерыв до 05.07.2019 до 10 час. 20 мин.

О перерыве в судебном заседании лица, участвующие в деле,  извещены путем размещения публичного объявления на официальном сайте суда в сети Интернет (Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25.12.2013 № 99 «О процессуальных сроках»).

Судебное заседание продолжено после перерыва 05.07.2019.

В судебном заседании 03.07.2019, в порядке ст. 49 АПК РФ принято от истца уточнение в части взыскания с ответчика основного долга – 8 575 760  руб. 83 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 2 783 563 руб. 55 коп. по день фактической оплаты.

В судебном заседании 04.07.2019, в порядке ст. 49 АПК РФ принято от истца уточнение в части взыскания с ответчика основного долга – 8 140 616  руб. 62 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 2 642 514 руб. 55 коп. по день фактической оплаты.

В судебном заседании 05.07.2019, в порядке ст. 49 АПК РФ принято от истца уточнение в части взыскания с ответчика основного долга – 8 140 616  руб. 62 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами в размере  2 643 813 руб. 56 коп., по день фактической оплаты.

В судебном заседании истец поддержал исковые требования в полном объеме.

Ответчик в судебном заседании против иска возражал по основаниям, изложенным в отзыве на иск.

Заслушав истца, ответчика, изучив материалы дела, арбитражный суд считает иск подлежащим удовлетворению по следующим основаниям. 

14.04.2015 между ООО «Челябспецстрой» (Подрядчик) и АО «Челябинский радиозавод «ПОЛЕТ» (Заказчик) заключен договор №31502181820 подряда (далее по тексту – «Договор»).

Согласно п. 1.1. Договора Подрядчик обязуется в установленный Договором срок выполнить работы в рамках выполнения программы технического перевооружения в: корпусе очистных сооружений (далее – Объект), расположенного по адресу: 

<

...>, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять выполненные работы и уплатить обусловленную Договором цену.

В соответствии с п. 5.3. Договора, оплата работа, указанных в п. 1.1. настоящего договора, производиться Заказчиком за фактически выполненный и принятый объем работ по акту приемке выполненных работ (форма КС-2) и справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), в течении 10 (десяти) рабочих дней, с момента их подписания Сторонами и представления Подрядчиком счета и счет-фактуры.

30.04.2015 между Подрядчиком и Заказчиком подписан Акт о приемке выполненных работ №1 (форма КС-2) и Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) на сумму 2 836 630,94 (два миллиона восемьсот тридцать шесть тысяч шестьсот тридцать) рублей, 94 коп.

29.05.2015 между Подрядчиком и Заказчиком подписан Акт о приемке выполненных работ №2 (форма КС-2) и Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) на сумму 269 440,19 (двести шестьдесят тысяч четыреста сорок) рублей, 19 коп.

30.06.2015 между Подрядчиком и Заказчиком подписан Акт о приемке выполненных работ №3 (форма КС-2) и Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) на сумму 490 736,84 (четыреста девяносто тысяч семьсот тридцать шесть) рублей, 84 коп.

30.06.2015  между Подрядчиком и Заказчиком подписан Акт о приемке выполненных работ №4 (форма КС-2) и Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) на сумму 132 590,32 (сто тридцать две тысячи пятьсот девяносто) рублей, 32 коп.

31.08.2015 между Подрядчиком и Заказчиком подписан Акт о приемке выполненных работ №5 (форма КС-2) и Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) на сумму 877 472 (восемьсот семьдесят семь тысяч четыреста семьдесят два) рубля.

Всего между ОАО «ЧРЗ «Полет» ООО «Челябспецстрой» по договору №31502181820 от 14.04.2015 подписано Актов о приемке выполненных работ на сумму 4 606 870,29 (четыре миллиона шестьсот шесть тысяч восемьсот семьдесят) рублей, 29 коп.

ОАО «ЧРЗ «Полет» произвело оплату за выполненные работы ООО «Челябспецстрой» по договору №31502181820 от 14.04.2015 в размере 4 029 398,29 (четыре миллиона двадцать девять тысяч триста девяносто восемь) рублей, 29 коп.

Согласно заключению эксперта №266-2018-10 от 19.03.2019 года стоимость фактически выполненных ООО "Челябспецстрой" работ по договору №31502181820 от 14.04.2015, исходя из условий договоров, с учетом данных экспертного осмотра и после корректировки смет в части задвоения работ и материалов составила - 4 386 306,69 (четыре миллиона триста восемьдесят шесть тысяч триста шесть) рублей, 69 коп. 

Таким образом, задолженность ОАО «ЧРЗ «Полет» перед ООО «Челябспецстрой» за выполненные работы по договору №31502181820 от 14.04.2015 составляет: 356 908,40 (триста пятьдесят шесть тысяч девятьсот восемь) рублей, 40 коп.

Проценты за пользование чужими денежными средствами в соответствии со ст. 395 ГК РФ по договору №31502181820 от 14.04.2015 за период с 03.10.2015 г. по 04.07.2019 г. составляют: 114 053,25 (сто четырнадцать тысяч пятьдесят три) рубля, 25 коп.

08.05.2015  между ООО «Челябспецстрой» (Подрядчик) и АО «Челябинский радиозавод «ПОЛЕТ» (Заказчик) заключен договор №31502313243 подряда (далее по тексту – «Договор»).

Согласно п. 1.1. Договора Подрядчик обязуется в установленный Договором срок выполнить работы в рамках выполнения программы технического перевооружения: Корпус очистных сооружений производства. Электроподключение вентоборудования. (далее – Объект), расположенного по адресу: 

<

...>, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять выполненные работы и уплатить обусловленную Договором цену.

В соответствии с п. 5.3. Договора, оплата работ, указанных в п. 1.1. настоящего договора, производиться Заказчиком за фактически выполненный и принятый объем работ по акту приемке выполненных работ (форма КС-2) и справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), в течении 10 (десяти) рабочих дней, с момента из подписания Сторонами и представления Подрядчиком счета и счет-фактуры.

29.05.2015  между Подрядчиком и Заказчиком подписан Акт о приемке выполненных работ №1 (форма КС-2) и Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) на сумму 1 324 025,36 (один миллион триста двадцать четыре тысячи двадцать пять) рублей, 36 коп.

30.06.2015 между Подрядчиком и Заказчиком подписан Акт о приемке выполненных работ №2 (форма КС-2) и Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) на сумму 413 744,12 (четыреста тринадцать тысяч семьсот сорок четыре) рубля, 12 коп.

31.08.2015 между Подрядчиком и Заказчиком подписан Акт о приемке выполненных работ №3 (форма КС-2) и Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) на сумму 263 552,06 (двести шестьдесят три тысячи пятьсот пятьдесят два) рубля, 06 коп.

Всего между ОАО «ЧРЗ «Полет» ООО «Челябспецстрой» по договору №31502313243 от 08.05.2015 подписано Актов о приемке выполненных работ на сумму 2 001 321,54 (два миллиона одна тысяча триста двадцать один) рублей, 54 коп.

ОАО «ЧРЗ «Полет» произвело оплату за выполненные работы ООО «Челябспецстрой» по договору №31502313243 от 08.05.2015 в размере 1 737 769,48 (один миллион семьсот тридцать семь тысяч семьсот шестьдесят девять) рублей, 48 коп.

Согласно заключению эксперта №266-2018-10 от 19.03.2019 года стоимость фактически выполненных ООО "Челябспецстрой" работ по договору №31502313243 от 08.05.2015 г., исходя из условий договоров, с учетом данных экспертного осмотра и после корректировки смет в части задвоения работ и материалов составила – 1 711 346,86 (один миллион семьсот одиннадцать тысяч триста сорок шесть) рублей, 86 коп. 

Таким образом, ОАО «ЧРЗ «Полет» излишне оплатило ООО «Челябспецстрой» за выполненные работы по договору №31502313243 от 08.05.2015 сумма переплаты составляет 26 422,62 (двадцать шесть тысяч четыреста двадцать два) рубля, 62 коп.

08.05.2015  между ООО «Челябспецстрой» (Подрядчик) и АО «Челябинский радиозавод «ПОЛЕТ» (Заказчик) заключен договор №31502313247 подряда (далее по тексту – «Договор»).

Согласно п. 1.1. Договора Подрядчик обязуется в установленный Договором срок выполнить работы в рамках выполнения программы технического перевооружения: Корпус очистных сооружений. (далее – Объект), расположенного по адресу: 

<

...>, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять выполненные работы и уплатить обусловленную Договором цену.

В соответствии с п. 5.3. Договора, оплата работ, указанных в п. 1.1. настоящего договора, производиться Заказчиком за фактически выполненный и принятый объем работ по акту приемке выполненных работ (форма КС-2) и справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), в течении 10 (десяти) рабочих дней, с момента из подписания Сторонами и представления Подрядчиком счета и счет-фактуры.

29.05.2015 между Подрядчиком и Заказчиком подписан Акт о приемке выполненных работ №1 (форма КС-2) и Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) на сумму 3 562 131,60 (три миллиона пятьсот шестьдесят тысяч сто тридцать один) рублей, 60 коп.

30.06.2015 между Подрядчиком и Заказчиком подписан Акт о приемке выполненных работ №2 (форма КС-2) и Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) на сумму 1 560 651,49 (один миллион пятьсот шестьдесят тысяч шестьсот пятьдесят один) рубль, 49 коп.

31.08.2015 между Подрядчиком и Заказчиком подписан Акт о приемке выполненных работ №3 (форма КС-2) и Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) на сумму 1 962 423,40 (один миллион девятьсот шестьдесят две тысячи четыреста двадцать три) рубля, 40 коп.

Всего между ОАО «ЧРЗ «Полет» ООО «Челябспецстрой» по договору №31502313247 от 08.05.2015 подписано Актов о приемке выполненных работ на сумму 7 085 206,49 (семь миллионов восемьдесят пять тысяч двести шесть) рублей, 49 коп.

ОАО «ЧРЗ «Полет» произвело оплату за выполненные работы ООО «Челябспецстрой» по договору №31502313247 от 08.05.2015 в размере 6 122 783,09 (шесть миллионов сто двадцать две тысячи семьсот восемьдесят три) рубля, 09 коп.

Согласно заключению эксперта №266-2018-10 от 19.03.2019 года стоимость фактически выполненных ООО "Челябспецстрой" работ по договору №31502313247 от 08.05.2015 г., исходя из условий договоров, с учетом данных экспертного осмотра и после корректировки смет в части задвоения работ и материалов составила – 6 697 393,45 (шесть миллионов шестьсот девяносто семь тысяч триста девяносто три) рубля, 45 коп. 

Таким образом, задолженность ОАО «ЧРЗ «Полет» перед ООО «Челябспецстрой» за выполненные работы по договору №31502313247 от 08.05.2015. составляет: 574 600,36 (пятьсот семьдесят четыре тысячи шестьсот) рублей, 36 коп.

Проценты за пользование чужими денежными средствами в соответствии со ст. 395 ГК РФ по договору №31502313247 от 08.05.2015 за период с 03.10.2015 по 04.07.2019 составляет: 219 323,79 (двести девятнадцать тысяч триста двадцать три) рубля, 79 коп.

16.06.2015  между ООО «Челябспецстрой» (Подрядчик) и АО «Челябинский радиозавод «ПОЛЕТ» (Заказчик) заключен договор №31502465282 подряда (далее по тексту – «Договор»).

Согласно п. 1.1. Договора Подрядчик обязуется в установленный Договором срок выполнить услуги и работы в рамках федеральной программы технического перевооружения на территории, в зданиях и сооружениях ОАО «ЧРЗ «Полет» (далее – Объект), расположенного по адресу: 

<

...>, Корпус очистных сооружений. Сантехнические работы, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять выполненные работы и уплатить обусловленную Договором цену.

В соответствии с п. 5.3. Договора, оплата работ, указанных в п. 1.1. настоящего договора, производиться Заказчиком за фактически выполненный и принятый объем работ по акту приемке выполненных работ (форма КС-2) и справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), в течении 10 (десяти) рабочих дней, с момента из подписания Сторонами и представления Подрядчиком счета и счет-фактуры. Заказчик обязуется произвести авансовый платеж в сумме 500 000 рублей.

29.02.2016  между Подрядчиком и Заказчиком подписан Акт о приемке выполненных работ №1 (форма КС-2) и Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) на сумму 739 452,78 (семьсот тридцать девять тысяч четыреста пятьдесят два) рубля, 78 коп.

29.02.2016  между Подрядчиком и Заказчиком подписан Акт о приемке выполненных работ №1.1. (форма КС-2) и Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) на сумму 58 428,10 (пятьдесят восемь тысяч четыреста двадцать восемь) рублей, 10 коп.

Всего между ОАО «ЧРЗ «Полет» ООО «Челябспецстрой» по договору №31502465282 от 16.06.2015 подписано Актов о приемке выполненных работ на сумму 797 880,88 (семьсот девяносто семь тысяч восемьсот восемьдесят) рублей, 88 коп.

ОАО «ЧРЗ «Полет» произвело оплату за выполненные работы ООО «Челябспецстрой» по договору №31502465282 от 16.06.2015 в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей, 00 коп.

Согласно заключению эксперта №266-2018-10 от 19.03.2019 года стоимость фактически выполненных ООО "Челябспецстрой" работ по договору №31502465282 от 16.06.2015 г., исходя из условий договоров, с учетом данных экспертного осмотра и после корректировки смет в части задвоения работ и материалов составила – 781 834,43 (семьсот восемьдесят одна тысяча восемьсот тридцать четыре) рубля, 43 коп. 

Таким образом, задолженность ОАО «ЧРЗ «Полет» перед ООО «Челябспецстрой» за выполненные работы по договору №31502465282 от 16.06.2015, составляет: 281 834,43 (двести восемьдесят одна тысяча восемьсот тридцать четыре) рубля, 43 коп. 

Проценты за пользование чужими денежными средствами в соответствии со ст. 395 ГК РФ по договору №31502465282 от 16.06.2015 за период с 17.03.2016 по 04.07.2019 составляют: 79 061,37 (семьдесят девять тысяч шестьдесят один) рубль, 37 коп.

16.06.2015 между ООО «Челябспецстрой» (Подрядчик) и АО «Челябинский радиозавод «ПОЛЕТ» (Заказчик) заключен договор №31502465279 подряда (далее по тексту – «Договор»).

Согласно п. 1.1. Договора Подрядчик обязуется в установленный Договором срок выполнить услуги и работы в рамках федеральной программы технического перевооружения на территории, в зданиях и сооружениях ОАО «ЧРЗ «Полет» (далее – Объект), расположенного по адресу: 

<

...>, Корпус №41, Цех №25. Участок поверхностного монтажа. Электромонтажные работы, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять выполненные работы и уплатить обусловленную Договором цену.

В соответствии с п. 5.3. Договора, оплата работ, указанных в п. 1.1. настоящего договора, производиться Заказчиком за фактически выполненный и принятый объем работ по акту приемке выполненных работ (форма КС-2) и справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), в течении 10 (десяти) рабочих дней, с момента из подписания Сторонами и представления Подрядчиком счета и счет-фактуры. Заказчик обязуется произвести авансовый платеж в сумме 500 000 рублей.

31.07.2015 между Подрядчиком и Заказчиком подписан Акт о приемке выполненных работ №1 (форма КС-2) и Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) на сумму 673 665,39 (шестьсот семьдесят три тысячи шестьсот шестьдесят пять) рублей, 39 коп.

31.08.2015 между Подрядчиком и Заказчиком подписан Акт о приемке выполненных работ №2 (форма КС-2) и Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) на сумму 316 027,75 (триста шестнадцать тысяч двадцать семь) рублей, 75 коп.

Всего между ОАО «ЧРЗ «Полет» ООО «Челябспецстрой» по договору №31502465279 от 16.06.2015 г. подписано Актов о приемке выполненных работ на сумму 989 693,14 (девятьсот восемьдесят девять тысяч шестьсот девяносто три) рубля, 14 коп.

ОАО «ЧРЗ «Полет» произвело оплату за выполненные работы ООО «Челябспецстрой» по договору №31502465279 от 16.06.2015 в размере 673 665,39 (шестьсот семьдесят три тысячи шестьсот шестьдесят пять) рублей, 39 коп.

Согласно заключению эксперта №266-2018-10 от 19.03.2019 года стоимость фактически выполненных ООО "Челябспецстрой" работ по договору №31502465279 от 16.06.2015 г., исходя из условий договоров, с учетом данных экспертного осмотра и после корректировки смет в части задвоения работ и материалов составила – 929 212,59 (девятьсот двадцать девять тысяч двести двенадцать) рублей, 59 коп. 

Таким образом, задолженность ОАО «ЧРЗ «Полет» перед ООО «Челябспецстрой» за выполненные работы по договору №31502465279 от 16.06.2015 составляет: 255 547,20 (двести пятьдесят пять тысяч пятьсот сорок семь) рублей, 20 коп. 

Проценты за пользование чужими денежными средствами в соответствии со ст. 395 ГК РФ по договору №31502465279 от 16.06.2015 за период с 03.10.2015  по 04.07.2019 составляют: 81 662,38 (восемьдесят одна тысяча шестьсот шестьдесят два) рубля, 38 коп.

16.06.2015 между ООО «Челябспецстрой» (Подрядчик) и АО «Челябинский радиозавод «ПОЛЕТ» (Заказчик) заключен договор №31502465277 подряда (далее по тексту – «Договор»).

Согласно п. 1.1. Договора Подрядчик обязуется в установленный Договором срок выполнить услуги и работы в рамках федеральной программы технического перевооружения для нужд ОАО «ЧРЗ «Полет» (далее – Объект), расположенного по адресу: 

<

...>, Корпус очистных сооружений. Монтаж теплового узла, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять выполненные работы и уплатить обусловленную Договором цену.

В соответствии с п. 5.3. Договора, оплата работ, указанных в п. 1.1. настоящего договора, производиться Заказчиком за фактически выполненный и принятый объем работ по акту приемке выполненных работ (форма КС-2) и справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), в течении 10 (десяти) рабочих дней, с момента из подписания Сторонами и представления Подрядчиком счета и счет-фактуры. Заказчик обязуется произвести авансовый платеж в сумме 1 100 000 рублей.

31.07.2015  ОАО «ЧРЗ «Полет» произвело авансовый платеж по договору подряда №31502465277 от 16.06.2015 в размере 1 100 000 рублей (платежное поручение №306 от 31.07.2015)

30.09.2015  между Подрядчиком и Заказчиком подписан Акт о приемке выполненных работ №1 (форма КС-2) и Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) на сумму 1 626 353,06 (один миллион шестьсот двадцать шесть тысяч триста пятьдесят три) рубля, 06 коп.

Всего ОАО «ЧРЗ «Полет» произвело оплату за выполненные работы ООО «Челябспецстрой» по договору №31502465277 от 16.06.2015  в размере 1 100 000 (один миллион сто тысяч) рублей, 00 коп.

Согласно заключению эксперта №266-2018-10 от 19.03.2019 года стоимость фактически выполненных ООО "Челябспецстрой" работ по договору №31502465277 от 16.06.2015 г., исходя из условий договоров, с учетом данных экспертного осмотра и после корректировки смет в части задвоения работ и материалов составила – 1 609 726,40 (один миллион шестьсот девять тысяч семьсот двадцать шесть) рублей, 40 коп. 

Таким образом, задолженность ОАО «ЧРЗ «Полет» перед ООО «Челябспецстрой» за выполненные работы по договору №31502465277 от 16.06.2015, составляет: 509 726,40 (пятьсот девять тысяч семьсот двадцать шесть) рублей, 40 коп. 

Проценты за пользование чужими денежными средствами в соответствии со ст. 395 ГК РФ по договору №31502465277 от 16.06.2015 за период с 17.10.2015 по 04.07.2019 составляют: 161 016,06 (сто шестьдесят одна тысяча шестнадцать) рублей, 06 коп.

18.06.2015 между ООО «Челябспецстрой» (Подрядчик) и АО «Челябинский радиозавод «ПОЛЕТ» (Заказчик) заключен договор №31502444917 подряда (далее по тексту – «Договор»).

Согласно п. 1.1. Договора Подрядчик обязуется в установленный Договором срок выполнить услуги и работы по реконструкции электроснабжения для нужд ОАО «ЧРЗ «Полет»: Кабельные линии ЛЭП-0,4кВ и ЛЭП-6кВ (далее – Объект), расположенного по адресу: 

<

...>, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять выполненные работы и уплатить обусловленную Договором цену.

В соответствии с п. 5.3. Договора, оплата работ, указанных в п. 1.1. настоящего договора, производиться Заказчиком за фактически выполненный и принятый объем работ по акту приемке выполненных работ (форма КС-2) и справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), в течении 10 (десяти) рабочих дней, с момента из подписания Сторонами и представления Подрядчиком счета и счет-фактуры.

09.07.2015 ОАО «ЧРЗ «Полет» произвело авансовый платеж по договору подряда №31502444917 от 18.06.2015  в размере 3 200 000 рублей (платежное поручение №652 от 09.07.2015 г.)

09.10.2015 между Подрядчиком и Заказчиком подписан Акт о приемке выполненных работ №1 (форма КС-2) и Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) на сумму 3 308 092,37 (три миллиона триста восемь тысяч девяносто два) рубля, 37 коп.

30.12.2015  между Подрядчиком и Заказчиком подписан Акт о приемке выполненных работ №2 (форма КС-2) и Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) на сумму 584 704,79 (пятьсот восемьдесят четыре тысячи семьсот четыре) рубля, 79 коп.

Всего между ОАО «ЧРЗ «Полет» ООО «Челябспецстрой» по договору №31502444917 от 18.06.2015 подписано Актов о приемке выполненных работ на сумму 3 892 797,16 (три миллиона восемьсот девяносто две тысячи семьсот девяносто семь) рублей, 16 коп.

Всего ОАО «ЧРЗ «Полет» произвело оплату за выполненные работы ООО «Челябспецстрой» по договору №31502444917 от 18.06.2015 в размере 3 200 000 (три миллиона двести тысяч) рублей, 00 коп.

Согласно заключению эксперта №266-2018-10 от 19.03.2019 года стоимость фактически выполненных ООО "Челябспецстрой" работ по договору №31502444917 от 18.06.2015 г., исходя из условий договоров, с учетом данных экспертного осмотра и после корректировки смет в части задвоения работ и материалов составила – 3 892 334,20 (три миллиона восемьсот девяносто две тысячи триста тридцать четыре) рубля, 20 коп. 

Таким образом, задолженность ОАО «ЧРЗ «Полет» перед ООО «Челябспецстрой» за выполненные работы по договору №31502444917 от 18.06.2015, составляет: 692 334,20 (шестьсот девяносто две тысячи триста тридцать четыре) рубля, 20 коп. 

Проценты за пользование чужими денежными средствами в соответствии со ст. 395 ГК РФ по договору №31502444917 от 18.06.2015 за период с 24.10.2015 по 04.07.2019 составляют: 205 160,55 (двести пять тысяч сто шестьдесят) рублей, 55 коп.

30.06.2015  между ООО «Челябспецстрой» (Подрядчик) и АО «Челябинский радиозавод «ПОЛЕТ» (Заказчик) заключен договор №31502517891 подряда (далее по тексту – «Договор»).

Согласно п. 1.1. Договора Подрядчик обязуется в установленный Договором срок выполнить услуги и работы в рамках федеральной программы технического перевооружения для нужд ОАО «ЧРЗ «Полет» (далее – Объект), расположенного по адресу: 

<

...>, Корпус очистных сооружений, кабельные линии ЛЭП-0,4 кВА до подстанции ТП-«5А», а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять выполненные работы и уплатить обусловленную Договором цену.

В соответствии с п. 5.3. Договора, оплата работ, указанных в п. 1.1. настоящего договора, производиться Заказчиком за фактически выполненный и принятый объем работ по акту приемке выполненных работ (форма КС-2) и справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), в течении 10 (десяти) рабочих дней, с момента из подписания Сторонами и представления Подрядчиком счета и счет-фактуры. Заказчик обязуется произвести авансовый платеж в сумме 2 200 000 рублей.

31.07.2015 между Подрядчиком и Заказчиком подписан Акт о приемке выполненных работ №1 (форма КС-2) и Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) на сумму 2 307 181,32 (два миллиона триста семь тысяч сто восемьдесят один) рубль, 32 коп.

Всего ОАО «ЧРЗ «Полет» произвело оплату за выполненные работы ООО «Челябспецстрой» по договору №31502517891 от 30.06.2015 в размере 2 201 276,84 (два миллиона двести одна тысяча двести семьдесят шесть) рублей, 84 коп.

Согласно заключению эксперта №266-2018-10 от 19.03.2019 года стоимость фактически выполненных ООО "Челябспецстрой" работ по договору №31502517891 от 30.06.2015, исходя из условий договоров, с учетом данных экспертного осмотра и после корректировки смет в части задвоения работ и материалов составила – 2 208 756,21 (два миллиона двести восемь тысяч семьсот пятьдесят шесть) рублей, 21 коп. 

Таким образом, задолженность ОАО «ЧРЗ «Полет» перед ООО «Челябспецстрой» за выполненные работы по договору №31502517891 от 30.06.2015 составляет: 7 479,37 (семь тысяч четыреста семьдесят девять) рублей, 37 коп. 

Проценты за пользование чужими денежными средствами в соответствии со ст. 395 ГК РФ по договору №31502517891 от 30.06.2015 за период с 15.08.2015 по 04.07.2019 составляют: 84 963,44 (восемьдесят четыре тысячи девятьсот шестьдесят три) рубля, 44 коп.

06.08.2015 между ООО «Челябспецстрой» (Подрядчик) и АО «Челябинский радиозавод «ПОЛЕТ» (Заказчик) заключен договор №31502622309 подряда (далее по тексту – «Договор»).

Согласно п. 1.1. Договора Подрядчик обязуется в установленный Договором срок выполнить электромонтажные работы в рамках оказания услуг и работ по перемещению цеховых площадей, оборудования, конструкций и оказание сопутствующих работ на территории, в зданиях и сооружениях АО «ЧРЗ «Полет», а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять выполненные работы и уплатить обусловленную Договором цену.

В соответствии с п. 5.3. Договора, оплата работ, указанных в п. 1.1. настоящего договора, производиться Заказчиком за фактически выполненный и принятый объем работ по акту приемке выполненных работ (форма КС-2) и справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), в течении 10 (десяти) рабочих дней, с момента из подписания Сторонами и представления Подрядчиком счета и счет-фактуры.

31.08.2015 между Подрядчиком и Заказчиком подписан Акт о приемке выполненных работ №1 (форма КС-2) и Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) на сумму 906 330,84 (девятьсот шесть тысяч триста тридцать) рублей, 84 коп.

31.08.2015 между Подрядчиком и Заказчиком подписан Акт о приемке выполненных работ №2 (форма КС-2) и Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) на сумму 388 915,48 (триста восемьдесят восемь тысяч девятьсот пятнадцать) рублей, 48 коп.

09.10.2015 между Подрядчиком и Заказчиком подписан Акт о приемке выполненных работ №3 (форма КС-2) и Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) на сумму 501 421,74 (пятьсот одна тысяча четыреста двадцать один) рубль, 74 коп.

30.12.2015  между Подрядчиком и Заказчиком подписан Акт о приемке выполненных работ №4 (форма КС-2) и Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) на сумму 145 177,09 (сто сорок пять тысяч сто семьдесят семь) рублей, 09 коп.

Всего между ОАО «ЧРЗ «Полет» ООО «Челябспецстрой» по договору №31502622309 от 06.08.2015 подписано Актов о приемке выполненных работ на сумму 1 941 845,15 (один миллион девятьсот сорок одна тысяча восемьсот сорок пять) рублей, 15 коп.

ОАО «ЧРЗ «Полет» не произвело оплату за выполненные работы ООО «Челябспецстрой» по договору №31502622309 от 06.08.2015.

Согласно заключению эксперта №266-2018-10 от 19.03.2019 года стоимость фактически выполненных ООО "Челябспецстрой" работ по договору №31502622309 от 06.08.2015, исходя из условий договоров, с учетом данных экспертного осмотра и после корректировки смет в части задвоения работ и материалов составила – 1 822 318,16 (один миллион восемьсот двадцать две тысячи триста восемнадцать) рублей, 16 коп. 

Таким образом, задолженность ОАО «ЧРЗ «Полет» перед ООО «Челябспецстрой» за выполненные работы по договору №31502622309 от 06.08.2015, составляет: 1 822 318,16 (один миллион восемьсот двадцать две тысячи триста восемнадцать) рублей, 16 коп.

Проценты за пользование чужими денежными средствами в соответствии со ст. 395 ГК РФ по договору №31502622309 от 06.08.2015 за период с 03.10.2015 по 04.07.2019 составляют: 576 618,02 (пятьсот семьдесят шесть тысяч шестьсот восемнадцать) рублей, 02 коп.

06.08.2015 между ООО «Челябспецстрой» (Подрядчик) и АО «Челябинский радиозавод «ПОЛЕТ» (Заказчик) заключен договор №31502622451 подряда (далее по тексту – «Договор»).

Согласно п. 1.1. Договора Подрядчик обязуется в установленный Договором срок выполнить работы по монтажу вентиляции и кондиционирования в рамках оказания услуг и работ по перемещению цеховых площадей, оборудования, конструкций и оказание сопутствующих работ на территории, в зданиях и сооружениях АО «ЧРЗ «Полет», а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять выполненные работы и уплатить обусловленную Договором цену.

В соответствии с п. 5.3. Договора, оплата работ, указанных в п. 1.1. настоящего договора, производиться Заказчиком за фактически выполненный и принятый объем работ по акту приемке выполненных работ (форма КС-2) и справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), в течении 10 (десяти) рабочих дней, с момента из подписания Сторонами и представления Подрядчиком счета и счет-фактуры.

31.08.2015 между Подрядчиком и Заказчиком подписан Акт о приемке выполненных работ №1 (форма КС-2) и Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) на сумму 404 254,22 (четыреста четыре тысячи двести пятьдесят четыре) рубля, 22 коп.

30.10.2015 между Подрядчиком и Заказчиком подписан Акт о приемке выполненных работ №2 (форма КС-2) и Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) на сумму 764 482,61 (семьсот шестьдесят четыре тысячи четыреста восемьдесят два) рубля, 61 коп.

21.03.2016  между Подрядчиком и Заказчиком подписан Акт о приемке выполненных работ №4 (форма КС-2) и Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) на сумму 127 463,28 (сто двадцать семь тысяч четыреста шестьдесят три) рубля, 28 коп.

Всего между ОАО «ЧРЗ «Полет» ООО «Челябспецстрой» по договору №31502622451 от 06.08.2015 подписано Актов о приемке выполненных работ на сумму 1 296 200,11 (один миллион двести девяносто шесть тысяч двести) рублей, 11 коп.

Всего ОАО «ЧРЗ «Полет» произвело оплату за выполненные работы ООО «Челябспецстрой» по договору №31502622451 от 06.08.2015 в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей, 00 коп.

Согласно заключению эксперта №266-2018-10 от 19.03.2019 года стоимость фактически выполненных ООО "Челябспецстрой" работ по договору №31502622451 от 06.08.2015 г., исходя из условий договоров, с учетом данных экспертного осмотра и после корректировки смет в части задвоения работ и материалов составила – 1 290 664,81 (один миллион двести девяносто тысяч шестьсот шестьдесят четыре) рубля, 81 коп. 

Таким образом, задолженность ОАО «ЧРЗ «Полет» перед ООО «Челябспецстрой» за выполненные работы по договору №31502622451 от 06.08.2015, составляет: 790 664,81 (семьсот девяносто тысяч шестьсот шестьдесят четыре) рубля, 81 коп. 

Проценты за пользование чужими денежными средствами в соответствии со ст. 395 ГК РФ по договору №31502622451 от 06.08.2015  за период с 17.11.2015  по 04.07.2019 составляют: 239 537,15 (двести тридцать девять тысяч пятьсот тридцать семь) рублей, 15 коп.

06.08.2015 между ООО «Челябспецстрой» (Подрядчик) и АО «Челябинский радиозавод «ПОЛЕТ» (Заказчик) заключен договор №31502622701 подряда (далее по тексту – «Договор»).

Согласно п. 1.1. Договора Подрядчик обязуется в установленный Договором срок выполнить услуги и работы по перемещению площадей, оборудования, конструкций и оказание сопутствующих работ на территории, в зданиях и сооружениях АО «ЧРЗ «Полет», а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять выполненные работы и уплатить обусловленную Договором цену.

В соответствии с п. 5.3. Договора, оплата работ, указанных в п. 1.1. настоящего договора, производиться Заказчиком за фактически выполненный и принятый объем работ по акту приемке выполненных работ (форма КС-2) и справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), в течении 10 (десяти) рабочих дней, с момента из подписания Сторонами и представления Подрядчиком счета и счет-фактуры.

31.08.2015 между Подрядчиком и Заказчиком подписан Акт о приемке выполненных работ №1 (форма КС-2) и Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) на сумму 1 029 556,74 (один миллион двадцать девять тысяч пятьсот пятьдесят шесть) рублей, 74 коп.

31.08.2015 между Подрядчиком и Заказчиком подписан Акт о приемке выполненных работ №2 (форма КС-2) и Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) на сумму 305 059,52 (триста пять тысяч пятьдесят девять) рублей, 52 коп.

30.10.2015  между Подрядчиком и Заказчиком подписан Акт о приемке выполненных работ №3 (форма КС-2) и Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) на сумму 473 849,26 (четыреста семьдесят три тысячи восемьсот сорок девять) рублей, 26 коп.

30.10.2015  между Подрядчиком и Заказчиком подписан Акт о приемке выполненных работ №4 (форма КС-2) и Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) на сумму 1 296 984,43 (один миллион двести девяносто шесть тысяч девятьсот восемьдесят четыре) рубля, 43 коп.

Всего между ОАО «ЧРЗ «Полет» ООО «Челябспецстрой» по договору №31502622701 от 06.08.2015 г. подписано Актов о приемке выполненных работ на сумму 3 105 449,95 (три миллиона сто пять тысяч четыреста сорок девять) рублей, 95 коп.

Всего ОАО «ЧРЗ «Полет» произвело оплату за выполненные работы ООО «Челябспецстрой» по договору №31502622701 от 06.08.2015 в размере 400 000 (четыреста тысяч) рублей, 00 коп.

Согласно заключению эксперта №266-2018-10 от 19.03.2019 года стоимость фактически выполненных ООО "Челябспецстрой" работ по договору №31502622701 от 06.08.2015, исходя из условий договоров, с учетом данных экспертного осмотра и после корректировки смет в части задвоения работ и материалов составила – 2 872 753,44 (два миллиона восемьсот семьдесят две тысячи семьсот пятьдесят три) рубля, 44 коп. 

Таким образом, задолженность ОАО «ЧРЗ «Полет» перед ООО «Челябспецстрой» за выполненные работы по договору №31502622701 от 06.08.2015 составляет: 2 472 753,44 (два миллиона четыреста семьдесят две тысячи семьсот пятьдесят три) рубля, 44 коп. 

Проценты за пользование чужими денежными средствами в соответствии со ст. 395 ГК РФ по договору №31502622701 от 06.08.2015 за период с 03.10.2015 по 04.07.2019 составляют: 771 199,42 (семьсот семьдесят одна тысяча сто девяносто девять) рублей, 42 коп.

Письмом от 24.11.2015 в адрес директора ООО «Челябспецстрой» АО «ЧРЗ «ПОЛЕТ» попросило осуществить поставку и монтаж автоматических ворот Алютех.

04.04.2016 ООО «Челябспецстрой» передал, а АО «ЧРЗ «ПОЛЕТ» принял автоматические ворота «Алютех» на общую сумму 402 862,46 (четыреста две тысячи восемьсот шестьдесят два) рубля, 46 коп. (Товарная накладная №7 от 04.04.2016, счет-фактура №7 от 04.04.2016).

Таким образом, задолженность ОАО «ЧРЗ «Полет» перед ООО «Челябспецстрой» за поставленные ворота «Алютех» составляет: 402 862,46 (четыреста две тысячи восемьсот шестьдесят два) рубля, 46 коп. 

В связи с тем, что поставка данного товара произведена без договора, ОАО «ЧРЗ «Полет» обязан был осуществить оплату на следующий день с момента поставки. Таким образом, проценты за пользование чужими денежными средствами начисляются со дня просрочки исполнения обязательств по оплате, а именно с 05.04.2016.

Проценты за пользование чужими денежными средствами в соответствии со ст. 395 ГК РФ за поставку ворот «Алютех» за период с 05.04.2016 по 04.07.2019 составляют: 111 218,13 (сто одиннадцать тысяч двести восемнадцать) рублей, 13 коп.

Таким образом, всего задолженность АО «ЧРЗ «Полет» в пользу ООО «Челябспецстрой» по оплате выполненных работ по Договорам подряда составляет 8 140 616,62 (Восемь миллионов сто сорок тысяч шестьсот шестнадцать) рублей 62 копейки.

Всего размер процентов за пользование чужими денежными средствами составляет 2 643 813,56 (Два миллиона шестьсот сорок три тысячи восемьсот тринадцать) рублей 56 копеек.

Проанализировав характер спорных правоотношений, исходя из содержания прав и обязанностей сторон, предусмотренных договорами, суд квалифицирует их как правоотношения по договору подряда, регулируемые главой 37 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ). 

По договору подряда в соответствии с пунктом 1 статьи 702 ГК РФ одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. 

Основанием для возникновения у заказчика обязательства по оплате выполненных работ является сдача подрядчиком и принятие заказчиком результатов работы (статьи 702, 711, 746 ГК РФ, пункт 8 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 № 51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда»). 

Пунктом 1 статьи 721 ГК РФ установлено, что качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 721 ГК РФ, если законом, иными правовыми актами или в установленном ими порядке предусмотрены обязательные требования к работе, выполняемой по договору подряда, подрядчик, действующий в качестве предпринимателя, обязан выполнять работу, соблюдая эти обязательные требования. 

В соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

По общему правилу только надлежащее исполнение прекращает обязательство.

Согласно ст. 310 ГК РФ, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. Односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, и одностороннее изменение условий такого обязательства допускаются также в случаях, предусмотренных договором, если иное не вытекает из закона или существа обязательства.

Требование истца о взыскании с ответчика основного долга в размере 8 140 616,62 (Восемь миллионов сто сорок тысяч шестьсот шестнадцать) рублей 62 копейки  обоснованно и подлежит удовлетворению.

Истцом заявлено требование о взыскании с ответчика процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 2 643 813,56 (Два миллиона шестьсот сорок три тысячи восемьсот тринадцать) рублей 56 копеек.

В соответствии со ст. 395 ГК РФ, в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором. (п. 1 в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 315-ФЗ)

Проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не установлен для начисления процентов более короткий срок.

Всего размер процентов за пользование чужими денежными средствами составляет 2 643 813,56 (Два миллиона шестьсот сорок три тысячи восемьсот тринадцать) рублей 56 копеек.

Поскольку истцом использован правильный механизм расчета процентов за пользование чужими денежными средствами, требование о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами  за задержку оплаты выполненных работ в размере 2 643 813,56 (Два миллиона шестьсот сорок три тысячи восемьсот тринадцать) рублей 56 копеек обоснованно и подлежит удовлетворению.

В связи с удовлетворением иска, судебные расходы по оплате судебной экспертизы  относятся на ответчика и подлежат взысканию с него в размере 110 000 руб. в пользу истца.

Иск удовлетворен, следовательно расходы по госпошлине относятся на ответчика (ст.110 АПК РФ).

Руководствуясь ст.ст.  110, 167, 168, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд

РЕШИЛ:

Взыскать с  акционерного общества «Челябинский радиозавод «Полет», г. Челябинск в пользу общества с ограниченной ответственностью «Челябспецстрой», г.Челябинск, основной долг в размере 8 140 616 руб. 62 коп., проценты за пользование чужими денежными в размере 2 643 813 руб. 56 коп., взыскивать проценты за пользование чужими денежными средствами с 05.07.2019 от суммы основного долга, исходя из ключевых ставок, установленных Банком России, действующих в соответствующие периоды просрочки по день фактической оплаты задолженности, судебные расходы по оплате судебной экспертизы в размере 110 000 руб.

Взыскать с  акционерного общества «Челябинский радиозавод «Полет», г. Челябинск в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 76 922 руб. 

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в апелляционную инстанцию – Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд путем подачи жалобы через Арбитражный суд Челябинской области. 

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Судья                                                                    И.В. Костарева

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной жалобы можно получить на Интернет-сайте Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда http://18aas.arbitr.ru.