12/2020-24569(1) 

Арбитражный суд Республики Карелия  ул. Красноармейская, 24 а, г. Петрозаводск, 185910, тел./факс: (814-2) 790-590 / 790-625, E-mail: info@karelia.arbitr.ru  

официальный сайт в сети Интернет: http://karelia.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А26-12006/2019

г. Петрозаводск

18 мая 2020 года

Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Республики Карелия  

РЕШИЛ:

1. Иск удовлетворить. 

Внести изменения в муниципальный контракт от 28.09.2018 №  08063000118180900278-1 на выполнение работ по разработке проектной  документации по объекту «Реконструкция ул. Хейкконена в г.  Петрозаводске» (ИКЗ 183100104050510010100101220017112414):  

- пункт 4.2.2 контракта изложить в следующей редакции: «Окончание  выполнения работ по контракту – не позднее 15.07.2020, в том числе, по  этапам выполнения работ: по первому этапу – не позднее 26.11.2018; по 2  этапу – не позднее 15.07.2020»  

- пункт 6.1 контракта изложить в следующей редакции: «Контракт вступает  в силу с даты его заключения сторонами и действует до 31.12.2020»;  

- столбец 3 «Основные данные и требования» пункта 11 приложения № 2 к  муниципальному контракту «Техническое задание на выполнение работ по  разработке проектной документации по объекту «Реконструкция ул.  Хейкконена в г. Петрозаводске» изложить в следующей редакции:  «Категория дороги – магистральная улица районного значения транспортно- пешеходная; длина – 1600 м (уточняется при проектировании); число полос  движения – 2; ширина полосы движения – 4 м, ширина полосы безопасности  – 0,5 м, ширина пешеходной части тротуара – 2,25 м, тип дорожной одежды  – асфальтобетон, расчетные нагрузки – 115 кН, А11,5»;  

- в пункте 13 приложения 2 к муниципальному контракту срок выполнения  работ 2 этапа указать не позднее 15.07.2020;  

- в приложении 3 дату окончания работ по второму этапу указать – не  позднее 15.07.2020.  

2. Решение может быть обжаловано: 

- в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня изготовления  полного текста решения в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд  (191015, 

<

...>);  

- в кассационном порядке в течение двух месяцев со дня вступления решения  в законную силу – в Арбитражный суд Северо-Западного округа (190000,  г.Санкт-Петербург, ул. Якубовича,4) при условии, что данное решение было  предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или  суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного  срока подачи апелляционной жалобы.  

Апелляционная и кассационная жалобы подаются в арбитражный суд  апелляционной и кассационной инстанций через Арбитражный суд  Республики Карелия.  

Судья Шалапаева И.В. 

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного

департамента

Дата 28.05.2019 13:22:30

Кому выдана Шалапаева Ирина Викторовна