АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПРИМОРСКОГО КРАЯ

690091, г. Владивосток, ул. Октябрьская, 27

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А51-19498/2022

г. Владивосток

02 февраля 2023 года

Резолютивная часть решения объявлена 26 января 2023 года. 

Полный текст решения изготовлен 02 февраля 2023 года.

            Арбитражный суд  Приморского края в составе судьи  Зайцевой Л.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «РМ-стил.ДВ» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 

к обществу с ограниченной ответственностью «Х10 Инжиниринг» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 

о взыскании 4 300 000 рублей

при участии:

от истца (в режиме веб-конференции) - ФИО2, паспорт, доверенность от 26.12.2022 сроком до 31.12.2023, диплом;

от ответчика -  не явился, извещен.

установил:

Общество с ограниченной ответственностью «РМ-стил.ДВ» (далее – истец, ООО «РМ-стил.ДВ», Заказчик) обратилось в Арбитражный суд Приморского края  с исковым заявлением к  обществу с ограниченной ответственностью «Х10 Инжиниринг»(далее – ответчик, ООО «Х10 Инжиниринг», Подрядчик) о взыскании  4 300 000 рублей неустойки по договору подряда № 49-П на выполнение проектных работ от 31.07.2020, а также взыскании неустойки на дату вынесения судебного решения.

В порядке статей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ)  дело рассмотрено в отсутствие извещенного ответчика.

Истец  заявленные требования в судебном заседании поддержал в полном объеме.

Исковые требования мотивированы  нарушением ответчиком обязательства по выполнению работ.

Ответчик письменный отзыв не представил, возражений относительно предмета спора не выразил.

Оценив представленные доказательства в соответствии со статьей 71 АПК РФ, суд установил следующее.

Между ООО «РМ-стил.ДВ» (Заказчик) и ООО «X10 Инжиниринг» (Подрядчик) заключен Договор подряда № 49-П на выполнение проектных работ от 31.07.2020 г. (далее – Договор).

Согласно пункту 2.1. Договора Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется собственными силами, либо с привлечением иных организаций, состоящих в Саморегулируемой организации (CPО) в области архитектурно-строительного проектирования в соответствии с Заданием разработать проектную, рабочую и сметную документацию для строительства завода по производству горячекатаного фасонного проката, расположенного по адресу, установленному относительно ориентира, расположенного в границах земельного участка. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Большой Камень, кадастровый номер земельного участка: 25:36:000000:1912. Представить проект в независимую экспертизу и получить положительное заключение по проектно-сметной документации и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить выполненные работы.

В соответствии с пунктом 2.2. Договора работы выполняются в полном соответствии с Заданием на проектирование (Приложение № 1 к настоящему Договору), необходимыми исходными данными для проектирования, должны соответствовать требованиям «Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87, СНиП и других действующих нормативно-правовых документов.

Согласно пункту 3.1. Договора  начало работ: в течение 3 (трех) рабочих дней с момента зачисления авансового платежа на расчетный счет Подрядчика и передачи всех исходных данных. Окончание работ: с даты начала работ в течение 15 месяцев. Сроки выполнения отдельных (промежуточных) этапов работ определяются в Календарном плане выполнения проектных работ (Приложение № 2). Объем работ, подлежащих выполнению в рамках конкретного этапа, предусмотрен Приложением № 1 к настоящему Договору.

Согласно пункту 4.1. Договора стоимость работ является твёрдой на весь срок действия Договора, не подлежит изменению, и включает в себя все расходы и издержки Подрядчика, согласно условиям настоящего Договора, которые могут возникнуть в процессе разработки и согласования Проектно-сметной документации, в т.ч. в рамках оплаты привлекаемым третьим лицам.

 Общая стоимость полного комплекса работ составляет 12 500 000 рублей, без НДС (пункт 4.2. Договора).

Заказчик в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания настоящего Договора и выставления счета Подрядчиком перечисляет на расчетный счет Подрядчика авансовый платеж в размере 1 000 000 рублей, без НДС (пункт 4.3. Договора).

Согласно пункту 7.4 Договора за нарушение сроков выполнения работ, в том числе конечного, сроков выполнения отдельных этапов работ согласно Приложению № 2 к Договору, Подрядчик по требованию Заказчика уплачивает неустойку в размере 0,1% от стоимости работ по Договору за каждый день просрочки выполнения работ.

17.08.2020 Заказчик перечислил ответчику авансовый платеж в размере 1 000 000 рублей в соответствии с платежным поручением № 113 от 17.08.2020.

Однако  работы по Договору Подрядчиком в полном объеме не выполнены. По состоянию на 01.10.2022 просрочка Подрядчика по выполнению принятых на себя обязательств по Договору составила  344 календарных дня.

В связи с тем, что Подрядчик не выполнил свои обязательства в установленные Договором сроки, Заказчик направил в адрес Подрядчика претензию исх. №РМДВ-80 от 27.09.2022 с требованием выполнения работ по Договору в кратчайшие сроки и уплаты неустойки. 

Претензия получена  Подрядчиком 03.10.2022 согласно входящей отметке о вручении № 3110 от 03.10.2022.

Обязательства по Договору Подрядчиком не исполнены, неустойка не оплачена, претензия оставлена без удовлетворения.

Неисполнение указанных требований в добровольном порядке явилось основанием для обращения с рассматриваемым иском в суд. 

Заслушав пояснения сторон, исследовав и оценив в соответствии со статьями 65, 71 АПК РФ представленные доказательства, суд считает исковые требования подлежащими удовлетворению в силу следующего.

  Возникшие правоотношения сторон подлежат регулированию нормами главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее -  ГК РФ) о подряде.

  В соответствии со статьей 702 ГК РФ одна сторона обязуется выполнить по заданию другой стороны определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

По правилам статей 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом, другими законами или иными правовыми актами. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). 

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы. 

На основании пункта 1 статьи 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором

В силу пункта 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. 

Согласно пункту 3.1. Договора  срок выполнения работ - начало работ: в течение 3 (трех) рабочих дней с момента зачисления авансового платежа на расчетный счет Подрядчика и передачи всех исходных данных. Окончание работ: с даты начала работ в течение 15 месяцев. Сроки выполнения отдельных (промежуточных) этапов работ определяются в Календарном плане выполнения проектных работ (Приложение № 2). Объем работ, подлежащих выполнению в рамках конкретного этапа, предусмотрен Приложением № 1 к настоящему Договору.

В соответствии с пунктом 7.4. Договора  за нарушение сроков выполнения работ, в том числе конечного, сроков выполнения отдельных этапов работ согласно Приложению № 2 к Договору, Подрядчик по требованию Заказчика уплачивает неустойку в размере 0,1% от стоимости работ по Договору за каждый день просрочки выполнения работ.

Как обоснованно указал истец, учитывая условия договора, срок окончания выполнения работ не позднее 22.11.2021.

На настоящий момент работы Подрядчиком в полном объеме не выполнены, доказательств обратного в материалы дела не представлено. Требования претензии оставлены без удовлетворения. Как следует из материалов дела и пояснил истец в судебном заседании в настоящее время договор между сторонами не расторгнут. 

Ответчиком допущена просрочка выполнения работ. В связи с этим  требование о взыскании неустойки заявлено истцом правомерно. 

Неустойка начислена истцом за период с 23.11.2021 по  01.11.2022 и составила общую сумму 4 300 000 рублей.

Представленный истцом расчет проверен, признан арифметически верным.  

На основании, вышеизложенного, исковые требования о взыскании неустойки за период с 23.11.2021 по  01.11.2022 подлежат удовлетворению в заявленном размере.

На основании статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, с ответчика в пользу истца подлежат взысканию судебные расходы в размере 44 500 рублей.

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

р е ш и л:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Х10 Инжиниринг» (ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «РМ-стил.ДВ»  (ИНН 

<

***>) 4 300 000 рублей неустойки, 44 500 рублей судебных расходов по оплате государственной пошлины.

            Исполнительный лист выдается после вступления решения суда в законную силу по заявлению взыскателя. 

            Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Приморского края в течение месяца со дня его принятия в Пятый арбитражный апелляционный суд и  в Арбитражный суд Дальневосточного округа  в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу.

 

Судья                                                                                                  Зайцева Л.В.