1210/2017-47053(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Логинова, д. 17, г. Архангельск, 163000, тел. (8182) 420-980, факс (8182) 420-799 

E-mail: info@arhangelsk.arbitr.ru, http://arhangelsk.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации  

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) 

г. Архангельск Дело № А05-5408/2017 

от 30 мая 2017 года 

Руководствуясь статьями 106, 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, Арбитражный суд Архангельской области  

РЕШИЛ:

Изменить пункт 10 государственного контракта № 0184200000616000210-0680189-02 от  01.03.2017, заключенного обществом с ограниченной ответственностью "Строй-Галерея"  (ОГРН 

<

***>) с казенным учреждением Ненецкого автономного округа "Центр  природопользования и охраны окружающей среды" (ОГРН 

<

***>)  

Изложить пункт 10 государственного контракта № 0184200000616000210-0680189-02 от  01.03.2017 в следующей редакции: «Сроки выполнения работ: начало работ – в течение 10 дней  с момента заключения государственного контракта, окончание – не позднее 25 августа 2017  года.»  

Взыскать с казенного учреждения Ненецкого автономного округа "Центр  природопользования и охраны окружающей среды" (ОГРН 

<

***>) в пользу общества с  ограниченной ответственностью "Строй-Галерея" (ОГРН 

<

***>) 6000 руб. в  возмещение расходов по уплате государственной пошлины.  

Настоящее решение может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный  апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд  Архангельской области в срок, не превышающий одного месяца со дня его принятия.  

Судья В.А. Крылов