10410_5270691  

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ

Дело № А53-20573/18

19 ноября 2018 г.

г. Ростов-на-Дону

 

Арбитражный суд Ростовской области в составе судьи Тановой Д.Г., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело Департамента жилищно-коммунального  хозяйства и благоустройства Администрации города Новочеркасска (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Юг-Транс» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

об обязании выполнить гарантийные обязательства по устранению недостатков в рамках  исполнения муниципального контракта (уточненные требования),  

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Юг-Транс» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) устранить дефекты, выявленные в ходе эксплуатации  объекта по муниципальному контракту № 0158600000917000035 от 20.11.2017 в месячный  срок, со дня вступления настоящего судебного акта в законную силу, в следующем  объеме:  

1.  Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т,  работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза - 11 кг;  

2. Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических  конструкций массой до 1 т - 11 кг;  

3. Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках 100  знаков - 1 знак;  

4. Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках  (Демонтаж дорожных знаков) - 1 знак;  

 5. Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических  конструкций массой до 1 т - 11 кг;  

6. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т,  работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза - 11 кг;  

7. Создание площадок под высокие нагрузки с использованием решетки  

геотехнической двуосной толщиной слоя основания 20 см и площадью: до 50 м2 (Укладка  тканого геотекстиль) - 45 м2;  

 8. Тканый геотекстиль KORTEX GT 1000/100 м2 - 47,7 м2; 

9. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т,  работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза - 2 760 кг;  

 10. Устройство основания под фундаменты: щебеночного - 2 мЗ; 

11. Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: до 3 м,  толщиной до 300 мм - 0,3 мЗ;  

12. Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: до 3 м,  толщиной до 500 мм - 1,25 мЗ;  

13. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т,  работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза - 24 235 кг;  

14. Устройство основания под фундаменты: песчаного - 16,83 мЗ;  

15. Устройство подпорных стенок из сборных блоков бетонных при высоте  насыпи: до 6 м - 0,4 мЗ;  

16. Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 500 кг/мЗ,  класс В 3,5 - 0,4 мЗ.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Юг-Транс» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета 6 000 руб.  

Решение суда по настоящему делу вступает в законную силу по истечении  месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае  подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в  законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной  инстанции.  

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в апелляционном  порядке в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты  принятия решения через суд, принявший решение.  

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в кассационном  порядке в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев со дня  вступления в законную силу решения через суд, принявший решение, при условии, что  оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд  апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи  апелляционной жалобы.  

 Судья Д.Г. Танова