Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-23308/2025

11 июня 2025 года

г.Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть решения объявлена  04 июня 2025 года.

Полный текст решения изготовлен  11 июня 2025 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Корчагиной Н.И.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Юламановым А.М., 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная группа компаний Модерн» 

ответчик: Общество с ограниченной ответственностью «РИР» 

о взыскании задолженности по договору подряда № 20/12-21 от 20.12.2021, по договору подряда № 27-10-21 20 от 27.10.2021, расходов по оплате госпошлины,

при участии

- от истца: ФИО1, по доверенности от 10.03.2025

- от ответчика: не явились, извещены

установил:

Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная группа компаний Модерн» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «РИР» (далее – ответчик) о взыскании задолженности по договору подряда № 20/12-21 от 20.12.2021, по договору подряда № 27-10-21 20 от 27.10.2021 в общей сумме 10 054 660 руб. 36 коп., расходов по оплате госпошлины в размере 330 547 руб.

Определением суда от 24.03.2025 исковое заявление принято к производству.

Представитель истца в судебное заседание явился, исковые требования поддержал в полном объеме.

Ответчик, надлежащим образом извещенный о месте и времени судебного заседания в порядке ст. 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), в судебное заседание не явился.

Изучив материалы дела, рассмотрев представленные доказательства, суд установил следующее.

20.12.2021 между истцом и ответчиком заключен договор подряда №20/12-21 (далее – Договор 1), в рамках которого Исполнитель обязался собственными и/или привлеченными силами и средствами выполнить работы (далее – «Работы») в соответствии со Сметным расчетом (Приложение 1) на объекте ансамбль культурного наследия федерального значения «Усадьба ФИО2 (Первый кадетский корпус)» и «Здание студенческой столовой Санкт-Петербургского университета», наружные инженерные сети Санкт-Петербургского государственного университета, работы по реставрации и приспособлению для современного использования, капитальному ремонту и техническому переоснащению, комплексному проектному решению и планировочному решению территории для размещения научно-учебного комплекса Санкт-Петербургского государственного университета которых осуществляет Подрядчик. Адрес Объекта: г. Санкт-Петербург, Здание «Первого Кадетского корпуса» (корпус 1) на территории Васильевского острова, ограниченной Менделеевской линией, Университетской набережной и Кадетской линией (далее – «Объект»),  Заказчик обязался принять выполненные работы и оплатить их.

В соответствии с п. 2.1. Договора 1 Цена договора составила 6 209 280,00 рублей (шесть миллионов двести девять тысяч двести восемьдесят рублей 00 копеек), НДС не облагается по 149 НК РФ.

20.02.2022 между сторонами было подписано Дополнительное соглашение №1, в соответствии с которым сумма Договора 1 увеличилось до 8 361 360 руб.  

Работы Подрядчиком были выполнены, сданы и приняты Заказчиком без замечаний, в подтверждении чего между сторонами были подписаны закрывающие документы:

08.04.2022 г. акт и справка по форме КС-2, КС-3 №1 на сумму 8 361 360 руб.

Согласно п. 2.2.1 Договора 1 авансирование не предусмотрено, оплат со стороны Ответчика не поступало.

Сумма задолженности по выполненным работам по Договору 1 составила 8 361 360  руб.

В соответствии с п. 2.2.2. Договора 1 оплата выполненных Работ по Договору производится Заказчиком в течение 5 (пяти) дней с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) по Договору и выставления Исполнителем счета на оплату. Срок оплаты наступил 14.04.2022 г.

04.02.2025 Истец направил в адрес ответчика претензию, ответ на претензию по истечении месяца в адрес Истца не поступил.

 27.10.2021 между истцом и ответчиком заключен договор подряда № 27-10-21 (далее – Договор 2), в рамках которого Исполнитель обязался собственными и/или привлеченными силами и средствами выполнить работы (далее – «Работы») в соответствии со Сметным расчетом (Приложение 1) на объекте ансамбль культурного наследия федерального значения «Усадьба ФИО2 (Первый кадетский корпус)» и «Здание студенческой столовой Санкт-Петербургского университета», наружные инженерные сети Санкт-Петербургского государственного университета, работы по реставрации и приспособлению для современного использования, капитальному ремонту и техническому переоснащению, комплексному проектному решению и планировочному решению территории для размещения научно-учебного комплекса Санкт-Петербургского государственного университета которых осуществляет Подрядчик. Адрес Объекта: г. Санкт-Петербург, Здание «Первого Кадетского корпуса» (корпус 1) на территории Васильевского острова, ограниченной Менделеевской линией, Университетской набережной и Кадетской линией (далее – «Объект»),  Заказчик обязался принять выполненные работы и оплатить их.    

В соответствии с п. 2.1. Договора 2 цена договора составила 9 958 065,00 рублей (Девять миллионов девятьсот пятьдесят восемь тысяч шестьдесят пять рублей 00 копеек), в том числе НДС 20%.

Работы Подрядчиком были выполнены, сданы и приняты Заказчиком без замечаний, в подтверждении чего между сторонами были подписаны закрывающие документы:

20.12.2021 г. акт и справка по форме КС-2, КС-3 №1 на сумму 6 683 300,38 руб.

В соответствии с п. 3.1.2. Договора 2 Оплата выполненных Работ по Договору производится Заказчиком в течение 10 (десяти) дней с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) по Договору и выставления Исполнителем счета на оплату. Срок оплаты наступил 30.12.2021 г.

Со стороны ответчика были осуществлены оплаты: ПП №34 от 07.12.2021 г., ПП №49 от 21.12.2021 г., ПП №73 от 30.12.2021 г., ПП №4 от 18.01.2022 г. в общей сумме 4 490 000 руб.

Сумма задолженности по выполненным работам по Договору 2 составила 2 193 300  руб. 

29.11.2024 Истец направил в адрес ответчика претензию, ответ на претензию по истечении месяца в адрес Истца не поступил.

Общая сумма задолженности по двум Договорам составила 10 054 660,38 руб.

Основные правила исполнения обязательств установлены статьями 309-310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), согласно которым обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами. Одностороннее изменение условий обязательства, связанного с осуществлением всеми его сторонами предпринимательской деятельности, или односторонний отказ от исполнения этого обязательства допускается в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором.

Согласно пункту 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии с пунктом 1 статьи 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Пунктом 1 статьи 711 ГК РФ предусмотрено, что, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

По смыслу приведенной нормы, основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику (пункт 8 Информационного письма Президиума Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 24.01.2000 N 51 "Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда").

Статьей 753 ГК РФ предусмотрено, что сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом, и акт подписывается другой стороной.

Согласно части 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Материалами дела подтверждается, что по факту выполнения работ в рамках договора между сторонами подписаны акт и справка по форме КС-2, КС-3 №1 08.04.2022 г. в рамках Договора 1 и акт и справка по форме КС-2, КС-3 №1 от 20.12.2021 в рамках Договора 2.

Доказательств, подтверждающих оплату задолженности по Договорам в заявленном размере, ответчиком не представлено.

При таких условиях суд считает исковые требования обоснованными по праву и по размеру и подлежащими удовлетворению в полном объеме.

Помимо суммы задолженности в соответствии с положениями статьи 110 АПК РФ взысканию с ответчика в пользу истца подлежит 330 547 руб. государственной пошлины за рассмотрение дела в суде первой инстанции.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «РИР» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная группа компаний Модерн» задолженность по договору подряда № 20/12-21 от 20.12.2021, по договору подряда № 27-10-21 20 от 27.10.2021 в размере 10 054 660 руб. 36 коп., расходы по уплате государственной пошлины в размере 330 547 руб.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия.

Судья                                                                            Корчагина Н.И.