РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Дело № А40-249469/19-110-1975

25 февраля 2020 года

город Москва

Резолютивная часть решения объявлена 13 февраля 2020 года 

Решение в полном объеме изготовлено 25 февраля 2020 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

судьи Мищенко А.В.  /единолично/, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Федерального государственного унитарного предприятия "ГЛАВНОЕ ВОЕННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №12"(125212, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА АДМИРАЛА МАКАРОВА, 6, 1, , ОГРН: 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью "ИНТЕРСТРОЙАЛЬЯНС"(115516, МОСКВА ГОРОД, ПРОЕЗД ТАРНЫЙ, 11, СТР.8, ОФИС 49, ОГРН: 

<

***>) о взыскании 2 002 954,24 руб.,

при участии:

от истца –ФИО2 по дов.  от  26.12.2019,

от ответчика - не явился, 

УСТАНОВИЛ:

Федеральное государственное унитарное предприятие "ГЛАВНОЕ ВОЕННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №12" обратилось с иском к обществу с ограниченной ответственностью "ИНТЕРСТРОЙАЛЬЯНС" о взыскании 1 371 396,47 руб. задолженности по Договору №1507-72-СУБ от 08.07.2015, 631 528,07 руб. неустойки за период с 14.01.2017 по 23.07.2019.

Ответчик отзыв не представил, в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом о времени и месте судебного заседания. С учетом своевременного размещения информации о времени и месте судебного заседания на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет, суд   рассмотрел спор в их отсутствие на основании ст.ст.121, 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, п.5 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011г. №12 «О некоторых вопросах применения АПК РФ в редакции Федерального закона от 27.07.2010 №228-ФЗ «О внесении изменений в АПК РФ».

Заслушав представителя истца, исследовав и оценив представленные доказательства, суд пришел к следующим выводам:

Как усматривается из материалов дела, между ФГУП «Спецстройсервис» при Спецстрое России» (новое наименование -ФГУП «ГВСУ № 12», далее - Истец) и ООО «ИнтерСтройАльянс» (далее - Ответчик) был заключен Договор от 08.07.2015 № 1507-72-СУБ на выполнение субподрядных работ по реконструкции административного здания, расположенного по адресу: 

<

...> (далее - Договор).

17.04.2017 в Единый Государственный Реестр Юридических лиц были внесены изменения в части наименования предприятия: прежнее наименование - ФГУП «Спецстройсервис» при Спецстрое России», новое наименование - Федеральное государственное унитарное предприятие «Главное военно-строительное управление № 12» (сокращенное наименование -ФГУП «ГВСУ № 12»).

Согласно условиям Договора Истец осуществляет финансирование, обеспечение выполнения и контроль за выполнением работ, а Ответчик осуществляет строительно-монтажные работы, в объеме, предусмотренном Договором в соответствии с Проектной и Рабочей документацией.

Цена Договора является приблизительной и составляет 38 956 337,11 руб.

В соответствии с п. 4.1. Договора оплата осуществляется в рублях по мере поступления денежных средств от Государственного заказчика (ФГУП Центр «Звездный»).

В соответствии с п. 4.3. Договора оплата выполненных Ответчиком строительно-монтажных работ производится Истцом ежемесячно в течение 25 банковских  дней после подписания Истцом оформленных Ответчиком актов о приёмке выполненных работ по форме №КС-2, справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3, оригиналов счета.

В соответствии с условиями Договора Ответчик выполнил работы па сумму 34 535 074,08 руб., что подтверждается актами о приемке выполненных работ формы КС-2 № 1,2, 3,4, 5 от 31.07.2015, №6, 7. 8.9, 10. 11, 12, 13, 14 от 31.08.2015, № 15, 16, 17, 18, 19,20,21,22,23, 24, 25 от 30.09.2015, № 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 от 30.10.2015, № 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 от 30.11.2015, № 51, 52 от 29.01.2016. № 55. 56 от 31.05.2016, № 57 от 30.11.2016 и справками о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 №1 от 31.07.2015, №2 от 31.08.2015, №3 от 30.09.2015,  №4 от 30.10.2015, №5 от 30.11.2015, №6 от 29.01.2016, №8 от 31.05.2016, №9 от 01.11.2016.

Истец согласно условиям Договора произвел оплату за выполненные Ответчиком работы на сумму 33 419 879,82 руб., что подтверждается платежными поручениями № 4525 от 26.08.2015 г.. №4569 от 27.08.2015 г., №005464 от 17.09.2015 г., №6362 от 14.10.2015 г., № 6625 от 16.10.2015 г., №6888 от 26.10.2015 г., №8419 от 30.11.2015 г., №9913 от 23.12.2015 г.. №8735 от 28.03.2016 г., №22057 от 09.02.2017 г.

В соответствии с п. 4.11. Договора Ответчик ежемесячно оплачивает Истцу оказанные им генподрядные услуги в размере 6% от стоимости выполненных Ответчиком в отчетном периоде работ (включая закупку и монтаж инженерного оборудования) в следующем порядке:

Истец ежемесячно в течение 3-х рабочих дней с даты подписания сторонами акта о приемке выполненных работ за отчетный период, представляет Ответчику акт приемки оказанных генподрядных услуг. Ответчик в течение 3-х рабочих дней обязан подписать указанный акт приемки оказанных генподрядных услуг или дать мотивированный отказ от оформления.

В случае нарушения указанного срока, акт приемки оказанных генподрядных услуг считается оформленным сторонами, а услуги Истца подлежащими оплате согласно условиям Договора.

Оплата генподрядных слуг, оказанных Истцом производится Ответчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Истца в течение 5 рабочих дней с момента подписания сторонами акта приемки оказанных генподрядных услуг.

Истец оказал генподрядные услуги на сумму 2 486 590,73 руб., что подтверждается актами приемки оказанных генподрядных услуг № 1 от 31.07.2015 г., № 2 от 31.08.2015 г., № 3 от 30.09.2015 г., № 4 от 30.10.2015 г., № 5 от 30.1 1.2015 г., № 6 от 31.05.2016 г., № 7 от 30.11.2016 г., №8 от 31.12.2016 г.

Таким образом, срок оплаты генподрядных услуг по Договору наступил 14.01.2017 г., однако по состоянию на 23.07.2019 г., Ответчик оплату оказанных Истцом генподрядных услуг по Договору не произвел.

В соответствии с п. 4.12. Договора Истец вправе принять решение и уведомить Ответчика об оплате стоимости оказанных генподрядных услуг путем зачета взаимных однородных требований, что подтверждается письмом от 26.01.2017 исх. № 35/9-613.

Таким образом, задолженность по Договору Ответчиком за оказанные генподрядные услуги составляет 1 371 396,47 руб. и рассчитывается следующим образом: 33 419 879,82 руб. (оплата по Договору) + 2 486 590,73 руб. (генподрядные услуги) - 34 535 074,08 руб. (выполненные работы).

При указанных обстоятельствах иск в этой части подлежит удовлетворению.

Согласно пункту 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

В соответствии с 16.7. Договора, в случае нарушения Ответчиком сроков по оплате оказанных Истцом генподрядных услуг, Истец имеет право взыскать с Ответчика неустойку в виде пени в размере 0.05% от несвоевременно уплаченной суммы за каждый день просрочки уплаты.

Сумма неустойки составляет 631 528 (шестьсот тридцать одна тысяча пятьсот двадцать восемь) рублей 07 копеек за период с 14.01.2017 г. по 23.07.2019 г. просрочки оплаты Ответчиком оказанных Истцом генподрядных услуг по Договору.

В силу ст. 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ, другими законами или иными правовыми актами.

Таким образом, у Ответчика перед Истцом имеется неисполненное обязательство по оплате за оказанные генподрядные услуги в размере 1 371 396 (один миллион триста семьдесят одна тысяча триста девяносто шесть) рублей 47 копеек, а также неустойка в размере 631 528 (шестьсот тридцать одна тысяча пятьсот двадцать восемь) рублей 07 копеек.

В соответствии со ст. 110 АПК РФ расходы по госпошлине относятся на ответчика.  

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 110, 123,156,169-171 АПК РФ,  

Р Е Ш И Л:

Взыскать с  общества с ограниченной ответственностью "ИНТЕРСТРОЙАЛЬЯНС"  в пользу  Федерального государственного унитарного предприятия "ГЛАВНОЕ ВОЕННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №12"  1 371 396 руб. 47 коп. задолженности, 631 528 руб. 07 коп. неустойки, 33 015 руб. в возмещение расходов по госпошлине.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение  месяца с даты его принятия.

Судья:               А.В. Мищенко