Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

Дело № А40-128657/17-68-596

г. Москва

22 декабря 2017 года

Резолютивная часть решения объявлена 27 ноября 2017 года

Решение в полном объеме изготовлено 22 декабря 2017 года

Арбитражный суд в составе: 

судьи Абрамовой Е.А.

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление Фонда капитального строительства города Москвы (101000, 

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 

к ГУП «МОСЖИЛНИИПРОЕКТ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, 109012, 

<

...>) 

о взыскании денежных средств,

при участии:

от истца: ФИО2 по доверенности  № Фкр-11-49/7 от 28.03.2017,папорт.

от ответчика: ФИО3  по доверенности №23 от 04.09.2017. паспорт

УСТАНОВИЛ:

Фонд капитального строительства города Москвы обратился в Арбитражный суд города Москвы с иском к ГУП «МОСЖИЛНИИПРОЕКТ» о взыскании неустойки  по договору  от 18.09.2015 №31-000037-15 на выполнение работ по разработке проектной документации на капитальный ремонт многоквартирных домов в ЦАО г. Москвы по 31 адресу в сумме 601 430,03 рублей.

В судебном заседании представитель истца заявленные требования поддержал.

В судебном заседании представитель ответчика возражал против удовлетворения заявленных требований по мотивам отзыва. 

Исследовав и оценив в порядке ст. 71 АПК РФ представленные в материалы дела доказательства, отзыв, письменные пояснения, заслушав пояснения сторон, суд пришёл к следующим выводам.

Как следует из материалов дела, между Фондом капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы (истец, заказчик) и ГУП "МОСЖИЛНИИПРОЕКТ'" (ответчик, генпроектировщик) заключен договор от 18.09.2015 № 31-000037-15 на выполнение работ по разработке проектной документации на капитальный ремонт многоквартирных домов в ЦДО г. Москвы по 31 адресу, согласно п. 2.1 которого заказчик поручил, а генподрядчик принял на себя обязательство по выполнению работ по разработке проектной документации на капитальный ремонт многоквартирных домов по адресам согласно адресного перечня (приложение № 3 к договору), выполняемых и оплачиваемых в соответствии с календарным планом выполнения работ (приложение № 1 к договору) в полном объеме и в соответствии с Техническим заданием (приложение № 2 к договору), строительными нормами и правилами, государственными стандартами.

Согласно п. 3.1 договора цена договора в соответствии с результатами  открытого конкурса  на выполнение работ  по разработке проектной документации на капитальный ремонт многоквартирных домов (протокол № 31-000037-15-3 от 31.08.2015) составляет 25.346.103,99 рублей.

В соответствии с п. 3.2. договора цена является твердой и не может быть увеличена в ходе  его исполнения.

Порядок и сроки оплаты выполненных работ по договору  изменению не подлежат.

В силу п. 4.1. договора генпроектировщик обязуется выполнить работы по договору в соответствии с календарным планом выполнения работ (Приложение № 1 к договору).

Согласно п. 5.2.1. договора генпроектировщик обязан своевременно и должным образом выполнять принятые на себя обязательства в соответствии с техническим заданием (Приложение № 2 к договору), календарным планом выполнения работ, условиями настоящего договора.

Порядок  сдачи и приемки документации предусмотрен разделом 7 настоящего Договора.

Исходя из п. 7.2 договора, сдача разработанной проектной и сметной документации по каждому объекту осуществляется по Акту сдачи-приемки ПСД в сроки, определенные  в соответствии с  календарным планом выполнения работ.

Пунктом 7.3.1 договора предусмотрено, что после выполнения работ в соответствии с календарным планом генпроектировщик передает уполномоченному представителю Заказчика о накладной Акт(-ы) сдачи-приемки ПСД, подписанные уполномоченными представителями Геннроектировщика, Департамента капитального ремонта города Москвы, уполномоченного тана в соответствии со ст. 190 ЖК РФ на согласование акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ, управляющей организации либо организации, осуществляющей управление многоквартирным домом согласно п. 2 ст. 161 ЖК РФ, а также представителя собственников помещений многоквартирного дома. Акт(ы) сдачи-приемки ПСД передается Заказчику с приложением комплектов готовой документации в количестве и комплектности, согласно технического задания. Сметная документация предоставляется в печатном виде и на электронном носителе в формате Excel, согласно техническому заданию.7.3.2  Подписание Заказчиком оформленной генпроектировщиком накладной подтверждает получение Заказчиком разработанной проектной и сметной документации.

Приемка работ заказчиком осуществляется в течение  10 рабочих дней с момента  получения проектной документации. (п. 7.3.3.)

За невыполнение или ненадлежащее исполнение Генпроектировщиком обязательств по срокам работ на Объекте в соответствии с Календарным планом  выполнения работ, Генпроектировщик  уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости объекта за каждый день просрочки.

В соответствии с п. 10.2. Технического задания разделы документации, передаваемой заказчику, включают в себя:

- рабочую (проектную) документацию, выполняемую в соответствии с ГОСТ 21. 1101-2013, Градостроительным кодексом РФ (в действующей редакции, СНиП, а также иными действующими нормативными правовыми актами РФ;

- инженерное обследование технического состояния несущих конструкций и инженерных систем здания (выпуск технического заключения о состоянии несущих конструкций и инженерных систем здания);

            -сметная документация;

            - положительное заключение экспертизы.

Согласно п. 15.3. Технического задания генпроектировщик обязан:

-передать проектно-сметную документацию;

-устранить все замечания заказчика и экспертизы;

-предоставить заказчику «Положительное заключение» на проект и достоверность определения сметной стоимости капитального ремонта экспертизы».

 В нарушение принятых на себя обязательств Генпроектировщик допустил просрочку выполнения обязательств в части завершения сроков окончания работ. Данный факт подтверждается актами приемки работ по разработке проектной и сметной документации с учетом акта о приостановке оформленных результатов приемки выполненных работ.

Учитывая изложенное, у ответчика перед истцом образовалась задолженность выплате договорной неустойки в размере 601 430,03 руб., начисленной в соответствии с п. 9.2 договора.  

В соответствии со ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии с положениями ст.ст. 309 и 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

Согласно п. 2 ст. 307 ГК РФ обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и иных оснований, указанных в ГК РФ. Основанием для возникновения обязательства Ответчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ Ответчику (ст. ст. 711, 746 ГК РФ).

В соответствии со ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Согласно п. 9.2 договора за невыполнение или ненадлежащее исполнение генпроектировщиком обязательств по срокам работ на объекте в соответствии с Календарным планом  выполнения работ, генпроектировщик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости объекта за каждый день просрочки.

Как следует из расчета истца, он производит начисление неустойки, с учетом даты получения положительного заключения экспертизы, срока приостановления выполнения работ, и сроков, предусмотренных в календарном плане, принимая во внимание даты подписания актов выполненных работ (от 26.10.2015, 25.12.2015, от 30.10.2015, 22.12.2015, 16.12.2015, 27.10.2015, 04.08.2016, 15.01.2016). Согласно расчету истца общий период просрочки составляет 08.04.16 по 12.07.2016. 

Возражая против удовлетворения иска, ответчик сослался на передачу результата работ истца по накладным в пределах срока, установленного календарным планом. А позднее подписание актов связано с тем, что сторонами заключено дополнительное соглашение от 28.06.2016 № 4. 

Вместе с тем, исходя из буквального толкования условий договора в соответствии со ст. 431 ГК РФ, надлежащим доказательством выполнения работ являются акты выполненных работ по разработке ПСД, а не накладные (п.п. 1.1. договора в редакции дополнительного соглашения № 2от 22.02.2016). В соответствии с п. 7.3,7.3.1,7.3.2 в редакции указанного дополнительного соглашения  готовность проектной и сметной документации подтверждается подписанным актом приемки выполненных работ по разработке ПСД с учетом требований, установленных разделом 3 договора оформляется в установленном договором порядке.  А из п. 3.4. договора следует, что обязанность по оформлению актов приемки выполненных работ по разработке ПСД возложена на генпроектировщика, т.е. ответчика. 

Расходы по уплате государственной пошлины по иску подлежат отнесению на ответчика в соответствии со ст. 110 АПК РФ.

На основании изложенного и, руководствуясь ст. 8, 11, 12, 307-310, 702, 711 ГК РФ, ст.ст.4, 9, 64-66, 71, 75, 110, 123, 156, 167-171, 180 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с  ГУП «МОСЖИЛНИИПРОЕКТ» в пользу Фонда капитального строительства города Москвы неустойку в сумме 601.430 (шестьсот одна тысяча четыреста тридцать) рублей 03 копейки и расходы по уплате государственной пошлины в сумме 15.029 (пятнадцать тысяч двадцать девять) рублей.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Девятом арбитражном апелляционном суде. 

Судья:

Е.А. Абрамова