564/2023-31319(1) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Учебная, д. 51, г. Омск, 644024; тел./факс (3812) 31-56-51 / 53-02-05, http://omsk.arbitr.ru, http://my.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е

(резолютивная часть) 

город Омск  № дела  06 марта 2023 года А46-23067/2022  

Арбитражный суд Омской области в составе судьи Шмакова Г.В., при ведении  протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в  предварительном судебном заседании дело по иску бюджетного учреждения города Омска  «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «АртРемСтрой»  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) об обязании устранить недостатки,  

руководствуясь статьями 110, 123, 137, 156, 167-171, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

исковые требования бюджетного учреждения города Омска «Управление дорожного  

хозяйства и благоустройства» удовлетворить. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью «АртРемСтрой» (ИНН 

<

***>,  

ОГРН 

<

***>) за счет собственных средств выполнить работы по устранению  

дефектов на автомобильных дорогах в рамках гарантийных обязательств в срок до 15.05.2023,  

а именно: ул. 8-я Восточная: - устранить зазор на покрытии тротуара и бордюром свыше 1 см.; - заделать трещины на тротуаре; 

- устранить выкрашивание покрытия 2 кв.м. район ул. 2-я ФИО2.  ул. Булатова (от ул. Гусарова до ул. Орджоникидзе):  

- устранить выкрашивание бортовых камней; - устранить выкрашивание бордюра тротуара. ул. Орджоникидзе: 

-устранить коррозию элементов крепления знаков на Г-образных опорах.  Ленинградская площадь:  

-заделать поперечные трещины с шагом от 15 м.; 

- заделать продольные трещины от 5 п.м. с шагом от 15 м.;  

- устранить колейность в районе перекрестка с пр. К.Маркса 10 м.п. в направлении  ул. Жукова.  

ул. Сыропятская: -устранить выкрашивание покрытия технического тротуара в районе ул. 3-я Восточная; - устранить зазор между тротуаром и бордюром свыше 1 см.; 

- устранить разрушение покрытия тротуара район 

<

...>;  

- устранить разрушение покрытия на стыке тех. тротуара с бордюром в районе  ул. 7-я Восточная.  

ул. Масленникова: - заделать поперечные трещины с шагом от 15 м.; 

- заделать продольные трещины от 3 п.м. с шагом от 10 м.;  - заделать выбоину на стыке с ул. Шебалдина - 1 кв.м.;  

ул. М. Берникова: 

- заделать выбоину 0,02 кв.м. район д.20 б ул. Л. Чайкиной;  - устранить разрушение кромки на повороте на путепровод с ул. Берникова 1 кв.м.;  

- устранить колейность на повороте на путепровод 20 п.м.;  

- устранить выкрашивание покрытия участками от 0,02 кв.м. с шагом от 1,5 м на  

подъеме путепровода; - устранить колейность на путепроводе в обоих направлениях 40 м.п.; - заделать выбоину 1 кв.м. в районе ООТ д. 21/2 пос. Чкалова. Мост «Октябрьский» от 2-й Восточной до ул. А. Нейбута: 

- устранить разрушение покрытия барьерного ограждения;  

- устранить коррозию элементов соединения стоек опор барьерного ограждения.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «АртРемСтрой»  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу бюджетного учреждения города Омска  «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>) 6000 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня изготовления  решения в полном объеме и может быть обжаловано в этот же срок путем подачи  апелляционной жалобы в Восьмой арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд  Омской области.  

Решение в полном объеме изготавливается в течение пяти дней, выполняется в  соответствии с частью 5 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации в форме электронного документа путем подписания усиленной  квалифицированной электронной подписью судьи.  

Арбитражный суд Омской области разъясняет, что в соответствии со статьёй 177  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации решение, выполненное в  форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его  размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа не позднее  следующего дня после дня его принятия.  

 По ходатайству указанных лиц копии решения на бумажном носителе могут быть  направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в  арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под  расписку.  

Информация о движении дела может быть получена путём использования сервиса «Картотека арбитражных  дел» http://kad.arbitr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

Судья Г.В. Шмаков 

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначейство 

Дата 24.12.2021 6:49:50Кому выдана Шмаков Глеб Вячеславович