АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

150999, г. Ярославль, пр. Ленина, 28  http://yaroslavl.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

(Резолютивная часть решения оглашена  21.12.2017 г.)

Дело № А82-13314/2017

г. Ярославль

09 января 2018 года

Арбитражный суд Ярославской области в составе судьи  Бессоновой И.Ю. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, помощником судьи Дыбцыной Е.А.

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление Общества с ограниченной ответственностью "ГлобалПроджект" (ИНН  

<

***>, ОГРН  

<

***>)

к Обществу с ограниченной ответственностью "Стройсервис" (ИНН  

<

***>, ОГРН  

<

***>)

о   взыскании   348086.02  руб.

при участии:

от истца – ФИО2 – представитель по доверенности от 09.01.2017 г.

от ответчика – не явились

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "ГлобалПроджект" обратилось в суд с иском к  Обществу с ограниченной ответственностью "Стройсервис" о взыскании 348086 руб. 02 коп., в том числе 308 003 руб. 80 коп. пени, 40 082 руб. 22 коп. проценты за пользование чужими денежными средствами, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ.

Определением Арбитражного суда Ярославской области от 30.10.2017 г. по делу №А82-13314/2017 произведена замена судьи Систеровой Н.А. на судью Бессонову И.Ю.

Истец в судебном заседании поддержал исковые требования в полном объеме.

Ответчик в судебное заседание не явился, о дате и времени судебного заседания извещен надлежащим образом, просил рассмотреть дело без участия его представителя,  в ходе судебного рассмотрения спора представил отзыв на иск, просил уменьшить размер неустойки по ст. 333 ГК РФ. Считает, что истец не уведомлял ответчика о готовности работ и необходимости их приемки, направил акты о выполненных работ только с сопроводительным письмом от 05.08.2016 г., в связи с чем истец имеет право требования неустойки только с 05.08.2016 г. 

Исследовав материалы дела, суд установил следующее.

20.09.2015г. между ООО "Стройсервис" /Заказчик/ и ООО "ГлобалПроджект" /Подрядчик/ заключен Договор № 1-СС, согласно п.п. 1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 5.3 которого, предметом договора является: работы по монтажу, пуско-наладке и вводу в эксплуатацию технических систем безопасности (далее - ТСБ). Срок исполнения Работ: с 20.09.2015 г. до 25.09.2015 г. при условии строительной готовности объекта. Стоимость выполняемых Подрядчиком Работ, указанных в пункте 1.1. Договора, определяется в соответствии со сметой (Приложение №1 к настоящему Договору) и составляет 395 760 (триста девяносто пять тысяч семьсот шестьдесят) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС -18% -60 370 (шестьдесят тысяч триста семьдесят) рублей 17 копеек. Оплата по Договору производится в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания акта выполненных работ. В случае нарушения сроков оплаты, указанных в п.2.2. настоящего Договора Подрядчик имеет право начислить Заказчику пени в размере 0,3 % за каждый день просрочки платежа от суммы, предъявленной к оплате, но не более 10% от стоимости Работ по Договору.

02.11.2015 г. между ООО "Стройсервис" /Заказчик/ и ООО "ГлобалПроджект" /Подрядчик/ заключен Договор № 2-СС, согласно п.п. 1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 5.3 которого, предметом договора является: работы по монтажу, пуско-наладке и вводу в эксплуатацию технических систем безопасности (далее - ТСБ). Срок исполнения Работ: с 02.11.2015 г. до 10.11.2015 г. при условии строительной готовности объекта. Стоимость выполняемых Подрядчиком Работ, указанных в пункте 1.1. Договора, определяется в соответствии со сметой (Приложение №1 к настоящему Договору) и составляет 407 400 рублей 00 копеек, в т.ч. НДС -18% -62 145 рублей 76 копеек. Оплата по Договору производится в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2). В случае если работы сдаются и принимаются поэтапно с оформлением нескольких актов о приемке выполненных работ, срок оплаты в соответствии с настоящим пунктом исчисляется с даты подписания последнего акта о приемке выполненных работ (форма КС-2). В случае нарушения сроков оплаты, указанных в п.2.2. настоящего Договора Подрядчик имеет право начислить Заказчику пени в размере 0,3 % за каждый день просрочки платежа от неоплаченной в срок суммы.

02.11.2015 г. между ООО "Стройсервис" /Заказчик/ и ООО "ГлобалПроджект" /Подрядчик/ заключен Договор № 4-СС, согласно п.п. 1.1, 1.3, 2.1, которого, предметом договора является: работы по монтажу, пуско-наладке и вводу в эксплуатацию технических систем безопасности (далее - ТСБ). Срок исполнения Работ: с 02.11.2015 г. до 10.11.2015 г. при условии строительной готовности объекта. Стоимость выполняемых Подрядчиком Работ, указанных в пункте 1.1. Договора, определяется в соответствии со сметой (Приложение №1 к настоящему Договору) и составляет 380 000 рублей 00 копеек, в т.ч. НДС -18% -57966  рублей 10 копеек. Оплата по Договору производится в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2). В случае если работы сдаются и принимаются поэтапно с оформлением нескольких актов о приемке выполненных работ, срок оплаты в соответствии с настоящим пунктом исчисляется с даты подписания последнего акта о приемке выполненных работ (форма КС-2). В случае нарушения сроков оплаты, указанных в п.2.2. настоящего Договора Подрядчик имеет право начислить Заказчику пени в размере 0,3 % за каждый день просрочки платежа от неоплаченной в срок суммы.

21.12.2015 г. между ООО "Стройсервис" /Заказчик/ и ООО "ГлобалПроджект" /Подрядчик/ заключен Договор № 5-СС, согласно п.п. 1.1, 1.3, 2.1 которого, предметом договора является: работы по монтажу, пуско-наладке и вводу в эксплуатацию технических систем безопасности (далее - ТСБ). Срок исполнения Работ: с 21.12.2015 г. до 28.12.2015 г. при условии строительной готовности объекта. Стоимость выполняемых Подрядчиком Работ, указанных в пункте 1.1. Договора, определяется в соответствии со сметой (Приложение №1 к настоящему Договору) и составляет 437 000 рублей 00 копеек, в т.ч. НДС -18% -66 661 рублей 02 копеек. Оплата по Договору производится в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2). В случае если работы сдаются и принимаются поэтапно с оформлением нескольких актов о приемке выполненных работ, срок оплаты в соответствии с настоящим пунктом исчисляется с даты подписания последнего акта о приемке выполненных работ (форма КС-2). В случае нарушения сроков оплаты, указанных в п.2.2. настоящего Договора Подрядчик имеет право начислить Заказчику пени в размере 0,3 % за каждый день просрочки платежа от неоплаченной в срок суммы.

08.02.2016 г. между ООО "Стройсервис" /Заказчик/ и ООО "ГлобалПроджект" /Подрядчик/ заключен Договор № 6-СС, согласно п.п. 1.1, 1.3, 2.1 которого, предметом договора является: работы по монтажу, пуско-наладке и вводу в эксплуатацию технических систем безопасности (далее - ТСБ). Срок исполнения Работ: с 08.02.2016 г. до 19.02.2016 г. при условии строительной готовности объекта. Стоимость выполняемых Подрядчиком Работ, указанных в пункте 1.1. Договора, определяется в соответствии со сметой (Приложение №1 к настоящему Договору) и составляет 279 000 рублей 00 копеек, в т.ч. НДС -18% -42559 рублей 32 копеек. Оплата по Договору производится в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2). В случае если работы сдаются и принимаются поэтапно с оформлением нескольких актов о приемке выполненных работ, срок оплаты в соответствии с настоящим пунктом исчисляется с даты подписания последнего акта о приемке выполненных работ (форма КС-2). В случае нарушения сроков оплаты, указанных в п.2.2. настоящего Договора Подрядчик имеет право начислить Заказчику пени в размере 0,3 % за каждый день просрочки платежа от неоплаченной в срок суммы.

22.02.2016 г. между ООО "Стройсервис" /Заказчик/ и ООО "ГлобалПроджект" /Подрядчик/ заключен Договор № 7-СС, согласно п.п. 1.1, 1.3, 2.1 которого, предметом договора является: работы по монтажу, пуско-наладке и вводу в эксплуатацию технических систем безопасности (далее - ТСБ). Срок исполнения Работ: с 22.02.2016 г. до 03.03.2016 г. при условии строительной готовности объекта. Стоимость выполняемых Подрядчиком Работ, указанных в пункте 1.1. Договора, определяется в соответствии со сметой (Приложение №1 к настоящему Договору) и составляет 353 400 рублей 00 копеек, в т.ч. НДС -18% -53908 рублей 47 копеек. Оплата по Договору производится в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2). В случае если работы сдаются и принимаются поэтапно с оформлением нескольких актов о приемке выполненных работ, срок оплаты в соответствии с настоящим пунктом исчисляется с даты подписания последнего акта о приемке выполненных работ (форма КС-2). В случае нарушения сроков оплаты, указанных в п.2.2. настоящего Договора Подрядчик имеет право начислить Заказчику пени в размере 0,3 % за каждый день просрочки платежа от неоплаченной в срок суммы. Оплата по Договору производится в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2). В случае если работы сдаются и принимаются поэтапно с оформлением нескольких актов о приемке выполненных работ, срок оплаты в соответствии с настоящим пунктом исчисляется с даты подписания последнего акта о приемке выполненных работ (форма КС-2). В случае нарушения сроков оплаты, указанных в п.2.2. настоящего Договора Подрядчик имеет право начислить Заказчику пени в размере 0,3 % за каждый день просрочки платежа от неоплаченной в срок суммы.

22.02.2016 г. между ООО "Стройсервис" /Заказчик/ и ООО "ГлобалПроджект" /Подрядчик/ заключен Договор № 8-СС, согласно п.п. 1.1, 1.3, 2.1 которого, предметом договора является: работы по монтажу, пуско-наладке и вводу в эксплуатацию технических систем безопасности (далее - ТСБ). Срок исполнения Работ: с 22.02.2016 г. до 03.03.2016 г. при условии строительной готовности объекта. Стоимость выполняемых Подрядчиком Работ, указанных в пункте 1.1. Договора, определяется в соответствии со сметой (Приложение №1 к настоящему Договору) и составляет 572 300 рублей 00 копеек, в т.ч. НДС -18% -87300 рублей 47 копеек. Оплата по Договору производится в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2). В случае если работы сдаются и принимаются поэтапно с оформлением нескольких актов о приемке выполненных работ, срок оплаты в соответствии с настоящим пунктом исчисляется с даты подписания последнего акта о приемке выполненных работ (форма КС-2). В случае нарушения сроков оплаты, указанных в п.2.2. настоящего Договора Подрядчик имеет право начислить Заказчику пени в размере 0,3 % за каждый день просрочки платежа от неоплаченной в срок суммы.

Истцом были выполнены согласованные работы, результат работ сдан ответчику, им принят и оплачен. При оплате работ ответчиком допущена просрочка исполнения обязательств. 

Претензией от 22.06.2017г. истец потребовал оплаты неустойки за несвоевременную оплату выполненных работ, а также процентов за пользование денежными средствами.

Отсутствие оплаты неустойки и процентов послужило основанием для обращения истца в суд с настоящим исковым заявлением.

Изучив материалы дела, суд считает требования истца подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Исходя из положений статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом, односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается. 

В  силу ч.1 ст. 702 ГК РФ  по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его. 

Согласно п.1  ст. 330 ГК РФ, неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

В соответствии со ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле должно доказать обстоятельства на которые оно ссылается как на основания своих требований и возражений.

Факт несвоевременной оплаты выполненной работы подтверждается материалами дела, в том числе актами выполненных работ, платежными поручениями № 128 от 29.10.2015 г. на сумму 250000 руб., № 176 от 17.11.2015 г. на сумму 145760 руб., № 245  от 07.12.2015 г. на сумму 400000 руб., № 3416 от 29.12.2015 г. на сумму 380000 руб., № 265 от 20.02.2016 г. на сумму 437000 руб., № 267 от 22.03.2016 г. на сумму 279000 руб., № 550 от 02.06.2016 г. на сумму 353400 руб., № 355 от 14.04.2016 г. на сумму 50000 руб., № 397 от 22.04.2016 г. на сумму 522300 руб. 

Довод ответчика о том, что истец не уведомил ответчика о готовности работ и необходимости их приемки, направил акты о выполненных работ только с сопроводительным письмом от 05.08.2016 г., в связи с чем истец имеет право требования неустойки только с 05.08.2016 г., оценен судом, отклонен.

Представленные в материалы дела акты выполненных работ КС-2, Справки о стоимости выполненных работ КС-3, счета на оплату датированы 25.09.2015г., 10.11.2015г., 28.12.2015г., 19.02.2016г., 03.03.2016г., при этом данные документы не имеют оговоренных сторонами исправлений в части даты принятия работ. Кроме того, истцом в материалы дела представлены пообъектные Акты приемки в эксплуатацию системы охранно-пожарной сигнализации и оповещения о пожаре, даты сдачи в эксплуатацию соотносятся с датами представленных документов. При данных обстоятельствах заявление ответчика об отсутствии уведомления о готовности к приемке отклоняется судом как противоречащее фактическим обстоятельствам. При этом суд учитывает, что, подписывая акты выполненных работ, заказчик знал, когда фактически работы были сданы и приняты, при несогласии с проставленными датами был вправе указать свои мотивированные замечания.  

Из материалов дела не следует, что просрочка выполнения обязательств по оплате вызвана действиями подрядчика, соответствующих доказательств не представлено.

При наличии установленного факта несвоевременной оплаты выполненной  работы применение гражданско-правовой ответственности в виде взыскания пени за просрочку оплаты является обоснованным, соответствует ст. 330 ГК РФ, п. 5.3 Договоров.

По расчету истца сумма пени за просрочку, исчисленная по состоянию на дату оплаты, составляет 308 003 руб. 80 коп.

Расчет пени ответчиком не оспорен, судом проверен.

В расчете истцом допущены арифметические ошибки, неверно определено количество дней просрочки с учетом наступления установленного в договорах срока на оплату.

По расчету суда, выполненному с учетом условий договоров об отсрочке оплаты работ в 10 банковских дней, положений ст. 191 ГК РФ, сумма неустойки, начисленной по договорам, составляет 302 408 руб. 52 коп. 

Ответчик просил уменьшить размер неустойки в связи с ее несоразмерностью последствиям неисполнения обязательства. 

Согласно п. 1 ст. 333 ГК РФ, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку. Если обязательство нарушено лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, суд вправе уменьшить неустойку при условии заявления должника о таком уменьшении.

В соответствии с п. 71 Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств", если должником является коммерческая организация, индивидуальный предприниматель, а равно некоммерческая организация при осуществлении ею приносящей доход деятельности, снижение неустойки судом допускается только по обоснованному заявлению такого должника, которое может быть сделано в любой форме (пункт 1 статьи 2, пункт 1 статьи 6, пункт 1 статьи 333 ГК РФ).

Согласно п. 73 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств", бремя доказывания несоразмерности неустойки и необоснованности выгоды кредитора возлагается на ответчика. 

Оценив размер предъявленной ко взысканию неустойки, условия договоров о сроке платежа, а также периоды просрочки, допущенной ответчиком, принимая во внимание отсутствие долга за выполнение работ в полном объеме, суд считает заявление ответчика о несоразмерности предъявленной неустойки обоснованным. 

Процент неустойки, согласованный сторонами в договоре, является значительным (составляет 109,5% годовых при действующей ключевой ставке 8,25% годовых), задолженность ответчиком погашена.

Суд считает соразмерной сумму неустойки в размере 100 802 руб. 84 коп., рассчитанной с применением обычно применяемой ставки 0,1 % за каждый день просрочки платежа от неоплаченной в срок суммы.

В указанном размере неустойка подлежит взысканию с ответчика.

Оснований для дальнейшего уменьшения неустойки, в том числе, для расчета неустойки с применением ключевой ставки Банка России, у суда не имеется.  

Истцом заявлено требование о взыскании процентов, начисленных по правилам ст. 317.1 ГК РФ.

Согласно п.1 ст. 317.1 ГК РФ (в редакции, действующей с 01.06.2015г. по 31.07.2016г.), если иное не предусмотрено законом или договором, кредитор по денежному обязательству, сторонами которого являются коммерческие организации, имеет право на получение с должника процентов на сумму долга за период пользования денежными средствами. При отсутствии в договоре условия о размере процентов их размер определяется ставкой рефинансирования Банка России, действовавшей в соответствующие периоды (законные проценты).

Истец просит взыскать проценты, начисленные за период действия указанной редакции статьи 317.1 ГК РФ, учитывает даты заключения договоров, период пользования денежными средствами.

Спорные договоры заключены сторонами в период действия статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в указанной истцом редакции. При таких обстоятельствах требование о взыскании процентов как платы на основании статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации за указанный истцом период признается судом правомерным.

По расчету истца размер процентов составляет 40 082 руб. 22 коп. 

Расчет ответчиком не оспорен, судом проверен.

И в первоначальном, и в уточненном расчете истцом неверно определена начальная дата исчисления процентов, при этом уточненный расчет в итоге представлен на сумму 28 830 руб. 06 коп, однако в итоговой строке истцом указана сумма 40 082 руб. 22 коп.

По расчету суда, выполненному с учетом требований ст. 191 ГК РФ, а также периода начисления процентов, указанного истцом, размер процентов составляет 38 368 руб. 78 коп. 

В данном объеме требование истца подлежит удовлетворению. 

В силу ст. 110 АПК РФ расходы истца по уплате госпошлины по делу относятся на ответчика пропорционально обоснованно предъявленным требованиям.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать с  Общества с ограниченной ответственностью "Стройсервис"  (ИНН  

<

***>, ОГРН  

<

***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "ГлобалПроджект"  (ИНН  

<

***>, ОГРН  

<

***>) 100 802 руб. 84 коп. пени, 38 368 руб. 78 коп. проценты, 9 753 руб. в возмещение расходов по уплате госпошлины.

В остальной части иска отказать.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства во Второй арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия (изготовления его в полном объеме), а со дня вступления решения в законную силу – в кассационном порядке в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в двухмесячный срок при условии, что оно было предметом рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Ярославской области, в том числе посредством заполнения форм, размещенных на официальном сайте суда в сети «Интернет».

Судья

Бессонова И.Ю.