АРБИТРАЖНЫЙ СУД АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

656015, Барнаул, пр. Ленина, д. 76, тел.: (3852) 29-88-01 

http:// www.altai-krai.arbitr.ru, е-mail: a03.info@arbitr.ru  

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А03-12390/2024

г. Барнаул

05 сентября 2024 года

Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Ланды О.В.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем Черепановой А.И. с  использованием средств аудиозаписи,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с  ограниченной ответственностью «ЮГТРАНССИБИРЬ» (ОГРН 

<

***>, 649006,  

<

...>)  

 к публичному акционерному обществу «Россети Сибирь» в лице филиала  «Алтайэнерго» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>)  

об обязании в течение месяца со дня вступления решения суда в законную силу  исполнить мероприятия по договору об осуществлении технологического присоединения   № 20.2200.5720.23 от 30.11.2023, а именно:  

- выполнить проектную документацию в соответствии с Положением о составе  разделов проектной документации и требованиях к ее содержанию, утвержденных  постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 и согласовать со всеми  заинтересованными организациями в соответствии с действующим законодательством,  

- построить ЛЭП-10 кВ от точки, указанной в пункте № 7ТУ до новой ТП 10/0,4 кВ.  Протяженность и характеристики ЛЭП уточнить проектом,  

- построить ТП-10кВ. Тип и мощность силовых трансформаторов уточнить  проектом,  

- построить ЛЭП-0,4 кВ от новой ТП 10/0,4 кВ до границы, установленной  правоустанавливающими документами заявителя. Протяженность и характеристики ЛЭП  уточнить проектом,  

- выполнить монтаж комплекса коммерческого учета электрической энергии в  соответствии с требованиями «Основных положений функционирования розничных  рынков электрической энергии» (утвержденных Постановлением Правительства РФ от  04.05.2012 № 442,  

а также о взыскании 9269 руб. 87 коп. неустойки за период с 01.06.2024 по  20.08.2024. Продолжить начисление неустойки с 21.08.2024 по день фактического  исполнения обязательств в размере 0,25% от суммы договора (45 777 руб. 15 коп.), но не  более чем за 365 дней просрочки в совокупности,  

о взыскании судебной неустойки на случай неисполнения судебного акта в размере  25 000 руб. за каждый календарный месяц неисполнения судебного акта,  

при участии в судебном заседании: от истца – ФИО1, доверенность 14/24 от 07.06.2024, паспорт, диплом, 

Руководствуясь статьями 27, 65, 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л 

Обязать публичное акционерное общество «Россети Сибирь» в лице филиала  «Алтайэнерго», г.Барнаул в течение месяца со дня вступления решения суда в законную  силу исполнить мероприятия по договору об осуществлении технологического  присоединения № 20.2200.5720.23 от 30.11.2023, а именно:  

- выполнить проектную документацию в соответствии с Положением о составе  разделов проектной документации и требованиях к ее содержанию, утвержденных  постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 и согласовать со всеми  заинтересованными организациями в соответствии с действующим законодательством,  

- построить ЛЭП-10 кВ от точки, указанной в пункте № 7ТУ до новой ТП 10/0,4 кВ.  Протяженность и характеристики ЛЭП уточнить проектом,  

- построить ТП-10кВ. Тип и мощность силовых трансформаторов уточнить  проектом,  

- построить ЛЭП-0,4 кВ от новой ТП 10/0,4 кВ до границы, установленной  правоустанавливающими документами заявителя. Протяженность и характеристики ЛЭП  уточнить проектом,  

- выполнить монтаж комплекса коммерческого учета электрической энергии в  соответствии с требованиями «Основных положений функционирования розничных  рынков электрической энергии» (утвержденных Постановлением Правительства РФ от  04.05.2012 № 442.  

Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» в лице филиала  «Алтайэнерго» в пользу общества с ограниченной ответственностью  «ЮГТРАНССИБИРЬ» судебную неустойку на случай неисполнения судебного акта в  размере 25 000 руб. за календарный месяц неисполнения судебного акта.  

Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» в лице филиала  «Алтайэнерго», г. Барнаул в пользу общества с ограниченной ответственностью  «ЮГТРАНССИБИРЬ» 9269 руб. 87 коп. неустойки, а также 8 000 руб. расходов по оплате  государственной пошлины.  

Продолжить начисление неустойки с 21.08.2024 по день фактического  исполнения обязательства в размере 0,25% от суммы договора (45 777 руб. 15 коп.), но не  более чем за 365 дней просрочки в совокупности.  

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Алтайского края в  апелляционную инстанцию - Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца  со дня принятия решения, либо в кассационную инстанцию - Арбитражный суд Западно-Сибирского округа, в течение двух месяцев со дня вступления решения в законную силу  при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной  

инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы. 

 Судья О.В.Ланда