АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

295000, Симферополь, ул. Александра Невского, 29/11

http://www.crimea.arbitr.ru         E-mail: info@crimea.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело №А83-9743/2019

18 декабря 2019 года

город Симферополь

 

Резолютивная часть решения объявлена 11 декабря 2019 года. Решение изготовлено в полном объеме 18 декабря 2019 года.

Арбитражный суд Республики Крым в составе судьи Кузняковой С.Ю., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела по заявлению Департамента городского хозяйства администрации города Евпатории Республики Крым (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, КПП: 911001001, проезд А.Ахматовой, д.21/16 г. Евпатория, 

<

...>) к  контрольно-счетной палате городского округа Евпатории Республики Крым (ОГРН: 

<

***>,ИНН: 

<

***>, КПП: 911001001, ул. Голикова,д6, г. Евпатория, 

<

...>), третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований на предмет спора: общество с ограниченной ответственностью "Фаворитюгплюс" (ул. Фрунзе, 36А, кв. 9, г. Симферополь, 

<

...>), общество с ограниченной ответственностью "Крым Дон Строй" (ул. Интернациональная дом 132 помещение 9, г. Евпатория, 

<

...>) о признании недействительным представления в части

при участии представителей:

от заявителя – не явился (уведомлен надлежащим образом);

от заинтересованного лица – ФИО2, по доверенности б/н, от 29.07.2019., ФИО3, по доверенности б/н, от 28.05.2019

от третьего лица (общество с ограниченной ответственностью "Фаворитюгплюс") – не явился (уведомлен надлежащим образом);

от третьего лица (общество с ограниченной ответственностью "Крым Дон Строй") – не явился (уведомлен надлежащим образом);

УСТАНОВИЛ:

Департамент  городского хозяйства администрации города Евпатории Республики Крым обратился  в Арбитражный суд Республики Крым с заявлением к  контрольно-счетной палате городского округа Евпатории Республики Крым, в котором просит суд признать незаконным и отменить пункт 4 представления №05-06/04 от 28.05.2019 года.

Представители заинтересованного лица возражали против удовлетворения заявленных требований по основаниям, изложенным в отзыве и дополнительных пояснениях.

Заявитель явку уполномоченного представителя в судебное заседание, назначенное на 11.12.2019, не обеспечил, о дате, времени и месте судебного заседания уведомлялся надлежащим образом. 

11.12.2019 через систему «Мой Арбитр» поступило ходатайство заявителя об отложении судебного разбирательства, мотивированное невозможностью обеспечения явки представителя.

Согласно положениям частей 3 и 4 статьи 158 АПК РФ в случае, если лицо, участвующее в деле и извещенное надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, заявило ходатайство об отложении судебного разбирательства с обоснованием причины неявки в судебное заседание, арбитражный суд может отложить судебное разбирательство, если признает причины неявки уважительными.

Арбитражный суд может отложить судебное разбирательство по ходатайству лица, участвующего в деле, в связи с неявкой в судебное заседание его представителя по уважительной причине.

Между тем, приведенные заявителем причины уважительными не являются, поскольку признаются внутренними организационными проблемами юридического лица (пункт 14 Постановления Пленума ВАС РФ от 28.05.2009 N 36 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции"), что не лишает юридическое лицо направить для участия в судебном заседании другого представителя.

На основании изложенного, принимая во внимание необоснованность заявленного ходатайства, в том числе документально, в ходе судебного заседания суд отказал в удовлетворении ходатайства заявителя.

Из материалов дела усматривается, что постановлением администрации города Евпатории Республики Крым от 25.12.2017 № 3401-п утверждена муниципальная программа «Формирование современной городской среды городского округа Евпатория Республики Крым на 2018-2022 гг.».

Источником финансирования муниципальной программы являются средства федерального бюджета, бюджета Республики Крым и бюджета муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Департамент городского хозяйства.

17.05.2018 между Министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым (министерство) и Администрацией города Евпатории Республики Крым (муниципалитет) заключено соглашение о предоставлении и расходовании в 2018 году субсидии из бюджета Республики Крым бюджету муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым в целях софинансирования муниципальной программы формирования современной городской среды на 2018-2022 годы (соглашение).

Целью предоставления субсидии является софинансирование расходных обязательств муниципалитета по финансовому обеспечению мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» (пункт 1.3 соглашения).

Согласно пункту 1.6 соглашения минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых и общественных территорий включает в себя: ремонт проездов, обеспечение освещения территорий, установка скамеек, установка урн.

В соответствии с пунктом 1.7 соглашения дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых и общественных террторий включает в себя: оборудование детских и (или) спортивных площадок, площадок для отдыха и досуга, площадок для выгула домашних животных, оборудование автомобильных парковок, ремонт тротуаров и пешеходных дорожек, установка малых архитектурных форм, озеленение территорий, установка ограждений, установка пандусов и иные виды работ, обеспечивающие доступность зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Общий размер субсидии, предоставляемой из Республики Крым бюджету муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым в соответствии с настоящим соглашением исходя из выраженного в процентах от общего объема расходного обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия, уровня софинансирования, равного 100%, составляет в 2018 году не более 60 000 000 руб. (пункт 2.1.1 соглашения)

На основании соглашения от 17.05.2018 бюджету городского округа Евпатория Республики Крым предоставлена из бюджета Республики Крым субсидия в общей сумме 60 000 000,00 руб. для софинансирования муниципальной программы формирования современной городской среды на 2018-2022 годы.

21.11.2018 в рамках исполнения муниципальной программы формирования современной городской среды на 2018-2022 гг. между Департаментом городского хозяйства Администрации города Евпатории Республики Крым (заказчик) и ООО «Фаворитюгплюс» (подрядчик) заключен муниципальный контракт №70 на выполнение работ (контракт).

В силу пункта 1.1 контракта подрядчик обязуется своевременно на условиях Контракта выполнить капитальный ремонт аллеи, расположенной между ул. Полтавская и ул. Чапаева, г. Евпатория, Республики Крым (далее работы) и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ оплатить его.

Объем работ определяется ведомостью объемов работ. (пункт 1.2 контракта)

Согласно пункту 1.4 контракта источник финансирования: за счет местного бюджета в сумме 696 210,00 руб. и субсидии из бюджета Республики Крым бюджету муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым в целях софинансирования муниципальной программы формирования современной городской среды на 2018-2022 гг. в сумме 25 443 790,00 руб.

Пунктом 2.2 контракта предусмотрена его общая цена – 26 140 000,00 руб.

Согласно пункту 4.4 контракта срок выполнения работ: с момента заключения контракта по 17 декабря 2018 года.

Работы по указанному договору приняты без замечаний в соответствии с актами о приемке выполненных работ №1 от 05.12.2018, №2 от 25.12.2018 и оплачены в полном объеме, что подтверждается приобщенными к материалам дела платежными документами.

10.01.2019 специалистами департамента городского хозяйства администрации города Евпатории Республики Крым и муниципального бюджетного учреждения «Управление городского хозяйства» с выходом на аллею, расположенной между ул. Полтавская и ул. Чапаева, г.Евпатория, Республики Крым, установлено, что на спортивном оборудовании "Жим к груди" расшатаны закладные детали, обожжены прорезиненные ручки, присутствуют множественные сколы и царапины; на спортивном оборудовании "Степ" расшатаны закладные детали, присутствуют множественные сколы и царапины; плитка резиновая травмобезопастная имеет значительный выбоины, потертости и расслаивание, трещины, а также отслаивание от приклеиваемой поверхности; асфальтобетонное покрытие имеет значительное проседание, крошение; бортовой камень просел, имеются значительные трещины; плитка тротуарная имеет значительное проседание, трещины, сколы, отслаивание верхнего слоя; на газоне рулонном присутствует пожелтения и множественные провалы, частично отсутствует; ограждение металлическое имеет множественные сколы, отслоения краски, и частично погнуто; входная арка «Лес», накладные детали имеют значительные царапины, вмятины, металлический каркас арки погнут, расшатан каркас конструкции, что отражено в акте осмотра аллеи расположенной между ул. Полтавская и ул. Чапаева, г.Евпатория, Республики Крым от 10.01.2019.

Изложенное стало основанием для обращения Департамента городского хозяйства Администрации города Евпатории Республики Крым к ООО «Фаворитюгплюс» с претензией об исполнении гарантийных обязательств по контракту.

Работы по устранению недостатков, заявленных департаментом в рамках заключенного контракта, выполнены обществом и приняты без замечаний в соответствии с актом о приемке выполненных работ №1 от 11.04.2019

При этом в период с 01.03.2019 по 29.03.2019 согласно Плана работы Контрольно-счетной палаты городского округа Евпатория Республики Крым на 2019 год, на основании распоряжения Контрольно-счетной палаты городского округа Евпатория Республики Крым (далее – Контрольно-счетная палата) от 11.01.2019 №01-23/1, Контрольно-счетной палатой проведено контрольное мероприятие «Проверка расходования в 2018 году субсидии из бюджета Республики Крым, средств бюджета городского округа Евпатория Республики Крым на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа Евпатория Республики Крым» на объекте - Департамент городского хозяйства администрации города Евпатории Республики Крым.

По результатам проведенной проверки Контрольно-счетной палатой составлен акт №05-02/6 от 29.03.2019, которым зафиксирован ряд нарушений, а также вынесено представление №05-06/04 от 28.05.2019, согласно резолютивной части которого Департаменту предлагается следующее:

1.1 Произвести начисление штрафных санкций и принять исчерпывающие меры по взысканию с подрядчика по муниципальному контракту №70 от 21.11.2018 - ООО «Фаворитюгплюс» пени за просрочку исполнения подрядчиком обязательств по контракту в сумме 43 054,64 руб. за 8 дней просрочки обязательств.

Произвести начисление штрафных санкций и принять исчерпывающие меры по взысканию с подрядчика по муниципальному контракту №70 от 21.11.2018 - ООО «Фаворитюгплюс» пени за просрочку, исполнения подрядчиком обязательств по контракту в сумме 24 185,58 руб. за 93 дня просрочки обязательств.

2. Не допускать в дальнейшем неисполнения обязательств заказчика при исполнении муниципальных контрактов во избежание неэффективного расходования бюджетных средств.

3. Произвести начисление штрафных санкций и принять исчерпывающие меры по взысканию с подрядчика по муниципальным контрактам №№ 2-13 от 25.01.2018 - ООО «Детские Площадки» пени за просрочку исполнения подрядчиком обязательств по контрактам в общей сумме 792,36 руб. за 3 дня просрочки обязательств по каждому из контрактов.

4. Принять исчерпывающие меры, направленные на взыскание с подрядчика по муниципальному контракту №70 от 21.11.2018 - ООО «Фаворитюгплюс» стоимости оплаченных в декабре 2018 фактически не выполненных работ в общей сумме 1 040 235,29 рублей.

5.  Не допускать в дальнейшем нарушений Инструкции по применению единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н (с изменениями и дополнениями), а также предоставления заведомо недостоверной бюджетной отчетности.

 Не согласившись с принятым в отношении себя представлением №05-06/04 от 28.05.2019, в части пункта 4 его резолютивной части Департамент городского хозяйства администрации города Евпатории Республики Крым обратился в Арбитражный суд Республики Крым с заявлением о признании его недействительным в указанной части.

В соответствии с частью 1 статьи 198 АПК Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Согласно части 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

В пункте 6 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта, действия (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления недействительными являются одновременно как его несоответствие закону, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившегося в суд.

Таким образом, согласно части 1 статьи 198, части 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  п. 6 Постановления Пленума основанием для признания недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц является наличие одновременно двух условий: их несоответствие закону или иному нормативному правовому акту и нарушение прав и законных интересов лица, обратившегося в суд с соответствующим требованием, в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Часть 1 статьи 265 Бюджетного кодекса Российской Федерации устанавливает, что государственный (муниципальный) финансовый контроль осуществляется в целях обеспечения соблюдения положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, правовых актов, обусловливающих публичные нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также соблюдения условий государственных (муниципальных) контрактов, договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета.

Согласно статье 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации порядок осуществления полномочий органами внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля по внутреннему государственному (муниципальному) финансовому контролю определяется соответственно федеральными законами, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами местных администраций, а также стандартами осуществления внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля.

Бюджетные полномочия Контрольной счетной палаты установлены ст. 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - БК РФ), осуществляются с соблюдением положений, установленных Федеральным законом № 6-ФЗ.

Методами осуществления государственного (муниципального) финансового контроля являются проверка, ревизия, обследование.

Под проверкой в целях осуществления государственного (муниципального) финансового контроля понимается совершение контрольных действий по документальному и фактическому изучению законности отдельных финансовых и хозяйственных операций, достоверности бюджетного (бухгалтерского) учета и бюджетной отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности в отношении деятельности объекта контроля за определенный период.

Исходя из изложенного, судом установлено, что проверка была проведена надзорным органом в пределах предоставленных ему полномочий, предполагающих как контроль за расходами бюджета, так и за эффективным использованием бюджетных средств.

Как указывалось выше, в ходе проведения контрольного мероприятия осуществлена выборочная проверка контрактов, заключенных Департаментом городского хозяйства администрации города Евпатории Республики Крым для реализации мероприятий муниципальной программы, в том числе муниципального контракта № 70 от 21.11.2018 заключенного Департаментом городского хозяйства администрации города Евпатории Республики Крым с ООО «Фаворитюгплюс» на выполнение работ по капитальному ремонту аллеи, расположенной между ул. Полтавская и ул. Чапаева, г. Евпатория, Республики Крым.

По условиям контракта оплата выполненных работ осуществляется в течение 30 календарных дней с даты подписания сторонами акта о приемке выполненных работ. Авансовые платежи контрактом не предусмотрены.

Согласно представленных к проверке актов о приемке выполненных работ №2, №3 работы по контракту приняты Департаментом городского хозяйства администрации города Евпатории Республики Крым 25.12.2018, т.е. спустя 8 календарных дней после установленного контрактом срока выполнения работ (17.12.2018). При этом, Департаментом не представлено проверяющему органу доказательств обращения к подрядчику с требованием о начислении штрафных санкций за просрочку исполнения обязательств по контракту.

Однако исходя из представленных к проверке счетов и платежных поручений, оплата работ в общей сумме 25 955 146,36 руб. осуществлена Департаментом городского хозяйства администрации города Евпатории Республики Крым в 2018 году в полном объеме.

Соглашением от 29.12.2018 контракт расторгнут. Стороны пришли к согласию считать обязательства по контракту исполненными на сумму 25 955 146,36 руб., обязательства в оставшейся части на сумму 184 853,64 руб. стороны прекращают. Претензий, связанных с отношениями по контракту стороны не имеют.

В ходе проведения контрольного мероприятия в адрес Департамента городского хозяйства администрации города Евпатории Республики Крым направлен запрос о предоставлении документов, подтверждающих постановку на бухгалтерский учет учреждения имущества и результатов выполненных работ по указанному контракту.

Согласно информации Департамента городского хозяйства администрации города Евпатории Республики Крым (от 19.03.2019 № 528), имущество на баланс не принято по причине его демонтажа подрядчиком для выполнения работ в рамках гарантийных обязательств. При этом, документы, подтверждающие наступление гарантийного случая в ходе проведения проверки, а также в ходе судебного разбирательства, не представлены.

С целью выяснения информации о работах, связанных с демонтажем ранее принятых без замечаний работ и оборудования, в адрес Департамента городского хозяйства администрации города Евпатории Республики Крым направлен запрос о сроках проведения гарантийных работ, перечне демонтированного оборудования и предоставления документов, подтверждающих необходимость выполнения гарантийных работ на объекте (исх. 01-39/173 от 22.03.2019).

Запрашиваемая информация и документы в период проведения контрольного мероприятия не предоставлены.

Для выяснения указанной выше информации контрольно-счетной палатой городского округа Евпатории Республики Крым инициирована и проведена инвентаризации фактического выполнения работ по муниципальному контракту № 70 от 21.11.2018.

По результатам инвентаризации составлен акт от 28.03.2019, в котором зафиксировано отсутствие на месте проведения работ по контракту асфальтобетонного покрытия парковочных карманов площадью 510 кв.м., урн в количестве 23 шт., спортивного тренажера, нахождение на объекте в разобранном состоянии элементов благоустройства и осуществление подрядчиком работ по монтажу скамеек и другого оборудования.

Следов демонтажа асфальтобетонного покрытия парковочных карманов и иного оборудования, указанного в акте инвентаризации, не выявлено, что подтверждается фотоматериалами, приложенными к акту инвентаризации.

Работы, проводимые подрядчиком на объекте в момент инвентаризации, имели характер проводимых впервые.

В связи с выявлением оплаченных, но фактически не выполненных по контракту работ, в адрес Департамента городского хозяйства администрации города Евпатории Республики Крым направлен запрос о предоставлении пояснений по данному факту, а также направлены на согласование сличительные ведомости на общую сумму 1 040 235,29 руб., в которых отражены оплаченные, но не выполненные работы контракту.

Пояснения должностных лиц Департамента городского хозяйства администрации города Евпатории Республики Крым по факту оплаты невыполненных работ в ходе проверки не представлены, доказательств обратного материалы дела не содержат.

Доводы Департамента городского хозяйства администрации города Евпатории Республики Крым о демонтаже оборудования подрядчиком не принимается судом, поскольку инвентаризацией установлено и подтверждено фотоматериалами (фотоматериалы приложены к акту выборочной инвентаризации от 28.03.2019), что следы демонтажа асфальтобетонного покрытия парковочных карманов площадью 510 кв.м, отсутствует, на момент инвентаризации произведено обустройство дорожной подушки из щебня с установкой бордюрного камня, следы демонтажа/монтажа урн также отсутствуют, на месте отсутствующего спортивного тренажера имеется подготовленное крепление по которому невозможно определить был ли на его месте демонтирован указанный тренажер.

Более того, к представленным актам выявления скрытых работ, послуживших по мнению заявителя основанием для демонтажа спорного оборудования, суд относится скептически, поскольку они составлены после (15-19.01.2019) фактического выявления недостатков в соответствии с иными документами, приобщенными к материалам дела, в частности, акта осмотра от 10.01.2019 и направления претензии подрядчику.

На основании изложенного, суд пришел к выводу о том, что материалы дела содержат доказательства, подтверждающие невыполнение ООО "Фаворитюгплюс", как подрядчиком, взятых на себя обязательств по контракту с департаментом, в то время как доказательств фактического осуществления обществом работ в декабре 2018 года заявителем не представлено.

Таким образом, счетной палатой правомерно установлено, что Департаментом городского хозяйства администрации города Евпатории Республики Крым платежными поручениями № 515050 от 07.12.2018 на сумму 5 089 366,57 руб. и № 773113 от 28.12.2018 на сумму 20 353 236,31 руб. произведена оплата фактически не выполненных работ по капитальному ремонту аллеи, расположенной между ул. Полтавская и ул. Чапаева, г. Евпатория, Республики Крым, в сумме не менее 1 040 235,29 руб. в нарушение пунктов 2.4.3 и 2.4.4 муниципального контракта № 70 от 21.11.2018 и статьи 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Относительно довода заявителя о непонятности оспариваемого пункта представления и невозможности из его содержания установить меры, которые необходимо принять предприятию в целях его исполнения, суд считает необходимым указать следующее.

Пунктом 4 резолютивной части представления департаменту предписано принять исчерпывающие меры, направленные на взыскание с подрядчика по муниципальному контракту №70 от 21.11.2018 - ООО «Фаворитюгплюс» стоимости оплаченных в декабре 2018 фактически не выполненных работ в общей сумме 1 040 235,29 рублей.

Таким образом, из оспариваемого представления однозначно усматривается какие действия необходимо совершить департаменту с целью исполнения представления и недопущения правонарушения в будущем, а именно: взыскать с ООО «Фаворитюгплюс» стоимость оплаченных в декабре 2018 фактически не выполненных работ в общей сумме 1 040 235,29 рублей, что свидетельствует об однозначности его толкования и исполнимости.

Иные доводы заявителя не нашли своего подтверждения в материалах дела, в виду чего были отклонены судом.

Учитывая изложенные обстоятельства, содержание спорного пункта представления в части необходимости принятия мер направленных на взыскание с подрядчика по муниципальному контракту №70 от 21.11.2018 - ООО «Фаворитюгплюс» стоимости оплаченных в декабре 2018 фактически не выполненных работ в общей сумме 1 040 235,29 рублей, суд пришел к выводу о полном соответствии спорного предписания в оспариваемой части нормам действующего законодательства, вследствие чего правовые основания для признания его недействительным у суда отсутствуют.

Таким образом, требования заявителю удовлетворению не подлежат.

Согласно статьи 110 АПК РФ все судебные расходы, связанные с рассмотрением данного арбитражного дела, относятся на заявителя.

Руководствуясь статьями 167 – 170, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Отказать в удовлетворении требований Департамента городского хозяйства администрации города Евпатории Республики Крым.

Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба, а в случае подачи апелляционной жалобы со дня принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции. 

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Республики Крым в порядке апелляционного производства в Двадцать первый арбитражный апелляционный суд (299011, 

<

...>) в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме).

Судья                                                                                                                   С.Ю.Кузнякова