Арбитражный суд Амурской области

675023, 

<

...>

тел. 

<

***>, факс 

<

***>

http://www.amuras.arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Дело №

А04-5021/2025

г. Благовещенск

15 декабря 2025 г.

Арбитражный суд Амурской области в составе судьи А.А. Стовбуна,

протокол вел секретарь судебного заседания Р.В. Галичанина

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «Вектор ДВ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

к Управлению по ЖКХ и благоустройству Администрации города Свободного (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

о взыскании 2 477 025,96 руб.,

при участии в заседании: от ответчика: ФИО1 – дов. № 214-ЖКХ от 03.02.2025

установил:

В арбитражный суд Амурской области обратилось общество с ограниченной ответственностью «Вектор ДВ» с исковым заявлением к Управлению по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного о взыскании 2 477 025,96 руб., из которых:

670 782,91 руб. – неустойка за период с 28.06.2024 по 07.11.2024, начисленная на основании пунктов 4.3.1 и 6.2.1 муниципального контракта № 103/2024 от 28.06.2024 на выполнение работ,

1 440 994,44 руб. – стоимость фактически выполненных работ по муниципальному контракту № 103/2024 от 28.06.2024,

5 000 руб. – штраф, начисленный на основании пункта 6.2.3 муниципального контракта № 103/2024 от 28.06.2024,

360 248,61 руб. – убытки (упущенная выгода).

Исковые требования обоснованы ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств по муниципальному контракту в части передачи участков с координатами поворотных точек конструктива, что повлекло невозможность выполнения контракта и последующего его расторжения заказчиком (ответчиком) в одностороннем порядке.

Ответчик возразил против заявленных требований, указав об отказе от спорного контракта (решение от 07.11.2024, опубликовано 07.11.2024), Решением Управления Федеральной антимонопольной службы по Амурской области № 02/06/104-924/2024 от 28.11.2024 сведения об ответчике внесены в реестр недобросовестных поставщиков сроком на 2 года, отрицает факт выполнения работ надлежащего качества и приемку результата выполнения таких работ ответчиком, указал, что фактически работы выполнены иными лицами- ИП ФИО2, ИП ФИО3

Истец заявил о фальсификации доводов ответчика по поводу передачи ему для подписания и скрепления печатью акта приема-передачи объектов. Ходатайство судом отклонено, поскольку, в силу ст. 161 АПК РФ подлежит рассмотрению по существу заявление о фальсификации доказательства, представленного другим лицом, участвующим в деле. При этом заявитель не указал- какое, по его мнению, доказательство является сфальсифицированным ответчиком и когда такое доказательство было представлено ответчиком в материалы дела. Доводы ответчика не могут быть признаны сфальсифицированными в силу ст. 161 АПК РФ.

Истец заявил о проведении экспертизы, проведение которой просил поручить ФИО4, стоимость экспертизы 5 000 руб., оплачена обществом с ограниченной ответственностью «Вектор ДВ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в размере 5 000 руб. по пл. пор. № 5 от 13.10.2025; срок проведения- 15 рабочих дней. На разрешение эксперта предлагает поставить вопрос об объеме и стоимости выполненных обществом с ограниченной ответственностью «Вектор ДВ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) работ надлежащего качества в ходе исполнения муниципального контракта № 103/2024 от 28.06.2024.

Суд назначил по делу экспертизу, производство которой поручил заявленному эксперту.

На разрешение эксперта поставлен следующий вопрос:

Определить объем и стоимость выполненных обществом с ограниченной ответственностью «Вектор ДВ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) работ надлежащего качества в ходе исполнения муниципального контракта № 103/2024 от 28.06.2024.

От эксперта ФИО4 поступило заключение № 2025/11-003-ТЗ, в котором даны следующие ответы на поставленный вопрос:

Оценка стоимости выполненных работ проведена пообъектно на основании утвержденных Заказчиком локальных сметных расчетов, акта №1 от 22.10.2024г объектов экспертизы с указанием объемов фактически выполненных на дату обследования работ в процентном отношении от сметной стоимости.

По объекту: обустройство контейнерной площадки для сбора твердых коммунальных отходов по адресу 

<

...>

Позиции ЛСР №15

1. Демонтаж: объем работ – 0,564 т, стоимость работ – 7 801,54 руб.

2. Разработка грунта: объем работ – 16,65 м3, стоимость работ – 3 114,68 руб.

3. Устройство основания под фундамент: объем работ – 8,325 м3, стоимость работ – 20 170,45 руб.

4. Устройство фундаментных плит: объем работ – 8 325 м3, стоимость работ – 123 103,68 руб.

5. Устройство закладных деталей: объем работ – 0,021 т, стоимость работ – 8 084,54руб.

6. Монтаж опорных стоек и пролетов: объем работ – 0,191 т, стоимость работ – 716 574,34 руб.

7. Монтаж вертикальных связей: объем работ – 0,099 т, стоимость работ – 28 227,92 руб.

8. Монтаж связей и распорок: объем работ – 0,09 т, стоимость работ – 12 440,10 руб.

9. Огрунтовка металлических поверхностей: объем работ – 38,45 м2, стоимость работ – 3 076,78 руб.

Итого:	207 497,39 руб.

Итого по смете с НДС 20%: 248 996,87 руб.

По объекту, обустройство контейнерной площадки для сбора твердых коммунальных отходов по адресу 

<

...>

Позиции ЛСР №29

1. Демонтаж: объем работ – 2,88 м3, стоимость работ – 7 801,54 руб.

2. Разработка грунта: объем работ – 17,75 м3, стоимость работ – 3 319,52 руб.

3. Устройство основания под фундамент: объем работ – 8,87 м3, стоимость работ – 21 496,96 руб.

4. Устройство фундаментных плит: объем работ – 8,87 т, стоимость работ – 131 199,70 руб.

5. Устройство закладных деталей: объем работ – 0,036 т, стоимость работ – 13 859,70 руб.

6. Монтаж опорных стоек и пролетов: объем работ – 0,328 т, стоимость работ – 28 462,72 руб.

7. Огрунтовка металлических поверхностей: объем работ – 32,9 м2, стоимость работ – 5 265,30 руб.

Итого: 208 772,79 руб.

Итого по смете с НДС 20%: 250 527,35 руб.

По объекту: обустройство контейнерной площадки для сбора твердых коммунальных отходов по адресу 

<

...>

Позиции ЛСР №4

1. Разработка грунта: объем работ – 7,65 м3, стоимость работ – 1 431,07 руб.

2. Устройство основания под фундамент: объем работ – 3,825 м3, стоимость работ – 9 267,51 руб.

3. Устройство фундаментных плит: объем работ – 3,825 м3, стоимость работ – 56 561,14 руб.

4. Устройство закладных деталей: объем работ – 0,012т, стоимость работ – 4 619,73 руб.

5. Монтаж опорных стоек и пролетов: объем работ – 0,11т, стоимость работ – 9 545,46 руб.

6. Монтаж вертикальных связей: объем работ – 0,05 т, стоимость работ – 13 239,66 руб.

7. Монтаж связей и распорок: объем работ – 0,262 т, стоимость работ – 6 629,23 руб.

8. Огрунтовка металлических поверхностей: объем работ – 21,9 т, стоимость работ – 1 752,43 руб.

Итого: 103 046,23 руб.

Итого по смете с НДС 20%: 123 655,48 руб.

По объекту: обустройство контейнерной площадки для сбора твердых коммунальных отходов по адресу г. Свободный, ул. Чубаровых, 59

Позиции ЛСР №6

1. Демонтаж: объем работ – 3,0 м3+1,32м3+0,06 т, стоимость работ – 31 751,12 руб.

2. Разработка грунта: объем работ – 7,65 м3, стоимость работ – 1 431,07 руб.

3. Устройство основания под фундамент: объем работ – 3,825 м3, стоимость работ – 9 267,51 руб.

4. Устройство фундаментных плит: объем работ – 3,825 м3, стоимость работ – 56 561,14 руб.

5. Устройство закладных деталей: объем работ – 0,012 т, стоимость работ – 4 619,73 руб.

6. Монтаж опорных стоек и пролетов: объем работ – 0,328 т, стоимость работ – 9 545,46 руб.

7. Монтаж вертикальных связей: объем работ – 0,05 т, стоимость работ – 6 631,98 руб.

8. Монтаж связей и распорок: объем работ – 0,04 т, стоимость работ – 5 528,98 руб.

Итого: 125 336,99 руб.

Итого по смете с НДС 20%: 150 404 ,39 руб.

По объекту: обустройство контейнерной площадки для сбора твердых коммунальных отходов по адресу 

<

...>

Позиция ЛСР № 32

1. Разработка грунта: объем работ – 7,65 м3, стоимость работ – 2 833,30 руб.

2. Устройство основания под фундамент: объем работ – 3,825 м3, стоимость работ – 9 267,51 руб.

3. Устройство фундаментных плит: объем работ – 3,825 м3, стоимость работ – 56 561,14 руб.

4. Монтаж опорных стоек и пролетов: объем работ – 0,11 т, стоимость работ – 9 545,46 руб.

5. Монтаж связей и распорок: объем работ – 0,262 т, стоимость работ – 25 350,36 руб.

Итого: 103 557,77 руб.

Итого по смете с НДС 20%: 120 869,72 руб.

По объекту: обустройство контейнерной площадки для сбора твердых коммунальных отходов по адресу 

<

...>

Позиции ЛСР №10

1. Разработка грунта: объем работ – 4,65 м3, стоимость работ – 1 722,22 руб.

2. Устройство основания под фундамент: объем работ – 2,325 м3, стоимость работ – 5 633,19 руб.

3. Устройство фундаментных плит: объем работ – 2,325 м3, стоимость работ – 34 380,27 руб.

4. Устройство закладных деталей: объем работ – 0,009 т, стоимость работ – 3 464,81 руб.

5. Монтаж опорных стоек и пролетов: объем работ – 0,082 т, стоимость работ – 7 115,71 руб.

6. Монтаж вертикальных связей: объем работ – 0,02 т, стоимость работ – 2 652,78 руб.

7. Монтаж связей и распорок: объем работ – 0,07 т, стоимость работ – 9103,17 руб.

Итого: 64 072,15 руб.

Итого по смете с НДС 20%: 76 886,58 руб.

По объекту: обустройство контейнерной площадки для сбора твердых коммунальных отходов по адресу 

<

...>

Позиции ЛСР №11

1. Демонтаж: объем работ – 2,41 м3, стоимость работ – 19 969,38 руб.

2. Разработка грунта: объем работ – 22,65 м3, стоимость работ – 4 151,73 руб.

3. Устройство основания под фундамент: объем работ – 11,325 м3, стоимость работ – 27 439,07 руб.

Итого: 51 560,18 руб.

Итого по смете с НДС 20%: 61 872,22 руб.

По объекту: обустройство контейнерной площадки для сбора твердых коммунальных отходов по адресу 

<

...>

Позиции ЛСР №2

1. Демонтаж: объем работ – 2,41м3, стоимость работ – 5 502,23 руб.

2. Разработка грунта: объем работ – 22,65 м3, стоимость работ – 3 944,42 руб.

3. Устройство основания под фундамент: объем работ – (11,325*0,65)м3, стоимость работ – 50 700 руб.

Итого: 60 146,65 руб.

Итого по смете с НДС 20%: 72 175,98 руб.

По объекту: обустройство контейнерной площадки для сбора твердых коммунальных отходов по адресу 

<

...>

Позиции ЛСР №1

1. Демонтаж: объем работ – 1,2 м3, стоимость работ – 9 034,79 руб.

2. Разработка грунта: объем работ – 16,65 м3, стоимость работ – 3 051,91 руб.

3. Устройство основания под фундамент: объем работ – 8,325 м3, стоимость работ – 17 840,87 руб.

Итого: 29 927,57 руб.

Итого по смете с НДС 20%: 35 913,08 руб.

По объекту: обустройство контейнерной площадки для сбора твердых коммунальных отходов по адресу 

<

...>

Позиции ЛСР №24

1. Демонтаж: объем работ – 5,18 м3, стоимость работ – 38 826,50 руб.

2. Разработка грунта: объем работ – 22,65 м3, стоимость работ – 4 151,73 руб.

3. Устройство основания под фундамент: объем работ – 11,325 м3, стоимость работ – 27 439,07 руб.

Итого: 70 417,30 руб.

Итого по смете с НДС 20%: 84 500,76 руб.

На основании утвержденных заказчиком локальных сметных расчетов и акта №1 от 22.10.2024г установлено, что общая стоимость работ, выполненных подрядчиком ООО "Вектор-ДВ" составляет 1 225 802,42 руб. с учетом НДС.

В результате визуального и инструментального обследования являющихся предметом судебного разбирательства объектов установлено соответствие данных акта №1 от 22.10.2024г и фактического состояния площадок ТКО (степень готовности не менее указанной в акте). Объем выполненных работ соответствует исковым требованиям.

На основании предоставленных истцом документов на приобретенные для выполнения работ по муниципальному контракту материалы, предусмотренные техзаданием и позициями локальных сметных расчетов заказчика, качество выполненных работ подтверждено.

С учетом поступления в суд экспертного заключения, производство по делу следует возобновить.

Суд считает необходимым привлечь к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора, индивидуального предпринимателя ФИО2 (ОГРНИП 

<

***>, ИНН 

<

***>) (675014, 

<

...>), индивидуального предпринимателя ФИО3 (ОГРНИП 

<

***>, ИНН 

<

***>) (676454, 

<

...> Октября, д.73, кв. l6).

Руководствуясь ст. 51, 146, ст. 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

определил:

Возобновить производство по делу.

привлечь к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора, индивидуального предпринимателя ФИО2 (ОГРНИП 

<

***>, ИНН 

<

***>) (675014, 

<

...>), индивидуального предпринимателя ФИО3 (ОГРНИП 

<

***>, ИНН 

<

***>) (676454, 

<

...> Октября, д.73, кв. l6).

Назначить судебное заседание по делу в заседании арбитражного суда на 13 января 2026 г. на 09 час. 15 мин. в помещении суда по адресу 

<

...>, кабинет № 230, тел. 

<

***> (канцелярия).

К судебному заседанию предложить сторонам представить письменную позицию по делу с учетом заключения эксперта.

Кроме того, истцу: обосновать расчет неустойки с учетом установленных контрактом сроков оплаты выполненных работ, а также стоимости фактически выполненных работ; доказательства выполнения работ на заявленную сумму; расчет упущенной выгоды, доказательства причинения истцу убытков в виде упущенной выгоды и доказательства того, какие меры были приняты и какие приготовления были сделаны истцом для ее получения (доказательства реальности возможного получения упущенной выгоды); всю имеющуюся переписку сторон по вопросу исполнения контракта; письменные обращения коммунальных служб и АО «РЖД» по вопросу размещения контейнерных площадок; в случае поступления отзыва ответчика, возражения по каждому заявленному доводу; рассмотреть вопрос о заключении с ответчиком мирового соглашения.

Ответчику и третьим лицам: доказательства выполнения работ в соответствии с условиями муниципальных контрактов №№ 164/2025 от 20.06.2025, 2154/2025 от 14.07.2025 (сметы, справки о стоимости выполненных работ, акты приемки выполненных работ, документы об оплате выполненных работ).

ИП ФИО2, ИП ФИО3- отзыв на заявленные требования, позицию подтвердить документально.

Судья	 	А.А. Стовбун.