АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ул. Гоголя, 18, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450076, http://ufa.arbitr.ru/, сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

Резолютивная часть

Дело № А07-29919/2021

г. Уфа

22 июня 2023 года

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи Кузнецова Д.П., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по иску 

Товарищества собственников недвижимости "Верхнеторговая 4" (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

к Обществу с ограниченной ответственностью "Многофункциональный  комплекс "Гостиный двор" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

об обязании в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента вступления  решения суда в законную силу, устранить недостатки в здании,  расположенном по адресу: Республика Башкортостан, город Уфа, площадь  Верхнеторговая, дом 4, взыскать расходы по оплате государственной  пошлины в размере 6 000 руб., в случае неисполнения решения арбитражного  

суда в части устранения недостатков, взыскать с неустойку в размере 10 000  руб. за каждый день, начиная с даты истечения месячного срока после  вступления решения в законную силу и до его фактического исполнения (с  учетом уточненных заявленных требований).  

Руководствуясь статьями 49, 110, 167-170 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования Товарищества собственников недвижимости  

"Верхнеторговая 4" удовлетворить частично. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью  

«Многофункциональный комплекс «Гостиный двор» (ИНН 

<

***>,  

ОГРН 

<

***>) в течении 30 (тридцати) календарных дней с момента  

решения суда в законную силу, устранить следующие недостатки в здании,  

расположенном по адресу: Республика Башкортостан, город Уфа, площадь  

Верхнеторговая, д.4: - Заделка трещин пола паркинга – 670м; - Монтаж колесоотбойников – 1896 кг; - Заделка монтажных отверстий и раковин в бетоне – 0,0055мЗ; - Заделка деформационного шва – 33,32м; - Оштукатуривание и покраска – 45,75м2; - Разборка бетонных конструкций – 0,17мЗ; 

- Гидроизоляция деформационного шва в районе пожарного въезда –  

6м; - Герметизация деформационного шва (верт.) – 4,6м; - Устройство каналов для отвода воды – 32,7мЗ; - Устройство потолков «Армстронг» - 33м2; 

- Устройство потолков «Грильято» - 697м2;  

- Устройство потолков реечных – 127,6м2; - Установка унитазов – 3шт.; - Установка умывальников – 1 шт.; - Установка светильников – 22 шт.; - Установка электрополотенец – 12 шт.; - Установка вентрешеток – 12 шт.; - Затягивание проводов 18м; - Штукатурка стен поверхностей санузлов – 257м2; - Окраска стен поверхностей санузлов – 257м2; - Покраска стен на крыше – 67,3м2; - Покраска металлоконструкций – 270м2; - Утепление венткоробов – 1,14м3. 

В случае неисполнения решения суда по истечении месяца с момента  

вступления его в законную силу и до момента фактического исполнения  

взыскать с общества с ограниченной ответственностью  

«Многофункциональный комплекс «Гостиный двор» (ИНН 

<

***>,  

ОГРН 

<

***>) в пользу Товарищества собственников недвижимости  

«Верхнеторговая 4» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) неустойку в  

размере 2 000 рублей, за каждый день просрочки. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  

«Многофункциональный комплекс «Гостиный двор» (ИНН 

<

***>,  

ОГРН 

<

***>) в пользу Товарищества собственников недвижимости  

«Верхнеторговая 4» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) расходы на  

оплату экспертизы в размере 295 000 руб., расходы по оплате  

государственной пошлины в размере 6 000 руб. В удовлетворении остальной части иска отказать. 

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную  

силу по ходатайству взыскателя. 

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный  апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления  его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Башкортостан.  

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения  апелляционной жалобы можно получить на Интернет-сайте Восемнадцатого  арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru.  

Судья Д.П.Кузнецов