Арбитражный суд Тамбовской области

392020 г. Тамбов, ул. Пензенская, 67/12

http://tambov.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е

Дело №А64-1522/2023

15 сентября 2023года

г. Тамбов

Резолютивная часть решения объявлена 11.09.2023г.

В полном объеме решение изготовлено 15.09.2023г.

Арбитражный суд Тамбовской области в составе судьи  Н.Ю. Макаровой 

при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудиозаписи 

помощником судьи О.И. Долгополовым 

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по иску

ООО «Профиснаб», г. Рассказово Тамбовской области (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

к МБУ «Дирекция городского хозяйства», г.Тамбов (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

о взыскании 2 614 107,31 руб.

при участии в судебном заседании:

от истца: ФИО1, доверенность от 01.02.2023г.;

от ответчика: ФИО2, доверенность от 29.11.2022г.

УСТАНОВИЛ:

ООО «Профиснаб» обратилось в Арбитражный суд Тамбовской области с исковым заявлением  к МБУ «Дирекция городского хозяйства» о взыскании задолженности по контракту № 49 от 10.10.2022 на выполнение работ  по устройству площадок для выгула домашних животных в размере 2 614 107,31 руб.

В процессе рассмотрения дела истец уточнял требования.

Истец просит суд взыскать по Контракту от 10.10.2022 № 49 на выполнение работ по устройству площадок для выгула домашних животных (идентификационный код закупки: 223682909558068290100100390014299244) сумму в размере 62638,88руб.

При рассмотрении дела в судебном заседании 05.09.2023 объявлялся перерыв. Судебное заседание после перерыва продолжено 11.09.2023.

Рассмотрев материалы дела, суд установил.

Между ООО «ПрофиСнаб» и МБУ «Спецтехуниверсал» (позднее переименованного в МБУ «Дирекция городского хозяйства») был заключен контракт от 10.10.2022 № 49 на выполнение работ по устройству площадок для выгула домашних животных (идентификационный код закупки: 223682909558068290100100390014299244).

Согласно п. 1.1. указанного контракта Подрядчик ООО «ПрофиСнаб» обязуется выполнить работы по устройству площадок для выгула домашних животных (Работы),   в соответствии с локальным сметным расчетом (Приложение №  1  к Контракту) и в полном соответствии с положениями настоящего Контракта, извещением об осуществлении закупки, с заявкой (окончательным предложением) Подрядчика (участника закупки).

Заказчик согласно п. 1.2. указанного Контракта обязуется принять и оплатить Работы в соответствии с положениями настоящего Контракта.

Цена Контракта определена сторонами в п. 2.1.    Контракта и составляет 2 770 071   руб. 40 копеек, НДС не облагается.

Цена Контракта включает общую стоимость всех Работ, расходы на приобретение, перевозку, хранение материалов и оборудования, вывоз мусора, страхование, уплату таможенных пошлин и сборов, налогов и других обязательных платежей, транспортные расходы и прочие обязательные платежи, предусмотренные законодательством РФ.

В соответствии с п. 3.2. Контракта оплата по Контракту осуществляется Заказчиком в безналичной форме платежными поручениями путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в статье 16 настоящего Контракта на основании документа о приемке работ, подписанного и размещенного Заказчиком в единой информационной системе в соответствии с п. 7.3 настоящего Контракта.

 Порядок и сроки оплаты выполненной работы: оплата производится Заказчиком одним этапом в срок не превышающем 7 рабочих дней с даты подписания и размещения Заказчиком в единой информационной системе документа о приемке работ в соответствии с п. 7.3. настоящего Контракта.

Документы о приемке работ, подтверждающие возникновение денежных обязательств по оплате настоящего Контракта, должны быть сформированы и подписаны в форме электронного документа в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в соответствии п.п. ,1).п. 13 ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ.

Истцом согласно условий Контракта были выполнены работы обустройству площадок для выгула домашних животных по следующим адресам: 

<

...> 

<

...> в р-не д.38 «Б»; 

<

...> в районе д. 112, к.Е.

Общая сумма выполненных работ по вышеуказанным объектам составляет 1 924 072,04 руб. (без учета 2% непредвиденных расходов).

Подрядчиком в соответствии с п. 7.3. настоящего Контракта Заказчику были направлены для подписания документы о приемке работ.

Истец в исковом заявлении ссылается на то, что в части выполнения работ по адресу: 

<

...> в районе д. 175/15 сложилась следующая ситуация.

На момент фактической передачи Заказчиком (ответчиком) Исполнителю ( земельного участка для обустройства площадки для выгула животных по адресу: 

<

...> в районе д. 175/15 указанный земельный участок оказался в состоянии непригодном для выполнения предусмотренных Контрактом работ, которые не позволяют осуществить монтаж тренажеров, оборудования и ограждений.

Переговоры и переписка с Заказчиком по вопросу переноса (продления) срока для осуществления обустройства площадки для выгула животных на весенний период, не привели к положительному разрешению указанного вопроса.

Заказчик отказался  оплачивать выполненные Подрядные работы по обустройству площадок для выгула домашних животных.

Претензия истца оставлена ответчиком без удовлетворения. Истец обратился в Арбитражный суд Тамбовской области с настоящим иском.

По уточненным требованиям истец взыскивает с ответчика задолженность по контракту от 10.10.2022г.  № 49 в размере 62638,88руб.

Ответчик возражает против удовлетворения уточненных исковых требований. Считает, что уточненная сумма правомерно удержана им в качестве неустойки.

Оценив представленные в материалы дела доказательства, суд считает заявленные требования подлежащими удовлетворению. При этом суд руководствовался следующим. 

Согласно ч. 1 ст. 4  АПК РФ заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном настоящим кодексом.

В силу  ст. 8  ГК РФ гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

В соответствии со ст. ст. 307, 309  ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги, и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. 

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий согласно правилам статьи 310 ГК РФ не допускается.

Как следует из материалов дела, между ООО «ПрофиСнаб» и МБУ «Спецтехуниверсал» (позднее переименованного в МБУ «Дирекция городского хозяйства») был заключен контракт от 10.10.2022 № 49.

Исходя из правовой природы отношений, вытекающих из Контракта, к возникшему спору подлежат применению нормы главы 37 Гражданского кодекса РФ о договорах подряда, а также Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В соответствии с п. 8 ст. 3 Федерального закона N 44-ФЗ (в редакций, действовавшей на момент спорных правоотношения), под государственным или муниципальным контрактом понимается договор, заключенный от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации (государственный контракт), муниципального образования (муниципальный контракт) государственным или муниципальным заказчиком для обеспечения соответственно государственных нужд, муниципальных нужд.

По государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату (пункт 2 статьи 763 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

К отношениям по государственным или муниципальным контрактам на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд в части, не урегулированной Кодексом, применяется закон о подрядах для государственных или муниципальных нужд (статья 768 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Согласно статье 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется по заданию другой стороны (заказчика) выполнить определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат и оплатить его. К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договорах.

В соответствии с п. 1 ст. 740 ГК РФ, по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Статьей 746 ГК РФ установлено, что оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда.

Пунктом 1.1 Контракта установлено, что Подрядчик обязуется выполнить работы по устройству площадок для выгула домашних животных в соответствии с локально-сметным расчетом, установленном в Приложение № 1, по 4 адресам:

1) 

<

...> в районе д. 112;

2) 

<

...> в районе д. 386;

3) г. Тамбов, ул. Рылеева/Агапкина;

4) 

<

...> в районе д, 175/15.

Согласно п. 3.2 Контракта оплата выполненных работ производится одним этапом, т.е. после выполнения 100% объёмов работ, учтенных сметным расчетом, в котором указано, что весь объем выполняемых работ равен 1 усл.ед, стоимостью 2 770 071,4 руб.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что должен быть составлен один акт о приемке выполненных работ (форма КС-2, а не отдельных по каждому объекту) и одно платежное поручение.

В соответствии с п. 4.2 Контракта общий срок выполнения работ с 17.10.2022 по 01.12.2022, включая:

-   с   17.10.2022   по   17.11.2022  срок  фактического  выполнения работ и формирования, подписания и размещения Подрядчиком в ЕИС документа о приемке в соответствии с пп. 1 и 2 п. 7.3 настоящего Контракта;

- с 18.11.2022 по 01.12.2022 (либо, в случае просрочки выполнения работ, в течение 10 рабочих дней, следующих заднем поступления Заказчику документа о приемке в соответствии с п.п. 3 п. 7.3. Контракта) срок принятия результатов исполнения       Контракта,       подписания       и       размещения       Заказчиком в ЕИС документа о приемке в соответствии с пп. 4 п. 7.3 Контракта.

Согласно п. 4.3 Контракта дата окончания работ является исходной - 17.11.2022 для определения имущественных санкций в случае нарушения сроков выполнения работ.

В соответствии с разделом 10 «Ответственность сторон» установлено, что

-   в   случае   нарушения   сроков   выполнения   работ,   предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной   трехсотой   действующей   на   дату   уплаты   пени   ключевой   ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком (п. 10.1 Контракта);

- за каждый факт неисполнения или ненадлежащего неисполнения Подрядчиком  обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключение просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных  Контрактом,   размер штрафа устанавливается в размере 1 (один) процент от цены Контракта, но не более 5 000 рублей и не менее 1 000 руб. (п. 10.2 Контракта).

Судом установлено, что Заказчик передал Подрядчику 2 площадки по адресам: г. Тамбов, ул. Рылеева/Агапкина и ул. Астраханская в районе д. 175/15, в ненадлежащем виде - без согласования расположения площадок с коммунальными службами.

Подрядчик не имел возможность приступить к исполнению работ по Контракту с 10.11.2025 по 25.11.2022, срок вынужденного простоя составил 15 дней.

Просрочка допущена подрядчиком не по его вине.

Лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности (ст. 401 ГК РФ)

Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства.

Должник не считается просрочившим, пока обязательство не может быть исполнено вследствие просрочки кредитора (п. 3 ст. 405 ГК РФ).

Суд считает, что необоснованно удержана заказчиком неустойка, выполненные работы истцом подлежат оплате в полном объеме.

Истец взыскивает с ответчика задолженность по контракту от 10.10.2022г.  № 49 в размере 62638,88руб.

Требования заявлены правомерно и подлежат удовлетворению.

В соответствии со ст. 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

В соответствии с ч.2 ст. 65 АПК РФ обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, определяются арбитражным судом на основании требований и возражений лиц, участвующих в деле, в соответствии с подлежащими применению нормами материального права. Представленные по делу и исследованные судом доказательства и установленные обстоятельства, согласно заявленных оснований, предмета иска, суд находит достаточными для разрешения спора по существу.

Согласно ст. 110 АПК РФ суд распределяет судебные расходы по госпошлине.

Руководствуясь статьями 102, 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации, 

СУД  РЕШИЛ:

Взыскать с МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ДИРЕКЦИЯ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА",  

<

...> (ОГРН 

<

***>, дата регистрации 12.11.2013, ИНН 

<

***>) в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФИСНАБ",  Тамбовская область, Рассказово город, ФИО4 улица, дом 4, помещение/комната 2/3 (ОГРН 

<

***>, дата регистрации  23.07.2019, ИНН 

<

***>) задолженность по контракту от 10.10.2022г.  № 49 в размере 62638,88руб.,

в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 2506руб.

Истцу по заявлению, налоговому органу выдать исполнительные листы после вступления решения в законную силу.

Решение арбитражного суда вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы, решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Тамбовской области.

Копии решения на бумажном носителе выдаются лицам, участвующим в деле, по заявлению.

Судья                                                                        Макарова Н.Ю.