Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-131770/2019

31 августа 2020 года

г.Санкт-Петербург

Резолютивная часть решения объявлена  30 июля 2020 года.

Полный текст решения изготовлен  31 августа 2020 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе: судьи О.Н. Сергеевой

при ведении протокола судебного заседания помощником ФИО1 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: Некоммерческая организация "Фонд-региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах" (адрес: Россия 191023, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 

<

...>; ОГРН: 

<

***>;);ответчик: общество с ограниченной ответственностью "АСК-ИНВЕСТ"; (адрес: Россия 196143, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 

<

...>; Россия 196143, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ул ЛЕНСОВЕТА 32/680ГРН: 1107847209436;1107847209436); третье лицо:

о взыскании 49 165 руб. 77 коп. при участии

- от истца: ФИО2 по доверенности от 20.11.19

- от ответчика: не явился, извещен надлежащим образом

установил:

НО "Фонд-региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах" после уточнения исковых требований в порядке ст. 49 АПК РФ. предъявила иск о взыскании с ООО "АСК-ИНВЕСТ" 1 596 870 руб. 25 коп. пеней за несвоевременную передачу документов по договору №1-156/Б/АВР/2017 от 30.03.2017.

Ответчик отзыв не представил, извещен надлежащим образом.

Дело рассматривается без участия ответчика на основании ст. 156 АПК РФ.

Судом установлено:

Между некоммерческой организацией «Фонд-региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» (далее - Фонд, Заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «АСК-ИНВЕСТ» (далее -подрядчик, ответчик) заключен договор от 30.03.2017 № 1 -156/Б/АВР/2017 на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, применяемый для получателей субсидии, формирующих фонд капитального ремонта на счете некоммерческой организации «Фонд - региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» или на специальном счете, владельцем которого является региональный оператор (далее -договор).

Согласно пункту 5.2.3 договора подрядчик при производстве работ по капитальному ремонту представляет заказчику в течение (пяти) рабочих дней со дня вступления договора в силу рабочую схему производства работ с указанием зоны производства земляных работ и/или зоны установки строительных лесов и места размещения строительного города и складирование материала.

В соответствии с пунктом 13.5 Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до момента исполнения сторонами своих обязательств, в том числе гарантийных обязательств Подрядчика.

В соответствии с пунктом 2.2 Договора датой окончания выполнения работ на объекте по виду работ считается дата подписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по виду работ (далее - Акт о приемке в эксплуатацию).

Таким образом, подрядчик должен был передать указанные в пункте 5.2.3 Договора документы в срок не позднее 06.04.2017. Вместе с тем на момент подписания Акта о приемке в эксплуатацию объекта договора, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ФИО3 ул., д. 7, лит. А (17.10.2018), Подрядчик так и не передал заказчику указанную документацию.

Просрочка подрядчика по передаче документации на момент подписания Акта о приемке в эксплуатацию составляет 559 календарных дней.

В силу пункта 10.2 договора в случае нарушения подрядчиком сроков представления документов, указанных в пункте 5.2.3 договора, он уплачивает Заказчику пени в размере ОД % от общей стоимости работ по договору в соответствии с пунктом 3.1 договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

Согласно пункту 3.1 договора общая стоимость выполнения работ по договору (с учетом дополнительных соглашений к договору от 30.03.2017, от 17.10.2018 № 1) составляет 2 731 431 (два миллиона семьсот тридцать одна тысяча четыреста тридцать один) рубль 58 копеек.

Таким образом, размер пени за нарушение подрядчиком срока предоставления документов в соответствии с пунктом 5.2.3 Договора составляет 1 526 870 (один миллион пятьсот двадцать шесть тысяч восемьсот семьдесят) рублей 25 копеек.

Расчет суммы требований: 2 731 431, 58 (общая стоимость работ по договору) * 0,1 % * 559 (количество дней просрочки за период с 07.04.2017 по 17.10.2018) = 1 526 870,25 руб.

Учитывая изложенное, иск подлежит удовлетворению.

Расходы по оплате государственной пошлины в сумме 2 000 руб. 00 коп. относятся на ответчика.

В связи с увеличением суммы иска, с ответчика подлежит взысканию в доход федерального бюджета 25 269 руб. 00 коп. государственной пошлины.

Руководствуясь статьями 309, 310, 330, Гражданского кодекса Российской Федерации 110, 156, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

решил:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "АСК-ИНВЕСТ" в пользу Некоммерческой организации "Фонд-региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах" 1 526 870 руб. 25 коп. пеней и 2 000 руб. расходов по оплате государственной пошлины.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "АСК-ИНВЕСТ" в доход федерального бюджета 25 269 руб. 00 коп. государственной пошлины                   

Выдать исполнительные листы в порядке ст. 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия.

Судья Сергеева О.Н.