ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело № А40-40310/2019-147-311

г. Москва

10 июля 2019 г.

Резолютивная часть решения оглашена 03.07.2019г.

Решение в полном объеме изготовлено 10.07.2019г.

Арбитражный суд города Москвы в составе  судьи Н.В. Дейна 

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1   

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску ГБУ «ДО ТЗФ ТиНАО» (адрес 108818, г. Москва, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 03.09.2012, ИНН: 

<

***>)

к ПАО «МОЭСК» - Новая Москва (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, дата регистрации 01.04.2005, адрес 115114, 

<

...>)

о взыскании задолженности в размере 4 455 017 руб. 35 коп. 

с участием

от заявителя – ФИО2 (паспорт, доверенность № 118-Ю от 08.11.2018 г.)

от ответчика – неявка (уведомлен)

суд 

УСТАНОВИЛ:

ГБУ «ДО ТЗФ ТиНАО» обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском к ПАО «МОЭСК» - Новая Москва о взыскании неосновательного обогащения в связи с расторжением Договора  от 27.06.17 № НМ-17-354-1430(900716) в виде предоплаты в размере 2 391 958, 96 руб. и неустойку в размере 2 063 058 руб. 39 коп.

Требования уточнялись, приняты судом к рассмотрению  в указанной редакции в порядке ст. 49 АПК РФ.

Ответчик, извещенный надлежащим образом, в судебное заседание не явился. 

Дело рассмотрено в порядке ст.ст.123, 156 АПК РФ в отсутствии представителя, надлежащим образом извещенного о дате, времени и месте судебного разбирательства.

Истец поддержал требования в полном объеме.

Выслушав объяснения представителя истца, исследовав материалы дела и оценив имеющиеся в деле доказательства в совокупности, арбитражный суд первой инстанции приходит к выводу, что иск подлежит удовлетворению в части, исходя из следующего.

Как следует из материалов дела, 27 июня 2017 года между Государственным бюджетным учреждением города Москвы «Дирекция по обслуживанию территорий зеленого фонда Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы» (далее – ГБУ «ДО ТЗФ ТиНАО», Заявитель, Истец) и Публичным акционерным обществом «Московская объединенная электросетевая компания» (далее – филиал ПАО «МОЭСК» - Новая Москва, Сетевая организация, Ответчик) заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 27.06.2017 №НМ-17-354-1430(900716).

Согласно пункту 1 статьи 1 договора Сетевая организация приняла на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя (далее – технологическое присоединение): Комплекса объектов на земельном участке, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик:

Максимальныя мощность присоединяемых энергопринимающих устройств: 500 кВт;

Категория надежности: III (Третья);

Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 0,4 кВ;

Максимальныя мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств: 0 кВт.

Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения Комплекса объектов на земельном участке, расположенном по адресу: 142160, г. Москва, п. Вороновское, вблизи д. Ясенки, кадастровый номер: 50:27:0030502:56 (далее – Комплекс объектов).

Точка(и) присоединения указана(ы) в технических условиях для присоединения к электрическим сетям (далее – технические условия) и распологается(ются) на расстоянии не далее 25 метров от границы участка Заявителя, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты Заявителя.

В соответствии с пунктом 5 статьи 1 договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 1 год со дня заключения договора.

Цена договора составляет 5 979 897 (Пять миллионов девятьсот семьдесят девять тысяч восемьсот девяносто семь) рублей 39 копеек.  

Во исполнение пункта 1 Дополнительного соглашения, Заявителем произведена выплата авансов на общую сумму 2 391 958 (Два миллиона триста девяносто одна тысяча девятьсот пятьдесят восемь) рублей 96 копеек: 

- 10% по счету от 22.09.2017 №088009086 за услуги технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям в размере 597 989 (Пятьсот девяносто семь тысяч девятьсот восемьдесят девять) рублей 74 копейки (платежное поручение от 26.09.2017 № 3718);

- 30% по счету от 26.09.2017 №088009087 за услуги технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям в размере 1 793 969 (Один миллион семьсот девяносто три тысячи девятьсот шестьдесят девять) рублей 22 копейки (платежное поручение от 28.09.2017 №3756).

Свои обязательства по выплате авансов, согласно договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 27.06.2017 №НМ-17-354-1430(900716) и Дополнительного соглашения от 29.08.2017 №1 к договору,  Заявителем исполнены. 

Нормы, регламентирующие договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержатся в статье 26 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» и Правилах технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям».

В соответствии с подпунктом «б» пункта 16 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (далее – Правила технологического присоединения), срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств не может превышать 1 (Один) год.

Согласно подпункту «в» пункта 16 Правил технологического присоединения, к существенным условиям договора технологического присоединения относится право Заявителя в одностороннем порядке расторгнуть договор при нарушении Сетевой организацией сроков технологического присоединения, указанных в договоре.

Таким образом, законодательством закреплено специальное основание для одностороннего расторжения договора технологического присоединения – нарушение Сетевой организацией сроков технологического присоединения, указанных в договоре.

Согласно Дополнительному соглашению, 29.08.2018 срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению (1 год) истек. 

Руководствуясь пунктом 16 Правил технологического присоединения, а также пункта 15 договора, Заявителем принято решение о расторжении в одностороннем порядке договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 27.06.2017 №НМ-17-354-1430(900716), в связи с нарушением Сетевой организацией сроков технологического присоединения, указанных в договоре.

В порядке досудебного (претензионного) урегулирования спора, 25.10.2018 в адрес Сетевой организации была направлена претензия № 02-18-1764/8 с Уведомлением о расторжении в одностороннем порядке договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 27.06.2017 №НМ-17-354-1430(900716) и требованием вернуть авансовые платежи на общую сумму 2 391 958 (Два миллиона триста девяносто одна тысяча девятьсот пятьдесят восемь) рублей 96 копеек и уплатить неустойку на сумму 2 063 058 (Два миллиона шестьдесят три тысячи пятьдесят восемь) рублей 39 копеек, однако, необходимых действий, в соответствии с нормами гражданского законодательства, со стороны Ответчика не последовало, взаимного согласия не достигнуто. 

Согласно списка № 1 внутренних почтовых отправлений от 31.10.2018г., почтовый идентификатор №117997 15 48905 2, Ответчику была направлена претензия № 02-18-1764/8 с Уведомлением о расторжении в одностороннем порядке договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 27.06.2017 №НМ-17-354-1430(900716).

 Исходя из информации, содержащийся на сайте «Почта России»: почтовое отправление (почтовый идентификатор №117997 15 48905 2) было получено адресатом 07.11.2018. 

Таким образом, договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 27.06.2017 №НМ-17-354-1430(900716) считается расторгнутым с 07.11.2018.

На момент расторжения договора обязательства Ответчиком по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств и обеспечению точки присоединения в границах участка Заявителя не далее 25 метров, не исполнены.

В соответствии со статьей 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение). 

Согласно части 4 статьи 453 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае, когда до расторжения или изменения договора одна из сторон, получив от другой стороны исполнение обязательства по договору, не исполнила свое обязательство либо предоставила другой стороне неравноценное исполнение, к отношениям сторон применяются правила об обязательствах вследствие неосновательного обогащения (глава 60), если иное не предусмотрено законом или договором либо не вытекает из существа обязательства.

На основании вышеизложенного требование истца о взыскании неосновательного обогащения в размере 2 391 958, 96 руб. подлежит удовлетворению.

Истец также просит взыскать с ответчика в пользу истца неустойку в размере 2 063 058 руб. 39 коп.

Между тем, требование в данной части удовлетворению не подлежит, взыскивается неосновательное обогащение. Данные требования не связаны  с исполнением Договора, не подлежат удовлетворению, учитывая предмет спора и отказ от Договора со стороны истца.

Согласно ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основании своих требований и возражений.

Учитывая вышеизложенное исковые требования подлежат удовлетворению в части. 

Госпошлина в размере 24 308, 75 руб., подлежит взысканию с ответчика в пользу истца в соответствии со ст. 110 АПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 4, 110,  167, 170, 176, 188, 189 АПК РФ, ст.309, 310, 1102 ГК РФ, арбитражный суд первой инстанции 

РЕШИЛ:

Взыскать с ПАО «МОЭСК»  в пользу ГБУ «ДО ТЗФ ТиНАО» неосновательное обогащение в связи с расторжением Договора  от 27.06.17 № НМ-17-354-1430(900716) в виде предоплаты в размере 2 391 958, 96 руб. и расходы по госпошлине в размере 24 308, 75 руб.

В остальной части требования оставить без удовлетворения. 

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд.

СУДЬЯН.В. Дейна