АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107

E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru

http://www.tatarstan.arbitr.ru

тел. (843) 294-60-00

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

 

г. Казань                                                                                    Дело № А65-16792/2021

 

Дата принятия решения –  13 октября 2021 года.

Дата объявления резолютивной части –  11 октября 2021 года.

Арбитражный суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи Воробьева Р.М., при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, рассмотрев дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Альметтрой116», г.Альметьевск (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «АльянсСтрой», г. Альметьевск (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании задолженности в размере 1 011 032,35 руб., неустойки в размере 42 713,29 руб.,

с участием:

от истца – ФИО2 по доверенности,

от ответчика – не явился, 

у с т а н о в и л :

Истец - общество с ограниченной ответственностью «Альметтрой116» обратился в Арбитражный суд Республики Татарстан с иском к ответчику - обществу с ограниченной ответственностью «АльянсСтрой», о взыскании задолженности в размере 1 311 032,35 руб. неоплаченной по субподрядному договору №1 на выполнение строительно-монтажных и прочих работ от 15.07.2020, неустойки в размере 42 713,29 руб.

Истец в судебном заседании исковые требования уточнил, в связи с частичной оплатой задолженности просил взыскать 1 011 032,35 руб., в остальной части иск поддержал, дал пояснения.

В соответствии со ст. 49 АПК РФ уточненные исковые требования судом были приняты.

Ответчик в судебное заседание не явился, ранее представил отзыв.

Дело рассмотрено в соответствии со ст. 156 АПК РФ.

Как следует из материалов дела, Между ООО «Альянсстрой» и ООО «Альметстрой116» 15 июля 2020 года заключен субподрядный договор №1 на выполнение строительно-монтажных и прочих работ (Договор). Согласно пункта 1.1 Договора ООО «Альянсстрой» поручило ООО «Альметстрой116», а ООО «Альметстрой116» обязалось выполнить строительно-монтажные и прочие работы по капитальному ремонту многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: 

<

...>. В объем строительно-монтажных работ включены ремонт фасада и крыши жилого дома.

Пунктом 2.1.1 Договора согласована стоимость работ в размере 9217 803 рубля 60 копеек с учетом НДС. Стоимость работ является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора. Изменение условий Договора не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Договором, как при его заключении, так и при его исполнении (п. 2.1.2).

Согласно локальных ресурсных сметных расчетов сметная стоимость строительных работ по кровле дома - 3 043 803 руб. 60 коп., сметная стоимость строительных работ по фасаду дома - 6 010 170 руб. 56 коп.

По результатам выполненных работ были подписаны пять актов о приемке выполненных работ по форме КС-2:

№1 на сумму 4 236 149 руб. 72 коп.;

№2 на сумму 2 363 763 руб. 60 коп.;

№3 на сумму 202 381 руб. 51 коп.;

№4 на сумму 120 260 руб. 60 коп.;

№5 на сумму 105 050 руб. 30 коп. 

Всего на сумму: 7 027 605 руб. 73 коп.

Также были оформлены справки №1 и №2 по форме КС-3 на 6 599 913 руб. 32 коп. и 427 692 руб. 42 коп. (с НДС). Всего на сумму: 7 027 605 руб. 74 коп.

В актах о приемке выполненных работ ООО «Альянстрой» в одностороннем порядке была занижена стоимость выполненных работ:

1) по кровельным работам оформлены акты о приемке выполненных работ №2 от 30.1 1.2020 года на 2 363 763 руб. 60 коп. и № 3 от 20.11.2020 года на 202 381 руб. 51 коп. 

Всего на сумму: 2 566 145 руб. 11 коп.

По смете стоимость этих работ 3 043 803 руб. 60 коп.;

2) по ремонту фасада оформлены акты о приемке выполненных работ №1 от 30.11.2020 года на 4 236 149 руб. 72 коп. и № 4 от 20.11.2020 года на 120 260 руб. 60 кои. 

Всего на сумму: 4 356 410 руб. 32 коп.

По смете стоимость этих работ 6 010 170 руб. 56 коп.

Работы по акту о приемке выполненных работ №5 от 20.11.2020 года на 105 050 руб. 30 коп. выполнены дополнительно и в стоимость работ по субподрядному договору №1 от 15.07.2002 года не были включены.

За предусмотренный пунктом 1.1 этого договора объем работ оформлены акты по форме КС-2 на сумму 6 922 555 руб. 43 коп.

Соглашение об изменении условий Договора между ООО «Альянсстрой» и ООО «Альметстрой116» не заключалось,

Акты или иные документы, подтверждающие замечания по качеству и объему выполненных работ, что могло бы повлиять на снижение стоимости выполненных работ, ООО «Альянсстрой» не предъявлялись.

За период с 5 августа 2020 года по 12 января 2021 года ООО «Альянсстрой» перечислило за выполненные строительно-монтажные работы по объекту 3 224 100 руб. 71 коп.,  20.07.2020 года и 12.08.2020 года за строительные материалы 3 300 000 рублей.

Всего по субподрядному договору №1 от 15.07.2020 года оплачено 6 524 100 руб. 71 коп.

С учетом удержания предусмотренных пунктом 2.2.9 Договора 15% от общей суммы за услуги ООО «Альяснсстрой» должно было быть перечислить ООО «Альметстрой116» 7 835 133 руб. 06 коп. = (9 217 803 руб. 60 коп. - ( 9 21 7 803 руб. 60 коп. х  15%)).

Не оплачена сумма за выполненные работы в размере 1 311 032 руб. 35 коп.

Направленная в адрес ответчика претензия оставлена без ответа.

Поскольку ответа на претензию не последовало, истец обратился в суд с настоящим иском.

В последующем истец уточнил исковые требования.

Суд, исследовав представленные материалы дела, пришел к следующим выводам.

В соответствии со статьями 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

На основании пункта 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода (пункт 1 статьи 721 ГК РФ).

Подписание сторонами Договора актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 не свидетельствует о согласии ООО «Альметстрой116» на изменение стоимости работ.

Оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда (п. 1 ст. 746 ГК РФ).

Согласно пункта 2.2.6 Договора окончательный расчет за выполненные работы: до 31 декабря 2020 года.

Факт исполнения истцом своих обязательств подтверждается представленными в материалы дела доказательствами.

Пунктами 11.5 и 11.6 Договора предусмотрена ответственность ООО «Альянсстрой» в случае просрочки исполнения обязательств по оплате по Договору в виде уплаты неустойки (штрафов, пеней) в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального Банка РФ от неуплаченной в срок суммы цены Договора за каждый день просрочки исполнения обязательств по оплате.

В силу статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или    ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.  

Сумма неустойки за период с 13 января по 12 июля 2021 года составила 42 713 руб. 29 коп.

Произведенный истцом расчет неустойки судом проверен, не превышает сумму неустойки, подлежащую взысканию в соответствии с требованиями закона и условиями договора и требование истца в данной части правомерно.

Учитывая вышеизложенное суд находит требование истца обоснованным и подлежащим удовлетворению. 

В соответствии со ст.110 АПК РФ государственная пошлина подлежит взысканию с ответчика.

Руководствуясь ст.ст. 110, 167, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Республики Татарстан

Р Е Ш И Л :

Иск удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «АльянсСтрой», г. Альметьевск (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Альметтрой116», г.Альметьевск (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) задолженность в размере 1 011 032,35 руб., пени в размере 42 713,29 руб.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «АльянсСтрой», г. Альметьевск (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 23 537 руб.

Исполнительные листы выдать по заявлению.

Решение может быть обжаловано в месячный срок в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Республики Татарстан.

 

Судья                                                                                                            Р.М. Воробьев