Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) 

ул. Курашова, д. 28, бокс 8, г. Якутск, Республика Саха (Якутия), 677980, 

www.yakutsk.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕШЕНИЕ

Дело № А58-2950/2018

16 июля 2018 года

город Якутск

 

Резолютивная часть решения объявлена 13.07.2018 Мотивированное решение изготовлено 16.07.2018 

Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) в составе судьи Шамаевой Т. С., при  ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, рассмотрев дело по  исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Торгово-монтажный  центр -НН" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к Государственному казенному  учреждению "Управление автомобильных дорог Республики Саха (Якутия)" (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании 390 935,35 рублей,  

в отсутствие надлежаще извещенных сторон, 

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "Торгово-монтажный центр -НН"  обратилось в Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) с иском к Государственному  казенному учреждению "Управление автомобильных дорог Республики Саха (Якутия)" о  взыскании неустойки по государственному контракту от 21.07.2017 № ЭА-5070 на  поставку и установку стационарного комплекса фотовидеофиксации нарушения Правил  дорожного движения в размере 390 935,35 руб.  

Ответчик отзыв на исковое заявление не представил. 

Стороны не явились, надлежаще извещены о времени и месте судебного заседания  в соответствии со ст.123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

В силу ч.1 и ч.3 ст.156 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации суд рассматривает дело в отсутствие надлежаще извещенных сторон, по  имеющимся в материалах дела доказательствам.  

Изучив материалы дела, судом установлены следующие обстоятельства. 

По условиям контракта от 21.07.2017 № ЭА-5070 общество с ограниченной  ответственностью "Торгово-монтажный центр -НН" (исполнитель) обязалось осуществить  поставку и установку стационарного комплекса фотовидеофиксации нарушения Правил  дорожного движения по адресу: г. Якутск, перекресток ул. Дзержинского – ул. Федора  Попова в соответствии с описанием объекта закупки (приложение № 1 к контракту),  Государственное казенное учреждение "Управление автомобильных дорог Республики  Саха (Якутия)" (заказчик) обязался произвести оплату в соответствии с условиями  контракта (л.д.12-26).  

Срок поставки и установки оборудования установлен до 01.11.2017.  

Цена контракта составляет 12 737 508,17 руб., в т.ч. НДС – 1 943 009,72 руб. и  включает в себя расходы, связанные с выполнением работ, предусмотренных контрактом  в полном объеме, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, других  обязательных платежей, а также иные расходы, связанные с исполнением исполнителем  своих обязательств по контракту.  

В соответствии с п.2.5 контракта оплата производится заказчиком по факту  установки оборудования и выполнения пуско- наладочных работ в течение 15 рабочих  дней после подписания акта приема-передачи, акта о вводе оборудования в эксплуатацию  на основании представленного счета (счета-фактуры) в форме безналичного расчета путем  перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя, указанного в настоящем  контракте.  

Согласно ст.431 Гражданского кодекса Российской Федерации толкование условий  договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов  и выражений. Буквальное значение условия договора в случае его неясности  устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом.  Если правила, содержащиеся в части первой настоящей статьи, не позволяют определить  содержание договора, должна быть выяснена действительная общая воля сторон с учетом  цели договора. При этом принимаются во внимание все соответствующие обстоятельства,  включая предшествующие договору переговоры и переписку, практику, установившуюся  во взаимных отношениях сторон, обычаи, последующее поведение сторон.  

Из документации проведенного ответчиком торгов, текста спорного контракта,  заключенного по результатам торгов, следует, что предметом контракта является поставка  

комплекса фотовидеофиксации нарушения Правил дорожного движения и оказание услуг  по установке оборудования, монтаж, пуско- наладка, работы по подключению, ввод в  эксплуатацию.  

При таких обстоятельствах суд приходит к квалификации спорного контракта как  смешанного договора с элементами договора поставки и договора возмездного оказания  услуг.  

Согласно ст.526 Гражданского кодекса Российской Федерации по  государственному контракту на поставку товаров для государственных нужд поставщик  (исполнитель) обязуется передать товары государственному заказчику либо по его  указанию иному лицу, а государственный заказчик обязуется обеспечить оплату  поставленных товаров.  

Согласно п.1 ст.532 Гражданского кодекса Российской Федерации при поставке  товаров покупателям по договорам поставки товаров для государственных или  муниципальных нужд оплата товаров производится покупателями по ценам,  определяемым в соответствии с государственным или муниципальным контрактом, если  иной порядок определения цен и расчетов не предусмотрен государственным или  муниципальным контрактом.  

Согласно п.1 ст.516 Гражданского кодекса Российской Федерации покупатель  оплачивает поставляемые товары с соблюдением порядка и формы расчетов,  предусмотренных договором поставки. Если соглашением сторон порядок и форма  расчетов не определены, то расчеты осуществляются платежными поручениями.  

По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию  заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить  определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги (ст.779  Гражданского кодекса Российской Федерации).  

В соответствии с п.1 ст.781 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик  обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре  возмездного оказания услуг.  

Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с  условиями обязательств и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии  таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно  предъявляемыми требованиями; односторонний отказ от исполнения обязательств не  допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими  законами или иными правовыми актами (статьи 309, 310 Гражданского кодекса  Российской Федерации).  

Факт поставки оборудования и выполнения работ по его установке  подтверждаются актами приема-передачи от 31.10.2017 № 5, о вводе оборудования в  эксплуатацию от 31.10.2017 № 5, актом от 31.10.2017 № 55 (л.д.27-30).  

Для оплаты истцом ответчику выставлены счет от 31.10.2017 № 60, счет-фактура от  31.10.2017 № 55 на 12 737 508,17руб. (л.д.31, 33).  

Истцом в адрес ответчика направлены письмо от 24.11.2017 № 249, претензия от  19.12.2017 № 256 с требованием об оплате товара, работ, уплате неустойки (л.д.35, 37-38).  

Ответчик письмом от 06.12.2017 № 07/2715 сообщил об оплате контракта по  доведению объема финансирования на счет ответчика от Министерства финансов  Республики Саха (Якутия) и Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики  Саха (Якутия) (л.д.36).  

Платежным поручением от 30.03.2018 № 494 ответчиком произведена оплата в  сумме 12 737 508,17 руб. (л.д.34).  

В связи с неисполнением ответчиком претензионных требований в части оплаты  пени, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.  

Предметом настоящего иска является требование о взыскании пени за нарушение  ответчиком срока оплаты товара, работ.  

Согласно расчету истца оплата в размере 12 737 508,17 руб. со сроком оплаты до  23.11.2017 фактически произведена 30.03.2018 (просрочка составила 127 дней).  

Согласно п.1 ст.329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение  обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества  должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами,  предусмотренными законом или договором.  

В силу п.1 ст.330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой  (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма,  которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего  исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.  

В соответствии с пп.5.5.1 контракта в случае просрочки исполнения заказчиком  обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или  ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом,  исполнитель вправе требовать уплаты неустойки (пени). Пени начисляется за каждый  день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня,  следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения  обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере 1/300 действующей на  дату уплаты пени ставки рефинансирования ЦБ РФ от неуплаченной в срок суммы.  

Аналогичные положения закреплены в ч.5 ст.34 Федерального закона от 05.04.2013   № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  государственных и муниципальных нужд".  

Ответчик письменный отзыв на исковое заявление не представил. 

Как следует из платежного поручения от 30.03.2018 № 494, ответчиком произведено  перечисление на расчетный счет истца денежных средств в сумме 12 737 508,17 руб.;  денежные средства списаны с лицевого счета ответчика 30.03.2018.  

Поскольку материалами дела подтверждается и ответчиком не оспаривается факт  просрочки денежного обязательства, предусмотренного п.2.5 контракта, требование истца  о взыскании неустойки обоснованно.  

Расчет неустойки за период с 23.11.2017 по 15.03.2018 судом проверен и признан  арифметически верным, соответствующим условиям контракта и требованиям  действующего гражданского законодательства Российской Федерации, по существу  ответчиком не оспаривается.  

Ответчиком ходатайство о снижении размера неустойки в связи с ее  несоразмерностью не заявлено.  

С учетом изложенных обстоятельств с ответчика подлежит взысканию неустойка в  размере 390 935,35 руб.  

При подаче иска истцом произведена уплата государственной пошлины 10 819 руб.  по платежному поручению от 10.04.2018 № 283.  

С учетом результатов рассмотрения дела, на основании ч.1 ст.110 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации расходы истца по уплате  государственной пошлины подлежат взысканию с ответчика.  

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

Взыскать с Государственного казенного учреждения "Управление автомобильных  дорог Республики Саха (Якутия)" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу  общества с ограниченной ответственностью "Торгово-монтажный центр -НН" (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) 390 935,35 руб. пени, а также 10 819 руб. расходов по  уплате государственной пошлины.  

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного  срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи  апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в  

законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной  инстанции.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в  Четвертый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения  (изготовления его в полном объеме).  

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции  через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная жалоба также может быть  подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте  арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети Интернет  http://yakutsk.arbitr.ru  

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства  информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить на  интернет-сайте Четвертого арбитражного апелляционного суда – http://4aas.arbitr.ru  

Судья Т.С. Шамаева