22/2018-35129(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 150999, г. Ярославль, пр. Ленина, 28 http://yaroslavl.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А82-18603/2017

г. Ярославль

27 марта 2018 года

Арбитражный суд Ярославской области  

в составе судьи Захаровой М.А. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  ФИО1  

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление открытого акционерного общества  "Российские железные дороги" в лице филиала Северная железная дорога (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью "БазисСтрой" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>)  

об обязании устранить недостатки работ 

Руководствуясь статьями 65, 110, 167-170 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Обязать Общество с ограниченной ответственностью "БазисСтрой" (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) безвозмездно устранить недостатки работ по  договору от 28.06.2016 № 198862/2015, а именно:  

- по пассажирской низкой береговой платформе 296 км (нечет) (инв.   № 120000000758/0000, сет. № 391012200000007580000; Ярославская область,  Ярославский район, Кузнечихинское сельское поселение, Кузнечихинский сельский  округ, о.п.296 км): 1.подготовить ремонтируемую поверхность к нанесению  тиксотропного состава серии Эмако, в том числе: очистить поверхность плит  перекрытия платформы от разрушенного защитного слоя в объеме 213,83 кв. м.,  нанести насечки на глубину до 5 мм, выполнить сплошную очистку поверхности от  пыли и мусора, тщательно пропитать ремонтируемую поверхность водой; 2. Ручным  способом нанести раствор смеси бетонной безусадочной быстротвердеющей  тиксотропного типа с мелким заполнителем и полимерной фиброй серии Эмако на  подготовленную поверхность платформы, толщиной слоя 25 мм, далее покрыть  отремонтированную поверхность пленкой полиэтиленовой; 3. Нанести разметку  краской сплошной линией;  

- по пассажирской низкой береговой платформе 296 км (чет) (инв.   № 120000000757/0000, сет № 39101200000007570000; Ярославская область, Ярославский  район, Кузнечихинское сельское поселение, Кузнечихинский сельский округ, о.п.296  км): 1. подготовить ремонтируемую поверхность к нанесению тиксотропного состава  серии Эмако, в том числе: очистить поверхность плит перекрытия платформы от  разрушенного защитного слоя в объеме 213,83 кв. м., нанести насечки на глубину до 5  мм., выполнить сплошную очистку поверхности от пыли и мусора, тщательно  

пропитать ремонтируемую поверхность водой. 2.Ручным способом нанести раствор  смеси бетонной безусадочной быстротвердеющей тиксотропного типа с мелким  заполнителем и полимерной фиброй серии Эмако на подготовленную поверхность  платформы, толщиной слоя 25 мм, далее покрыть отремонтированную поверхность  пленкой полиэтиленовой. 3. Нанести разметку краской сплошной линией.  

- по пассажирской платформе ст. Красильниково (инв. № 024034, сет. №  39101200000002030000; Костромская область, Галичский район, пос.Красильниково):  1.Подпорная стенка со стороны пути: выполнить демонтаж верхнего покрытия,  произвести ремонт с нанесением тиксотропного состава серии Эмако согласно  технологии производства работ. 2. Подпорная стенка с полевой стороны: выполнить  ремонт с нанесением тиксотропного состава серии Эмако согласно технологии  производства работ. 3. Верхнее покрытие платформы: выполнить переукладку плитки  тротуарной с устройством подстилающих и выравнивающих слоев из песчано- гравийной смеси согласно технологии производства работ. 4.Нанести разметку краской  сплошной линией. 5. выполнить благоустройство прилегающей территории с уборкой  строительного мусора.  

- по пассажирской платформе ст. Бродни (инв. № 024004, сет.   № 391012000000017300004 Костромская область, Буйский район, пос.Бродни):  1.Подпорная стенка со стороны пути: выполнить демонтаж верхнего покрытия,  произвести ремонт с нанесением тиксотропного состава серии Эмако согласно  технологии производства работ. 2. Подпорная стенка с полевой стороны: выполнить  ремонт с нанесением тиксотропного состава серии Эмако согласно технологии  производства работ. 3. Верхнее покрытие платформы: выполнить переукладку плитки  тротуарной с устройством подстилающих и выравнивающих слоев из песчано- гравийной смеси согласно технологии производства работ. 4. Нанести разметку  краской сплошной линией. 5.выполнить благоустройство прилегающий территории: в  том числе засыпать котлован с полевой стороны, убрать строительный мусор.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "БазисСтрой" (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу Открытого акционерного общества  "Российские железные дороги" в лице филиала Северная железная дорога (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) 6000 руб. в возмещение расходов по уплате  госпошлины.  

Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу. 

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства во  Второй арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия  (изготовления его в полном объеме).  

Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ярославской области, в  том числе посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте суда в  сети «Интернет»,  через систему «Мой арбитр» (http://my.arbitr.ru).  

Судья Захарова М.А.