АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ул. Ленина, д. 60, г. Сыктывкар, 167000

8(8212) 300-800, 300-810, http://komi.arbitr.ru, е-mail: info@komi.arbitr.ru   

 

Именем Российской Федерации

 

РЕШЕНИЕ

Дело № А29-15891/2022

13 июня 2023 года

г. Сыктывкар

 

Резолютивная часть решения объявлена 05 июня 2023 года, полный текст решения изготовлен 13 июня 2023 года.

 

Арбитражный суд Республики Коми в составе судьи  Суслова М.О.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску

акционерного общества «Коми тепловая компания»

(ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>)

к администрации муниципального района «Троицко-Печорский»

(ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>)

о взыскании задолженности и пеней,

при участии в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора,

акционерного общества «ПромМонтажСтрой»

(ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>),

при участии в судебном заседании:

от истца: представитель ФИО2 по доверенности от 01.11.2022 (до перерыва), представитель ФИО3 по доверенности № 023-КТК/2023 от 09.01.2023 (до и после перерыва);

от ответчика и третьего лица: не явились;

установил:

Акционерное общество «Коми тепловая компания» (далее – АО «КТК», истец, Общество, исполнитель) обратилось в Арбитражный суд Республики Коми с исковым заявлением к администрации муниципального района «Троицко-Печорский» (далее – ответчик, Администрация, заказчик) о взыскании 2 013 106 руб. 57 коп. задолженности по договорам № 018-ТП/2020/004/4 от 17.11.2020 о подключении (техническом присоединении) к центральной системе водоснабжения и № 020-ТП/2020/004/4 от 17.11.2020 о подключении (техническом присоединении) к центральной системе водоотведения, 528 440 руб. 47 коп. пеней, начисленных за период с 01.01.2021 по 31.03.2022.

Определением суда от 13.12.2022 исковое заявление принято к производству.

В отзыве ответчик исковые требования не признает, ссылаясь на отсутствие доказательств выполнения Обществом в полном объеме мероприятий для создания технической возможности подключения, выполнения работ по подключению объекта и готовности осуществления технологического подключения. Также ответчиком указано на то, что до настоящего времени объект не подключен к централизованной системе, поставка коммунальных ресурсов в виде холодного водоснабжения и водоотведения истцом не осуществляется,  начисление пени считает необоснованным.

В возражениях на отзыв истец указывает, что доводы Администрации об отсутствии подключения объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс в пгт.Троицко-Печорск Республики Коми» к холодному водоснабжению и водоотведению опровергаются договором на отпуск воды и ее подвоз автотранспортом №В-55 от 07.10.2020, заключенным с подрядчиком ответчика, в соответствии с дополнительным соглашением от 20.08.2021 которого АО «КТК» предоставляет АО «Проммонтажстрой» услуги по подаче через присоединенную водопроводную сеть из централизованной системы холодного водоснабжения холодную воду для нужд строительства здания «ФОК» пгт.Троицко-Печорск кв. Южный, участок №23. 

Кроме того, истец поясняет, что уведомление о выполнении условий подключения (технологического присоединения) по созданию и подготовке к подключению и подаче воды внутриплощадочных и внутридомовых водопроводных сетей и оборудования объекта является обязанностью Администрации. Как следует из письма от 02.11.2022 №1791 была осуществлена проверка готовности подключения, в ходе которой выявлены нарушения. Однако Администрация не устранила выявленные нарушения, в связи с чем,  фактическое присоединение объекта невозможно по причине неисполнения требований технических условий со стороны Администрации.

Определением суда от 06.02.2023 дело назначено к судебному разбирательству на 16.03.2023, этим же определением суд привлек к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, акционерное общество «ПромМонтажСтрой».

Истец в дополнениях указывает, что  со стороны истца все необходимые мероприятия для создания технической возможности подключения (технологического присоединения) и выполнения работ по подключению (технологическому присоединению) выполнены,  со стороны заказчика сроки фактического присоединения не соблюдались, оставшаяся доля платы за подключение (технологическое присоединение) не внесена.

Ответчик, возражая, указывает, что фактически мероприятия по подключению объекта осуществлялись с ноября 2022 года, а не как указано в договоре до  декабря 2020 года, представил акта допуска в эксплуатацию узла учета холодной и горячей воды.

Определением суда от 23.03.2023 судебное разбирательство отложено до 28.04.2023.

Заявлением от 26.04.2023 истец уточнил требования, просит взыскать 2 013 106 руб. 57 коп. задолженности, 528 440 руб. 47 коп. пеней, начисленных за период с 01.01.2021 по 31.03.2022, а также пени с 02.10.2022 по дату погашения задолженности в размере 1/130 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, за каждый день просрочки.

На основании статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса РФ увеличение требований принято судом к рассмотрению.

Администрация в пояснениях указывает, что срок выполнения работ по муниципальному контракту №0307200030620001277 от 20.07.2020 продлен до 31.10.2023.

На основании статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса РФ в судебном заседании объявлялся перерыв до 09 час. 30 мин. до 05.06.2023.

Информация о перерыве своевременно размещена в сети «Интернет» в официальном источнике «Картотека арбитражных дел».

Явившийся после перерыва в судебное заседание представитель истца поддержал позицию, изложенную ранее.

На основании части 3 и 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса РФ дело рассмотрено судом без участия представителя ответчика и третьего лица, по имеющимся в материалах дела доказательствам.

Исследовав материалы дела, заслушав представителей истца, суд установил следующее.

Как следует из материалов дела, между АО «Коми тепловая компания» (организация водопроводно-канализационного хозяйства) администрацией муниципального района «Троицко-Печорский» (заказчик) заключен договор №018-ТП/2020/004/4 от 17.11.2020 о подключении (техническом присоединении) к центральной системе водоснабжения (далее – договор №018-ТП/2020/004/4), согласно пункту 1.1 которого  организация водопроводно-канализационного хозяйства обязуется выполнить действия по подготовке централизованной системы холодного водоснабжения к подключению (технологическому присоединению) объекта заказчика и в соответствии с условиями подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения, указанными сторонами в приложении №1 к договору, подключить объект к сетям централизованной системы холодного водоснабжения, а заказчик обязуется внести плату за подключение (технологическое присоединение) и выполнить технические условии подключения объекта капитального строительства к централизованной системе холодного водоснабжения, выданные в порядке, установленном Правилами определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строитель стаз к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 г. №83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», а также выполнить предусмотренные договором мероприятия (в том числе технические), направленные на подключение (технологическое при соединение) к централизованной системе холодного водоснабжения.

Срок подключения  объекта  до 31 декабря  2020 года при условии своевременного и надлежащего исполнения заказчиком своих обязательств по договору в части подготовки объекта заказчика к подключению (технологическому присоединению) н оплаты услуг по подключению (технологическому присоединению) объект (пункт 4 договора №018-ТП/2020/004/4).

Размер платы за подключение (технологическое присоединение), к централизованной системе холодного водоснабжения согласно пункту 14 договора №018-ТП/2020/004/4 составляет 1 372 660 руб. 02 коп, и НДС 20% - 228 776 руб. 67 коп.

Сторонами в абзаце 2 подпункта Б пункта 15 договора №018-ТП/2020/004/4 предусмотрено, что в случае если сроки фактического присоединения объекта заказчика не соблюдаются в связи с действиями (бездействием) заказчика и организацией водопроводно - канализационного хозяйства выполнены все необходимые мероприятия для создания технической возможности подключения (технологического присоединение) и выполнения работ то подключению (технологическому присоединению), оставшаяся доля платы за подключение (технологическое присоединение) вносится не позднее срока подключения (технологического присоединения), указанного в договоре.

Объект считается подключенным к централизованной системе холодного водоснабжения с даты подписания сторонами акта о подключении (технологическом присоединении) объекта по форме согласно приложению №3 (пункт 21 договора №018-ТП/2020/004/4).

Акт о подключении (технологическом присоединении) объекта подписывается сторонами в течение десяти рабочих дней с даты фактического подключения (технологического присоединения) объекта к централизованной системе холодного водоснабжения и проведения работ по промывке и дезинфекции внутреплощадных  и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта (пункт 22 договора №018-ТП/2020/004/4).

В соответствии с пунктом 34 договора №018-ТП/2020/004/4 договор вступает в силу со дня утверждения для организации водопроводно-канализационного хозяйства в установленном порядке ставок тарифа за протяженность водопроводной сети и действует до полного исполнения сторонами обязательств по договору.

Так же между АО «Коми тепловая компания» (организация водопроводно-канализационного хозяйства) администрацией муниципального района «Троицко-Печорский» (заказчик) заключен договор №020-ТП/2020/004/4 от 17.11.2020 о подключении (техническом присоединении) к центральной системе водоотведения (далее – договор №020-ТП/2020/004), по условия пункта 1.1 которого, организация водопроводно-канализационного хозяйства обязуется выполнить действие по подготовке централизованной системы водоотведения к подключению (технологическому присоединению) объекте капитального строительства заказчика и в соответствии с условиями подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения по форме согласно приложению №1 подключить объект к сетям централизованной системы водоотведения, а заказчик обязуется внести плату за подключение (технологическое присоединение) и выполнить технические условия подключения объекта к централизованной системе водоотведения предоставленные в порядке, установленном Правилами определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 г. №83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», а также выполнить предусмотренные договором мероприятия (в том числе технические), направленные на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения.

Срок подключения  объекта  до 31 декабря  2020 года при условии своевременного и надлежащего исполнения заказчиком своих обязательств по договору в части подготовки объекта заказчика к подключению (технологическому присоединению) н оплаты услуг по подключению (технологическому присоединению) объект (пункт 4 договора №020-ТП/2020/004/4).

Размер платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения согласно пункту 14 договора №020-ТП/2020/004/4 составляет 1 503 206 руб. 51 коп, и НДС 20% - 250 534 руб. 42 коп.

Сторонами в абзаце 2 подпункта Б пункта 16 договора №020-ТП/2020/004/4 предусмотрено, что в случае если сроки фактического присоединения объекта заказчика не соблюдаются в связи с действиями (бездействием) заказчика и организацией водопроводно - канализационного хозяйства выполнены все необходимые мероприятия для создания технической возможности подключения (технологического присоединение) и выполнения работ то подключению (технологическому присоединению), оставшаяся доля платы за подключение (технологическое присоединение) вносится не позднее срока подключения (технологического присоединения), указанного в договоре.

Объект считается подключенным к централизованной системе водоотведения с даты подписания сторонами акта о подключении (технологическом присоединении) объекта, подтверждающего выполнение сторонами условий подключения (технологического присоединения)  и всех иных обязательств по договору по форме согласно приложению №3 (пункт 22 договора №020-ТП/2020/004/4).

Акт о подключении (технологическом присоединении) объекта подписывается сторонами в течение десяти рабочих дней с даты фактического подключения (технологического присоединения) объекта к централизованной системе водоотведения (пункт 23 договора №020-ТП/2020/004/4).

В соответствии с пунктом 34 договора №020-ТП/2020/004/4, договор вступает в силу со дня утверждения для организации водопроводно-канализационного хозяйства в установленном порядке ставок тарифа за протяженность канализационной сети и действует до полного исполнения сторонами обязательств по договору.

Объект - строящийся «Физкультурно-оздоровительный комплекс в пгт. «Троицко-Печорск Республики Коми». Месторасположение объекта: Республика Коми, пгт. Трпиико-Печорск, квартал Южный, участок 23; Назначение объекта: здание «Физкультурно-оздоровительный комплекс в пгт. «Тронцко-Печорск Республики Коми». Этажность: 4 этажа, высота здания: 13,695 метров. Планируемый срок введения в эксплуатацию объекта: декабрь 2021 года (пункт 5 договора №020-ТП/2020/004/4 и №018-ТП/2020/004/4).

Как следует из искового заявления и пояснений представителей истца, работы в рамках договоров от 17.11.2020 №020-ТП/2020/004/4 и №018-ТП/2020/004/4) выполнены со стороны АО «КТК» в полном объеме,  что  подтверждается актами от  25.10.2020 и от 26.10.2020 (л.д.20-21) и актами о проведении гидравлических испытаний напорного трубопровода на прочность и герметичность от 26.10.2020 и 27.10.2020 (л..д.24-27),  подписанными со стороны истца в одностороннем порядке.

Поскольку ответчик не оплатил стоимость выполненных работ, в том числе, и после направления истцом претензии №05-02/6884 от 03.12.2021 (л.д.9-10), АО «КТК» обратилось в арбитражный суд с настоящим исковым заявлением.

Суд считает, что исковые требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

В силу статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ, Кодекс) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Статья 310 Кодекса предусматривает недопустимость одностороннего отказа от исполнения обязательства и одностороннего изменения его условий.

Отношения в сфере водоснабжения и водоотведения регулируются Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее - Закон № 416-ФЗ), Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 (далее - Правила № 644) и Правилами определения и предоставления технических условий подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и Правилами подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83 (далее - Правила № 83), действовавшими в спорный период.

В силу пункта 1 статьи 18 Закона № 416-ФЗ подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства, в том числе водопроводных и (или) канализационных сетей, к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения (далее также - подключение (технологическое присоединение) осуществляется на основании заявления в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных настоящим Федеральным законом и правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Пунктом 2 той же статьи предусмотрено, что лица, обратившиеся в организацию, осуществляющую холодное водоснабжение и (или) водоотведение, с заявлением о заключении договора подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе застройщики, планирующие подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения (далее - заявители), заключают договоры о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения и вносят плату за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения в порядке, установленном настоящим Федеральным законом.

На основании пункта 86 Правил N 644 подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства, в том числе водопроводных и (или) канализационных сетей, к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом "О водоснабжении и водоотведении" и настоящими Правилами, на основании договора о подключении (технологическом присоединении), заключенного в соответствии с типовым договором о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения или типовым договором о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения. Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения объектов, не относящихся к объектам капитального строительства, осуществляется с согласия организации водопроводно-канализационного хозяйства или по согласованию с органами местного самоуправления в порядке, предусмотренном настоящими Правилами для подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства.

Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, используемым в процессе холодного водоснабжения и водоотведения, определяется в соответствии с Федеральным законом "О водоснабжении и водоотведении" от 07.12.2011 N 416-ФЗ, пунктом 13 статьи 18 которого установлено, что плата за подключение (технологическое присоединение) рассчитывается организацией, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, исходя из установленных тарифов на подключение (технологическое присоединение) с учетом величины подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки и расстояния от точки подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства заявителя до точки подключения (технологического присоединения) водопроводных и (или) канализационных сетей к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения. В случае, если объем запрашиваемой заявителем нагрузки в целях обеспечения водоснабжения и (или) водоотведения объекта капитального строительства заявителя превышает устанавливаемый в порядке, утвержденном Правительством Российской Федерации, предельный уровень нагрузки, определенный в виде числового значения или в виде доли от общей мощности централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, плата за подключение (технологическое присоединение) устанавливается органом регулирования тарифов индивидуально в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Плата за подключение (технологическое присоединение), устанавливаемая с учетом величины подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки и расстояния от точки подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства заявителя до точки подключения (технологического присоединения) водопроводных и (или) канализационных сетей к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения, включает в себя затраты на создание водопроводных и (или) канализационных сетей и объектов на них от существующих сетей централизованной системы холодного водоснабжения или водоотведения (объектов такой системы) до точки подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства заявителя, за исключением расходов заявителя на создание этих сетей и объектов и расходов, предусмотренных на создание этих сетей и объектов за счет других источников финансирования инвестиционной программы, либо средств, полученных на создание этих сетей и объектов обеспечения за счет иных источников, в том числе средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

При установлении платы за подключение (технологическое присоединение) в индивидуальном порядке могут учитываться расходы на увеличение мощности (пропускной способности) централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе расходы на реконструкцию и модернизацию существующих объектов централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения в порядке, определенном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации. Точка подключения (технологического присоединения) при наличии технической возможности устанавливается на границе земельного участка, на котором располагается объект капитального строительства заявителя.

Согласно пункту 4 статьи 19 Закона N 416-ФЗ плата за подключение (технологическое присоединение) рассчитывается в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Таким образом, технологическое присоединение к централизованным сетям водоснабжения и водоотведения представляет собой комплекс мероприятий и осуществляется на основании возмездного договора, заключаемого организацией, осуществляющей их эксплуатацию (исполнитель), и обратившимся к ней лицом (заявитель). По условиям этого договора исполнитель обязан реализовать мероприятия, необходимые для осуществления такого технологического присоединения (в том числе разработать технические условия), а заявитель обязан, помимо прочего, внести плату за технологическое присоединение.

Из характера обязательств исполнителя и заявителя по договору о технологическом присоединении следует, что к правоотношениям по технологическому присоединению применимы как нормы главы 39 Гражданского кодекса Российской Федерации ("Возмездное оказание услуг"), так и общие положения об обязательствах и о договоре (раздел III Гражданского кодекса Российской Федерации).

По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги (пункт 1 статьи 779 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В силу пункта 1 статьи 781 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.

В статье 783 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что общие положения о подряде (статьи 702 - 729) и положения о бытовом подряде (статьи 730 - 739) применяются к договору возмездного оказания услуг, если это не противоречит статьям 779 - 782 настоящего Кодекса, а также особенностям предмета договора возмездного оказания услуг.

На основании пункта 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Оплата работ должна быть произведена непосредственно после их приемки (статья 711 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Названными нормами предусмотрена оплата стоимости услуг по факту их оказания.

Авансирование заказчиком услуг исполнителя, исходя из положений статей 1, 421 и 422 Гражданского кодекса Российской Федерации, может устанавливаться законодательством или соглашением сторон.

По условиям пункта 15 договора №018-ТП/2020/004/4 плата за технологическое присоединение объекта капитального строительства к центральной системе водоотведения вносится заказчиком в два этапа. При этом, первый этап платежа не связан с фактом выполнения работ (оказания услуг) и носит характер авансового платежа. Сумма аванса в размере 411798 руб. 01 коп. (30 процентов платы за подключение (технологические присоединение)), в том числе, НДС, внесена заказчиком в установленные сроки.

Сумма в размере 960862 руб. 01 коп. (70 процентов платы за подключение (технологические присоединение)), подлежит выплате  организации водопроводно-канализационного хозяйства в течение тридцати дней со дня подписания сторонами акта о подключении (технологическом присоединении) объекта к централизованной системе холодного водоснабжения.

Сторонами в абзаце 2 подпункта Б пункта 15 договора №018-ТП/2020/004/4 предусмотрено, что в случае если сроки фактического присоединения объекта заказчика не соблюдаются в связи с действиями (бездействием) заказчика и организацией водопроводно - канализационного хозяйства выполнены все необходимые мероприятия для создания технической возможности подключения (технологического присоединение) и выполнения работ то подключению (технологическому присоединению), оставшаяся доля платы за подключение (технологическое присоединение) вносится не позднее срока подключения (технологического присоединения), указанного в договоре.

По условиям пункта 16 договора №020-ТП/2020/004/4 плата за технологическое присоединение объекта капитального строительства к центральной системе водоотведения вносится заказчиком в два этапа. При этом, первый этап платежа не связан с фактом выполнения работ (оказания услуг) и носит характер авансового платежа. Сумма аванса в размере 450961 руб. 95 коп. (30 процентов платы за подключение (технологические присоединение)), в том числе, НДС, внесена заказчиком в установленные сроки.

Сумма в размере 1052244 руб. 56 коп. (70 процентов платы за подключение (технологические присоединение)), подлежит выплате  организации водопроводно-канализационного хозяйства в течение тридцати календарных  дней со дня подписания сторонами акта о подключении (технологическом присоединении) объекта к централизованной системе водоотведения.

Сторонами в абзаце 2 подпункта Б пункта 16 договора №020-ТП/2020/004/4 предусмотрено, что в случае если сроки фактического присоединения объекта заказчика не соблюдаются в связи с действиями (бездействием) заказчика и организацией водопроводно - канализационного хозяйства выполнены все необходимые мероприятия для создания технической возможности подключения (технологического присоединение) и выполнения работ то подключению (технологическому присоединению), оставшаяся доля платы за подключение (технологическое присоединение) вносится не позднее срока подключения (технологического присоединения), указанного в договоре.

Размер платы рассчитан в соответствии с приложением № 2 к Приказу Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми от 04.09.2020 № 33/2-Т.

В соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований или возражений.

Судом установлено, что по состоянию на 31.12.2020 условия договоров со стороны истца выполнены в полном объеме, что подтверждается представленными в дело актами выполненных работ, актами гидравлических испытаний, представленной проектной документацией, уведомлением о готовности объекта к подключению (л.д.19).

Факт оказания услуг по подключению к сетям инженерно-технического обеспечения водоснабжения и водоотведения, наличие и размер задолженности подтверждены материалами дела (договором, указанными выше актами и иными документами), и ответчиком документально не опровергнуты.

Доказательства соблюдения Администрацией положений  подпункта «д» п.12 договоров в части направления в адрес исполнителя уведомлений о выполнении условий подключения (технологического присоединения) по созданию и подготовке к подключению и подаче воды внутриплощадочных и внутридомовых  водопроводных сетей и оборудования объекта не представлены.

Напротив, из представленных в дело доказательств следует, что проверкой готовности объекта к подключению (технологическому присоединению), проведенной 26.10.2022, установлен факт неготовности объекта к подключению, в акте от 26.10.2022 (л.д.82) указаны нарушения, которые Администрации необходимо устранить в целях подключения объекта к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения.

Возражения ответчика об отсутствии подключения объекта коммунальным ресурсам в виде холодного водоснабжения и водоотведения судом не принимаются, поскольку представленные данные об оплате коммунальных ресурсов подрядной организацией ООО «ПромМонтажСтрой», выполняющей работы на объекте, свидетельствуют об обратном.

При изложенных обстоятельствах, фактическое присоединение объекта в установленный договорами срок до 31.12.2020 невозможно было по причине невыполнения в полном объеме своих обязательств по договорам ответчиком и, как следствие, неготовности объекта к подключению.

Доказательства обратного ответчиком не представлены.

Таким образом, задолженность по договорам подлежала оплате Администрацией с учетом условий договоров не позднее 31.12.2020.

Доводы ответчика об изменении сроков сдачи объекта строительства в эксплуатацию не свидетельствует об освобождении Администрации от обязанности по оплате оказанных услуг в рамках заключенных с истцом договоров.

Поскольку доказательства оплаты задолженности в полном объеме в материалы дела не представлены, исковые требования АО «КТК» о взыскании с администрации муниципального района «Троицко-Печорский» задолженности по договорам № 018-ТП/2020/004/4 от 17.11.2020 о подключении (техническом присоединении) к центральной системе водоснабжения и № 020-ТП/2020/004/4 от 17.11.2020 о подключении (техническом присоединении) к центральной системе водоотведения в размере 2 013 106 руб. 57 коп. подлежат удовлетворению.

В связи с тем, что ответчик своевременно не исполнил обязанность по оплате оказанных услуг, истцом также заявлены требования о взыскании суммы неустойки в размере 528 440 руб. 47 коп., начисленной за период с 01.01.2021 по 31.03.2022, и неустойку с 02.10.2022  по день фактической оплаты задолженности.

В соответствии с пунктом 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения (пункт 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В пункте 26 договоров стороны предусмотрели, что в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств по оплате договора организация водопроводно - канализационного хозяйства  вправе потребовать от заказчика уплаты пени в размере одной стотридцатой ставки рефинансировании Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, начиная со следующего дня после дня наступления установленного срока оплати по день фактической оплаты.

Проверив представленный истцом расчет суммы неустойки в размере 528 440 руб. 47 коп. за период с 01.01.2021 по 31.03.2022, суд признает его составленным верно и не превышающим сумму неустойки по расчету суда.

Оснований для уменьшения неустойки судом не установлено.

В соответствии с разъяснениями, данными в  пункте 65 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств», по смыслу статьи 330 ГК РФ, истец вправе требовать присуждения неустойки по день фактического исполнения обязательства (в частности, фактической уплаты кредитору денежных средств, передачи товара, завершения работ).

При изложенных обстоятельствах, требования истца о взыскании с Администрации неустойки подлежат удовлетворению в размере 528 440 руб. 47 коп., а также в части взыскания неустойки, начисленной за каждый день просрочки на сумму долга 2 013 106 руб. 57 коп., исходя из 1/130 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, за период с 02.10.2022 по день фактической оплаты суммы долга.

В соответствии со статьей 110 АПК РФ судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 35 708 руб. подлежат взысканию с ответчика в пользу истца, в размере 8 176 руб. 11 коп. государственная пошлина подлежит возвращению истцу из федерального бюджета на основании подпункта 1 пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса РФ.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 171, 176, 180-181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 

РЕШИЛ:

1. Исковые требования удовлетворить полностью.

2. Взыскать с администрации муниципального района «Троицко-Печорский» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) в пользу акционерного общества «Коми тепловая компания» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) 2 577 255 руб. 04 коп., из них: 2 013 106 руб. 57 коп. задолженности, 528 440 руб. 47 коп. неустойки и 35 708 руб. судебных расходов по оплате государственной пошлины.

Взыскать с администрации муниципального района «Троицко-Печорский» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) в пользу акционерного общества «Коми тепловая компания» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) неустойку, начисленную за каждый день просрочки на сумму долга 2 013 106 руб. 57 коп. исходя из 1/130 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, за период с 02.10.2022 по день фактической оплаты суммы долга.

Исполнительный лист выдать по заявлению истца после вступления решения суда в законную силу.

3. Возвратить акционерному обществу «Коми тепловая компания» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) из федерального бюджета 8 176 руб. 11 коп. государственной пошлины.

Справку на возврат государственной пошлины выдать после вступления решения суда в законную силу.

4. Разъяснить, что решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке во Второй арбитражный апелляционный суд (г.Киров) с подачей жалобы через Арбитражный суд Республики Коми в месячный срок со дня изготовления в полном объеме.

 

Судья                                                                                                 М.О. Суслов