Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-99372/2025

10 февраля 2026 года

г.Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть решения объявлена 29 января 2026 года.

Полный текст решения изготовлен 10 февраля 2026 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи Болотовой Л.Д.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Лебедевой П.Д.

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: публичное акционерное общество "РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)

ответчик: общество с ограниченной ответственностью "ПЕТРОСТРОЙ РИТМ" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)

о взыскании

при участии

- от истца: ФИО1 (доверенность от 06.05.2024)

- от ответчика: ФИО2 (доверенность от 12.01.2026)

установил:

публичное акционерное общество "РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО" (далее - истец, заказчик) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области (далее – суд) с иском к обществу с ограниченной ответственностью "ПЕТРОСТРОЙ РИТМ" (далее - ответчик, подрядчик) о взыскании по договору от 20.07.2023 № 23-17197: 1 804 000 руб. пени за нарушение сроков выполнения работ за период с 10.01.2025 по 26.09.2025.

В настоящем судебном заседании представитель истца заявил об уточнении исковых требований, просил взыскать 123 200 руб. пени за нарушение сроков выполнения работ за период с 16.07.2025 по 12.08.2025.

Суд в порядке статьи 49 АПК РФ принял заявленные уточнения.

Ранее поданное заявление о возвращении искового заявления представитель истца не поддержал, о чем имеется отметка в протоколе судебного заседания.

Суд в порядке статьи 137 АПК РФ перешел из предварительного судебного заседания в основное.

Представитель ответчика заявил о признании иска с учетом принятых судом уточнений.

Исследовав материалы дела, заслушав представителей сторон, суд установил следующие обстоятельства.

Стороны заключили договор от 20.07.2023 № 23-17197 (далее – Договор) по условиям которого Подрядчик обязуется в установленный срок по Заявкам Заказчика выполнить следующие работы для осуществления технологического присоединения к электрическим сетям объектов электро-сетевого хозяйства на выполнение проектно-изыскательских работ, строительно-монтажных работ (с поставкой оборудования) и полного комплекса проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ (по Заявкам) на общестроительных и электросетевых объектах, включающих наружные и внутренние сети электроснабжения, в целях осуществления технологического присоединения Заявителей, повышения надежности электросетевого комплекса, а также в целях осуществления мероприятий для исполнения обязательств по сносу и восстановлению электросетевых объектов, попадающих в зону производства работ третьих лиц, поставку, строительство, монтаж и пуско-наладочные работы на трансформаторных и распределительных подстанций, кабельных линий, работы по строительству, испытание электросетей и электрооборудования, сдачу готового объекта в эксплуатацию с привлечением специалистов организаций осуществляющих государственный надзор для технологического присоединения абонентов и прочие (дополнительные) услуги по филиалам ПАО «Россети Ленэнерго» «Южные электрические сети», «Кабельная сеть», филиалам ПАО «Россети Ленэнерго» Ленинградской области, филиалу «Санкт-Петербургские высоковольтные электрические сети» и др. «ЛОТ №1» (231015/1/1):

- проектные и изыскательские работы;

- строительно-монтажные работы с поставкой оборудования (при необходимости) и пуско-наладочными работами;

- полный комплекс работ (проектно-изыскательские, строительно-монтажные работы с поставкой оборудования и пуско-наладочные работы) ввести объекты в эксплуатацию и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ, оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

Согласно п.2.1 Договора срок начала выполнения работ по Договору – с 26.07.2023.

Сроки выполнения работ (начальный, конечный, промежуточный) по Объекту определяются сторонами в Заявке (п.2.3 Договора).

Между сторонами заключена заявка от 11.10.2024 №23-12626. Срок завершения работ – не позднее 31.12.2024. Цена заявки – 4 400 000 руб.

Вместе с тем, ответчик обязательства по заявке не исполнил, допустил нарушение сроков выполнения работ.

Пунктом 8.1 Договора предусмотрено, что при нарушении Подрядчиком своих обязательств по Договору, а равно и по каждой Заявке, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты санкций, перечисленных в настоящем пункте, а Подрядчик, в случае наличия соответствующего требования Заказчика обязан уплатить

8.1.1 За нарушение сроков выполнения работ, в том числе по Заявкам, указанных в Календарном плане (в том числе работ по этапам) - пени в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства.

8.1.2. В случае превышения сроков выполнения работ свыше 30 календарных дней или неоднократного превышения сроков выполнения работ, в дополнение к п. 8.1.1. Договора – штраф в размере 10% от стоимости невыполненных работ;

8.1.3. В случае превышения сроков выполнения работ свыше 60 календарных дней, дополнительно к санкциям, предусмотренным пунктами 8.1.1., 8.1.2. Договора – штраф в размере 5% от стоимости работ;

В связи с нарушением ответчиком сроков выполнения работ, истцом начислено, с учетом принятых уточнений, 123 200 руб. пени за период с 16.07.2025 по 12.08.2025.

Истец направил в адрес ответчика претензию от 21.08.2025 №ЛЭ\06-21/701 с требованием оплаты договорной неустойки. Оставление данной претензии без удовлетворения послужило основанием для обращения истца в суд с настоящим иском.

В ходе рассмотрения дела ответчик заявил о признании иска.

В соответствии со статьей 307 ГК РФ, в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

Как установлено статьями 309 и 310 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

Согласно пункту 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В силу пункта 1 статьи 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

В соответствии с пунктом 1 статьи 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков (статья 330 ГК РФ).

Расчет пени, произведенный истцом на основании п.8.1 Договора судом проверен и признан верным.

Согласно части 3 статьи 49 АПК РФ ответчик вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде любой инстанции признать иск полностью или частично.

В соответствии с частью 3 статьи 70 АПК РФ признание стороной обстоятельств, на которых другая сторона основывает свои требования или возражения, освобождает другую сторону от необходимости доказывания таких обстоятельств.

Принимая во внимание, что требования истца подтверждены материалами дела, а также то обстоятельство, что ответчик заявил о признании исковых требований,, исковые требования о взыскании 123 200 руб. пени за нарушение сроков выполнения работ за период с 16.07.2025 по 12.08.2025 следует признать правомерными, обоснованными и подлежащим удовлетворению.

В соответствии со статьей 110 АПК РФ судебные расходы по уплате государственной пошлины относятся на ответчика.

Согласно абз. 2 пункта 3 части 1 ст. 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации при признании ответчиком иска до принятия решения судом первой инстанции возврату истцу подлежит 70 процентов суммы уплаченной им государственной пошлины.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

решил:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ПЕТРОСТРОЙ РИТМ" в пользу публичного акционерного общества "РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО" 123 200 руб. пени, 3348 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины.

Возвратить публичному акционерному обществу "РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО" 75 772 руб. государственной пошлины, уплаченной по платежному поручению от 03.10.2025 №30405.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья Болотова Л.Д.