Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52

http://www.spb.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-122802/2018

24 января 2019 года

г.Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть решения объявлена  15 января 2019 года.

Полный текст решения изготовлен  24 января 2019 года.

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Сергеева О.Н,

 

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: общество с ограниченной ответственностью "ИНСАН" (адрес:  Россия 183038, г МУРМАНСК, МУРМАНСКАЯ обл, ул КАПИТАНА ЕГОРОВА 14/336, ОГРН:  

<

***>);

ответчик: общество с ограниченной ответственностью "ПЕТРОКОМ" (адрес:  Россия 119331, г МОСКВА, 

<

...>/П. III КОМН. 8, ОГРН:  

<

***>);

о взыскании 5 961 057 руб. 45 коп.

 

при участии

-от истца: не явился, о времени и месте извещен надлежащим образом,

-от ответчика: ФИО2 по доверенности от 20.09.18, 

 

установил:

ООО "ИНСАН" предъявило иск о взыскании с ООО "ПЕТРОКОМ" 5 849 520 руб. 00 коп. задолженности по оплате выполненных работ и 111 537 руб. 45 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами.

Ответчик иск отклонил и заявил ходатайство об уменьшении процентов по ст. 333 ГК РФ

Дело рассматривается без участия истца на основании ст.156 АПК РФ.

Судом установлено:

Между сторонами был заключен

02 мая 2017 года между ООО «Петроком» - Заказчик и ООО «Инсан» - Подрядчик был заключен договор № 13-51 на выполнение работ по вывозу и утилизации на полигоне ТБО торфа и избытка плодородного грунта по объекту «СМР, ПНР, поставка МТРиО по 1-му этапу строительства по титулу «Строительство ПС 330 кВ Мурманская с заходами ВЛ ЗЗОкВ. Корректировка» для нужд филиала ПАО «ФСК ЮС» - МЭС Северо-Запад» в соответствии с утвержденной документацией (шифр 1025-ПЗУ, выполненного ООО «Роспроект»). Стоимость работ по Договору определена Ведомостью договорной цены и составляет 14 261 520 рублей 00 копеек.

30 мая 2017 года между ООО «Петроком» и ООО «Инсан» было заключено дополнительное соглашение № 1 к Договору № 13-51, согласно которого стороны пришли к соглашению дополнительно выполнить работы по вывозу непригодного растительного слоя с площадки строительства до места складирования и утилизации. Стоимость дополнительных работ составила 2 080 000 рублей 00 копеек.

25 августа 2017 года ООО «Петроком» и ООО «Инсан» было заключено дополнительное соглашение № 2 к Договору № 13-51, согласно которого стороны пришли к соглашению дополнительно выполнить работы по вывозу непригодного растительного слоя с площадки строительства до места складирования и утилизации. Стоимость дополнительных работ составила 572 000 рублей 00 копеек.

Все вышеуказанные работы были выполнены ООО «Инсан» в срок и надлежащим образом, что подтверждается подписанными сторонами актами формы КС-2, КС-3.

Согласно пункту 3.2.1. Договора № 13-51 Заказчик перечисляет Подрядчику первый авансовый платеж размере 4 500 000 руб. в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Договора. Заказчик перечисляет Подрядчику второй авансовый платеж в размере 4 500 000 руб. в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Договора. В нарушение установленного договором обязательства ООО «Петроком» произвело оплату по одному авансовому платежу 18.05.2017 г., оплата второго авансового платежа произведена не была.

В соответствии с п. 3.5. Договора расчеты за фактически выполненные и принятые работы производится заказчиком не позднее 10 календарных дней с момента подписания заказчиком без разногласий акта о приемке выполненных работ КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 и представления Заказчику счета-фактуры при условии предоставления полного комплекта исполнительной документации, оформленной надлежащим образом.

Заказчик,   нарушив  условия  договора  №   13-51   не   исполнил  своих обязательств по оплате в полном объеме. ООО «Петроком» произведена частичная оплата. По состоянию на 12.09.18 задолженность по оплате работ составляет 5 849 520 руб. 00 коп.

Пунктом 9.3. договора предусмотрено, что за нарушение Заказчиком срока исполнения обязательства по оплате по Договору Подрядчик имеет право начислить Заказчику проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки выполнения обязательств, общий срок начисления которых не может превышать 3 (трех) месяцев со дня нарушения Заказчиком условий Договора.

Согласно представленному расчету размер договорной неустойки составил  111 537 руб. 45 коп. Расчет проверен судом и признан правильным.

Суд не усматривает явной несоразмерности начисленных процентов сумме основного долга.

Проценты, рассчитанные в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, не могут быть уменьшены по ст.333 ГК РФ.

Учитывая изложенное, иск подлежит удовлетворению.

В связи с тем, что при подаче иска истцу была предоставлена отсрочка уплаты государственной пошлины, с ООО "ПЕТРОКОМ" подлежит взысканию в доход федерального бюджета 52 805 руб. 00 коп. государственной пошлины.

Руководствуясь статьями 309, 310, 395, 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 110, 156, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ПЕТРОКОМ" в пользу общества с ограниченной ответственностью "ИНСАН" 5 961 057 руб. 45 коп., из них: 5 849 520 руб. 00 коп. задолженности и 111 537 руб. 45 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ПЕТРОКОМ" в доход федерального бюджета 52 805 руб. 00 коп. государственной пошлины.

Выдать исполнительный лист в порядке статьи 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

 

Судья                                                                            Сергеева О.Н.  -  400