Арбитражный суд Мурманской области 

улица Книповича, дом 20, город Мурманск, 183038, www.murmansk.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) 

город Мурманск Дело № А42-247/2018 23.10.2018 

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, суд  

решил:

обязать АО «Центргазстрой» в течение 30 дней с момента вступления  решения суда в законную силу по делу № А42-247/2018 устранить недостатки  выполненной работы по государственным контрактам № 4 от 04.07.2014 и № 3  

от 15.06.2015, а именно произвести следующие работы: - установить новые полотенцесушители в квартирах 

 № 15,19,20,22,23,25,28,40,46 многоквартирного жилого дома № 30 по ул. Пронина в  г. Кандалакша;  

- устранить протечку кровли над квартирой № 17 многоквартирного жилого  дома № 30 по ул. Пронина в г. Кандалакша;  

-выполнить покраску потолка водоэмульсионными составами кухни в квартире   № 17 многоквартирного жилого дома № 30 по ул. Пронина в г. Кандалакша;  

- заменить замок входной двери в квартире № 46 многоквартирного жилого дома   № 30 по ул. Пронина в г. Кандалакша;  

- выполнить покраску водоэмульсионными составами потолка и стен выше 1,8  м в ванной комнате квартиры № 25 многоквартирного жилого дома № 30 по  

ул. Пронина в г. Кандалакша; 

- выполнить покраску водоэмульсионными составами потолка и стен в  туалете квартиры № 20 многоквартирного жилого дома № 30 по ул. Пронина в  

г. Кандалакша; 

- выполнить покраску водоэмульсионными составами потолка и выполнить  смену обоев на стенах в коридоре в квартире № 20 многоквартирного жилого  дома № 30 по ул. Пронина в г. Кандалакша;  

- произвести замену металлических отливов по помещению кухни и комнаты  в квартире № 10 многоквартирного жилого дома № 30 по ул. Пронина в г. Кандалакша  для предотвращения попадания атмосферных осадков в квартиру, заменить замок  входной двери;  

- заменить механизм регулируемой створки оконного блока из ПВХ в комнате  (помещение № 2 по тех. паспорту) квартиры № 11 многоквартирного жилого дома  

 № 30 по ул. Пронина в г. Кандалакша; 

- заменить механизм регулируемых створок оконных блоков из ПВХ в комнатах  и в помещении кухни в квартире № 17 многоквартирного жилого дома № 30 по ул.  Пронина в г. Кандалакша; установить фильтры перед ИПУ ХВС и ГВС в помещении  санузла в квартире № 17 многоквартирного жилого дома № 30 по ул. Пронина в  

г. Кандалакша; 

- восстановить циркуляцию горячего водоснабжения в квартирах № 37,43,49  многоквартирного жилого дома № 30 по ул. Пронина в г. Кандалакша;  

- заделать трещины на отделочном слое капитальной стены и перегородки в  ванной комнате между помещениями туалета и ванной (путем расшивки трещин,  обеспыливания, грунтовки, шпаклёвки, шлифовки шпаклёвки заподлицо,  повторной грунтовки) с последующей покраской стены и перегородки  водоэмульсионными составами в квартире № 49 многоквартирного жилого дома № 30  по ул. Пронина в г. Кандалакша;  

-заделать трещины во всех помещениях квартиры на потолке вдоль стыка  плит перекрытия (на окрасочном слое) (путем расшивки трещин,  обеспыливания, грунтовки, шпаклёвки, шлифовки шпаклёвки заподлицо,  повторной грунтовки) с последующей окраской водоэмульсионными составами  потолка во всех помещениях в квартире № 50 многоквартирного жилого дома №  30 по ул. Пронина в г. Кандалакша;  

- заменить механизм регулируемых створок оконных блоков из ПВХ в  комнате и помещении кухни в квартире № 43 многоквартирного жилого дома   № 30 по ул. Пронина в г. Кандалакша, заменить терморегулятор на радиаторе  отопления в комнате;  

- заменить наружную дверь в квартиру № 33 многоквартирного жилого  дома № 30 по ул. Пронина в г. Кандалакша;  

- установить фильтры для очистки воды перед ИПУ ХВС и ГВС в квартире   № 31 многоквартирного жилого дома № 30 по ул. Пронина в г. Кандалакша;  

- заменить наружную дверь в квартире № 22 многоквартирного жилого  дома № 30 по ул. Пронина в г. Кандалакша; замена кафельной плитки в ванной  комнате;  

- замена оконного блока из ПВХ в комнате в квартире № 21  многоквартирного жилого дома № 30 по ул. Пронина в г. Кандалакша;  

- устранить протечку кровли над квартирой № 7 многоквартирного жилого  дома № 30 по ул. Пронина в г. Кандалакша;  

- выполнить покраску водоэмульсионными составами потолка и стен в  туалете в квартире № 7 многоквартирного жилого дома № 30 по ул. Пронина в  г. Кандалакша;  

- выполнить покраску водоэмульсионными составами потолка и  выполнить смену обоев на стенах кухни в квартире № 7 многоквартирного  жилого дома № 30 по ул. Пронина в г. Кандалакша;  

- укрепить дверную коробку входных металлических дверей во все  подъезды установленные с нарушениями;  

- восстановить штукатурный и окрасочный слой фасада в местах скола со  стороны проезжей части (при подготовке фасада, произвести очистку  поверхности от старого окрасочного слоя и шпаклёвки, расшить трещины с  подмазыванием, произвести шлифование, произвести шпатлевание,  зашлифовать зашпатлеванную поверхность, произвести окраску аналогичной  краской, которая использовалась застройщиком при покраске здания);  

- укрепить перила в подъезде № 2; - устранить отслоение отделочного слоя между 2 и 3 этажом в подъезде 

 № 2; устранить трещины отделочного слоя стен в общем коридоре по кв. № 17 и  

18 в подъезде № 2 (при подготовке стен, произвести очистку поверхности от  старого окрасочного слоя и шпаклёвки, расшить трещины с подмазыванием,  произвести шлифование, произвести шпатлевание, зашлифовать  зашпатлеванную поверхность, произвести окраску аналогичной краской,  которая использовалась застройщиком при покраске подъездов);  

- устранить провисание дверного полотна металлической двери в  подвальное помещение со стороны главного фасада многоквартирного жилого  дома № 30 по ул. Пронина в г. Кандалакша путем регулировки дверных петель;  

- восстановить подшивную доску крыши со стороны главного фасада многоквартирного жилого дома № 30 по ул. Пронина в г. Кандалакша; 

- устранить просадку грунта под бетонной отмосткой многоквартирного  жилого дома № 30 по ул. Пронина в г. Кандалакша;  

- устранить трещины штукатурного и окрасочного слоев стен в подъезде   № 1 многоквартирного жилого дома № 30 по ул. Пронина в г. Кандалакша (при  подготовке стен, произвести очистку поверхности от старого окрасочного слоя и  шпаклевки, расшить трещины с подмазыванием, произвести шлифование,  произвести шпатлевание, зашлифовать зашпатлеванную поверхность,  произвести окраску аналогичной краской, которая использовалась  застройщиком при покраске подъездов);  

- устранить течь по примыканию металлического козырька к фасаду над  входом в тепловой пункт многоквартирного жилого дома № 30 по ул. Пронина в г.  Кандалакша путём герметизации стыка кровли козырька с фасадом здания.  

Взыскать с АО «Центргазстрой» в доход федерального бюджета  государственную пошлину в сумме 6000 руб.  

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный  апелляционный суд в течение месяца со дня принятия.  

Судья Максимец Д. Л.