Арбитражный суд Хабаровского края

г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

дело № А73-4033/2024

г. Хабаровск

20 мая 2024 года

Решение в виде резолютивной части принято 13 мая 2024 года.

Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи О.П. Никитиной,

рассмотрел в порядке упрощенного производства дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Дежнев» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 680021, 

<

...>) к акционерному обществу «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 675004, 

<

...>)

о взыскании 670 965 руб. 53 коп. неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по договору №650/21-ХЭС от 17.03.2021 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, 30 883 руб. 81 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 02.12.2023 по 07.03.2023, а также обязании произвести технологическое присоединение к электрическим сетям в течение одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу и взыскании судебной неустойки за неисполнение решения суда в данной части.

установил:

общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Дежнев» (далее – ООО СЗ «Дежнев», истец) обратилось в арбитражный суд с иском к акционерному обществу «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (далее – АО «ДРСК», ответчик) о взыскании 670 965 руб. 53 коп. неустойки по договору №650/21-ХЭС от 17.03.2021 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям за период с 01.12.2022 по 01.12.2023, 30 883 руб. 81 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 02.12.2023 по 07.03.2023, а также обязании произвести технологическое присоединение к электрическим сетям в течение одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу и взыскании судебной неустойки за неисполнение решения суда в данной части.

Определением суда от 15.03.2024 дело принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства без вызова сторон, в соответствии со статьей 228 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ).

Стороны были извещены надлежащим образом в соответствии со статьей 123 АПК РФ о рассмотрении дела в порядке упрощенного производства.

Ответчик, как следует из отзыва на иск, предъявленные к нему требования не признал, указал, что с даты подписания дополнительного соглашения от 14.10.2022, изменившего существенные условия договора в части мероприятий по технологическому присоединению (фактически утверждены новые технические условия), подлежал применению нормативно установленный срок их выполнения, а не ранее определенный срок, в дополнительном соглашении и технических условиях стороны не указали этапы каждого технологического присоединения. Ответчик утверждая, что в настоящем случае изменение технических условий было обусловлено тем, что в ходе проектирования у заявителя возникла необходимость частичного отступления от технических условий, но проектную документацию на проверку истец не предоставил. Заявлено о применении положении статьи 333 ГК РФ в случае удовлетворения требований.

13.05.2024 арбитражным судом в соответствии с частью 1 статьи 229 АПК РФ принято решение в виде резолютивной части, которое размещено на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Решением в виде резолютивной части от 13.05.2024 в удовлетворении иска отказано.

13.05.2024 истец обратился в суд с заявлением о составлении мотивированного решения по настоящему делу.

На основании абзаца третьего части 2 статьи 229 АПК РФ судом изготовлено мотивированное решение.

Исследовав материалы дела, арбитражный суд установил следующие обстоятельства.

Между ООО СЗ «Дежнев» (заявитель) и АО «ДРСК» (сетевая организация) заключен договор № 650/21-ХЭС об осуществление технологического присоединения к электрическим сетям (далее по тексту - Договор).

Согласно п. 1.1. договора сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя - Две ЛЭП-6кВ для организации электроснабжения объекта: Комплекс жилых домов со встроенными помещениями общественного назначения пристроенным гаражом-стоянкой и пристроенным зданием общественного назначения по ул. Дикопольцева в Центральном районе г. Хабаровска, кадастровый номер земельного участка 27:23:0030103:2217.

Запрошенная Истцом максимальная мощность энергопринимающих устройств составляет 3 300 кВт при напряжении 6-10 кВ, по 2 категории надежности электроснабжения.

Заявитель принял на себя обязательство оплатить услуги по технологическому присоединению в соответствии с условиями договора (п.п.3.1. и 3.2. Договора).

Согласно п. 1.10. договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составлял два года со дня заключения настоящего договора.

В силу п. 7.3. договора, договор считается заключенным с даты поступления подписанного заявителем экземпляра договора ответчику.

Поскольку подписанный договор был предоставлен истцом в сетевую организацию 05.04.2021, следовательно, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составлял 05.04.2023.

Согласно п.2.1.4. договора сетевая организация приняла на себя обязательство надлежащим образом исполнять обязательства по договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях (Приложение А), 1.2, 2.1 - 2.3 Технических условий, в том числе:

- реконструкция РУ 6кВ ПС 35 кВ Парк Гайдара с установкой на первой и второй секции шин РУ-6 кВ по одной линейной ячейке 6 кВ с вакуумным выключением;

В линейных ячейках 6 кВ, устанавливаемых РУ-6 кВ ПС 35/6 кВ Парк Гайдара предусмотреть установку устройств и противоаварийной автоматики (АЧР, ЧАПВ) на базе микропроцессорных терминалов.

- выполнить учет электроэнергии в соответствии с Типовой инструкцией по учету электроэнергии при ее производстве, передача и распространении (СО 153-34.09.101-94), требованиями правил организации учета электрической энергии на розничном рынке, установленных Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии, утв. Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 № 442.

Согласно п.2.1.5. договора сетевая организация обязуется в течение 10 календарных дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им технических условий осуществить проверку выполнения технических условий заявителем.

Согласно п. 4.2. Договора Сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25 процента от указанного общего размере платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки. При этом, совокупный размер такой неустойки не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки. Сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне договора расходы, связанные с необходимостью принудительного взыскания неустойки, предусмотренной абзацем первым настоящего пункта, в случае необоснованного уклонения либо отказа от ее уплаты.

Выявив в ходе проектирования необходимость частичного отступления от мероприятий, предусмотренных техническими условиями к договору о технологическом присоединении, ООО СЗ «Дежнев» направило в адрес сетевой компании письмо от 27.07.2022 с просьбой о согласовании и внесении изменений в договор в части поэтапного срока технологического подключения, заявитель просил изменить порядок выполнения мероприятий по технологическому присоединению, предусмотреть 3 этапа технологического присоединения.

Одобрив корректировку мероприятий в рамках действующего договора технологического присоединения, ПАО «ДРСК» утвердило изменения в технические условия, согласовало поэтапный срок технологического присоединения (3 этапа), с указанием количества и характеристик возводимых объектов электросетевого хозяйства, без изменения максимальной мощности энергопринимающих устройств.

В этой связи сторонами 14.10.2022 заключено дополнительное соглашение N 1 к договору, которым внесены изменения в его существенные условия; в том числе пункт 1.1 изложен в следующей редакции: сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя - Две ЛЭП-6кВ для организации электроснабжения объекта: Комплекс жилых домов со встроенными помещениями общественного назначения пристроенным гаражом-стоянкой и пристроенным зданием общественного назначения по ул. Дикопольцева в Центральном районе г. Хабаровска, кадастровый номер земельного участка 27:23:0030103:2217., со следующими характеристиками:

- максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 3300 кВт;

- категория надёжности 2 категория 3300 кВт;

- класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 6 кВ, к объектам электросетевого хозяйства Сетевой организации поэтапно:

1            этап: мощность 1 420,0кВт (2 категория надежности) по уровню напряжения 6 кВ.

2            этап: мощность 1 050кВт (2 категория надежности) по уровню напряжения 6 кВ.

3            этап: мощность 830,0кВт (2 категория надежности) по уровню напряжения 6 кВ.

Также договор дополнен приложениями, в том числе «Изменения от 14.10.2022 в технические условия № ТПр650/21 от 17.03.2021 на технологическое присоединение к электрическим сетям АО «ДРСК».

В Изменениях от 14.10.2022 в технические условия стороны согласовали год ввода в эксплуатацию энергопринимающего устройства/объекта электросетевого хозяйства: 1 этап – ноябрь 2022, 2 этап – сентябрь 2023, 3 этап – март 2024.

31.05.2023 ООО СЗ «Дежнев» уведомило сетевую организацию о полном выполнении мероприятий предусмотренных техническими условиями № ТПр650/21 от 17.03.2021, просило информировать о сроках исполнения обязательств сетевой организацией.

21.06.2023 стороны подписали временный акт об осуществлении временного опосредованного технологического присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью 1 100 кВт.

По утверждению ООО СЗ «Дежнев» сроки исполнения обязательств сетевой организацией были нарушены.

ООО СЗ «Дежнев» обратился к АО «ДРСК» с претензией от 24.01.2024 об уплате неустойки за период с 01.12.2022 по 01.12.2023.

Требование претензии оставлено ООО СЗ «Дежнев» без удовлетворения, что явилось истцу основанием для обращения в суд с настоящим иском.

Сложившиеся правоотношения сторон регулируются нормами ГК РФ, Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее – Закон № 35-ФЗ), Правилами № 861.

В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Закона № 35-ФЗ технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям осуществляется в порядке, устанавливаемом Правительством РФ, и носит однократный характер.

По договору об осуществлении технологического присоединения к электрической сети одна сторона (сетевая организация) обязуется в установленный действующими правилами порядке присоединить по заявке другой стороны (абонента) принадлежащие ему энергопринимающие устройства к электрической сети сетевой организации, а абонент обязуется оплатить мероприятия по технологическому присоединению и соблюдать его технические условия.

Порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц, процедура технологического присоединения, существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям регулируются Правилами № 861.

В соответствии с пунктами 3 и 6 Правил № 861 сетевая организация на основании заявки заявителя обязана заключить с ним договор на технологическое присоединение, а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств заявителя мероприятия по технологическому присоединению.

В силу подпункта «а» пункта 16 Правил №861 технические условия являются неотъемлемой частью договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям и определяют перечень мероприятий по технологическому присоединению, являющийся существенным условием.

Согласно пункту 16 Правил N 861, договор должен содержать следующие существенные условия: а) перечень мероприятий по технологическому присоединению (определяется в технических условиях, являющихся неотъемлемой частью договора) и обязательства сторон по их выполнению; б) срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению.

Подпунктом «в» пункта 16 Правил N 861 предусмотрено, что одним из существенных условий договора является положение об ответственности сторон за несоблюдение установленных договором и Правилами сроков исполнения своих обязательств, в том числе: право заявителя в одностороннем порядке расторгнуть договор при нарушении сетевой организацией сроков технологического присоединения, указанных в договоре.

Пунктом 101 Правил N 861 предусмотрено, что в случае, если техническими условиями предусмотрен поэтапный ввод в работу энергопринимающих устройств, то проверка выполнения технических условий проводится в части мероприятий, предусмотренных каждым этапом, и по техническим условиям в целом по завершении выполнения всех этапов.

Таким образом, из буквального толкования вышеназванных норм права следует, что основания для начисления неустойки за нарушение срока выполнения конкретного этапа мероприятий по технологическому присоединению имеются лишь в том случае, если техническими условиями предусмотрен поэтапный ввод в работу энергопринимающих устройств.

Согласно пункту 23 Правил №861, в случае, если в ходе проектирования у заявителя возникает необходимость частичного отступления от технических условий, такие отступления должны быть согласованы с выдавшей их сетевой организацией с последующей корректировкой технических условий, являющихся неотъемлемым приложением договора технического присоединения. Согласование соответствующих изменений в технические условия сетевая организация осуществляет в течение 10 рабочих дней со дня обращения заявителя.

Аналогичные условия содержатся в договоре (пункт 2.4.4).

Истец, выявив в ходе проектирования необходимость частичного отступления от мероприятий, предусмотренных техническими условиями к договору о технологическом присоединении, обратился к ответчику с просьбой об их согласовании.

Ответчик принял предложения истца об изменении технических условий и согласовал их с ним, путем подписания дополнительного соглашения к договору.

Согласно п. 6 дополнительного соглашения, дополнительное соглашение вступает в силу с момента его поступления в сетевую организацию.

Подписанное дополнительное соглашение поступило в адрес ответчика 13.01.2023, менее чем за 3 месяца до окончания срока исполнения мероприятий по договору.

В соответствии с частью 3 статьи 453 ГК РФ в случае изменения или расторжения договора обязательства считаются измененными или прекращенными с момента заключения соглашения сторон об изменении или о расторжении договора, если иное не вытекает из соглашения или характера изменения договора.

В соответствии с подпунктом «б» пункта 16 Правил № 861 срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению исчисляется со дня заключения договора и не может превышать 2 года - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет не менее 670 кВт, в том числе при технологическом присоединении к объектам электросетевого хозяйства организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, если для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств или объектов электроэнергетики заявителя требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы смежных сетевых организаций, и (или) объектов по производству электрической энергии.

Для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет не менее 670 кВт, по инициативе (обращению) заявителя, договором могут быть установлены иные сроки (но не более 4 лет).

Данная норма носит императивный характер и направлена на недопустимость злоупотребления сетевой организацией как сильной стороной в договоре с потребителем услуги.

В силу положений статьи 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами (пункт 1 статьи 310 ГК РФ).

В силу статьи 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой.

В соответствии со статьей 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в том числе в случае просрочки исполнения. По требованию о взыскании неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков (статья 330 ГК РФ).

Вина должника в нарушении обязательства предполагается, пока не доказано обратное. Отсутствие вины в неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательства доказывается должником (пункт 2 статьи 401 ГК РФ).

Пунктом 4.1 договора предусмотрено, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по договору, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ и настоящим договором.

Согласно п. 4.2. договора сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25 процента от указанного общего размере платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки.

В соответствии с третьим абзацем подпункта «в» пункта 16 раздела II Правил № 861 за несвоевременное выполнение мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренному договором (за исключением случаев нарушения выполнения технических условий заявителями, указанными в пунктах 12(1), 13(2)-13(5) и 14 настоящих Правил, технологическое присоединение энергопринимающих устройств которых осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже), установлена ответственность в виде обязанности такого лица уплатить другой стороне договора неустойку, равную 0,25% общего размера платы за технологическое присоединение за каждый день просрочки, при этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке, за год просрочки.

Статья 65 АПК РФ возлагает на каждое лицо, участвующее в деле, обязанность доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений, а часть 2 статьи 9 АПК РФ предусматривает, что лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

При рассмотрении дела, исследовав представленные доказательства, оценив их в порядке статьи 71 АПК РФ, суд пришел к следующим выводам.

Пунктом 101 Правил № 861 предусмотрено, что в случае, если техническими условиями предусмотрен поэтапный ввод в работу энергопринимающих устройств, то проверка выполнения технических условий проводится в части мероприятий, предусмотренных каждым этапом, и по техническим условиям в целом по завершении выполнения всех этапов.

Таким образом, из буквального толкования вышеназванных норм права следует, что основания для начисления неустойки за нарушение срока выполнения конкретного этапа мероприятий по технологическому присоединению имеются лишь в том случае, если техническими условиями предусмотрен поэтапный ввод в работу энергопринимающих устройств.

Соглашением от 14.10.2022 по инициативе истца внесены изменения в предмет договора, сторонами согласовано поэтапное присоединение.

В дополнительном соглашении и технических условиях стороны не указали сроки выполнения каждого этапа технологического присоединения, при этом в изменениях от 14.10.2022 в технические условия стороны указан год ввода в эксплуатацию энергопринимающего устройства/объекта электросетевого хозяйства: 1 этап – ноябрь 2022, 2 этап – сентябрь 2023, 3 этап – март 2024 необходимый заявителю .

Вместе с тем, в технических условиях (Приложение к дополнительному соглашению от 14.10.2022) установлено, что выполнение поэтапного технологического присоединения впервые вводимых в эксплуатацию в процессе технологического присоединения энергопринимающих устройств истца осуществляется не позднее окончания срока действия технических условий. Срок действия технических условий установлен 5 лет с 14.10.2022 года. Данные изменения были приняты истцом и не оспорены.

Согласно п. 6 дополнительного соглашения, дополнительное соглашение вступает в силу с момента его поступления в сетевую организацию.

Подписанное дополнительное соглашение поступило в адрес ответчика 13.01.2023, менее чем за 3 месяца до окончания срока исполнения мероприятий по договору.

В соответствии с частью 3 статьи 453 ГК РФ в случае изменения или расторжения договора обязательства считаются измененными или прекращенными с момента заключения соглашения сторон об изменении или о расторжении договора, если иное не вытекает из соглашения или характера изменения договора.

Суд полагает, что стороны не могли не понимать, что измененные существенные условия сделки (включающие по первому этапу: сооружение дополнительных объектов электросетевого хозяйства, разработку задания на проектирование, проектной и рабочей документации, их согласование с сетевой организацией) объективно не могут быть исполнены в ранее определенный срок (05.04.2021).

В связи с тем, что срок в дополнительном соглашении каждого этапа не оговорен необходимо руководствоваться положением п.п. «б» п. 16 Правил N 861, где законодатель установил предельный срок технологического присоединения к электрическим сетям, не более 4 лет, т. е. до 05.04.2025.

В связи с чем срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению в силу закона не истек.

Позиция ответчика мотивирована, в том числе, и наличием объективных препятствий, за которые ответственность несет истец.

Анализируя поведении сторон договора с учетом положений статьей статей 401, 404 - 406 ГК РФ, суд учитывает следующее.

Истец представил расчет неустойки с 01.12.2022 по 01.12.2023, при этом не обосновал начало период начисления санкций.

Ответчика указал на то, что неустойка заявлена за период, когда сам истец не в полной мере исполнил обязательства по договору, более того, истцом до настоящего времени не представлена в сетевую организацию проектная документация.

В силу п. 2.3.4. истец обязуется своевременно осуществить разработку проектной документации в рамках исполнения своих обязательств по технических условий (далее - ТУ), предусматривающей технические решения, обеспечивающие выполнение ТУ, в том числе решения по схеме внешнего электроснабжения (схема выдачи мощности объектов по производству электрической энергии), релейной защиты и автоматике, телемеханике и связи (в том числе по этапам) и своевременно (не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до направления уведомления о выполнении ТУ направить ее ответчику для проверки соответствия проекта требованиям ТУ.

Пунктом 4.1. ТУ (Изменения от 14.10.2022) истец обязан выполнить мероприятия указанные в п. 1.1, 1.4, 1.7. и 2.4 с учетом требований раздела 3 ТУ, включая разработку проектной и рабочей документации. Истец обязан предоставить ответчику копии разделов проектной документации, предусматривающих реализацию технических решений, обеспечивающих выполнение настоящих ТУ.

Согласно п. 2.3.7 договора истец после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ своего участка уведомляет сетевую организацию (ответчика) о выполнении технических условий.

Сетевая организация (ответчик) имеет право не осуществлять присоединение мощности энергопринимающих устройств истца к объектам электросетевого хозяйства ответчика, в случае не соответствия проектной документации, выполняемой истцом, ТУ; не соответствия выполненных истцом работ проектной документации и (или) ТУ, до момента устранения нарушения истцом (п. 2.2.3 договора).

Истец 20.06.2023 предоставил ответчику уведомление от 09.06.2023 о выполнении технических условий по договору, просил произвести осмотр электроустановок: 2КЛ-6кВ, 2 ТП 1600 кВт, при этом нарушил условия п. 2.3.4. договора и п. 4.1. ТУ, не предоставил в установленный срок проектную документацию, предусматривающую реализацию технических решений, обеспечивающих выполнение технических условий.

Согласно п. 7 Правил N 861, п 2.3.9 и 2.3.10 Договора, п 4.7. ТУ истец обязан получить разрешение органа федеральной государственного энергетического надзора на допуск в эксплуатацию присоединяемых объектов.

После получения допуска в эксплуатацию присоединяемых объектов составляется акт об осуществлении технологического присоединения. В силу п. 19 Правил, акт об осуществлении технологического присоединения является документом завершающим технологическое присоединение к электрическим сетям.

Согласно акту об осуществления временного технологического присоединения от 21.06.2023 № 331/21-хэс-атп-временный, запрошена истцом мощность у ООО «Трансэнерго 1 100 кВт, что гораздо меньше той мощности, которая запрошена по договору между истцом и ответчиком. Указанный акт подтверждает довод ответчикачто истец не готов в полном объеме к технологическому присоединению. Ответчик отметил, что временному технологическому присоединению допуск от органа федерального государственного энергетического надзора не требуется.

Как пояснил ответчик, истец в настоящее время только осуществляет строительство своего объекта, объект к сдаче не готов, получить допуск в эксплуатацию присоединяемых объектов у органа федеральной государственного энергетического надзора не получится, в связи с чем закончить процедуру технологического присоединения в срок, установленный исковым заявлением, ответчику будет невозможно. В связи с чем ответчик, в случае удовлетворения иска истца, не сможет исполнить решение суда по осуществлению технологического присоединения объекта истца к электрическим сетям и составить акт об осуществлении технологического присоединения, по не зависящим от него причинам.

В соответствии с пунктом 3 статьи 405 ГК РФ должник не считается просрочившим, пока обязательство не может быть исполнено вследствие просрочки кредитора.

Согласно пункту 1 статьи 406 ГК РФ кредитор считается просрочившим, если он отказался принять предложенное должником надлежащее исполнение или не совершил действий, предусмотренных законом, иными правовыми актами или договором либо вытекающих из обычаев или из существа обязательства, до совершения которых должник не мог исполнить своего обязательства.

Как следует из материалов дела, в ходе исполнения договора выяснились обстоятельства, которые требуют содействия истца для своевременного достижения результата работ сетевой организацией в рассматриваемом случае имела место просрочка кредитора, следовательно, должник не считается просрочившим, пока обязательство не может быть исполнено вследствие просрочки кредитора.

Доказательств тому, что сетевой организации своевременно представлена проектная документация, истец в порядке статьи 65 АПК РФ не представил.

Исходя из изложенного, оснований для взыскания неустойки и процентов за не имеется, а требование истца по удовлетворению не подлежит.

В отсутствие доказательств надлежащего исполнения обязательств самим истцом у суда отсутствуют основания для обязания ответчика произвести технологическое присоединение к электрическим сетям в течение одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу.

С учетом изложенных обстоятельств в удовлетворении иска отказано.

Расходы по уплате государственной пошлины распределяются в соответствии с требованиями статьи 110 АПК РФ и возлагаются на истца.

Руководствуясь статьями 110, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

отказать в иске.

Арбитражный суд составляет мотивированное решение по заявлению лица, участвующего в деле, которое может быть подано в течение пяти дней со дня размещения настоящего решения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения арбитражного суда – со дня принятия решения в полном объеме.

Решение, если оно было предметом рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции или если арбитражный суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы, и постановление арбитражного суда апелляционной инстанции, принятое по данному делу, могут быть обжалованы в суд кассационной инстанции – Арбитражный суд Дальневосточного округа по основаниям, предусмотренным частью 3 статьи 288.2 АПК РФ.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются в арбитражный суд апелляционной и кассационной инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края.

Решение вступает в законную силу по истечении пятнадцати дней со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае составления мотивированного решения арбитражного суда решение вступает в законную силу по истечении срока, установленного для подачи апелляционной жалобы. В случае подачи апелляционной жалобы решение арбитражного суда первой инстанции, если оно не отменено или не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.

 

Судья                                                                                               Никитина О.П.