АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ,

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело №А76-10338/2022

16 февраля 2023 года

г. Челябинск

 

Резолютивная часть решения объявлена 15 февраля 2023 года

Решение изготовлено в полном объеме 16 февраля 2023 года

 

Судья Арбитражного суда Челябинской области И.В. Костарева,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, помощником судьи Э.И. Даминовой,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску публичного акционерного общества «Ростелеком», г. Санкт-Петербург, ОГРН: 

<

***>,

к Управлению строительства, инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства Карталинского муниципального района, г. Карталы Челябинской области,  ОГРН: 

<

***>,

при участии третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, общества с ограниченной ответственностью «Уральская энергосбытовая компания», г. Челябинск, ОГРН: 

<

***>, открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала», г. Екатеринбург, ОГРН: 

<

***>, открытого акционерного общества «Российские железные дороги», г. Москва, ОГРН: 

<

***>, общества с ограниченной ответственностью «МиассЭнергоСтрой», г. Миасс Челябинской области, ОГРН: 

<

***>,

о взыскании 2 091 838 руб. 73 коп.,

при участии в судебном заседании до и после перерыва:

от истца: ФИО2 – представителя, действующего на основании доверенности  № 0504/29/86/21 от 29.06.2021, личность установлена паспортом,

от ответчика: ФИО3 – представителя, действующего на основании доверенности № 01 от 09.01.2023, личность установлена паспортом,

от третьих лиц: не явились, извещены,

УСТАНОВИЛ:

акционерное общество «Ростелеком», г. Санкт-Петербург, обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к Управлению строительства, инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства Карталинского муниципального района, г. Карталы Челябинской области, о взыскании 2 091 838 руб. 73 коп.

Протокольным определением от 29.06.2022 суд перешел из стадии предварительного судебного заседания в судебное заседание. 

Определением Арбитражного суда Челябинской области от 29.06.2022 к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены общество с ограниченной ответственностью «Уральская энергосбытовая компания», г. Челябинск, ОГРН: 

<

***>, открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала», г. Екатеринбург, ОГРН: 

<

***>, открытое акционерное общество «Российские железные дороги», г. Москва, ОГРН: 

<

***>, общество с ограниченной ответственностью «МиассЭнергоСтрой», г. Миасс Челябинской области, ОГРН: 

<

***>.

В судебном заседании 13.02.2023 в порядке ст. 163 АПК РФ,  был объявлен перерыв до 15.02.2023 до 11 час. 20 мин.

О перерыве в судебном заседании лица, участвующие в деле,  извещены путем размещения публичного объявления на официальном сайте суда в сети Интернет (Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25.12.2013 № 99 «О процессуальных сроках»).

Судебное заседание продолжено после перерыва 15.02.2023.

Протокольным определением от 15.02.2023 от акционерное общество «Ростелеком», г. Санкт-Петербург принято уточнение исковых требований в части взыскания с Управления строительства, инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства Карталинского муниципального района, г. Карталы Челябинской области основного долга в размере 3 253 741 руб. 82 коп.

Истец в судебном заседании поддержал исковые требования в полном объеме.

Ответчик в судебном заседании против исковых требований возражал по основаниям, изложенным в отзыве на иск.

 Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, в судебное заседание не явились, извещены надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства с соблюдением требований ст. 121 - 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

Неявка в судебное заседание лиц, участвующих в деле, извещенных надлежащим образом, не препятствует рассмотрению дела по существу в их отсутствие (п.5 ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). 

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу о том, что лица, участвующие в деле извещены надлежащим образом о времени и месте разбирательства дела с соблюдением требований ст.ст. 121 - 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Дело рассматривается по правилам п. 5 ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие представителей   третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, извещенных надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела, по имеющимся в деле доказательствам.

Заслушав истца, ответчика, исследовав и оценив представленные доказательства в соответствии со ст.71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд пришел к следующим выводам.

Как видно из материалов дела,  по результатам открытого конкурса в электронной форме, согласно Протоколу подведения итогов открытого конкурса от 28.01.2021 между Публичным акционерным обществом «РОСТЕЛЕКОМ» (Истец, Исполнитель) и Управлением строительства, инфраструктуры и жилищно - коммунального хозяйства Карталинского муниципального района (Ответчик, Заказчик) 09.02.2021 года заключен энергосервисный контракт №0169300012320000633_192684 (далее - Контракт) (имеется в материалах дела).

В силу пункта 1.1. Контракта Исполнитель осуществляет выполнение мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов на объектах наружного освещения Заказчика в соответствии с Приложением №2 к Контракту. Результатом выполнения Исполнителем обязательств по Контракту является обеспечение размера экономии электроэнергии в натуральном выражении.

Размер экономии электроэнергии в натуральном выражении определен на основании размера экономии в денежном выражении, предложенной Исполнителем в его конкурсной заявке 49 005 025,19 руб., и стоимости единицы электроэнергии, действующей на дату размещения извещения о проведении открытого конкурса 7,25 руб. с НДС.

В силу пункта 1.1.1. Контракта Исполнитель обязуется обеспечить ежегодный размер экономии расходов Заказчика на оплату электроэнергии в натуральном выражении 965 616,26 кВт*ч; таким образом, за период действия настоящего Контракта размер экономии должен составить не менее 6 759 313,82 кВт*ч. Доли размера экономии в натуральном выражении, обеспечиваемые Исполнителем, указаны в Приложении №4 к Контракту.

Обязательство Исполнителя по обеспечению экономии расходов Заказчика на поставке электрической энергии считается исполненным, если размер экономии, достигнутой в результате исполнения Контракта, в натуральном выражении равен или больше размера экономии электрической энергии, указанного в пункте 1.1.1. Контракта.

Согласно Приложению № 2 к Контракту энергосберегающие мероприятия состоят из:

№

Энергосберегающие мероприятия

Объем

Срок оказания услуг

1.

Разработка и согласование с заказчиком

адресного перечня, включающего места

установки согласно типам энергосберегающих светильников наружного освещения, места установки СИП.

1 шт.

Не более 150 (Ста пятидесяти) календарных дней с даты заключения энергосервисного контракта (Первый этап энергосберегающих мероприятий).

2.

Демонтаж существующих уличных светильников с лампами ДРЛ, ДНаТ на территории Карталинского городского поселения.

2131 шт.

 

3.

Установка энергосберегающих светильников наружного освещения на территории Карталинского городского поселения.

2131 шт.

 

4.

Модернизация сетей уличного освещения: установка СИП.

19000 м.

Не более 150 (Ста пятидесяти) календарных дней с даты получения Исполнителем от Заказчика технических условий на подключение к электрическим сетям, а также других необходимых документов, без которых невозможно выполнение Исполнителем второго этапа энергосберегающих мероприятий (Второй этап энергосберегающих мероприятий).

5

Установка системы управления наружным освещением в комплекте с автоматизированной системой учета потребления электроэнергии на территории Карталинского городского поселения.

31 пункт учета

 

Согласно разделу 3 Контракта: 

3.1.Объем потребления электрической энергии Объектом в натуральном выражении до реализации Исполнителем энергосберегающих мероприятий определяется Сторонами по данным об объеме потребления электрической энергии за базисный год. Показатели потребления энергетических ресурсов за базисный год приведены в Приложении №3 к настоящему Контракту.

3.2.      Данные об объеме (доле объема) потребления электрической энергии Заказчиком, полученные при помощи приборов учета электрической энергии, принимаются как объем потребления с учетом факторов, влияющих на объем потребления электрической энергии (изменение суточного графика включения и отключения электрических сетей наружного освещения, изменение количества потребителей электрической энергии), согласно Приложению №8 к настоящему Контракту.

3.3.      В случае выхода прибора учета из строя, в период его неработоспособности, потребление принимается равным потреблению, зафиксированному этим прибором учета в аналогичный период предыдущего года после выполнения энергосберегающих мероприятий,   в случае,   когда это по каким-либо причинам невозможно,  величина потребления определяется расчетным методом.

3.4. Определение объема потребления электрической энергии после реализации Исполнителем перечня энергосберегающих мероприятий осуществляется по данным об объеме потребления электрической энергии, определенных при помощи приборов учета используемого энергетического ресурса, и переданных в Систему учета и сбора данных о потреблении электрической энергии системой освещения Карталинского городского поселения, а в случае, когда это по каким-либо причинам невозможно, величина потребления определяется расчетным методом.

Согласно разделу 4 Контракта:

В случае изменения количества и/или типа работающего оборудования на Объекте, изменении графика работы соответствующего оборудования Заказчик обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней до даты таких изменений письменно уведомить об этом Исполнителя (согласно Приложению №8 к настоящему Контракту).

Заказчик при эксплуатации Объекта обязан:

- обеспечить доступ специалистам Исполнителя на Объект, в согласованное сторонами время;

- обеспечить согласованные Сторонами режимы и условия использования электрической энергии;

- осуществить допуск представителей Исполнителя на Объект, в отношении которого осуществляются энергосберегающие мероприятия, в том числе в целях контроля измерительных приборов учета электрической энергии;

- предоставить дистанционный доступ специалистам Исполнителя к данным потребления и достигнутой экономии электроэнергии на Объекте по каждому прибору учета....

п. 4.20. Начальный срок достижения предусмотренного настоящим Контрактом размера экономии электроэнергии: первый полный качендарныи месяц, следующий за месяцем подписания Акта о выполнении первого этапа энергосберегающих мероприятий.

п. 4.21. Конечный срок достижения предусмотренного настоящим Контрактом размера экономии электроэнергии: полный качендарныи месяц, предшествующий месяцу истечения срока действия Контракта.

п.4.22. Заказчик обязан в срок не более 2 (Двух) месяцев после момента подписания Сторонами Акта о выполнении первого этапа энергосберегающих мероприятий окончить внесение изменений в договоры на электроснабжение в части оплаты электроэнергии, а именно:

- перевести все линии освещения, оборудованные многотарифными приборами учета, на одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток;

- изменить подключенную расчетную мощность одиночно стоящих светичьников на фактическую, взятую из предоставленных Исполнителем паспортов на светильники;

- изменить расписание режимов работы светильника в соответствии с требованиями контракта.

Потребление и стоимость потребленной электрической энергии (для составления актов о величине полученной экономии электрической энергии) в период, после подписания Акта о выполнении первого этапа энергосберегающих мероприятий до окончательного согласования всех изменений в договорах на электроснабжение, рассчитываются с учетом существующих изменений в договорах на электроснабжение.

Согласно п. 5.10. Контракта, Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня поступления документов, указанных в пункте 5.9 настоящего Контракта, но не позднее 30 (Тридцати) календарных дней со дня окончания периода достижения размера экономии (доли размера экономии), за которые осуществляются расчеты, подписывает документы и оплачивает Исполнителю путем перечисления денежных средств на его расчетный счет или направляет мотивированный отказ. Доводы, на которых основан отказ,    не    должны    выходить    за    пределы    обязательств    Исполнителем, предусмотренных Контрактом.

В обоснование иска истец ссылается на то, что Результат выполненных работ передан Заказчику в полном объеме (ч.1 ст. 721 ГК РФ), соответственно, энергосберегающие мероприятия реализованы Исполнителем и приняты Заказчиком.

В ходе исполнения Контракта между сторонами были подписаны акт № 1 от 25 июня 2021 года к энергосервисному контракту № 0169300012320000633J92684 от 09.02.2021 на оказание услуг по выполнению мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации объектов наружного (уличного) освещения на территории Карталинского городского поселения с привлечением собственных инвестиций (имеется в материалах дела); акт № 2 от 29.06.2021 о выполнении 1 этапа энергосеберегающих мероприятий (имеется в материалах дела); акт № 3 от 29.06.2021 о приёмки-передачи оборудования по энергосервисному контракту (имеется в материалах дела).

Между сторонами в результате получения Заказчиком экономии электрической энергии были подписаны акт № 1 от 01.11.2021 о величине полученной экономии электрической энергии за июль 2021 г. на сумму 289 145,89 руб., акт № 2 от 01.11.2021 о величине полученной экономии электрической энергии за август 2021 на сумму 399 813,07 руб.,  акт № 3 от 22.11.2021 о величине полученной экономии электрической энергии за сентябрь 2021 на сумму 472 944,13 руб., акт № 4 от 01.12.2021 о величине полученной экономии электрической энергии за октябрь 2021; акт № 5 от 13.01.2022 о величине полученной экономии электрической энергии за ноябрь 2021, акт № 6 от 28.01.2022 о величине полученной экономии электрической энергии за декабрь 2021. При подписании указанных актов каких-либо возражении у Ответчика не было.

В связи с тем, что Заказчиком не произведена оплата за июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2021 года, Исполнителем в адрес Заказчика были направлены претензии (имеются в материалах дела), которые остались без удовлетворения.

Доказательств оплаты выполненных и принятых  работ на сумму 3 253 741 руб. 82 коп., Ответчик не представил.

В судебном заседании 15.02.2023 Ответчик отказался воспользоваться своим правом и заявить ходатайство о назначении по делу судебной экспертизы, предложенной судом.

Ссылаясь на ненадлежащее исполнение ответчиком принятых на себя по договору обязательств в части внесения платы за выполненные работы в полном объеме, истец обратился в суд с настоящими исковыми требованиями.

В соответствии с п.1 ст. 8 Гражданского кодекса Российской Федерации, гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. 

Судом установлено, что между сторонами возникли правоотношения по договору подряда, которые регулируются главой 37 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

В соответствии с п. 1 ст. 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В силу ст. 753 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик обязан уведомить заказчика о завершении работ (этапа работ) по договору и готовности результата работ к сдаче, а заказчик обязан организовать и осуществить приемку результата работ.

Доказательством сдачи подрядчиком результата работ и приемки его заказчиком является акт или иной документ, удостоверяющий приемку выполненных работ (п. 2 ст. 720 Гражданского кодекса Российской Федерации).

По смыслу названных норм права сдача подрядчиком и принятие заказчиком результатов работы являются основанием для возникновения у заказчика обязательства по оплате выполненных работ.

Приемка выполненных работ оформляется актом, подписанным обеими сторонами, то есть надлежащим доказательством выполнения работ является названный документ. Исходя из назначения указанного документа, акт выполненных работ должен отражать сведения о содержании выполненных работ, их объеме.

В соответствии с п. 1 ст. 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Согласно ст. ст. 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязательства должны исполняться надлежащим образом, а односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается за исключением случаев, предусмотренных законом.

В соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лицо, участвующее в деле, обязано доказать те обстоятельства, на которые она ссылается в обоснование своих требований и возражений.

Анализируя предмет заявленных исковых требований в соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд исходит из того, что бремя доказывания факта выполнения работ несет истец, в то время как доказывание факта оплаты работ возлагается на ответчика.

Требование  Истца о взыскании с Ответчика основного долга в размере 3 253 741 руб. 82 коп. обоснованно и подлежит удовлетворению.

В соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по госпошлине подлежат отнесению на ответчика, в связи с удовлетворение иска. 

Руководствуясь ст.ст. 110, 167, 168, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать с Управления строительства, инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства Карталинского муниципального района, г. Карталы Челябинской области в пользу акционерного общества «Ростелеком», г. Санкт-Петербург, основной долг в размере 3 253 741 руб. 82 коп., в возмещение расходов по оплате госпошлины 33 459 руб.

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в апелляционную инстанцию – Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд путем подачи жалобы через Арбитражный суд Челябинской области. 

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

 

Судья                                                                    И.В. Костарева

 

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной жалобы можно получить на Интернет-сайте Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда http://18aas.arbitr.ru.