АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 410002, 

<

...>; тел.: 

<

***>;  

http://www.saratov.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А57-16946/2024

24 апреля 2025 года

город Саратов

 

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Обязать Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах  

в Саратовской области в течении двух месяцев с момента вступления решения в законную  

силу устранить недостатки, допущенные в ходе проведения капитального ремонта крыши  

жилого многоквартирного дома по адресу: Саратовская область, Советский район,  

<

...>, выполнив следующие работы: 

Демонтажные работы по вентканалам: 

1. Демонтаж защитных колпаков вентканалов из листовой оцинкованной стали с  

сохранением материала -100 м2 (ед. изм.) - 0,155 (кол-во); 

2. Демонтаж штукатурки улучшенной - 100 м2 (ед. изм.) - 1,390 (кол-во); 3. Демонтаж прижимной рейки - м (ед. изм.) - 99,29 (кол-во);  

Демонтажные работы по парапетам: 

4. Демонтаж оголовка парапета из цементного раствора - м3 (ед. изм.) - 7,344 (кол- 

во); 

5. Демонтаж прижимной рейки - м (ед. изм.) - 96,60 (кол-во); 6. Разборка парапета кирпичного – м3 (ед. изм) - 1,62 (кол-во);  

Демонтажные работы по будке: 

7. Демонтаж штукатурки улучшенной - 100 м2 (ед. изм.) - 0,11 (кол-во); 8. Демонтаж прижимной рейки - м (ед. изм.) - 7,5 (кол-во);  

Демонтажные работы по кровле: 9. Демонтаж двуслойной наплавляемой кровли - 100 м2 (ед. изм.) - 1,4 (кол-во); 

10. Разборка карнизных свесов - 100 м2 (ед. изм.) - 0,434 (кол-во); Элементы кровли - Вентканалы:  

11. Ремонт кирпичной кладки вентканалов отдельными местами – м3 (ед. изм.) - 1,036 (кол-во);  

12. Установка защитных колпаков на оголовках вентканалов - 100 м2 (ед. изм.) - 0,155 (кол-во);  

13. Выравнивание оголовков вентканалов по уклону- 100 м2 (ед. изм.)-0,130 (кол- 

во); 

14. Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен - 100 м2 (ед.  

изм.) - 1,390 (кол-во); 

15. Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по  

штукатурке вентканалов - 100 м2 (ед. изм.) - 1,390 (кол-во); 

16. Монтаж прижимных реек, с заделкой шва герметикой - м (ед. изм.) - 99,29 (кол- 

во) Элементы кровли – парапет; 

17. Выравнивание верхних покрытий по уклону - 100 м2 (ед. изм.) - 0,460 (кол-во); 18. Устройство наплавляемого слоя по стяжке над парапетом - 100 м2 (ед.изм.) - 0,460 (кол-во);  

19. Устройство мелких покрытий (парапета) из листовой стали - 100 м2 (ед. изм.) - 0,460 (кол-во);  

20. Монтаж ограждение кровель перилами - 100 м (ед. изм.) - 0,96 (кол-во);  

21. Грунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 - 100 м2  

(ед. изм.) - 0,677 (кол-во); 

22. Масляная окраска металлических поверхностей - 100 м2 (ед. изм.) - 0,499 (кол- 

во) Элементы кровли – Будка; 

23. Штукатурка по сетке без устройства каркаса - 100 м2 (ед. изм.) - 0,11 (кол-во); 24. Ремонт дверных петель при помощи сварки - шт. (ед. изм.) - 2 (кол-во);  

25. Окраска двери за два раза - 100 м2 (ед. изм.) - 0,22 (кол-во); 

26. Монтаж прижимных реек, с заделкой шва герметиком - м (ед. изм.) - 7,6 (кол- 

во) Элементы кровли – Кровля; 

27. Ремонт покрытий кровель двуслойных из наплавляемых материалов - 100 м2  

(ед. изм.) - 0,168 (кол-во); 

28. Выравнивание стяжки под рулонный ковер безусадочными растворами - 100 м2  

(ед. изм.) - 1,4 (кол-во); 

29. Устройство кровли двуслойной из наплавляемых материалов - 100 м2 (ед. изм.)  

- 1,4 (кол-во); 30. Монтаж карнизного свеса - 100 м2 (ед. изм.) - 0,434 (кол-во); 

31. Ремонт примыканий кровель двуслойных из наплавляемых материалов - 100 м2  

(ед. изм.) - 0,96 (кол-во); 

32. Установка проходок из оцинкованной стали на фановые трубы диаметром 100  

мм. с заделкой под рулонный ковёр - шт. (ед. изм.) - 12 (кол-во); 

33. Замена водосточных желобов, расположенных по углам здания - шт. (ед. изм.) - 2 (кол-во); 34. Погрузка и вывоз мусора строительного.  

Взыскать с Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных  

домах в Саратовской области, ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, г. Саратов, в  

пользу общества с ограниченной ответственностью «Жилищник», ИНН 

<

***>,  

ОГРН 

<

***>, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, расходы по  

оплате государственной пошлины в размере 6 000 руб., расходы на проведение  

экспертизы в размере 48 000,00 руб. 

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по  

заявлению взыскателя. 

Решение арбитражного суда первой инстанции вступает в законную силу по  

истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.  

Решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в  

апелляционную или кассационную инстанции в порядке, предусмотренном главами 34, 35  

раздела VI Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Направить копии судебного акта лицам, участвующим в деле, в соответствии с  

требованиями статьи 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

Судья Арбитражного суда Саратовской области ФИО1