23/2023-299293(1) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ Резолютивная часть

Дело № А45-26185/2023

город Новосибирск

17 октября 2023 года

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Серёдкиной Е.Л., при  ведении протокола секретарем судебного заседания Сурмановой Л.А., рассмотрев в  открытом судебном заседании дело по иску муниципального казенного учреждения  города Новосибирска «Управление дорожного строительства» (ОГРН  1065406101265), г. Новосибирск,  

к обществу с ограниченной ответственностью СУ «Сибстрой» (ОГРН  1075410008926), г. Новосибирск,  

об обязании предоставить обеспечение гарантийных обязательств. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

решил:

обязать общество с ограниченной ответственностью СУ «Сибстрой» (ОГРН  1075410008926) в течении месяца с момента вступления решения в законную силу,  при наступлении климатических условий (в сухую погоду весной и летом при  температуре окружающего воздуха не ниже 5°С, осенью - не ниже 10°С), устранить  следующие недостатки (дефекты) в выполненных работах по муниципальному  контракту от 01.07.2021 № 33/21:  

1) на объекте «ул. Аникина»: 

- выкрашивание а/б покрытия в месте отбора проб - 2 шт. (Аникина, 114 ТСТ  «Новый Мир»);  

- выкрашивание поперечного стыка - 7 п.м. (поворот с ул. Тюменской); 2) на объекте «ул. Богдана Хмельницкого»: 

- выкрашивание а/б покрытия в месте отбора проб- 2 шт. (ул. Б. Хмельницкого,  63, 76);  

- выкрашивание а/б покрытия проезжей части - 65 м2 (четная сторона: на  

пешеходном переходе перед ООТ «Писемского» ул. Б. Хмельницкого, 86/1; напротив  

ООТ «Писемского»; перед информационным щитом ул. Б. Хмельницкого, 90 к.2); 3) на объекте «ул. Блюхера пересечение с ул. Котовского (трамвайные пути)»: 

- выбоины на а/б покрытии проезжей части и вдоль трамвайных путей на  

пересечении -10 м2; 4) на объекте «УЛ. Вертковская»: 

- выкрашивание а/б покрытия в месте отбора проб - 3 шт. (в районе дома по ул.  

Вертковская, 42); 5) на объекте «ул. Курчатова»: 

- выкрашивание а/б покрытия в месте отбора проб - 3 шт. (вдоль здания по ул.  

Объединения, 11); 6) на объекте «УЛ. Лыщинского»: 

 выкрашивание а/б покрытия в месте отбора проб - 2 шт. (вдоль дома по ул.  

Геодезическая, 23); 

- выкрашивание поперечного стыка - 10 п.м. (в начале участка ул. Немировича- 

Данченко, 163); 7) на объекте «ул. Объединения»: 

- выкрашивание а/б покрытия в месте отбора проб - 1 шт.(на пересечении по  

центру возле информационного шита); 

- выкрашивание а/б покрытия вокруг смотрового колодца - 0,5 м2 (поворот на ул.  

Объединения направо где ж/д пути); 8) на объекте «проспект Дзержинского»: 

- выкрашивание а/б покрытия в месте отбора проб - 2 шт. (проспект  

Дзержинского, 145 и 147); 

- выкрашивание а/б покрытия по полосам наката - 150 м2 (от пр. Дзержинского,  

118 до 120); 

- выкрашивание а/б покрытия на проезжей части - 80 м2 (пр. Дзержинского. 113;  

ООТ «Золотая Горка»; от пр. Дзержинского, 118 в сторону АЗС «Лукойл» лево и  

право; пр. Дзержинского, 118 к.4; пр. Дзержинского, 157 лево и право); 9) на объекте «ул. Промышленная»: 

- выкрашивание а/б покрытия на проезжей части - 200 м2 (на всем пересечении с  

ул. Индустриальной); 

- выкрашивание и просадка смотровых колодцев - 4 шт. (на всем пересечении с  

ул. Индустриальной); 

10) на объекте «Развязка Чемского моста (подъем с Северного проезда на  

Советское шоссе»): 

- выкрашивание а/б покрытия в месте отбора проб - 5 шт. (на всем участке  

ремонта); 

- выкрашивание а/б покрытия на проезжей части на поперечном стыке - 50 п.м.  

(перед поворотом под путепровод); 11) на объекте «УЛ. Рекордный переулок»: 

- выкрашивание а/б покрытия в месте отбора проб - 2 шт. (в районе дома по ул.  

Рекордный переулок, 2 и в конце участка); 

- колейность на а/б покрытии проезжей части h = 3 — 3,5 см - 90 м2 (на повороте  

на внутреннем радиусе лево перед ул. Объединения); 12) на объекте «ул. Северный проезд ( № °24 - подъем на Советское шоссе)»: 

- выкрашивание а/б покрытия в месте отбора проб - 5 шт. (напротив зданий по  

ул. Сибиряков-Гвардейцев, 49А к.4 и 49А к.2; въезд в ворота здание по ул.  

Сибиряков-Гвардейцев, 49А к 2/1; ул. Северный проезд, 28); 

- выкрашивание а/б покрытия проезжей части на поперечном стыке - 10 п.м. (в  

начале участка ул. Северный проезд, 24); 

- выкрашивание а/б покрытия вокруг дождеприемного колодца - 1 шт. (в районе  

здания по ул. Сибиряков-Гвардейцев, 49А к.4); 13) на объекте «ул. Сибиряков - Гвардейцев»: 

- выкрашивание а/б покрытия вокруг колодцев - 2 шт. (в районе домов по ул.  

Сибиряков-Гвардейцев, 25, 27); 14) на объекте «УЛ. Тюменская - Оловозаводская»: - выкрашивание а/б покрытия в месте отбора проб - 1 шт. (ул. Тюменская, 4); 

- выкрашивание а/б покрытия проезжей части вокруг колодцев - 2 шт. (на  

пересечении); 

- выкрашивание а/б покрытия проезжей части - 180 м2 (по центру на  

пересечении: от дорожного знака 3.18.2 «Поворот налево запрещен» по ул.  

Тюменской в сторону перекрестка с ул. Оловозаводской; на повороте с ул.  

Оловозаводской направо на ул. Тюменскую); 

- выкрашивание а/б покрытия проезжей части на поперечном стыке - 10 п.м. (ул.  

Тюменская, 5), 

15) на объекте «ул. Сержанта Коротаева»: 

- просадка смотрового колодца - 1 шт. (на пешеходном переходе в районе ООТ  «Сержанта Коротаева»);  

- выкрашивание а/б в местах отбора проб - 6 шт. (ООТ «Сержанта Коротаева» по  правой стороне в направление ул. Комсомольской»; в районе дома по ул. Чигорина,  2/1 слева; вдоль дома но ул. Чигорина, 20 слева и справа; в районе дома по ул.  Сержанта Коротаева, 3 первый подъезд: между домами по ул. Сержанта Коротаева, 3  и 5;  

- выкрашивание продольного шва на а/б покрытии проезжей части - 200 п.м. (от  дома по ул. Чигорина, 20 до ООТ «Сержанта Коротаева»;  

- выбоины на а/б покрытии проезжей части - 1 м2 (на повороте между домами по  ул. Чигорина, 20 и Чигорина, 12/1).  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью СУ «Сибстрой» (ОГРН  1075410008926) в доход федерального бюджета Российской Федерации 6000 рублей  государственной пошлины.  

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Седьмой  арбитражный апелляционный суд, в течение месяца после его принятия.  

Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Арбитражный  суд Западно-Сибирского округа при условии, если оно было предметом рассмотрения  арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции  отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья Е.Л. Серёдкина