АРБИТРАЖНЫЙ СУД СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е  Резолютивная часть

Дело № А63-19038/2017

г. Ставрополь

21 марта 2018 года

Арбитражный суд Ставропольского края в составе судьи Кузьминой М.Н., при  ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Еременко М.В.,  рассмотрев в судебном заседании исковое заявление  

Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Георгиевского городского  округа Ставропольского края, г. Георгиевск, ОГРН 1132651033129, ИНН 2625801946,  

к обществу с ограниченной ответственностью «Стройплюс», г. Можайск, ОГРН 1133525017009, ИНН 3525309316, 

об обязании ООО «Стройплюс» выполнить гарантийные обязательства по  

муниципальному контракту № 0121300029011000030/43 и устранить выявленные в ходе  эксплуатации недостатки в построенном многоквартирном доме, а именно: 1. Удалить  дренирующий материал из пазух фундамента, до нижней отметки железобетонной плиты; 2.  Внутреннюю и наружную поверхность стен подвала просушить, очистить от пыли и грязи,  тщательно удалить всю старую краску, заделать цементным раствором пустоты швов и  углубления, обработать пропиточным составом; 3. Произвести окрасочную и оклеечную  гидроизоляцию наружных стен фундаментов в два слоя. Толщина слоя не должна быть менее  1-3 мм; 4. Произвести засыпку пазух фундамента до нижней отметки железобетонной  плиты, глиной с послойным трамбованием; 5. Отмостку выполнить с обеспечением отвода  дождевой воды от стен здания;  

 Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 181 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, суд   

РЕШИЛ:

Принять уточненные исковые требования.  Исковые требования удовлетворить в полном объеме. 

 Обязать ООО «Стройплюс» выполнить гарантийные обязательства по  

муниципальному контракту № 0121300029011000030/43 от 25.07.2011 и устранить  выявленные в ходе эксплуатации недостатки в построенном многоквартирном доме, а  именно: 1. Удалить дренирующий материал из пазух фундамента, до нижней отметки  

железобетонной плиты; 2. Внутреннюю и наружную поверхность стен подвала просушить,  очистить от пыли и грязи, удалить старую краску, заделать цементным раствором пустоты  швов и углубления, обработать пропиточным составом; 3. Произвести окрасочную и  оклеечную гидроизоляцию наружных стен фундаментов в два слоя. Толщина слоя не менее  1-3 мм; 4. Произвести засыпку пазух фундамента до нижней отметки железобетонной  плиты, глиной с послойным трамбованием; 5. Отмостку выполнить с обеспечением отвода  дождевой воды от стен здания.  

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Стройплюс», г. Можайск, 

ОГРН 1133525017009, ИНН 3525309316, в доход федерального бюджета государственную  пошлину в размере 6 000 руб.  

 Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу. 

 Решение суда может быть обжаловано через Арбитражный суд Ставропольского  края в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его  принятия (изготовления в полном объеме) и в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа  при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной  инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока  подачи апелляционной жалобы.  

Судья М.Н.Кузьмина