ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной cторожки, 12

адрес электронной почты: 9aas.info@arbitr.ru

адрес веб.сайта: http://www.9aas.arbitr.ru

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 09АП-16619/2023

Дело № А40-240543/22

г. Москва

12 апреля 2023 года

Резолютивная часть постановления объявлена 05 апреля 2023 года 

Постановление изготовлено в полном объеме 12 апреля 2023 года 

 

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи: Титовой И.А.,

судей: Порывкина П.А., Фриева А.Л.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу ООО "ДАВИНЧИ КОМПАНИ" на решение Арбитражного суда г. Москвы от 06.02.2023 по делу № А40-240543/22 по иску общества с ограниченной ответственностью "ФИБРОБЕТОН" (127572, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИАНОЗОВО, УГЛИЧСКАЯ УЛ., Д. 16, ЭТАЖ 2, ПОМЕЩ. 61, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 13.11.2014, ИНН: 

<

***>, КПП: 771501001) к обществу с ограниченной ответственностью "ДАВИНЧИ КОМПАНИ" (127247, 

<

...>, ЭТАЖ 03 02 АНТРЕСОЛЬ ПОМ 3308, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 03.06.2013, ИНН: 

<

***>, КПП: 771301001) о взыскании неустойки в размере 3 614 020,79 руб. с учетом принятых судом уточнений исковых требований в порядке ст. 49 АПК РФ,

При участии в судебном заседании:

от истца: ФИО2 по доверенности от 07.06.2021,

от ответчика: ФИО3 по доверенности от 05.12.2022. 

 

У С Т А Н О В И Л:

Общество с ограниченной ответственностью "ФИБРОБЕТОН" обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "ДАВИНЧИ КОМПАНИ" о взыскании неустойки в размере 1 314 863,80 руб. по двусторонним актам, 1 574 272,10 руб. по односторонним актам и 3 614 020,79 руб. по невыполненным работам, с учетом принятых судом уточнений исковых требований, в порядке ст. 49 АПК РФ.

Ответчик заявил о снижении неустойки в порядке ст. 333 ГК РФ.

Решением от 06.02.2023  с общества с ограниченной ответственностью "ДАВИНЧИ КОМПАНИ" (127247, 

<

...>, ЭТАЖ 03 02 АНТРЕСОЛЬ ПОМ 3308, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 03.06.2013, ИНН: 

<

***>, КПП: 771301001) в пользу общества с ограниченной ответственностью "ФИБРОБЕТОН" (127572, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИАНОЗОВО, УГЛИЧСКАЯ УЛ., Д. 16, ЭТАЖ 2, ПОМЕЩ. 61, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 13.11.2014, ИНН: 

<

***>, КПП: 771501001) взыскана неустойка в размере 3 614 020 (Три миллиона шестьсот четырнадцать тысяч двадцать) руб.  79 коп., расходы по оплате госпошлины в размере 30 852 (Тридцать тысяч восемьсот пятьдесят два) руб. 09 коп, в удовлетворении остальной части исковых требований – отказано. Возвращена обществу с ограниченной ответственностью "ФИБРОБЕТОН" (127572, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИАНОЗОВО, УГЛИЧСКАЯ УЛ., Д. 16, ЭТАЖ 2, ПОМЕЩ. 61, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 13.11.2014, ИНН: 

<

***>, КПП: 771501001) из дохода федерального бюджета госпошлина в размере 3 425 (Три тысячи четыреста двадцать пять) руб., уплаченной по платежному поручению № 407 от 31.10.2022 г.

ООО "ДАВИНЧИ КОМПАНИ", не согласившись с принятым решением, обратился с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда отменить. По их мнению, при вынесении обжалуемого решения судом первой инстанции неправильно применены нормы материального права, выводы суда не соответствуют обстоятельства дела. 

В судебном заседании стороны поддержали свои правовые позиции по спору.  

Девятый арбитражный апелляционный суд, повторно рассмотрев дело,  проверив законность и обоснованность обжалуемого судебного акта в порядке ст. ст. 123, 156, 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса РФ, изучив материалы дела, заслушав, лиц, участвующих в деле, исследовав имеющиеся в деле доказательства, проверив доводы апелляционных жалоб, находит решение Арбитражного суда города Москвы не подлежащим изменению или отмене по следующим основаниям.

Как усматривается из материалов дела и верно установлено судом первой инстанции, ООО «Фибробетон» (далее - Истец, Заказчик) и ООО «ДаВинчи Компани» (далее -Ответчик, Проектировщик) заключен договор № ПСД20/01Ф от 19.06.2020г. (далее -Договор) на выполнение работ по разработке проектной документации для проведения капитального ремонта объектов (далее - работы).

Согласно п. 1.1 Договора Заказчик поручает и оплачивает, а Проектировщик принимает на себя обязательства выполнить обследования и разработать проектную документацию по капитальному ремонту жилых домов по заявке Заказчика.

Согласно п. 3.1, Цена разработки Документации в соответствии с условиями Договора составляет 20 000 000,00 (Двадцать миллионов) рублей 00 кои., в том числе НДС (20%).

В соответствии с п. 3.2, Заказчик перечисляет Исполнителю аванс в размере до 90%, первичный аванс составляет 2 000 000 (Два миллиона) рублей.

Расчеты по настоящему Договору производятся Заказчиком путем перечисления соответствующих сумм па расчетный счет Проектировщика (п. 3.3).

В силу п. 4.2, Сроки выполнения работ по настоящему Договору конкретизируются в заявке Заказчика.

В соответствии с разделом 6, выполненные Работы передаются Заказчику в следующем порядке:

Согласно п. 6.1, в срок, указанный в и. 4.2. настоящего Договора Проектировщик передает на рассмотрение уполномоченному представителю Заказчика Документацию для согласования: а) 1 (Один) экземпляр Документации на электронном носителе;

Дата получения Заказчиком Акта выполненных работ на комплект Документации, указанный в пункте 6.1. настоящего Договора, является датой получения Заказчиком Документации на согласование. Датой выполнения Проектировщиком работ, установленной подпунктом 4.2.2 пункта 4.2 настоящего Договора, является дата подписания Заказчиком Акта выполненных работ (п. 6.1.1).

Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней рассмотреть направленную Проектировщиком но Акту выполненных работ Документацию или, в случае несоответствия документации условиям Договора, дать в тот же срок мотивированный отказ (6.1.2).

Согласно п. 6.2.2, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента приемки Документации на утверждение Заказчиком по Акту выполненных работ Заказчик подписывает и скрепляет печатью Акт сдачи-приемки работ в двух экземплярах, один из которых возвращает Проектировщику.

Из материалов дела усматривается, что стороны согласовали сроки исполнения работ - 30.10.2020г. и 07.07.2020г. согласно заявкам к Договору, однако ответчиком часть работ не выполнена и не сдана надлежащим образом, часть работ по Договору выполнена с нарушением срока выполнения работ, согласно периодам просрочки выполнения работ по объектам, указанным в последнем расчете неустойки.

Согласно п. 7.6 Договора, в случае нарушения Проектировщиком сроков выполнения работ, предусмотренных в ст. 4 настоящего Договора, более чем на 10 (Десять) рабочих дней Заказчик вправе требовать пеню с платежей в размере 0.1 % от договорной цены невыполненных в срок работ за каждый день просрочки.

В связи с ненадлежащим исполнением ответчиком своих обязательств по договору, истец начислил последнему неустойку в размере 1 314 863,80 руб. по двусторонним актам, 1 574 272,10 руб. по односторонним актам и 3 614 020,79 руб. по невыполненным работам.

28.09.2022г. в адрес Ответчика была направлена досудебная претензия с требованием оплатить Истцу неустойку, однако, требование в досудебном порядке Ответчиком не удовлетворено, что послужило основанием для обращения в суд с настоящим иском.

В соответствии со статьей 309 ГК РФ обязательства  должны  исполняться  надлежащим  образом  в   соответствии   с   условиями  обязательства   и требованиями закона,  иных  правовых  актов,  а  при  отсутствии  таких  условий   и  требований  -  в  соответствии с обычаями  делового  оборота  или  иными  обычно  предъявляемыми  требованиями.

Статья 310 ГК РФ указывает  на то, что односторонний  отказ  от  исполнения  обязательства и одностороннее изменение   его  условий  не  допускается.

В силу ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик), обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу, и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять и оплатить ее.

Согласно ст. 708 ГК РФ  в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Как усматривается из материалов дела, истцом начислена неустойка в размере 1 314 863,80 руб. по двусторонним актам, 1 574 272,10 руб. по односторонним актам и 3 614 020,79 руб. по невыполненным работам.

Возражая против удовлетворения заявленных требования, ответчик в отзыве на заявление и дополнению к нему указывает, что отсутствует просрочка на стороне ответчика за нарушение согласованного срока выполнения работ, а именно: по работам, сданным по двусторонне подписанным актам и по односторонне подписанным актам.

Суд первой инстанции правомерно согласился с указанным доводом ответчика на основании следующего.

Согласно сложившейся судебной практике (Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 12.02.2019 по делу № А40-191254/18, Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.06.2020 по делу № А40-311000/19) подписанный сторонами акт выполненных работ с указанием на то, что «...работа сдана в установленные сроки....заказчик претензий по срокам оказания услуг не имеет....» или иная формулировка, подтверждающая отсутствие претензий по срокам выполнения работ, является подтверждением своевременно выполненной работы, независимо от того, что Договором между сторонами был установлен иной срок сдачи работ.

В рамках исполнения Договора № ПСД20/01Ф от 19.06.2020 (далее по тексту - «Договор») Ответчиком выполнены работы (данные обстоятельства установлены вступившим в законную силу Решением Арбитражного суда г. Москвы от 27.06.2022 по делу № А40-96415/2022), что подтверждается подписанными Сторонами актами: к-037 от 17.12.2020, к-038 от 30.12.2020, к-01 от 11.01.2021, к-02 от 19.01.2021, к-04 от 26.02.2021, к-05 от 01.03.2021 на общую сумму 12 644 815 руб. 93 коп., а также односторонними актами к-001 от 17.01.2022, к-002 от 17.01.2022, к-003 от 17.01.2022, к-007 от 17.03.2022 на которые от Истца не поступили мотивированные возражения в установленный Договором срок, в связи, с чем работы считаются принятыми Истцом без замечаний по оформленному Ответчиком одностороннему акту.

При этом в каждом Акте, указано: «Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет».

Таким образом, отсутствует нарушение Ответчиком установленных сроков выполнения работ, в связи с чем исковые требования в части начисления неустойки в размере 1 314 863,80 руб. по двусторонним актам и  1 574 272,10 руб. по односторонним актам является необоснованным и удовлетворению не подлежит.

Кроме того, за всё время истец не предъявлял никаких требований/претензий к Ответчику, таким образом, фактически действия Истца по подаче заявления в указанной части являются недобросовестными.

Ответчик в отзыве на исковое заявление также указывает, что  учитывая положения п. 7.6 договора, истцом неверно определен период просрочки, полагает обоснованным начисление пени только с 11 рабочего дня, а также считает, что истцом неверно определена сумма на которую подлежат начислению пени, по доводам ответчика, неустойка подлежит начислению на сумму произведенных платежей, а не на стоимость невыполненных в срок работ.

При этом, суд первой инстанции правомерно не согласился с указанными доводами, так как они являются несостоятельными и основанными на неверном толковании норм права.

В соответствии с п. 7.6 Договора, в случае нарушения проектировщиком сроков выполнения работ, предусмотренных ст. 4 договора, более чем на 10 рабочих дней, заказчик вправе потребовать пеню с платежей в размере 0,1% от договорной цены невыполненных в срок работ за каждый день просрочки.

Таким образом, стороны лишь согласовали, что у истца имеется право потребовать взыскания пени, в случае, если просрочка составил более 10 дней, при этом, речи о «допустимой просрочки», на которую не подлежит начислению неустойка, в указанном пункте не ведется.

Суд первой инстанции верно отметил, что истцом правильно определены периоды просрочки, а также суммы, на которые подлежит начислению неустойка, исходя из стоимости невыполненных работ.

Доводы ответчика относительно того, что просрочка производства работ по договору была допущена по вине истца, являются несостоятельными и не подтверждаются документальными доказательствами.

В соответствии с ч.1 ст. 719 ГК РФ - подрядчик (в данном случае Субподрядчик) вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, в частности непредоставление материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи, препятствует исполнению договора подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок.

Суд первой инстанции правомерно установил, что ответчиком работы, в порядке ст. 719 ГК РФ не приостанавливались, в связи с чем, у него отсутствуют основания ссылаться на неисполнение истцом своих обязательств.

Кроме того, суд первой инстанции также пришел к верному выводу,  что сдача работ иному лицу не подтверждает выполнение работ ответчиком для истца.

Ответчик в ходатайстве о приобщении также дополнительно указывает, что позиции 10,19, 28, 53 и 68 выполнены и сданы истцу по акту к-001 от 17.01.2022 г. Между тем, указанные позиции учтены истцом не в том расчете, однако, суд первой инстанции верно отметил, что сумма пени не меняется, поскольку не меняется период начисления, согласно сдаче работ по односторонним актам  28 января 2022 г.

Доводы ответчика относительно того, что позиция 38 (расчет по двусторонним актам) и 41 (расчет невыполненных работ) отсутствуют в заявках, обоснованно отклонены судом первой инстанции, как несостоятельные. Позиция 38 (расчет по двусторонним актам) отражена в заявке 3 (позиция 35); а позиция 41 (расчет невыполненных работ) отражена в заявке № 3 (позиция 120), однако допущена техническая опечатка по ул. Ленинградская.

В виду чего, указанные работы были согласованы сторонами в заявках, ответчик указывает, что истцом в позиции № 66 в расчете невыполненных работ неверно определена согласованная стоимость работ, вместо 20 612,89 руб. указано 206 112,89 руб., в связи с чем и размер неустойки по данной позиции рассчитан неверно.

Рассмотрев указанный довод, суд первой инстанции с ним правомерно  согласился, истцом была допущена опечатка по стоимости работ, в связи с чем, исходя их стоимости работ 20 612,89 руб. размер неустойки составит 9 420, 09 руб. При этом, указанное расхождение в судебном заседании было обсуждено со сторонами, что повлекло уменьшение истцом требований в части неустойки по невыполненным работам с 3698 794,30 руб. до суммы 3 614 020,79 руб., уточнение требований было принято судом, в порядке ст. 49 АПК РФ.

Таким образом, указанная ошибка была учтена истцом.

В соответствии со ст. 64 АПК РФ - доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном настоящим кодексом и другими Федеральными законами порядке сведения о фактах, на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования или возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела. В качестве доказательств допускаются письменные и вещественные доказательства, объяснения лиц, участвующих в деле, заключения экспертов, показания свидетелей, аудио-видеозаписи, иные документы и материалы.

Согласно ст. 65 АПК РФ - каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В соответствии со ст. 71 АПК РФ - доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности.

Арбитражным процессуальным законодательством установлены критерии оценки доказательств в качестве подтверждающих фактов наличия тех или иных обстоятельств.

Доказательства, на основании которых лицо, участвующее в деле, обосновывает свои требования и возражения должны быть допустимыми, относимыми и достаточными.

Признак допустимости доказательств предусмотрен положениями ст. 68 АПК РФ.

В соответствии с указанной статьей обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами.

Достаточность доказательств можно определить как наличие необходимого количества сведений, достоверно подтверждающих те или иные обстоятельства спора.

Отсутствие хотя бы одного из указанных признаков является основанием не признавать требования лица, участвующего в деле, обоснованными (доказанными).

Отказывая в удовлетворении ходатайства ответчика о применении ст. 333 ГК РФ, суд первой инстанции обоснованно исходил из нижеследующего.

Согласно Определению Конституционного Суда РФ от 14.10.2004 N 293-О гражданское законодательство предусматривает неустойку в качестве способа обеспечения исполнения обязательств и меры имущественной ответственности за их неисполнение или ненадлежащее исполнение, а право снижения размера неустойки предоставлено суду в целях устранения явной ее несоразмерности последствиям нарушения обязательств.

Согласно п. 70 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2016 г. N 7 «О применении судами некоторых положений гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» по смыслу статей 332, 333 ГК РФ, установление в договоре максимального или минимального размера (верхнего или нижнего предела) неустойки не являются препятствием для снижения ее судом.

Пунктом 73 разъяснено, что бремя доказывания несоразмерности неустойки и необоснованности выгоды кредитора возлагается на ответчика. Несоразмерность и необоснованность выгоды могут выражаться, в частности, в том, что возможный размер убытков кредитора, которые могли возникнуть вследствие нарушения обязательства, значительно ниже начисленной неустойки (часть 1 статьи 56 ГПК РФ, часть 1 статьи 65 АПК РФ). Доводы ответчика о невозможности исполнения обязательства вследствие тяжелого финансового положения, наличия задолженности перед другими кредиторами, наложения ареста на денежные средства или иное имущество ответчика, отсутствия бюджетного финансирования, неисполнения обязательств контрагентами, добровольного погашения долга полностью или в части на день рассмотрения спора, выполнения ответчиком социально значимых функций, наличия у должника обязанности по уплате процентов за пользование денежными средствами (например, на основании статей 317.1, 809, 823 ГК РФ) сами по себе не могут служить основанием для снижения неустойки.

Также в п. 77 указанного постановления Верховный суд Российской Федерации указал, что снижение размера договорной неустойки, подлежащей уплате коммерческой организацией, индивидуальным предпринимателем, а равно некоммерческой организацией, нарушившей обязательство при осуществлении ею приносящей доход деятельности, допускается в исключительных случаях, если она явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства и может повлечь получение кредитором необоснованной выгоды (пункты 1 и 2 статьи 333 ГК РФ).

Доказательств, подтверждающих явную несоразмерность неустойки последствиям нарушения обязательств, ответчиком в нарушении ст. 65 АПК РФ не представлено и судом не установлено.

Доводы ответчика, изложенные в отзыве на заявление в обоснование просрочки исполнения обязательств, не могут быть приняты в качестве надлежащих доказательств, подтверждающих чрезмерность начисления неустойки.

Размер неустойки соразмерен значительно превышающему ее основному долгу и определен судом с соблюдением принципов разумности, справедливости и с учетом баланса интересов обеих сторон.

Учитывая отсутствие правовых обоснований и доказательств, свидетельствующих о несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства, суд первой инстанции правомерно не нашел оснований для применения ст. 333 ГК РФ и признал размер неустойки соразмерным последствиям нарушения ответчиком договорных обязательств, в связи с чем, суд первой инстанции пришел к верному выводу, что исковые требования подлежат удовлетворению частично в размере 3 614 020,79 руб. (по расчету от 13.01.2023 г. на суммы невыполненных работ, с учетом уточнения требований в связи с расхождениями по позиции 66), в удовлетворении остальной части исковых требований следует отказать.

Кроме того доводы апелляционной жалобы отклоняются в связи со следующим.

По указанному Договору Ответчик допустил просрочку в выполнении своихобязательств в сроки, указанные в Договоре.

Стороны по Договору согласовали условия о наличии у заказчика гарантии по исполнению проектировщиком принятых на себя обязательств при наличии нарушений с его стороны.

Согласно п. 7.6 Договора стороны определили ответственность за нарушение срока выполнения работ исполнителем (Ответчиком).

Основные доводы в жалобе Заявителя направлены на освобождение ответственности за неисполнение работ по Договору в срок, при этом просрочка выполнения работ Ответчиком является существенной, более 2 лет.

Довод жалобы ООО «ДаВинчи Компани» о том, что заказчик в случае нарушений Исполнителем (Ответчиком) своих обязательств по исполнению работ, вправе требовать пеню с «платежей», т.е. с суммы оплаченных, но не выполненных работ не обоснован. Воля сторон при согласовании условий о мерах ответственности по неисполнению обязательств Договору согласно п.7.6 Договора была направлена на установление ответственности стороны от договорной цены невыполненных в срок работ за каждый день просрочки. В данном контексте формулировка «с платежей» не имеет юридического значения и не согласуется по смыслу всего пункта, так как исполнитель (ООО «ДаВинчи Компани) по договору имеет обязательства по выполнению работ, а не денежные обязательства.

Заявитель жалобы ООО «ДаВинчи Компани» указывает, что начисление Истцом неустойки по позициям 10, 19, 28, 53 в расчете Истца необоснованно.

Однако, в своем отзыве Ответчик предоставляет свой контрасчет неустойки в котором Ответчик включил в расчет неустойки указанные позиции (32, 126, 127, 128), то есть Ответчик согласился с тем, что по данным позициям может начисляется неустойка и привел свой расчет. 

Конституционный Суд Российской Федерации в абзаце 3 пункта 1.0 Решения: '"Об утверждении Обзора практики Конституционного Суда Российской Федерации за первый квартал 2015 года" от 23 апреля 2015 года указал, что положения законодательства "не допускают возможности решения судом вопроса о снижении размера неустойки по мотиву явной несоразмерности последствиям нарушения обязательства без представления ответчиками доказательств, подтверждающих такую несоразмерность.

Судом первой инстанции установлено, что Ответчик (Заявитель жалобы) не исполнил обязательства по разработке документации в предусмотренный договором срок и доказательств наличия обстоятельств, позволяющих снизить размер неустойки, Ответчиком не представлено.

Таким образом, доводы апелляционной жалобы не содержат фактов, которые не были бы проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении заявления и имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли на обоснованность и законность судебного акта, либо опровергали выводы суда первой инстанции.

В силу изложенного суд апелляционной инстанции считает, что выводы суда первой инстанции основаны на полном и всестороннем исследовании материалов дела и сделаны при правильном применении норм действующего законодательства.

Оснований для переоценки выводов суда первой инстанции, сделанных при рассмотрении настоящего спора, апелляционным судом не установлено.

Нарушений норм процессуального права, являющихся безусловным основанием к отмене судебного акта, судом первой инстанции не допущено. Оснований для отмены обжалуемого судебного акта не имеется.

  Руководствуясь ст.ст. 110, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  

 

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 06.02.2023 по делу №А40-240543/22 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения. 

  Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского округа. 

 

Председательствующий судья:                                                      И.А. Титова 

Судьи:                                                                                               П.А. Порывкин 

                                                                                                           А.Л. Фриев 

 

 

Телефон справочной службы суда – 8 (495) 987-28-00.