АРБИТРАЖНЫЙ СУД СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Большая Советская, д. 30/11, 

<

...>

http:// www.smolensk.arbitr.ru; e-mail: info@smolensk.arbitr.ru

тел.8(4812)24-47-71; 24-47-72; факс 

<

***>

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е

город Смоленск

24.04.2025Дело № А62-6484/2024

Резолютивная часть решения оглашена 10.04.2025

Полный текст решения изготовлен 24.04.2025

Арбитражный суд Смоленской области в составе судьи Каринской И. Л.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Сорокиной В.Э.,

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению

Общества с ограниченной ответственностью «РСК Гидра» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) 

к Акционерному обществу «Квадра-Генерирующая компания» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) 

о признании незаконным одностороннего отказа от исполнения договора строительного подряда №935/1748-Д,

при участии в судебном заседании:

от истца: до перерыва в судебном заседании 27.03.2025 ФИО1 – представитель по доверенности от 01.07.2024; после окончания перерыва 10.04.2025 - не явились, извещены надлежащим образом;

от ответчика: ФИО2 - представитель по доверенности от 09.01.2025; ФИО3 – представитель по доверенности от 28.12.2024;

У С Т А Н О В И Л :

Общество с ограниченной ответственностью «РСК Гидра» (далее – истец, ООО «РСК Гидра») обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к Акционерному обществу «Квадра-Генерирующая компания» (далее – ответчик, АО «Квадра-Генерирующая компания») о признании незаконным одностороннего отказа от исполнения договора строительного подряда № 935/1748-Д.

Как следует из материалов дела, 04.06.2024 по итогам заседания закупочной комиссии (протокол № SBR063-240550388000119/3 от 14.05.2024) между АО «Квадра-Генерирующая компания» (заказчик) и ООО «РСК Гидра» (подрядчик) заключен договор строительного подряда № 935/1748-Д (далее по тексту – договор), в соответствии с условиями которого заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства выполнить комплекс работ по техническому перевооружению участка теплосети №3 от 3.15к1 - 3.15 к3, в 

<

...> находящемуся по адресу, указанному в техническом задании (Приложение №1) (далее - объект), в соответствии с требованиями, указанными в договоре, техническом задании (Приложение №1), с достижением требуемых заказчиком результатов работ, указанных в техническом задании (Приложение №1).

Технические, экономические и другие требования к выполняемой работе содержатся в техническом задании (Приложение №1), которое является неотъемлемой частью договора.

Комплекс работ включает в себя все работы, необходимые для достижения результатов работ, указанных в техническом задании, в том числе, но не исключительно: изготовление и/или поставку основных и вспомогательных материально-технических ресурсов/ запасных частей/товарно-материальных ценностей/изделий/конструкций и оборудования (далее - МТРиО), необходимых для выполнения работ по договору; выполнение строительно-монтажных работ; выполнение работ по вводу в эксплуатацию объекта; выполнение прочих работ, хотя прямо и не упомянутых в договоре и техническом задании (Приложение №1), но необходимых для выполнения обязательств по договору и достижения результата работ; исполнение гарантийных обязательств в течение гарантийного срока, установленного в п.6.2.

Работы выполняются по инвестиционному проекту СмГ/71 «Техническое перевооружение участка теплосети № 3 от 3.15к1 - 3.15к3, в 

<

...>».

Пунктом 1.2 договора установлено, что работы на объекте осуществляются в соответствии с техническим заданием (Приложение №1), действующими нормативными документами Российской Федерации, строительными нормами и правилами, требованиями органов государственной власти и управления, уполномоченных контролировать, согласовывать, выдавать разрешения, и наделенных иными государственными полномочиями в отношении создаваемого результата работ (далее - контролирующие органы).

Согласно пункту 1.4 договора работы выполняются частично иждивением подрядчика, частично иждивением заказчика. Заказчик предоставляет подрядчику материалы и оборудование для выполнения работ согласно перечню, предусмотренному в Приложении №1 к договору. В остальном работы выполняются иждивением подрядчика, из его материалов, его силами и средствами. Материалы и оборудование в соответствии с номенклатурой, указанной в технической документации, необходимые для выполнения работ по договору, приобретаются подрядчиком согласно проектной документации. В случае, если это не предусмотрено в проектной документации, выбор поставщика, производителя, типа (марки) материалов, их количество осуществляется подрядчиком по согласованию с заказчиком.

В соответствии с пунктом 1.7 работы выполняются для нужд филиала АО «Квадра» - «Смоленская генерация»: ГИМ 054-005-302 «Поддержание функционирования энергокомплекса филиала АО «Квадра»-«Смоленская генерация» СмГ/71 «Техническое перевооружение участка теплосети № 3 от 3.15к1 - 3.15к3, в 

<

...>».

Договор заключен под отлагательным условием (п. 1 ст. 157 ГК РФ) -принятием решения Инвестиционным комитетом АО «Квадра» о выделении лимитов для реализации мероприятия в 2024 году.

Во избежание сомнений стороны договорились, что возникновение у сторон обязательств по началу исполнения договора обусловлено наступлением отлагательного условия.

О наступлении указанного условия заказчик уведомляет подрядчика отдельным уведомлением в письменной форме, которое должно быть направлено в течение 2 (двух) рабочих дней с момента, когда заказчику станет известно о наступлении отлагательного условия. Уведомление, указанное в настоящем пункте, направляется подрядчику на адрес электронной почты, указанный в п. 13.15 договора, с последующим направлением оригинала уведомления в течение 5 (пяти) рабочих дней заказным письмом либо нарочным способом по адресу, указанному в настоящем договоре. В случае не наступления указанного условия в течение 60 (шестьдесят) календарных дней с даты заключения договора такое отлагательное условие считается не наступившим, а договор - прекратившимся.

Если в каком-либо положении договора, в том числе в каком-либо положении приложения к договору, установлено, что срок исполнения обязательства исчисляется с даты заключения договора, либо с даты подписания договора - такие сроки будут исчисляться сторонами с даты уведомления заказчиком подрядчика о наступлении отлагательного условия.

Подрядчик принимает на себя все свои риски и убытки, связанные с возможным не наступлением отлагательного условия и прекращением договора в связи с указанным в настоящем пункте договора (пункт 1.8 договора).

В соответствии с пунктом 2.2.1 договора подрядчик обязан выполнить работы в сроки, предусмотренные договором и в полном соответствии с технической документацией и требованиями, указанными в п. 1.3 договора.

Согласно пункту 3.1 договора общая стоимость работ по договору (цена договора) составляет 64 124 109, 30 рублей. Детализация стоимости работ приведена в сметной документации (Приложение № 2, Приложения: 2.1, 2.2, 2.3 договора, Приложение № 2).

Заказчик выплатит подрядчику авансовый платеж в размере 6 412 410, 93 рублей, что составляет 10 % от цены договора (п.3.1 договора), включая НДС в размере 1 068 735,16 рублей, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты предоставления подрядчиком оригинала счета на оплату при условии предоставления подрядчиком соответствующего обеспечения в соответствии с разделом 12 договора. Выплата авансового платежа до предоставления обеспечения не осуществляется, при этом заказчик не несет ответственности за нарушение сроков оплаты (пункт 3.4.1 договора).

Пунктами 4.1, 4.2 договора установлено, что работы, предусмотренные договором, осуществляются подрядчиком в сроки, предусмотренные техническим заданием (Приложение №1). Наименование и сроки выполнения отдельных этапов работ (промежуточные сроки) предусмотрены в графике выполнения работ (Приложение №8), являющемся неотъемлемой частью договора. Сроком выполнения подрядчиком работ в целом по договору, является дата утверждения заказчиком итогового акта приемки выполненных работ. Сроки начала и окончания работ могут быть изменены по взаимному согласию сторон, что оформляется дополнительным соглашением, являющимся с момента его подписания неотъемлемой частью договора.

В соответствии с пунктом 11.1 договора, он вступает в силу с даты его заключения и действует до полного выполнения сторонами обязательств по договору. Договор заключается с использованием программно-аппаратных средств электронной торговой площадки и составлен по итогам закупочной процедуры (пункт 1.6 договора), с учетом преддоговорных переговоров (если применимо). Договор считается заключенным в момент (дату) подписания договора заказчиком с использованием программно-аппаратных средств электронной торговой площадки.

Согласно пункту 11. договора изменение и расторжение договора возможно по соглашению сторон, за исключением случаев одностороннего отказа от исполнения договора, установленных договором и действующим законодательством.

Кроме случаев, когда это предусмотрено законодательством, заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке в соответствии со статьей 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации отказаться (как полностью, так и в части) от исполнения договора путем направления подрядчику уведомления об одностороннем отказе от договора в следующих случаях:

- неисполнения либо ненадлежащего исполнения подрядчиком своих обязательств, если такое неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств длится более чем 14 дней подряд или в совокупности в течение действия договора более 30 дней;

- систематического (два и более раза) нарушения подрядчиком правил и инструкций по охране труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности, защиты окружающей среды при выполнении работ на территории заказчика;

- непредставления заказчику любого предусмотренного договором обеспечения исполнения обязательств в установленный срок (если предоставление обеспечения предусмотрено условиями договора);

- в любой момент после заключения договора, когда заказчику стало известно о предоставлении подрядчиком до подписания договора и в ходе его исполнения ложных или недостоверных сведений о финансовом положении Подрядчика, его учредительных документах, разрешений/лицензий/допусков на осуществление работ, выполняемых по договору подрядчиком, и другой информации об обстоятельствах, имеющих существенное значение в отношении договора.

- в случае признания несостоятельности (банкротства) подрядчика или в отношении него начата процедура признания несостоятельным (банкротом), ликвидации или иная аналогичная процедура;

- в случае отсутствия у подрядчика (прекращения действия) лицензии на осуществление деятельности/для производства работ;

- когда деятельность подрядчика приостановлена по решению суда или иного уполномоченного государственного органа;

- если допущенные им отступления в работах от условий договора или иные недостатки результата работ в установленный заказчиком срок не были устранены подрядчиком, либо являются существенными или неустранимыми;

- когда подрядчик допускает два и более случая документально подтвержденных заказчиком отступлений от условий договора, ухудшающих результаты работ (брак в работе);

- когда подрядчик допускает два и более случая документально подтвержденных заказчиком недостатков в работе, которые делают ее результат не пригодным для предусмотренного договором использования.

- когда подрядчик выполняет работы настолько медленно, что выполнение их в срок, предусмотренный договором, становится невозможно;

- в случае прекращения (отсутствия) членства в саморегулируемой организации, утраты права выполнять соответствующие работы в отношении объектов капитального строительства, необходимых подрядчику для выполнения своих обязательств по договору, и/или в связи с отсутствием у СРО, в которой состоит подрядчик, компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств и/или превышении совокупного размера обязательств подрядчика по своим заключенным договорам над уровнем ответственности подрядчика по компенсационному фонду обеспечения Договорных обязательств;

- в случае неполного предоставления подрядчиком информации или предоставления недостоверной информации о бенефициарах;

- в случае не предоставления подрядчиком информации о включении его самого и (или) лица, подписавшего договор, в перечень лиц, указанный в постановлении правительства Российской Федерации от 01.11.2018 №1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22.10.2018 №592», а также информации о том, что он контролируется указанными лицами, а также в иных случаях, указанных в п. 13.6 договора;

- в случае нарушения подрядчиком условия, предусмотренного п.2.6 договора;

- внесения подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

- иных предусмотренных договором случаях.

Договор считается прекратившимся (расторгнутым) с момента получения подрядчиком от заказчика уведомления об одностороннем отказе от исполнения договора, если иной срок не указан в уведомлении (пункт 11.3 договора).

Так, договор заключен под отлагательным условием принятием решения Инвестиционным комитетом АО «Квадра» о выделении лимитов для реализации мероприятия в 2024 году. Возникновение у сторон обязательств по началу исполнения договора обусловлено наступлением отлагательного условия. В соответствии с графиком выполнения работ (приложение 8 к договору) демонтажные, строительно-монтажные работы, гидравлические испытания трубопроводов и обратная засыпка траншеи/котлована должны были быть завершены не позднее 16.08.2024, восстановление благоустройства (дорожного покрытия, газонов), сдача территории производства работ УЖКХ Администрации города Смоленска - не позднее 30.08.2024. Эта же дата (30.08.2024) определена в разделе 8 технического задания (приложение № 1 к договору) в качестве конечного срока выполнения всех работ по договору.

05 июня 2024 года АО «Квадра» направило ООО «РСК «Гидра» уведомление № 935-30-1/972-2 о наступлении отлагательного условия.

Работы по спорному договору строительного подряда № 935/1748-Д должны были быть выполнены ООО «РСК «Гидра» в период с 05.06.2024 по 30.08.2024.

26.06.2024 на электронную почту истца от ответчика поступило электронное уведомление об одностороннем отказе ответчика от исполнения договора строительного подряда № 935/1748-Д.

Несогласие ООО «РСК «Гидра» с принятым АО «Квадра» решением об одностороннем отказе от исполнения договора строительного подряда № 935/1748-Д послужило основанием для обращения истца в суд с настоящим исковым заявлением.

Ответчик представил письменный отзыв, в котором заявленные требования не признал, считая их необоснованными, указал, что перед началом работ по договору строительного подряда № 935/1748-Д ООО «РСК «Гидра» не выполнило мероприятия по предоставлению документов по обеспечению соблюдения при выполнении работ правил охраны труда и промышленной безопасности, предусмотренные положениями договора строительного подряда № 935/1748-Д. Кроме того, истец не мог быть допущен до выполнения работ по договору строительного подряда № 935/1748-Д также в связи с отсутствием согласованного проекта производства работ, соответствующего требованиям «СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004», утвержденных и введенных в действие Приказом Минстроя России от 24.12.2019 N 861/пр.

Представитель истца в судебном заседании поддержал заявленные исковые требования в полном объеме.

Ответчик в судебном заседании заявленные исковые требования не признал по изложенным в отзыве на исковое заявление основаниям.

Оценив доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, определив относимость, допустимость и достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности, заслушав пояснения представителей сторон, суд приходит к следующим выводам.

В соответствии со статьями 309 - 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В соответствии со статьей 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Существенными условиями договора строительного подряда являются предмет договора подряда и сроки выполнения работ.

В соответствии со статьей 740 ГК РФ основанием для возникновения правоотношения по строительному подряду является договор.

Договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора (статья 432 ГК РФ).

Рассматриваемый спор возник из правоотношений сторон, сложившихся в рамках исполнения договора подряда, правовое регулирование которых определяется главой 37 ГК РФ.

На основании статьи 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену. Предмет договора подряда является существенным условием договора.

Согласно абзацу 2 пункта 1 статьи 708 ГК РФ, если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Согласно пункта 1 статьи 450.1 ГК РФ предоставленное данным Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) (статья 310) может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено названным Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором.

На основании 2 статьи 715 ГК РФ, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

В силу статьи 717 ГК РФ, если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить подрядчику убытки, причиненные прекращением договора подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

В рассматриваемом случае, сославшись на статью 450 ГК РФ и пункт 11.3 договора строительного подряда № 935/1748-Д письмом от 26.06.2024 № 935-2/1659-2.17 ответчик известил подрядчика об одностороннем отказе от исполнения договора.

Материалами дела установлено, что перед началом работ по договору строительного подряда № 935/1748-Д ООО «РСК «Гидра» было обязано выполнить мероприятия по обеспечению соблюдения при выполнении работ правил охраны труда и промышленной безопасности, для чего заказчику должны были быть представлены документы, предусмотренные приведенными выше положениями договора.

В соответствии с пунктом 4.6 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», утвержденного Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80, перед началом выполнения строительно - монтажных работ на территории организации генеральный подрядчик (субподрядчик) и администрация организации, эксплуатирующая (строящая) этот объект, обязаны оформить акт - допуск по форме приложения В.

Согласно пункту 2.4.2 договора строительного подряда № 935/1748-Д и пункту 3.1.10 технического задания строительная площадка, необходимая для выполнения работ, предоставляется подрядчику по акту-допуску.

Письмом от 11.06.2024 № 935-30.21/1025-30.11акт-допуск для производства работ по спорному договору подряда направлен подрядчику и подписан им. Данным актом предусматривалось, что до начала производства работ по договору необходимо выполнить мероприятия, обеспечивающие безопасность работ.

Так, подрядчик должен был предоставить приказы о назначении ответственных лиц за обеспечение: производства работ на объекте, по обеспечению контроля качества строительно-монтажных работ с предоставлением выписки из протокола МТУ Ростехнадзора об аттестации вышеуказанного специалиста в области «Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются трубопроводы пара и горячей воды» в соответствие с пунктом 101 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536; безопасных условий и охраны труда (специалист по ОТ должен иметь соответствующую квалификацию); за производство общих работ; требований пожарной безопасности; электробезопасности; безопасного производства работ с грузоподъемными машинами и механизмами, подъемными сооружениями с предоставлением выписки из протокола МТУ Ростехнадзора об аттестации вышеуказанного специалиста в области «Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и перемещения грузов»; санитарно-бытового состояния бытовых помещений.

Также подрядчик был обязан предоставить копии: лицензий, удостоверений ответственных ИТР, аттестованных по охране труда и на группу по электробезопасности; удостоверений специалистов сварочного производства 1-го и 2-го уровней (регистрация и аттестация НАКС); удостоверения аттестованных стропальщиков, не имеющих медицинских противопоказаний.

Кроме того, ООО РСК «Гидра» назначено лицом, ответственным за организацию проведения вводного инструктажа (представителем службы ПК и ОТ заказчика) всего персонала, заявленного подрядчиком для выполнения строительно-монтажных и ремонтных работ.

Письмом от 13.06.2024 ООО РСК «Гидра» направило список ответственных лиц и разрешительную документацию (приложение 1), в ответ на которое АО «Квадра» письмом от 14.06.2024 № 935-30.1/1045-30.11 указало на существенные недостатки этой документации, а именно: несоответствие списка персонала представленным документам о квалификации, отсутствие удостоверений сварщиков и стропальщиков и приказов о назначении лиц, ответственных за пожарную и электробезопасность с приложением документов об их аттестации и квалификации.

Подрядчик принял эти замечания (письмо от 17.06.2024 № 50/24, приложение 2) и направил скорректированный список персонала с приложением документов о его аттестации и квалификации, а также исправленную разрешительную документацию (письмо от 17.06.2024 с приложениями.

Изучив представленные подрядчиком документы, АО «Квадра» письмом от 19.06.2024 № 935-30.1/1079-30.11 уведомило подрядчика о наличии недостатков разрешительной документации. В частности, АО «Квадра» указало на: удостоверения стропальщиков с истекшими сроками проверки знаний; отсутствия у лица, ответственного за электрохозяйство, присвоенной во время работы в организации группы по электробезопасности; отсутствие выписки из протокола аттестационной комиссии о результатах аттестации по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации для руководителей организации и лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности и проведение противопожарных инструктажей, отсутствие удостоверений этих лиц.

Данные замечания приняты подрядчиком, письмом от 20.06.2024№ 54/24 он направил заказчику исправленную документацию (приложение № 4), однако направленные документы были представлены в нечитаемом виде, о чем АО «Квадра» сообщило подрядчику письмом от 21.06.2024 № 935-30.1/1090-30.11.

ООО РСК «Гидра» разрешительную документацию заказчику больше не направляло.

Таким образом, ООО РСК «Гидра» не исполнило договорных обязательств по обеспечению безопасности строительных работ, не выполнив приведенных в акте – допуске мероприятий по обеспечению соблюдения требований охраны труда и промышленной безопасности. Поскольку эти мероприятия должны были быть выполнены подрядчиком до начала предусмотренных договором строительного подряда № 935/1748-Д строительно-монтажных работ, заказчик вплоть до 24.06.2024 - даты направления уведомления об отказе от договора - не имел возможности предоставить подрядчику строительную площадку.

В соответствии с пунктами 2.2.6 и 2.2.10 договора строительного подряда № 935/1748-Д подрядчик обязался, в том числе, обеспечить разработку всех необходимых проектов производства работ (ППР), проектов производства геодезических работ, проектов совмещенных работ, технологических карт, организационно-технологической и другой монтажно-технологической документации по всем видам производимых работ на строящемся объекте, ее согласование в установленном порядке и безусловное исполнение ее требований (ППР подлежат обязательному согласованию с Заказчиком). Подрядчик обязан обеспечить организацию работ в соответствии с технологическими картами ППР. Требования к проекту производства работ, предусмотренных спорным договором продажи, определены в разделе 2.4 технического задания (приложение 1 к договору строительного подряда № 935/1748-Д).

В силу п. 3.15 СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004 (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 24.12.2019 N 861/пр) под ППР поднимается один из основных организационно-технологических документов (в том числе в составе информационной модели объекта), описывающих применяемые обоснованные организационно-технологические решения для обеспечения оптимальной технологичности производства и безопасности соответствующих видов работ, а также экономической эффективности капитальных вложений.

ППР устанавливает порядок инженерного оборудования и обустройства строительной площадки, обеспечивает моделирование строительного процесса, прогнозирование возможных рисков, определяет оптимальные сроки строительства.

Согласно п. 5.10, 6.1 СП 48.13330.2019 ППР относится к организационно-технологической документации, которую лицо, осуществляющее строительство, разрабатывает перед началом работ на объекте. Пунктом 6.10 СП 48.13330.2019 установлено, что ППР, разработанный на выполнение работ на территории действующего предприятия, должен быть согласован с эксплуатирующей его организацией.

В соответствии с п. 2.4.4 технического задания разработка, утверждение и согласование ППР в обязательном порядке с заказчиком и всеми заинтересованными организациями должны быть выполнены не позднее 7 (семи) календарных дней.

Разработанный проект производства работ по спорному договору ООО РСК «Гидра» направило в адрес ответчика письмом от 10.06.2024 № 51/24, однако данный ППР не соответствовал установленным требованиям, так, в разработанном подрядчиком ППР: имелись несогласованные отступления от проектной документации в части разработки грунта и крепления стенок траншеи (нарушение п. 6.21 СП 48.13330.2019); отсутствовали графики поступления материалов (нарушение п. 6.1 и 6.14 СП 48.13330.2019); не были обозначены опасные зоны подъемных сооружений (нарушение п. 6.14 СП 48.13330.2019); отсутствовали приложения № 2 и № 4.

Кроме того, ППР, включающий работы, в том числе, в охранной зоне ЛЭП, в нарушение п. 6.10 СП 48.13330.2019 не был согласован с эксплуатирующей ЛЭП организацией.

Об указанных недостатках ППР АО «Квадра» сообщило подрядчику в письме от 13.06.2024 № 935-30.1/1037-30.11.

Данные замечания подрядчик принял и 17.06.2024 письмом № 51/24 направил исправленный и дополненный ППР, однако этот ППР также не был согласован с владельцем ЛЭП, в связи с чем не мог быть согласован и заказчиком в лице АО «Квадра».

При таких обстоятельствах подрядчик не мог быть допущен до выполнения работ по договору строительного подряда № 935/1748-Д также в связи с отсутствием согласованного проекта производства работ, соответствующего требованиям СП 48.13330.2019.

Таким образом, ООО РСК «Гидра» не приступило своевременно к выполнению работ по договору строительного подряда № 935/1748-Д в связи с тем, что ему не могла быть передана строительная площадка по причине невыполнения им требований к охране труда, предусмотренных актом-допуском, неоформления разрешительных документов и отсутствия согласованного проекта производства работ.

Указанные подготовительные мероприятия, необходимые для начала выполнения работ по договору подряда, не были завершены подрядчиком по истечении более чем 20 календарных дней с даты наступления обусловленного договором срока начала выполнения работ. С учетом того, что проектной документацией предусмотрен нормативный срок строительства 5 месяцев, допущенное подрядчиком затягивание сроков начала выполнения работ привело к тому, что работы по договору строительного подряда № 935/1748-Д не могли быть завершены к обусловленному этим договором сроку их завершения.

После расторжения договора строительного подряда № 935/1748-Д с ООО «РСК «Гидра», АО «Квадра» в целях выполнения комплекса работ по техническому перевооружению участка теплосети №3 от 3.15к1-3.15кЗ в 

<

...> обеспечения бесперебойной подачи теплоносителя потребителям, объекты которых подключены к указанному участку тепловой сети (2 Центральных тепловых пункта, 3 предприятия, 18 многоквартирных жилых домов с количеством жителей более 4 тысяч человек, 3 прочих объекта (гараж, пристройка)), в отопительном периоде 2024/2025 годов заключило договор строительного подряда от 30.07.2024 № 935/2458-Д со вторым участником закупки - подрядной организацией ООО «ПСК», со сроком выполнения работ до 30.08.2024, до такой же даты как было предусмотрено в договоре с ООО «РСК «Гидра».

При таких обстоятельствах, основания для удовлетворения требований ООО «РСК «Гидра» отсутствуют.

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Руководствуясь статьями 167 - 171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л :

В удовлетворении иска Общества с ограниченной ответственностью «РСК Гидра» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) отказать.

Лица, участвующие в деле, вправе обжаловать настоящее решение суда в течение месяца после его принятия в апелляционную инстанцию – Двадцатый арбитражный апелляционный суд (г.Тула), в течение двух месяцев после вступления решения суда в законную силу в кассационную инстанцию – Арбитражный суд Центрального округа (г. Калуга) при условии, что решение суда было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы. Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Смоленской области.

Судья И.Л. Каринская