Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

ул. Мира, д. 27, г. Ханты-Мансийск, 628011, тел. (3467) 95-88-71, сайт http://www.hmao.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А75-17014/2017

30 января 2018 г.

г. Ханты-Мансийск

 

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в составе судьи  Бухаровой С.В., при ведении протокола заседания секретарем ФИО1,  рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной  ответственностью «Радужный» (625048, 

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к управлению капитального  строительства и ремонта администрации Березовского района (628140, Ханты- Мансийский автономный округ – Югра, Березовский район, пгт. Березово,  

ул. Первомайская, д. 10, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о внесении изменений в  контракт,  

с участием в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований  относительно предмета спора, Департамента строительства Ханты-Мансийского  автономного округа – Югры,  

при участии представителей сторон: от истца – ФИО2 по доверенности от 23.10.2017, от ответчика – ФИО3 по доверенности от 29.01.2018 № 2, от третьего лица – не явились, 

руководствуясь статьями 9, 16, 64, 65, 71, 167, 168, 169, 170, 174, 176, 180, 181  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Радужный»  удовлетворить.  

Изменить пункты 3.2, 18.2 муниципального контракта на выполнение работ  по строительству объекта: «Образовательно-культурный комплекс в д. Хулимсунт  Березовского района ХМАО – Югры» от 23.10.2015 № 73/15, изложив их в следующей  редакции:  

«3.2. Окончание выполнения работ по контракту устанавливается контрактом  20 октября 2018 года.  

18.2. Контракт считается заключенным и вступает в силу со дня его подписания  сторонами и действует до 31 октября 2018 года. С 01 ноября 2018 года обязательства  сторон по контракту прекращаются, за исключением обязательств по возмещению  убытков и выплате неустойки».  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его  принятия, если не подана апелляционная жалоба.  

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в апелляционном  порядке в Восьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его  принятия. Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ханты-Мансийского  автономного округа - Югры.  

Судья С.В. Бухарова