Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-149716/2018

03 мая 2019 года

г.Санкт-Петербург

Резолютивная часть решения объявлена  18 апреля 2019 года.

Полный текст решения изготовлен  03 мая 2019 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Сергеева О.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙПРОГРЕСС" (адрес:  Россия 198261, Санкт-Петербург, ПРОСПЕКТ ВЕТЕРАНОВ 114, КОРПУС 1 ЛИТЕР Б, ПОМЕЩЕНИЕ 1-Н, ОГРН:  1117847168890);

ответчик: общество с ограниченной ответственностью "Р-СТРОЙИНВЕСТ" (адрес:  Россия 197342, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ул СЕРДОБОЛЬСКАЯ 64/1/А/31-Н/9, ОГРН:  1089847230065);

о взыскании 952208.94 и встречный иск ответчика к истцу

при участии

-от истца: ФИО2 по доверенности от 16.04.19, ФИО3 выписка по ЕГРЮЛ,

-от ответчика: ФИО4 по доверенности от 25.12.18,

установил:

ООО "СТРОЙПРОГРЕСС" предъявило иск о взыскании с ООО "Р-СТРОЙИНВЕСТ"

 418 752 руб. 56 коп. задолженности по выплате гарантийных удержаний по договору субподряда №18/02/2017 от 04.05.17, 41 875 руб. 00 коп. пеней за просрочку платежей и 11 765 руб. 23 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами.

Ответчик предъявил встречный иск, который с учетом уточнений состоит во взыскании 544 378 руб. 32 коп. пеней за нарушение сроков выполнения работ и 37 596 руб. 80 коп. штрафа за просрочку предоставления документов.

Встречный иск принят к рассмотрению совместно с первоначальным на основании ст. 132 АПК РФ.

Судом установлено:

Между ООО «Р-СтройИнвест» (Подрядчик) и ООО «СтройПрогресс» (Субподрядчик) (далее - стороны) заключен Договор субподряда №18/02/2017 от 04 мая 2017г (далее Договор) по выполнению строительно-монтажных работ по внутренней отделке стен объекта: «Строительство 60-квартирного жилого дома по адресу: ЛО, Волховский муниципальный район, Волховское городское поселение, 

<

...>».

Данные работы выполнены в полном объеме и с надлежащим качеством. Вся исполнительная документация передана ООО «Р-СтройИнвест».

Согласно п. 3.3.3 настоящего Договора уплата гарантийной суммы в размере 5% от цены настоящего Договора (согласно акта сверки составляет 418 752,56 руб) производится ООО «Р-СтройИнвест» в течение 45 банковских дней с даты приемки объекта Подрядчиком, Заказчиком (ОАО «РЖД»), эксплуатирующей объект организацией, а также надзорными и административными организациями. Указанной в настоящем пункте датой приемки Объекта для целей уплаты гарантийной суммы признается дата подписания Сторонами Акта об исполнении настоящего Договора по форме приложения №2 к настоящему Договору, подписанного не ранее Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по типовой межотраслевой форме КС-14.

Заказчик (ОАО «РЖД») получил разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 04 мая 2018 за номером №47-R4 47503101-34/2015-2015), всеми участниками строительства подписан Акт приемки законченного строительством объекта приемной комиссией (форма кс-14), объект передан эксплуатирующей организации.

Все это подтверждает, что построенный объект выполнен в соответствии с проектом, отвечает санитарно-эпидемиологическим, экологическим, пожарным, строительным нормам и правилам, и государственным стандартам. Таким образом, нет никаких препятствий к подписанию итогового акта между Подрядчиком и Субподрядчиком и уплаты гарантийных удержаний.

Со стороны ООО «СтройПрогресс» в адрес ООО «Р-СтройИнвест» были направлены многочисленные письма с просьбой о подписании итогового Акта об исполнении Договора, акта сверки, а именно:

- Акт сверки от 22.01.2018 (получатель Ген.директор ООО «Р-СтройИнвест» ФИО5)

- Акт об исполнении Договора, акт сверки , счет на оплату задолженности - 24.07.2018 (получатель - секретарь Еремеева Е.В.)

- Акт об исполнении Договора - 10.08.2018 (получатель - инженер ПТО ООО «Р-СтройИнвест» ФИО6)

- Акт об исполнении Договора (эл.почта) - 21.08.2018

- Акт об иполнении Договора, счет, акт сверки 03.10.2018 (эл.почта)

- Акт об исполнении Договора, Акт сверки, Счет - (почта Рф, письмо с описью от 23.10.2018)

Все эти письма были проигнорированы ООО «Р-СтройИнвест». Акт ввода объекта в эксплуатацию является основополагающим документом и согласно п.3.3.3 настоящего Договора датой отсчета 45 банковских дней для оплаты гарантийных сумм является 04 мая 2018г, т.е. оплата гарантийных удержаний должна была быть произведена не позднее 11 июля 2018г, путем перечисления денежных средств на счет Субподрядчика.

23 Октября 2018 года в связи с уклонением Подрядчика от подписания итогового акта, Подрядчику согласно п. 10 «Порядок разрешения споров» настоящего Договора было направлено письмо-претензия через почту России. Информация о результатах рассмотрения претензии Истцу не поступала.

Таким образом, на 26 ноября 2018 года задолженность составляет 472 392 руб. 79 коп. 

В соответствии с п.8.2 договора ООО "Р-СТРОЙИНВЕСТ" обязано уплатить пени в размере 0,1% от суммы долга за каждый день просрочки, но не более 10% от неуплаченной суммы.

С учетом 10% ограничения неустойка составляет – 41 875 руб. 00 коп. 

Проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 11 765 руб. 23 коп. взысканию не подлежат, так как за одно правонарушение не может применяться две меры ответственности.

Встречный иск удовлетворению не подлежит, так как строительная площадка была передана субподрядчику только 31.05.17, т.е. через 27 календарных дней с момента заключения договора. Это подтверждается актом приема-передачи фронта работ от 31.05.17.

Субподрядчик неоднократно обращался к подрядчику с письмами о продлении срока выполнения работ, ответа на которые не получил.

Из ответа на претензию от 17.07.17 исх. №47 усматривается, что из-за ненадлежащего выполнения работ сторонними организациями (отклонения стен и перекрытий по геометрии) увеличилась толщина штукатурного слоя, что потребовало дополнительного времени для его высыхания. Во время высыхания штукатурных слоев производить последующие работы не представлялось возможным.

Из письма ООО "СТРОЙПРОГРЕСС" от 05.06.17 исх. №39 усматривается, что субподрядчик не мог выполнить работы в связи с невыполнением монтажа электропроводки, повреждения пазогребневых перегородок, невыполнением пароизоляции на окнах и других нарушениях.

Письмом от 12.07.17 исх. №46 субподрядчик сообщил об отсутствии полного монтажа электрических трасс в квартирах и местах общего пользования.

Учитывая изложенное, суд не усматривает наличие вины субподрядчика в нарушении срока выполнения работ.

Руководствуясь статьями 309, 310, 330, 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Р-СТРОЙИНВЕСТ" в пользу общества с ограниченной ответственностью "СТРОЙПРОГРЕСС" по первоначальному иску 460 627 руб. 56 коп., из них: 418 752 руб. 56 коп. задолженности и 41 875 руб. 00 коп. неустойки, а также 12 212 руб. 55 коп. расходов по государственной пошлине.

Выдать исполнительный лист в порядке статьи 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В остальной части первоначального иска отказать.

В удовлетворении встречного иска отказать.

Выдать обществу с ограниченной ответственностью "Р-СТРОЙИНВЕСТ" справку на возврат государственной пошлины в размере 23 448 руб. 00 коп., уплаченную по платежному поручению №1107 от 20.12.18.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья Сергеева О.Н.