﻿

Арбитражный суд Волгоградской области

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

город  Волгоград

«19» ноября 2021 года

                                  Дело № А12-17785/2021

Резолютивная часть оглашена 18 ноября 2021 года

Полный текст изготовлен 19 ноября 2021 года

Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Поповой Т.В., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Донцовой Н.Н., рассмотрев в судебном заседании дело по иску муниципального унитарного предприятия «Городской водоканал г. Волгоград» (ИНН 3446002106, ОГРН 1033400546156)  к обществу с ограниченной ответственностью «Поволжская строительная компания – 34» (ИНН 3409014488, ОГРН 1123455003869) о взыскании задолженности.

В судебном заседании участвовали представители:

от истца –  Вавилов А.Г., по доверенности №9 от 05.05.2021, 

от ответчика – извещены, не явились.

 

Муниципальное унитарное предприятие «Городской водоканал г. Волгоград» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Волгоградской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Поволжская строительная компания – 34» (далее – ответчик) о взыскании задолженности по договору № 782-13 от 28.06.2013 в виде неосновательного обогащения размере 19 810 875,59 рублей и договорной неустойки в размере  13 819 786,18 руб.

	В ходе рассмотрения спора истец  отказался от иска о взыскании неустойки. Отказ от иска принят судом.

	Выслушав истца, исследовав материалы дела, суд

установил:

Между МУП «Горводоканал г. Волгограда» (Заказчик) и ООО «ПСК-34» (Подрядчик) заключен Договор на выполнение работ по установке узлов учета холодной воды в жилых домах № 782-13 от 28 июня 2013 года.

Согласно раздела 1,  Подрядчик обязуется по заданию Заказчика в установленный срок выполнить работы по устройству узлов учета холодной воды, Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить выполненные работы.

Срок выполнения работ с 01.07.2013 года по 01.12.2013 года.

Цена на момент заключения договора составила 100 000 000 рублей. Оплата в виде 100% предоплаты.

МУП «Горводоканал»  перечислило ответчику предоплату в сумме 100 000 000 рублей, что подтверждается   платежным поручением от 16.07.2013 № 2993.

 	Работы ответчиком на сумму 100 000 000 рублей в полном объеме выполнены  не были. Остаток долга в размере  19 810 875, 59 руб. признан ответчиком в акте сверки (л.д л.д 121-132, т2.)

	Согласно части 1 статьи 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса. Эти правила применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли.

В силу части 2 статьи 1105 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, неосновательно временно пользовавшееся чужим имуществом без намерения его приобрести либо чужими услугами, должно возместить потерпевшему то, что оно сберегло вследствие такого пользования, по цене, существовавшей во время, когда закончилось пользование.

Заявленная истцом сумма является неосновательным обогащением ответчика, следовательно она должна быть возвращена истцу. 

Руководствуясь ст.ст.110, 112, 167 – 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд   

решил :

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Поволжская строительная компания – 34» (ИНН 3409014488, ОГРН 1123455003869) в пользу муниципального унитарного предприятия «Городской водоканал г. Волгоград» (ИНН 3446002106, ОГРН 1033400546156) денежную сумму в размере 19 810 875 руб. 59 коп.

	Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Поволжская строительная компания – 34» (ИНН 3409014488, ОГРН 1123455003869) государственную пошлину в доход федерального бюджета в размере 122 054 руб. 

	Полный текст решения  изготовлен в течение пяти рабочих дней с даты оглашения резолютивной части.

Решение может быть обжаловано в течение  одного месяца с момента изготовления в полном объеме в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд  через Арбитражный суд Волгоградской области.

 

Судья                                                                                                                   Т.В.Попова