Арбитражный суд Тамбовской области

392020, г. Тамбов, ул. Пензенская, д. 67/12

 http://tambov.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

г. Тамбов

«09» февраля 2018г.                                    Дело №А64-9234/2017

Резолютивная часть решения объявлена 06.02.2018.

Полный текст решения изготовлен 09.02.2018.

Арбитражный суд Тамбовской области в составе судьи А.В. Захарова

при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудиозаписи помощником судьи Е.В. Китаевой

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску 

ООО «Энергетик-Б», г. Тамбов,

к ООО «Котовская ТЭЦ», г. Котовск Тамбовской области,

о взыскании 7 402 155,69 руб.,

при участии в судебном заседании

от истца – ФИО1, приказ №22 от 07.08.2015, ФИО2, доверенность от 15.01.2018,

от ответчика – ФИО3, доверенность №177 от 01.11.2017. 

Лицам, участвующим в деле, процессуальные права и обязанности разъяснены. Отводов суду не заявлено.

установил:

ООО «Энергетик-Б», г. Тамбов, обратилось в Арбитражный суд Тамбовской области с исковым заявлением к ООО «Котовская ТЭЦ», г. Котовск Тамбовской области, с требованием о взыскании задолженности по договору №01/2017 от 23.01.2017 в размере 2 512 137,52 руб.; по договору №02/2017 от 30.01.2017 в размере 3 136 034,01 руб.; по договору №ЗИС-04/2017 от 24.03.2017 в размере 1 753 984,16 руб., всего 7 402 155,69 руб.  

Представитель истца исковые требования поддержал в полном объеме по основаниям, указанным в исковом заявлении.

Представитель ответчика исковые требования в части взыскания задолженности по договору №01/2017 от 23.01.2017 в размере 2 512 137,52 руб.; по договору №ЗИС-04/2017 от 24.03.2017 в размере 1 753 984,16 руб. признал, в остальной части исковые требования не признал по основаниям, указанным в отзыве.

Исследовав материалы дела, заслушав доводы сторон, суд выяснил, что 23.01.2017 между Обществом с ограниченной ответственностью «Котовская ТЭЦ» (Заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Энергетик-Б» (Подрядчик), был заключен Договор №01/2017 на выполнение работ по текущему ремонту турбоагрегата ПТ-80/100/130/13 ст. №4 ООО «Котовская ТЭЦ» (далее – Договор от 23.01.2017).

П. 1.1 Договора от 23.01.2017 Подрядчик обязался по заданию Заказчика выполнять следующие работы:

Плановый (текущий) ремонт турбоагрегата ПТ-80/100/130/13 ст. №4  в объеме и на условиях, определенных в договоре, а Заказчик обязался принимать и оплачивать результаты выполненных Подрядчиком работ (п. 1.1.1).

Подрядчик выполняет работы на основании Технического задания и объемов работ (Приложение №1 к договору) (п. 1.3.1 Договора от 23.01.2017).

П. 2.1 Договора от 23.01.2017 в редакции Дополнительного соглашения №1 от 31.08.2017 сторонами устанавливались календарные сроки выполнения работ: начало работ – с даты подписания договора, окончание работ – 30.09.2017.

Работы выполняются на объектах ООО «Котовская ТЭЦ» (адрес: 393194, 

<

...>, КПП 682501001).

Согласно п. 3.1 Договора от 23.01.2017 стоимость работ является ориентировочной и не может быть выше суммы в размере 2294832,56 руб., кроме того НДС (18%) в размере 413069,86 руб. Итого с НДС (18%) 2707902,42 руб.

Окончательная стоимость работ по договору определяется на основании Актов о приемке выполненных работ и Справок о стоимости выполненных работ и затрат, составленных подрядчиком и согласованных (утвержденных) Заказчиком в течение срока действия договора. Окончательная стоимость работ по договору не может превышать сумму, указанную в п. 3.1 договора, если иное не согласовано сторонами в порядке, определенном в п. 21.1 договора (п. 3.2 Договора от 23.01.2017)

П. 5.4 Договора от 23.01.2017 установлен порядок сдачи-приемки результатов выполненных работ, согласно которому Подрядчик направляет Заказчику акты приемки выполненных работ, составленные по форме КС-2, а также Справки о стоимости работ и затрат по форме КС-3, в двух экземплярах. Заказчик подписывает Акт и Справку не позднее 7-ми рабочих дней с даты их получения и возвращает один экземпляр Подрядчику. В случае непредставления Заказчиком подписанного Акта и Справки или мотивированного отказа, Акт и Справка будут считаться согласованными Заказчиком без замечаний.

Согласно п. 3.3.1 Договора от 23.01.2017 оплата стоимости выполненных работ производится путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в договоре до 28 числа месяца, следующего за отчетным, при условии наличия подписанных сторонами Актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, представленными Заказчику не позднее 25 числа отчетного месяца. Стоимость материалов и запасных частей, поставленных Подрядчиком и использованных при производстве работ, включается в Акты о приемке выполненных работ и Справки о стоимости выполненных работ и затрат.

Истцом работы были выполнены на сумму 2512137,52 руб., ответчиком приняты без возражений и замечаний, что подтверждено Актом приемки выполненных работ №1 от 31.08.2017 на сумму 1816322,40 руб., №2 от 30.09.2017 на сумму 695815,12 руб., подписанных сторонами без разногласий и возражений и скрепленных их печатями.

Стоимость работ соответствует Справкам о стоимости выполненных работ и затрат №1 от 31.08.2017 на сумму 1816322,40 руб., №2 от 30.09.2017 на сумму 695815,12 руб. 

Ответчиком оплата выполненных работ не была произведена. 

Претензия истца №455 от 07.11.2017, полученная согласно штампа ответчиком 09.11.2017, с требованием оплатить задолженность в течение 5 календарных дней с момента получения претензии, оставлена без удовлетворения.

30.01.2017 между Обществом с ограниченной ответственностью «Котовская ТЭЦ» (Заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Энергетик-Б» (Подрядчик), был заключен Договор №02/2017 на выполнение работ по ремонту основного оборудования ООО «Котовская ТЭЦ» (далее – Договор от 30.01.2017).

П. 1.1 Договора от 30.01.2017 Подрядчик обязался по заданию Заказчика выполнять следующие работы:

Плановый (капитальный, средний и текущий) ремонт основного оборудования в объеме и на условиях, определенных в договоре, а Заказчик обязался принимать и оплачивать результаты выполненных Подрядчиком работ (п. 1.1.1).

Подрядчик выполняет работы на основании Технического задания и объемов работ (Приложение №1 к договору) (п. 1.3.1 Договора от 30.01.2017).

П. 2.1 Договора от 30.01.2017 в редакции Дополнительного соглашения №1 от 15.08.2017 сторонами устанавливались календарные сроки выполнения работ: начало работ – с даты подписания договора, окончание работ – 10.09.2017.

Работы выполняются на объектах ООО «Котовская ТЭЦ» (адрес: 393194, 

<

...>, КПП 682501001) (п. 1.2 Договора от 30.01.2017).

Согласно п. 3.1 Договора от 30.01.2017 в редакции Дополнительного соглашения №1 от 15.08.2017 стоимость работ составляет 4601768,43 руб., кроме того НДС (18%) 828318,32 руб. Итого с НДС (18%) 5430086,75 руб.

Окончательная стоимость работ по договору определяется на основании Актов о приемке выполненных работ и Справок о стоимости выполненных работ и затрат, составленных подрядчиком и согласованных (утвержденных) Заказчиком в течение срока действия договора. Окончательная стоимость работ по договору не может превышать сумму, указанную в п. 3.1 договора, если иное не согласовано сторонами в порядке, определенном в п. 21.1 договора (п. 3.2 Договора от 30.01.2017)

П. 5.4 Договора от 30.01.2017 установлен порядок сдачи-приемки результатов выполненных работ, согласно которому Подрядчик направляет Заказчику акты приемки выполненных работ, составленные по форме КС-2, а также Справки о стоимости работ и затрат по форме КС-3, в двух экземплярах. Заказчик подписывает Акт и Справку не позднее 7-ми рабочих дней с даты их получения и возвращает один экземпляр Подрядчику. В случае непредставления Заказчиком подписанного Акта и Справки или мотивированного отказа, Акт и Справка будут считаться согласованными Заказчиком без замечаний.

Согласно п. 3.3.1 Договора от 30.01.2017 оплата стоимости выполненных работ производится путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в договоре до 28 числа месяца, следующего за отчетным, при условии наличия подписанных сторонами Актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, представленными Заказчику не позднее 25 числа отчетного месяца. Стоимость материалов и запасных частей, поставленных Подрядчиком и использованных при производстве работ, включается в Акты о приемке выполненных работ и Справки о стоимости выполненных работ и затрат.

Истцом работы были выполнены на сумму 3636034,01 руб., ответчиком приняты без возражений и замечаний, что подтверждено Актом приемки выполненных работ №1 от 30.06.2017 на сумму 889439,94 руб., №1 от 10.09.2017 на сумму 1956890,74 руб., №1 от 10.09.2017 на сумму 682664,79 руб., №1 от 10.09.2017 на сумму 107038,54 руб., подписанных сторонами без разногласий и возражений и скрепленных их печатями.

Стоимость работ соответствует Справкам о стоимости выполненных работ и затрат №1 от 30.06.2017 на сумму 889439,94 руб., №1 от 10.09.2017 на сумму 1956890,74 руб., №1 от 10.09.2017 на сумму 682664,79 руб., №1 от 10.09.2017 на сумму 107038,54 руб.

Ответчиком оплата выполненных работ не была произведена. 

Претензия истца №456 от 07.11.2017, полученная согласно штампа ответчиком 09.11.2017, с требованием оплатить задолженность в течение 5 календарных дней с момента получения претензии, оставлена без удовлетворения.

24.03.2017 между Обществом с ограниченной ответственностью «Котовская ТЭЦ» (Заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Энергетик-Б» (Подрядчик), был заключен Договор №ЗИС-04/2017 на выполнение работ по текущему ремонту градирни ст. №2 (Fop=1100 м2) ООО «Котовская ТЭЦ» (далее – Договор от 24.03.2017).

П. 1.1 Договора от 24.03.2017 Подрядчик обязался по заданию Заказчика выполнять следующие работы:

Плановый (текущий) ремонт градирни ст. №2 (Fop=1100) в объеме и на условиях, определенных в договоре, а Заказчик обязался принимать и оплачивать результаты выполненных Подрядчиком работ (п. 1.1.1).

Подрядчик выполняет работы на основании Технического задания и объемов работ (Приложение №1 к договору) (п. 1.3.1 Договора от 24.03.2017).

П. 2.1 Договора от 24.03.2017 в редакции Дополнительного соглашения №1 от 31.08.2017 сторонами устанавливались календарные сроки выполнения работ: начало работ – с даты подписания договора, окончание работ – 30.09.2017.

Работы выполняются на объектах ООО «Котовская ТЭЦ» (адрес: 393194, 

<

...>, КПП 682501001) (п. 1.2 Договора от 24.03.2017).

Согласно п. 3.1 Договора от 24.03.2017 стоимость работ является ориентировочной и не может быть выше суммы в размере 1720405,21 руб., кроме того НДС (18%) в размере 309672,94 руб. Итого с НДС (18%) 2030078,15 руб.

Окончательная стоимость работ по договору определяется на основании Актов о приемке выполненных работ и Справок о стоимости выполненных работ и затрат, составленных подрядчиком и согласованных (утвержденных) Заказчиком в течение срока действия договора. Окончательная стоимость работ по договору не может превышать сумму, указанную в п. 3.1 договора, если иное не согласовано сторонами в порядке, определенном в п. 21.1 договора (п. 3.2 Договора от 24.03.2017).

П. 5.4 Договора от 24.03.2017 установлен порядок сдачи-приемки результатов выполненных работ, согласно которому Подрядчик направляет Заказчику акты приемки выполненных работ, составленные по форме КС-2, а также Справки о стоимости работ и затрат по форме КС-3, в двух экземплярах. Заказчик подписывает Акт и Справку не позднее 7-ми рабочих дней с даты их получения и возвращает один экземпляр Подрядчику. В случае непредставления Заказчиком подписанного Акта и Справки или мотивированного отказа, Акт и Справка будут считаться согласованными Заказчиком без замечаний.

Согласно п. 3.3.1 Договора от 24.03.2017 оплата стоимости выполненных работ производится путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в договоре до 28 числа месяца, следующего за отчетным, при условии наличия подписанных сторонами Актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, представленными Заказчику не позднее 25 числа отчетного месяца. Стоимость материалов и запасных частей, поставленных Подрядчиком и использованных при производстве работ, включается в Акты о приемке выполненных работ и Справки о стоимости выполненных работ и затрат.

Истцом работы были выполнены на сумму 1753984,16 руб., ответчиком приняты без возражений и замечаний, что подтверждено Актом приемки выполненных работ №1 от 31.08.2017 на сумму 1560319,22 руб., №2 от 30.09.2017 на сумму 193664,94 руб., подписанных сторонами без разногласий и возражений и скрепленных их печатями.

Стоимость работ соответствует Справкам о стоимости выполненных работ и затрат №1 от 31.08.2017 на сумму 1560319,22 руб., №2 от 30.09.2017 на сумму 193664,94 руб. 

Ответчиком оплата выполненных работ не была произведена. 

Претензия истца №457 от 07.11.2017, полученная согласно штампа ответчиком 09.11.2017, с требованием оплатить задолженность в течение 5 календарных дней с момента получения претензии, оставлена без удовлетворения.

Ссылаясь на то, что выполненные истцом работы не были оплачены, истец обратился в арбитражный суд с требованием о взыскании с ответчика задолженности на общую сумму 7402155,69 руб.

Ответчик исковые требования в части взыскания задолженности по договору №01/2017 от 23.01.2017 в размере 2 512 137,52 руб.; по договору №ЗИС-04/2017 от 24.03.2017 в размере 1 753 984,16 руб. признал; относительно остальной части задолженности пояснил, что истец по договору №02/2017 от 30.01.2017 не выполнил свои обязательства, предусмотренные п. 6.2.1 договора, не передал необходимую документацию, поскольку без нее ответчик не вправе эксплуатировать паропровод рег. №715.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном ст. 71 АПК РФ, представленные доводы и доказательства, суд приходит к выводу, что исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме.

При этом суд руководствовался следующим.

Статьей 12 ГК РФ предусмотрены определенные способы защиты гражданских прав. 

Условиями предоставления судебной защиты лицу, обратившемуся в суд с рассматриваемым требованием, являются установление наличия у истца принадлежащего ему субъективного материального права потребовать исполнения определенного обязательства от ответчика, наличия у ответчика обязанности исполнить это обязательство и факта его неисполнения последним. 

В соответствии со статьей 307 Гражданского кодекса Российской Федерации в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

Согласно статьям 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований  – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями; односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

Обязательства сторон возникают из Договоров 

- №01/2017 на выполнение работ по текущему ремонту турбоагрегата ПТ-80/100/130/13 ст. №4 ООО «Котовская ТЭЦ» от 23.01.2017, 

- №02/2017 на выполнение работ по ремонту основного оборудования ООО «Котовская ТЭЦ» от 30.01.2017, 

- №ЗИС-04/2017 на выполнение работ по текущему ремонту градирни ст. №2 (Fop=1100 м2) ООО «Котовская ТЭЦ» от 24.03.2017.

Согласно статье 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется по заданию другой стороны (заказчика) выполнить определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат и оплатить его. К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договорах.

В соответствии с п. 1 ст. 740 ГК РФ, по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Статьей 746 ГК РФ установлено, что оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда.

В соответствии с частью 1 статьи 706 Гражданского кодекса Российской Федерации если из закона или договора подряда не вытекает обязанность подрядчика выполнить предусмотренную в договоре работу лично, подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков). В этом случае подрядчик выступает в роли генерального подрядчика.

На основании части 4 статьи 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.

Истцом работы были выполнены, ответчиком приняты без возражений и замечаний, по договору:

- №01/2017 на выполнение работ по текущему ремонту турбоагрегата ПТ-80/100/130/13 ст. №4 ООО «Котовская ТЭЦ» от 23.01.2017 -  на сумму 2512137,52 руб., что подтверждено Актом приемки выполненных работ №1 от 31.08.2017 на сумму 1816322,40 руб., №2 от 30.09.2017 на сумму 695815,12 руб.,

- №02/2017 на выполнение работ по ремонту основного оборудования ООО «Котовская ТЭЦ» от 30.01.2017 - на сумму 3636034,01 руб., что подтверждено Актом приемки выполненных работ №1 от 30.06.2017 на сумму 889439,94 руб., №1 от 10.09.2017 на сумму 1956890,74 руб., №1 от 10.09.2017 на сумму 682664,79 руб., №1 от 10.09.2017 на сумму 107038,54 руб., 

- №ЗИС-04/2017 на выполнение работ по текущему ремонту градирни ст. №2 (Fop=1100 м2) ООО «Котовская ТЭЦ» от 24.03.2017 - на сумму 1753984,16 руб., что подтверждено Актом приемки выполненных работ №1 от 31.08.2017 на сумму 1560319,22 руб., №2 от 30.09.2017 на сумму 193664,94 руб.,

 подписанных сторонами без разногласий и возражений и скрепленных их печатями.

Стоимость работ соответствует Справкам о стоимости выполненных работ и затрат по договору:

- №01/2017 на выполнение работ по текущему ремонту турбоагрегата ПТ-80/100/130/13 ст. №4 ООО «Котовская ТЭЦ» от 23.01.2017 - №1 от 31.08.2017 на сумму 1816322,40 руб., №2 от 30.09.2017 на сумму 695815,12 руб.,

- №02/2017 на выполнение работ по ремонту основного оборудования ООО «Котовская ТЭЦ» от 30.01.2017 - №1 от 30.06.2017 на сумму 889439,94 руб., №1 от 10.09.2017 на сумму 1956890,74 руб., №1 от 10.09.2017 на сумму 682664,79 руб., №1 от 10.09.2017 на сумму 107038,54 руб., 

- №ЗИС-04/2017 на выполнение работ по текущему ремонту градирни ст. №2 (Fop=1100 м2) ООО «Котовская ТЭЦ» от 24.03.2017 - №1 от 31.08.2017 на сумму 1560319,22 руб., №2 от 30.09.2017 на сумму 193664,94 руб.

В силу пункта 1 ст. 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Из смысла статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что заказчик обязан оплатить только качественно выполненные работы.

Поскольку истцом работы выполнены, ответчиком приняты, основания для отказа от оплаты выполненных истцом работ у ответчика отсутствуют.

Ответчиком возражений по качеству работ не заявлено.

Оплата произведена частично на сумму 500000 руб., что подтверждено платежным поручением №1538 от 24.07.2017 и не оспаривается ответчиком.

Ответчик исковые требования в части взыскания задолженности по договору №01/2017 от 23.01.2017 в размере 2512137,52 руб.; по договору №ЗИС-04/2017 от 24.03.2017 в размере 1753984,16 руб. признал.

Согласно части 3 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, признание стороной обстоятельств, на которых другая сторона основывает свои требования или возражения, освобождает другую сторону от необходимости доказывания таких обстоятельств.

Исследовав обстоятельства дела, оценив в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные в материалы дела доказательства, иск заявлен обоснованно, материалами дела доказан, подлежит удовлетворению в полном объеме.

Довод ответчика о том, что истец по договору №02/2017 от 30.01.2017 не выполнил свои обязательства, предусмотренные п. 6.2.1 договора, не передал необходимую документацию, поскольку без нее ответчик не вправе эксплуатировать паропровод рег. №715, опровергается материалами дела (письмо №20 от 05.02.2018 о повторном направлении материалов дела с приложением на 67 л.).

В соответствии со ст. 102, 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по государственной пошлине следует отнести на ответчика.

Истцу определением арбитражного суда Тамбовской области от 18.12.2017 предоставлялась отсрочка по уплате государственной пошлины, в связи с чем госпошлина подлежит взысканию в доход федерального бюджета.

Руководствуясь статьями 102, 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

РЕШИЛ:

1. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Котовская ТЭЦ», г.Котовск Тамбовской области (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), в пользу общества с ограниченной ответственностью «Энергетик – Б» (ИНН: 

<

***>; ОГРН: 

<

***>), г. Тамбов, задолженность в размере 7402155,69 руб.; в доход федерального бюджета расходы по уплате государственной пошлины в размере 60011 руб.

2. Истцу и налоговому органу выдать исполнительные листы после вступления решения в законную силу.

3. Решение арбитражного суда вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы, решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд, находящийся по адресу 394006, 

<

...>  через Арбитражный суд Тамбовской области.

СудьяА.В. Захаров