АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А53-9745/20

04 августа 2021 г.

г. Ростов-на-Дону

Резолютивная часть решения объявлена   29 июля 2021 г.

Полный текст решения изготовлен            04 августа 2021 г.

Арбитражный суд Ростовской области  в составе судьи Абдулиной С.В.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску акционерного общества "Научно-исследовательский институт телевидения" (ОГРН 1117847610297, ИНН 7802774001)

к федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего образования "Южный федеральный университет" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 

третье лицо: федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

о взыскании 13250000 руб., расторжении договора

при участии:

от истца: представитель ФИО2 по доверенности от 14.03.19

от ответчика: представитель ФИО3 по доверенности от 13.11.2020

от третьего лица: представитель ФИО4 по доверенности от 21.06.2021

установил:

акционерное общество "Научно-исследовательский институт телевидения" обратилось в суд с иском к федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего образования "Южный федеральный университет" о взыскании 13250000 руб., в том числе 10000000 руб. убытков и 3250000 руб. пени, а также расторжении договора на выполнение опытно-конструкторской работы от 20.01.2016 № 21/16/555.

Решением по делу от 21.09.2020 исковые требования частично удовлетворены. 

Постановлением 15 ААС от 04.12.2020 решение изменено.

Постановлением Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 19.03.2021 решение и постановление суда апелляционной инстанции по настоящему делу отменены, дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции. При этом суд кассационной инстанции указал, что судами не учтено, что предметом договоров на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ является результат творческой деятельности, который в отличие от результата обычной подрядной работы не может быть гарантирован исполнителем. Отказ в иске со ссылкой на неправильный выбор способа судебной защиты (при формальном подходе к квалификации заявленного требования) недопустим, поскольку не обеспечивает разрешение спора, определенность в отношениях сторон, баланс их интересов и стабильность гражданского оборота в результате рассмотрения одного дела в суде, что способствовало бы процессуальной экономии и максимально эффективной защите прав и интересов всех причастных к спору лиц. Судам следовало рассмотреть вопрос о потребительской ценности работ и возможности их использования, с учетом не достижения конечного результата работ (в том числе с использованием предусмотренных процессуальным законом способов доказывания).

Представитель истца в судебном заседании поддержал исковые требования в полном объеме.

Представитель ответчика возражал против удовлетворения исковых требований.

Третье лицо поддержало позицию ответчика.

Изучив материалы дела, выслушав представителей лиц, участвующих в деле, суд установил, что между АО "Научно-исследовательский институт телевидения" (заказчик) и ФГАОУ ВО "Южный федеральный университет" заключен договор от 20.01.2016 № 21/16/555 на выполнение опытно-конструкторской работы «Разработка многофункционального медицинского комплекса для ультразвуковой диагностики и терапии новообразований молочной и щитовидной желез», Шифр «Стрела-УЗ».

Срок исполнения работ в соответствии с календарным планом (приложение №1 к договору) 1 этапа с 24.03.2016 по 31.08.2016, 2 этапа с 01.10.2016 по 20.05.2017, 3 этапа  с 21.05.2017 по 31.10.2017.

Общая стоимость работ согласно п. 3.1 договора  составляет 65000000 руб., из них в 2016 году - 5000000 рублей, в 2017 году - 60000000 рублей.

Согласно п. 3.2 договора заказчик обеспечивает выдачу аванса на основании счёта исполнителя в течение 30 банковских дней с момента подписания договора с Минобрнауки России на предоставление субсидии путём перечисления денежных средств на расчётный счет исполнителя в размере 50% от стоимости работ 2016 года. Авансирование работ последующих лет производится заказчиком в течение первого месяца текущего года в размере 50% от стоимости работ текущего года. Окончательный расчет за работы отчетного года производится в течение 10 дней после подписания заказчиком акта сдачи-приемки на основании полученного счета (с учетом авансового платежа).

Как следует из материалов дела, заказчик платежным поручением от 20.09.2016 № 2938 перечислил исполнителю аванс в размере 5000000 руб.

Работы по 1 этапу договора были выполнены ответчиком и приняты истцом по акту сдачи-приемки №1 от 31.08.2016 на сумму 5000000 руб.

Вместе с тем, исполнитель не представил к приёмке результаты по 2 этапу выполнения работ надлежащего качества и в полном объеме, что подтверждается протоколом комиссии от 17.05.2017 и подписанными сторонами актом комиссии по приемке работ от 22.05.2017.

В связи с просрочкой выполнения работ и невозможностью реализации комплексного проекта, заказчик письмом от 21.09.2017 № 4556/118 предложил исполнителю расторгнуть договор по соглашению сторон с возвратом израсходованных денежных средств и возмещением убытков. 

Ссылаясь на то, что требования оставлены ответчиком без удовлетворения, АО "Научно-исследовательский институт телевидения" обратилось в арбитражный суд с настоящим иском.

Изучив материалы дела, суд пришел к выводу о том, что требования истца  подлежат частичному удовлетворению по следующим основаниям. 

Правовая природа анализируемых правоотношений имеет смешанный характер, содержащим элементы договоров на выполнение опытно-конструкторских работ и подряда.

В соответствии со ст. 769 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору на выполнение опытно-конструкторских и технологических работ - исполнитель обязуется разработать образец нового изделия, конструкторскую документацию на него или новую технологию, а заказчик обязуется принять работу и оплатить ее. Договор с исполнителем может охватывать как весь цикл проведения исследования, разработки и изготовления образцов, так и отдельные его этапы (элементы).

В силу ст. 773 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнитель в договоре на выполнение опытно-конструкторских и технологических работ обязан выполнить работы в соответствии с согласованным с заказчиком техническим заданием и передать заказчику их результаты в предусмотренный договором срок.

В соответствии со ст.702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать её результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно статье  708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы. Указанные в договоре подряда начальный, конечный и промежуточные сроки выполнения работы могут быть изменены в случаях и в порядке, предусмотренных договором. Указанные в пункте 2 статьи 405 настоящего Кодекса последствия просрочки исполнения наступают при нарушении конечного срока выполнения работы, а также иных установленных договором подряда сроков.

В соответствии с ч.2 ст.715 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание её к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

Пунктом 1 статьи 777 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что исполнитель несет ответственность перед заказчиком за нарушение договора на выполнение опытно-конструкторских и технологических работ, если не докажет, что такое нарушение произошло не по вине исполнителя (пункт 1 статьи 401).

Согласно статьям 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

Статья 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  устанавливает, что каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Каждое лицо, участвующее в деле, должно раскрыть доказательства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений, перед другими лицами, участвующими в деле, до начала судебного заседания или в пределах срока, установленного судом, если иное не установлено настоящим Кодексом.

Ответчик указывает, что нарушение срока выполнения работ по договору обусловлено поведением самого заказчика.

Рассмотрев позицию ответчика, суд пришел к выводу о её ошибочности ввиду следующего. 

Как установлено статье 719 Гражданского кодекса Российской Федерации  подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, а именно непредоставление технической документации, препятствует исполнению договора подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок

Статья 716 Гражданского кодекса Российской Федерации   обязывает подрядчика немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу, в частности, при обнаружении несоответствия в документации, представленной Заказчиком для производства работ.

Подрядчик, не предупредивший заказчика о данных обстоятельствах, либо продолживший работу, не дожидаясь   ответа не вправе при предъявлении к нему или им к заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.

В рассматриваемом случае, исполнитель не приостанавливал выполнение работ. Письма ответчика, на которые он ссылается, носят уведомительный характер о необходимости корректировки сроков, предусмотренных договором.

Ответчик, как профессиональный исполнитель работ обладает специальными познаниями и опытом о сроках выполнения спорного вида работ, а также может предвидеть весь необходимый к выполнению объём работ.

Ответчик, подписывая договор, мог ознакомиться со сроками, указанными в проекте договора, и предвидеть невозможность получения результата работ в установленный договором срок, а также возникшие трудности в ходе их выполнения.

В рассматриваемом случае, ответчик не представил доказательства приостановления работ и наличия вины заказчика в неисполнении контракта.

Ненадлежащее выполнение работ подтверждается протоколом комиссии от 17.05.2017 и подписанными сторонами актом комиссии по приемке работ от 22.05.2017, а также решением суда по делу А53-667/18.

28.08.2017 Минобрнауки направило истцу уведомление о расторжении договора о предоставлении субсидии на реализацию спорного проекта и указало о необходимости возврата субсидии в сумме 5000000 руб.

При указанных обстоятельствах заказчик правомерно заявил односторонний отказ от исполнения договора ввиду нарушения исполнителем срока выполнения работ.

Статьей 450 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами или договором. По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда при существенном нарушении договора другой стороной.

Согласно  ст. 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации предоставленное настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) (статья 310) может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором.

В соответствии с правовой позицией, изложенной в пункте 14 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22.11.2016 N 54 "О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах и их исполнении", при осуществлении стороной права на одностороннее изменение условий обязательства или односторонний отказ от его исполнения она должна действовать разумно и добросовестно, учитывая права и законные интересы другой стороны (пункт 3 статьи 307 и пункт 4 статьи 450.1 Гражданского кодекса). Нарушение этой обязанности может повлечь отказ в судебной защите названного права полностью или частично, в том числе признание ничтожным одностороннего изменения условий обязательства или одностороннего отказа от его исполнения (пункт 2 статьи 10 и пункт 2 статьи 168 Гражданского кодекса).

Истец направил ответчику требование о расторжении договора на выполнение опытно-конструкторской работы от 20.01.2016 № 21/16/555 в претензии исх. №4556/118 от 21.09.2017, что свидетельствует о прекращении договорных обязательств. Из материалов дела не следует, что ответчик продолжил работы после получения уведомления.

Таким образом, спорный договор сторонами расторгнут до обращения с иском в суд.

При указанных обстоятельствах, указанный договор не может быть признан расторгнутым в судебном порядке, поскольку данное требование не влечет юридических последствий, в данной части требования истца подлежат отклонению.

Истцом заявлены требования о возврате денежных средств, полученных в качестве оплаты 1 этапа работ в сумме 5000000 руб., и убытков в размере 5000000 руб., которые являются собственными затратами истца, понесенных в связи с проведением испытаний макетов составных частей изделия, технологической подготовкой производства, разработкой бизнес-плана организации производства.

В силу ст. 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.

Факт перечисления денежных средств в сумме 5000000 руб. подтверждается платежным поручением №2938 от 20.09.2016.

Как указывалось судом ранее, договор расторгнут путем направления уведомления ответчику.

В соответствии с пунктом 4 статьи 453 Гражданского кодекса стороны не вправе требовать возвращения того, что было исполнено ими по обязательству до момента изменения или расторжения договора, если иное не установлено законом или соглашением сторон. В случае, когда до расторжения или изменения договора одна из сторон, получив от другой стороны исполнение обязательства по договору, не исполнила свое обязательство либо предоставила другой стороне неравноценное исполнение, к отношениям сторон применяются правила об обязательствах вследствие неосновательного обогащения (глава 60 Гражданского кодекса), если иное не предусмотрено законом или договором либо не вытекает из существа обязательства.

Как следует из пояснений истца, в силу специфики предмета договора, потребительскую ценность для заказчика представляет только полное исполнение договора, в том числе выполнение 2 этапа работ, заключающегося в изготовлении опытного образца изделия. При этом ввиду того, что опытный образец изготовлен не был, потребительская ценность 1 этапа, состоящая в разработке проектной документации, программного обеспечения, испытаний макета, не имеет потребительской ценности, поскольку в случае обращения к иному исполнителю, необходимо выполнение всего спорного объёма работ заново.

Таким образом, в связи с тем, что доказательств наличия потребительской ценности работ по 1 этапу без завершения всей опытно-конструкторской работы ответчиком в нарушение ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не представлено, основания для удержания денежных средств в сумме 5000000 руб. у ответчика отсутствуют.

На основании изложенного, требование истца о взыскании 5000000 руб. денежных средств, оплаченных за 1 этап работ, признается судом обоснованным и подлежащим удовлетворению в качестве неосновательного обогащения в заявленной истцом сумме.

Рассмотрев требования о взыскании убытков в сумме 5000000 руб., составляющих затраты АО "НИИ телевидения" по реализации комплексного проекта, суд не находит оснований для их удовлетворения.

Статья 723 ГК РФ регулирует отношения, связанные с ответственностью подрядчика за ненадлежащее качество работ. В частности, пункт 3 статьи 723 ГК РФ предусматривает право заказчика на возмещение подрядчиком убытков, которые определяются по правилам, предусмотренным статьей 15 названного Кодекса. 

В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 393 Гражданского кодекса Российской Федерации должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства; убытки определяются в соответствии с правилами, предусмотренными статьей 15 настоящего Кодекса.

Согласно статье 15 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Применение такой меры гражданско-правовой ответственности, как возмещение убытков, возможно при доказанности совокупности нескольких условий: противоправности действий причинителя убытков, причинной связи между противоправными действиями и возникшими убытками, наличия и размера понесенных убытков. При этом для удовлетворения требований о взыскании убытков необходима доказанность всей совокупности указанных фактов. Недоказанность одного из необходимых оснований возмещения убытков исключает возможность удовлетворения исковых требований. Убытки подлежат взысканию судом при условии представления истцом доказательств, свидетельствующих о совершении ответчиком виновных действий (бездействия), в результате которых нарушены положения закона или договора, явившихся необходимой и достаточной причиной несения заказчиком убытков, а также доказательств наличия причинно-следственной связи между фактом причинения убытков и неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств.

Таким образом, применение гражданско-правовой ответственности в виде взыскания убытков возможно при наличии условий, предусмотренных законом.

Отсутствие хотя бы одного из вышеперечисленных условий служит основанием для отказа судом в удовлетворении иска о взыскании убытков.

В соответствии со статьей 68 АПК РФ, обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами. 

В составе убытков истцом заявлены расходы, связанные с участием в проведении испытаний макетов составных частей изделий (затраты на оплату труда - 0,58 млн. руб., страховые взносы - 0,18 млн. руб., накладные расходы - 0,24 млн. руб.); технологической подготовкой производства (затраты на оплату труда - 2,25 млн. руб., страховые взносы - 0,68 млн. руб., накладные расходы - 0,93 млн. руб.); разработкой бизнес-плана организации производства (затраты на оплату труда - 0,08 млн. руб., страховые взносы - 0,03 млн. руб., накладные расходы - 0,03 млн. руб.).

Таким образом, указанные расходы связаны с исполнением договора о предоставлении субсидии № 02.G25/31/0184 от 27.04.2016, а не договора, заключенного с ФГАОУ ВО "Южный федеральный университет".

Договором от 20.01.2016 № 21/16/555, заключенным между истцом и ответчиком, не предусмотрена компенсация стоимости проведения АО "НИИ телевидения" мероприятий, связанных с испытанием.

Кроме того, из отчета о выполненных работах по договору о предоставлении субсидии следует, что указанные истцом расходы понесены в период выполнения ФГАОУ ВО "Южный федеральный университет" первого этапа работ, который был принят истцом без замечаний.

Кроме того, истцом не представлены первичные документы, подтверждающие оплату вышеназванных расходов на сумму 5000000 руб. Относимость расходов, связанных с оплатой труда, с обоснованием количества сотрудников, задействованных в реализации проекта, времени их работы, истцом не доказана. Состав накладных расходов не расшифрован, соответствующие платежные документы не представлены.

Таким образом, истцом не представлены документы в подтверждение убытков, не представлены доказательства наличия причинной связи между понесенными убытками и неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств либо противоправными действиями ответчика.

При таких обстоятельствах, требования истца в указанной части не подлежат удовлетворению.

Также истцом заявлено требование о взыскании с ответчика неустойки в размере 3250000 руб. за период с 21.05.2017 по 25.03.2020.

Согласно п. 5.2 договора в случае нарушения любой из сторон любого из установленных настоящим договором сроков выполнения обязательств, потерпевшая сторона имеет право начислить пеню в размере 0,01% от стоимости невыполненного обязательства за каждый день просрочки. Общая сумма пени не должна превышать 5% от стоимости по договору. Уплата неустойки и штрафа не освобождает виновную сторону от исполнения обязательств по договору.

Согласно статье 12 Гражданского кодекса Российской Федерации взыскание неустойки является одним из способов защиты нарушенного гражданского права. В соответствии с пунктом 1 статьи 330 Кодекса неустойкой (штрафом, пенями) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. 

Согласно п. 66. Постановления Пленума Верховного суда РФ №7 от 24.03.2016 по общему правилу, если при расторжении договора основное обязательство прекращается, неустойка начисляется до момента прекращения этого обязательства (пункт 4 статьи 329 ГК РФ). Например, отказ продавца от договора купли-продажи транспортного средства, проданного в рассрочку, прекращает обязательство покупателя по оплате товара и, соответственно, освобождает его от дальнейшего начисления неустойки за просрочку оплаты товара (пункт 2 статьи 489 ГК РФ). Если при расторжении договора основное обязательство не прекращается, например, при передаче имущества в аренду, ссуду, заем и кредит, и сохраняется обязанность должника по возврату полученного имущества кредитору и по внесению соответствующей платы за пользование имуществом, то взысканию подлежат не только установленные договором платежи за пользование имуществом, но и неустойка за просрочку их уплаты (статья 622, статья 689, пункт 1 статьи 811 ГК РФ).

Истец направил ответчику требование о расторжении договора на выполнение опытно-конструкторской работы от 20.01.2016 № 21/16/555 в претензии исх. №4556/118 от 21.09.2017, то есть, после указанной даты договорные отношения между сторонами прекратились. 

Кроме того истцом неверно установлены периоды просрочки и количество дней в них, поскольку согласно ст. 191, 193 ГК РФ, течение срока, определенного периодом времени, начинается на следующий день после календарной даты или наступления события, которым определено его начало, а в случае, если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

Таким образом, период начисления неустойки по 2 этапу составляет 122 дня, с 23.05.2017 по 21.09.2017.

Так как договор был расторгнут, обязанность выполнения 3 этапа не наступила и неустойка за нарушение обязательств по 3 этапу начислению не подлежит.

Ответчиком о снижении неустойки  по статье 333 Гражданского кодекса Российской Федерации не заявлено.

С учетом изложенного, по расчету суда с ответчика в пользу истца подлежат взысканию неустойка в размере 488000 руб. В удовлетворении остальной части требований о взыскании неустойки суд отказывает.

Истцом при подаче искового заявления оплачена государственная пошлина по платежному поручению №853 от 24.03.2020 в размере 89250 руб.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по уплате государственной пошлины по иску подлежат отнесению на ответчика пропорционально удовлетворенным требованиям, со взысканием в  пользу истца.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать с федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Южный федеральный университет" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу акционерного общества "Научно-исследовательский институт телевидения" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 5000000 руб. неосновательного обогащения, 488000 руб. неустойки, а также 36967 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины. 

В остальной части в удовлетворении иска отказать.

Решение суда по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции. 

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения через суд, принявший решение.

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в кассационном порядке в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев со дня вступления в законную силу решения через суд, принявший решение, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы. 

СудьяАбдулина С. В.