10_577444 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Большая Советская, д. 30/11, г.Смоленск, 214001  

http:// www.smolensk.arbitr.ru; e-mail: info@smolensk.arbitr.ru  

тел.8(4812)24-47-71; 24-47-72; факс 8(4812)61-04-16  

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ Р Е Ш Е Н И Я

 

город Смоленск  13.11.2020 Дело № А62-2918/2020  

Арбитражный суд Смоленской области в составе судьи Бажановой Е.Г.  при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Безруковой  И.Н., рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению  

Общества с ограниченной ответственностью "Кубаньгазэнергосервис" (ОГРН  

<

***>; ИНН 

<

***>)  

к Обществу с ограниченной ответственностью "2А Инжиниринг" (ОГРН  

<

***>; ИНН 

<

***>),  

третье лицо: Общество с ограниченной ответственностью "Дельта-Строй",  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>),  

о взыскании неосновательного обогащения в размере 215007,20 руб.,  неустойки, процентов за пользование чужими денежными средствами,  

при участии: от истца: ФИО1 – представитель по доверенности, паспорт, диплом; от ответчика: не явился, извещен надлежаще; от третьего лица: не явился, извещен надлежаще; 

Руководствуясь статьями 167 - 171 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, суд  

Р Е Ш И Л :

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "2А  Инжиниринг" (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) в пользу Общества с  ограниченной ответственностью "Кубаньгазэнергосервис" (ОГРН  

<

***>; ИНН 

<

***>) 332650,96 руб., в том числе:  неосновательное обогащение в размере 215007,20 руб.; пени за  несвоевременное выполнение работ по договору, начисленные за период с  01.09.2019 по 31.12.2019, в сумме 110769 руб.; проценты за пользование  чужими денежными средствами, начисленные на долг по неосновательному  обогащению за период с 31.12.2019 по 23.07.2020, в сумме 6874,76 руб. и с  

24.07.2020 по день фактической уплаты; а также 39487,52 руб. в возмещение  судебных расходов.  

Считать Договор субподряда № СЕГ/3-0020/КГЭС/СУБ01 от 04 июля  2019 г. на выполнение части строительно-монтажных работ на Объекте:  "Линейная часть. Участок км 538 – км 852,7 (2-я нитка)" в составе стройки  "Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона,  участок Грязовец – КС Славянская" исполненным в объеме стоимости работ  2879992,80 руб. на основании Актов о приемке выполненных работ (по  форме КС-2) № 1 (466665,50 руб. без НДС), 2 (397332,34 руб. без НДС), 3  (847997,88 руб. без НДС), 4 (393332,35 руб. без НДС), 5 (294665,93 руб. без  НДС) от 31.12.2019 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по  форме КС-3) № 1 от 31.12.2019 (2399994 руб. без НДС; 2879992,80 руб. с  НДС), подписанных в одностороннем порядке Обществом с ограниченной  ответственностью "Кубаньгазэнергосервис" (ОГРН 

<

***>; ИНН  

<

***>).  

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать. 

Возвратить Обществу с ограниченной ответственностью  "Кубаньгазэнергосервис" (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) из  федерального бюджета 15441 руб. государственной пошлины, излишне  уплаченной по платежному поручению № 1051 от 08.04.2020.  

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную  силу.  

В соответствии с частью 3 статьи 319 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации исполнительный лист выдается по  письменному ходатайству взыскателя или по его ходатайству направляется  для исполнения непосредственно арбитражным судом.  

Лица, участвующие в деле, вправе обжаловать настоящее решение суда  в течение месяца после его принятия в апелляционную инстанцию –  Двадцатый арбитражный апелляционный суд (г.Тула), в течение двух  месяцев после вступления решения суда в законную силу в кассационную  инстанцию – Арбитражный суд Центрального округа (г. Калуга) при  условии, что решение суда было предметом рассмотрения арбитражного суда  апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в  восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд  Смоленской области.  

Судья Е.Г. Бажанова