АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  РЕСПУБЛИКИ  ИНГУШЕТИЯ

Республика  Ингушетия,  город Назрань, проспект имени Идриса  Базоркина ,44

телефон: (8732) 22-40-77, факс: (8732) 22-40-8, http://ingushetia.arbitr.ru/, info@ingushetia.mail

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело №А18-1183/2022

город Назрань

08 августа 2022 года

Резолютивная часть решения объявлена 03 августа 2022 года.

Полный текст решения изготовлен  08 августа 2022 года.

 

Арбитражный суд Республики Ингушетия в составе судьи Мержоева М.М., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании исковое заявление Министерства по делам гражданской обороны чрезвычайным ситуациям Республики Ингушетии (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) к Акционерному обществу «СИТРОНИКС» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>),  третье лицо - Правительство РИ, о расторжении соглашения,

при  участии:

от истца – ФИО2 М-С., по доверенности от 08.02.2022г., ФИО3 по доверенности от 02.08.2022г.;

от ответчика – ФИО4 по доверенности от 01.01.2022г.

от третьего лица - не явились, 

 

УСТАНОВИЛ:

В Арбитражный суд Республики Ингушетия обратилось Министерство по делам гражданской обороны чрезвычайным ситуациям Республики Ингушетии к  Акционерному обществу «СИТРОНИКС»;  третье лицо - Правительство РИ о  расторжении Концессионного Соглашения №б/н от 04.04.2017 года по вине Концессионера в связи с нарушением существенных условий Концессионного Соглашения. 

Представитель истца требования поддерживает в полном объеме и просит суд их удовлетворить.

Представитель ответчика исковые требования не признал,  просил суд  в иске  отказать, по доводам, изложенным в отзыве на исковое заявление.

Как усматривается из материалов дела, 04.04.2017 года между Республикой Ингушетия (Концедент), от имени которого и в соответствии с распоряжением Правительства Республики Ингушетия от 08.12.2016 года № 959-р, о заключении концессионного соглашения выступает Управление Республики Ингушетия по обеспечению деятельности по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций (далее - Управление) в лице ФИО5 Магомет-Гиреевича, действующего на основании Положения именуемое в дальнейшем «Концедент», с одной стороны, и Акционерным обществом «СИТРОНИКС» (Концессионер) (далее - Общество) в лице Президента Кузнецова Павла Владиславовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Концессионер», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключено концессионное соглашение № б/н, именуемое в дальнейшем «Концессионное Соглашение» (далее - Соглашение).

Согласно подпункту 2.1. пункта 2 Соглашения предметом Концессионного Соглашения являются обязательства Концессионера за свой счёт создать (модернизировать)    Объект    Концессионного    Соглашения,        Имущество Концедента и иное движимое имущество составляющие с объектом единое целое, предназначенные для осуществления деятельности, предусмотренной Концессионным Соглашением и осуществлять эксплуатацию Объекта Концессионного Соглашения и Имущества Концедента, а Концедент обязуется предоставить концессионеру на установленный концессионным соглашением срок право владения и пользования объектом концессионного соглашения и Имуществом концедента, а также осуществлять предусмотренные концессионным соглашением выплаты.

Согласно подпункту 3.1 пункта 3 Соглашения целью создания (модернизации) и эксплуатации Объекта Концессионного Соглашения и Имущества Концедента является обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах Республики Ингушетия, предупреждение дорожно-транспортных происшествий и снижение тяжести их последствий.

В соответствии с пунктом 4 Соглашения Объектом концессионного: соглашения являются элементы обустройства автомобильных дорог на территории Республики Ингушетия, технологически связанные между собой объекты недвижимого и движимого имущества, работающие в автоматическом режиме специальные технические средства, имеющие функции фото-и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения на территории Республики Ингушетия (далее - Объект Концессионного Соглашения).

В состав Объекта Соглашения входят отдельные элементы обустройства автомобильных дорог, иное оборудование, объекты движимого и недвижимого имущества и нематериальные активы, технологически связанные между собой и предназначенные для осуществления деятельности, предусмотренной Соглашением.

Указывая, на нарушении Обществом условий концессионного соглашения Министерство обратилось в суд с заявлением о его  расторжении по вине ответчика.

Как указывает истец и подтверждается материалами дела, на   основании   Распоряжения   Правительства   Республики   Ингушетия № 609-р от 18.12.2020 года заместителем председателя Госфинконтроля Ингушетии ФИО6 А-Х.Б. и начальником контрольно-ревизионного отдела Госфинконтроля Ингушетии ФИО7 за период с 18.12.2020 года по 19.04.2021 года была проведена проверка исполнения Концессионного Соглашения № б/н от 04.04.2017 года, в том числе проверка соблюдения концессионером условий Соглашения и исполнения обязательств по соблюдению сроков создания и (или) реконструкции объекта Соглашения, а также осуществления инвестиций в его создание и (или) реконструкцию.

Согласно акту о результатах контроля от 19.04.2021 года в ходе проведения проверки были выявлены следующие нарушения: Нарушение      требований      объема      капитальных      вложений, предусмотренных приложением №  10 к Соглашению, в рамках реализации первого этапа на сумму 13 835 929 (тринадцать миллионов восемьсот тридцать пять тысяч девятьсот двадцать девять) рублей 82 (восемьдесят две) копейки;                 Нарушение  требований  подпункта   19.3   пункта   19  Соглашения в части страхования объекта Соглашения на 719 дней.

Нарушение   сроков   создания   и   (или)   реконструкции   объекта Концессионного Соглашения по вине концессионера, неисполнение и ненадлежащее исполнение концессионером установленных концессионным соглашением обязательств.

В соответствии с подпунктом 14.1 пункта 14 Соглашения, контроль  за исполнением Концессионного Соглашения осуществляется Концедентом в соответствии с Концессионным Соглашением, Приложением № 7 к Концессионному Соглашению и статьей 9 Закона о Концессионных Соглашениях. 

В частности, Концедент осуществляет контроль за исполнением обязательств, изложенных в подпунктах 14.1.1 - 14.1.5 пункта 14 Соглашения.

В том числе на основании подпункта 14.4 пункта 14 Соглашения стороны обязаны своевременно предоставлять друг другу информацию, необходимую для исполнения обязанностей по Концессионному Соглашению.

Комитетом Госфинконтроля Ингушетии (далее - Комитет) в адрес АО «Ситроникс» были направлены запросы за исх. № 445 ГФК РИ от 18.12.2020 года и № 104 ГФК РИ от 04.03.2021 года о предоставлении информации об объеме инвестиций Концессионера в создание Объекта Соглашения.

Аналогичный запрос в адрес АО «Ситроникс» был направлен Комитетом за исх. № 01/364 от 01.04.2021 года.

Однако в нарушение подпункта 14.4 пункта 14 Соглашения АО «Ситроникс» не были представлены запрашиваемые Комитетом документы, подтверждающие осуществление инвестиций в объеме, установленном Концессионным Соглашением.

Согласно Приложению 10 к Соглашению объем капитальных вложений для реализации первого этапа составляет сумму - 158 000 000 (сто пятьдесят восемь миллионов) рублей, для реализации второго этапа составляет -236 000 000 (двести тридцать шесть миллионов) рублей.

Таким образом, Концессионер гарантировал указанный выше объем инвестиций.

Однако по окончанию исполнения первого этапа Концессионером передана Концеденту комплексная система безопасности движения, обеспечивающая ФВФН ПДД, на сумму 124 126 457 (сто двадцать четыре миллиона сто двадцать шесть тысяч четыреста пятьдесят семь) рублей 43 (сорок три) копейки, что подтверждается актом приема-передачи Объекта Соглашения и Имущества Концедента № б/н от 30.03.2018 года.

Вместе с тем, согласно акту приема-передачи Иного движимого имущества № б/н от 30.03.2018 года, по окончанию исполнения первого этапа Концессионером было также передано Концеденту Иное движимое имущество в соответствии с подпунктом 9.1 пункта 9 Соглашения на сумму 20 037 612 (двадцать миллионов тридцать семь тысяч шестьсот двенадцать) рублей 75 (семьдесят пять) копеек.

Следовательно, размер общей суммы капитальных вложений в создание Объекта   Соглашения   в   рамках   реализации   первого   этапа   составляет   -144 164 070 (сто сорок четыре миллиона сто шестьдесят четыре тысячи семьдесят) рублей 18 (восемнадцать) копеек вместо суммы, установленной в Приложении 10 к Соглашению, а именно - 158 000 000 (сто пятьдесят восемь миллионов) рублей.

Таким образом, сумма капитальных вложений в создание Объекта Соглашения в рамках реализации первого этапа на 13 835 929 (тринадцать миллионов восемьсот тридцать пять тысяч девятьсот двадцать девять) рублей 82 (восемьдесят две) копейки ниже, предусмотренного объема в Приложении 10 к Соглашению.

Следовательно, Концессионером допущено невыполнение обязанности по объему капитальных вложений, предусмотренной Соглашением в рамках реализации первого этапа исполнения Соглашения на сумму - 13 835 929 (тринадцать миллионов восемьсот тридцать пять тысяч девятьсот двадцать девять) рублей 82 (восемьдесят две) копейки.

         16.08.2021 года Концедентом в адрес Концессионера направлено уведомление о возникновении спора № 01/1073 с требованием предоставить заверенные копии страховых полисов Объекта Соглашения в соответствии с протоколом совещания от 23.06.2021 года № 1, проведенного между Концедентом и Концессионером, по результатам которого Концессионером не представлены доказательства исполнения пункта 19 Соглашения.

Согласно подпункту 2.1. пункта 2 Соглашения предметом Концессионного Соглашения являются обязательства Концессионера за свой счёт создать (модернизировать)    Объект    Концессионного    Соглашения, Имущество Концедента и иное движимое имущество составляющие с объектом единое целое, предназначенные для осуществления деятельности, предусмотренной Концессионным Соглашением  и    осуществлять    эксплуатацию    Объекта Концессионного Соглашения и Имущества Концедента, а Концедент обязуется предоставить концессионеру на установленный концессионным соглашением срок право владения и пользования объектом концессионного соглашения и Имуществом Концедента, а также осуществлять предусмотренные концессионным соглашением выплаты.

Согласно подпункту 3.1 пункта 3 Соглашения целью создания (модернизации) и эксплуатации Объекта Концессионного Соглашения и Имущества Концедента является обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах Республики Ингушетия, предупреждение дорожно-транспортных происшествий и снижение тяжести их последствий.

В соответствии с пунктом 4 Соглашения Объектом концессионного соглашения являются элементы обустройства автомобильных дорог на территории Республики Ингушетия, технологически связанные между собой объекты недвижимого и движимого имущества, работающие в автоматическом режиме специальные технические средства, имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения на территории Республики Ингушетия (далее - Объект Концессионного Соглашения).

В состав Объекта Соглашения входят отдельные элементы обустройства автомобильных дорог, иное оборудование, объекты движимого и недвижимого имущества и нематериальные активы, технологически связанные между собой и предназначенные для осуществления деятельности, предусмотренной Соглашением.

Пунктом 9 Соглашения регламентирован срок обследования, проектирования, создания (модернизации) объекта концессионного соглашения, имущества Концедента и Иного движимого имущества и ввод в эксплуатацию Объекта Концессионного Соглашения, Имущества Концедента и Иного движимого имущества и его передача Концеденту.

Согласно подпункту 9.1 пункта 9 Соглашения срок создания (модернизации) Объекта Концессионного Соглашения, Имущества Концедента и Иного движимого имущества, осуществляется в 2 этапа:

Срок реализации 1 этапа - 6 месяцев с момента подписания Концессионного Соглашения.

Второй этап - создание второй (оставшейся) части Иного движимого имущества. Срок создания - не более 5 лет с момента окончания Первого этапа.

Между Концедентом и Концессионером было подписано Дополнительное соглашение № 3 от 23.03.2020 года к Соглашению, в Календарном плане Приложения № 1 в котором указаны сроки окончания создания и готовности к вводу в эксплуатацию Иного движимого имущества, создаваемого Концессионером (Региональная платформа АПК «Безопасный город», на основе КСА ЕЦОР г. Магас, КСА ЕЦОР муниципальных образований Республики Ингушетия).

В рамках исполнения требований, предусмотренных Соглашением, Концессионер обязан создать вторую часть Иного движимого имущества, в соответствии с календарным планом (Приложение № 1 к Дополнительному соглашению № 3 от 23.03.2020 года к Концессионному соглашению).

Концессионером не были выполнены обязательства по Соглашению в части создания и готовности к вводу в эксплуатацию Иного движимого имущества.

Согласно вышеуказанному календарному плану срок окончания создания Концессионером ЕДЦС г. Магас - май 2020 года, срок окончания создания Концессионером ЕДЦС г. Назрани - июль 2020 года, срок окончания создания Концессионером ЕДДС г. Карабулак  - октябрь 2020 года, срок окончания создания Концессионером ЕДДС г. Малгобек  - февраль 2021  года.

          Вместе с тем, Концессионер в срок, установленный в календарном плане Приложения № 1 к Дополнительному соглашению № 3 от 23.03.2020 года к Концессионному соглашению, и по настоящее время не ввел в эксплуатацию Иное движимое имущество, следовательно, Концессионером допущено нарушение своего обязательства по Соглашению.

         Согласно подпунктам 9.6.4 и 9.6.9 пункта 9 Соглашения ввод в эксплуатацию Объекта Концессионного Соглашения, Имущество Концедента и Иного движимого имущества оформляется Актами ввода в эксплуатацию Объекта Соглашения, ввода в эксплуатацию Имущества Концедента и ввода в эксплуатацию Иного движимого имущества, подписывается Концедентом и Концессионером.

          С момента подписания Концедентом и Концессионером Акта приема-передачи объекта соглашения и/или имущества Концедента и/или Иного движимого имущества и/или его части, обязательства Концессионера по созданию (модернизации) Объекта концессионного соглашения и/или имущества концедента и/или Иного движимого имущества и/или его части в соответствии с Соглашением считаются выполненными.

           В нарушение вышеназванных положений Соглашения Акты приема-передачи Объекта Соглашения и/или имущества концедента и/или Иного движимого имущества и/или его части, обязательства Концессионера по созданию (модернизации) Объекта концессионного соглашения и/или имущества концедента и/или Иного движимого имущества и/или его части, в соответствии с Соглашением не подписаны, Объекты соглашения не введены в эксплуатацию в соответствующие сроки.

           Таким образом, существенным нарушением условий Соглашения Концессионером является нарушение сроков создания Концессионера по созданию (модернизации) в отношении 2 этапа строительства - более чем на 2 (два) месяца.

           В соответствии с подпунктом 2.2 пункта 2 Приложения № 8 к Соглашению в случае возникновения Спора Стороны должны приложить все зависящие от них усилия, чтобы разрешить Спор путем переговоров между соответствующими руководителями Сторон, имеющими полномочия по урегулированию Спора.

           Истцом соблюдены требования разрешения споров в досудебном порядке, изложенные в Приложении № 8 к Соглашению.

           22.07.2021 года № 01/938 Концедентом направлено уведомление о возникновении спора в адрес Концессионера, которое оставлено без удовлетворения, нарушения не устранены.

Факт, просрочки в части создания и ввода объектов в эксплуатацию составляет более 1 года, уже является основанием для расторжения концессионного соглашения по решению суда. Факт просрочки исполнения обязательств в части создания и ввода в эксплуатацию второй части Иного движимого имущества, в соответствии с календарным планом строительства объектов подтверждается приложенными истцом документами.

Изучив материалы дела, выслушав представителей сторон суд, считает исковые требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии с ч. 1 ст. 3 Закона о концессионных соглашениях по концессионному соглашению одна сторона (концессионер) обязуется за свой счет создать и (или) реконструировать определенное этим соглашением имущество (недвижимое имущество или недвижимое имущество и движимое имущество, технологически связанные между собой и предназначенные для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, за исключением случаев, если концессионное соглашение заключается в отношении объекта, предусмотренного пунктом 21 части 1 статьи 4 настоящего Федерального закона) (далее - объект концессионного соглашения), право собственности на которое принадлежит или будет принадлежать другой стороне (концеденту), осуществлять деятельность с использованием (эксплуатацией) объекта концессионного соглашения, а концедент обязуется предоставить концессионеру на срок, установленный этим соглашением, права владения     и     пользования     объектом     концессионного     соглашения    для осуществления указанной деятельности Частью 2 ст. 8 Закона о концессионных соглашениях предусмотрено, что при исполнении концессионного соглашения концессионер обязан: 1) осуществить в установленные концессионным соглашением сроки создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения и приступить к его использованию (эксплуатации); 2) использовать (эксплуатировать) объект концессионного соглашения в целях и в порядке, которые установлены концессионным соглашением; 3) осуществлять деятельность, предусмотренную концессионным соглашением, и не прекращать (не приостанавливать) эту деятельность без согласия концедента, за исключением случая, указанного в части 3.7 статьи 13 настоящего Федерального закона; 4) обеспечивать при осуществлении деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, возможность получения потребителями соответствующих товаров, работ, услуг; 5) предоставлять потребителям установленные федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми актами органа местного самоуправления льготы, в том числе льготы по оплате товаров, работ, услуг, в случаях и в порядке, которые установлены концессионным соглашением; 6) поддерживать объект концессионного соглашения в исправном состоянии, проводить за свой счет текущий ремонт и капитальный ремонт, нести расходы на содержание этого объекта, если иное не установлено концессионным соглашением.

В ч. 2 ст. 15 Закона о концессионных соглашениях предусмотрено, что существенными нарушениями условий концессионного соглашения концессионером являются: 1) нарушение сроков создания и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения; 2) использование (эксплуатация) объекта концессионного соглашения в целях, не установленных концессионным соглашением, нарушение порядка использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения; 3) неисполнение концессионером обязательств по осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением; 4) прекращение или приостановление концессионером деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, без согласия концедента; 5) неисполнение или ненадлежащее исполнение концессионером установленных концессионным соглашением обязательств по предоставлению гражданам и другим потребителям товаров, работ, услуг, в том числе услуг по водо-, тепло-, газо- и энергоснабжению, услуг по водоотведению, услуг транспорта общего пользования.

Концессионным соглашением помимо указанных в частях 2 и 2.1 настоящей статьи существенных нарушений его условий могут быть определены действия (бездействие) концедента или концессионера, являющиеся существенными нарушениями условий концессионного соглашения (ч. 3 ст. 15 Закона о концессионных соглашениях).

В соответствии с частью 1 статьи 3 Закона № 115-ФЗ по концессионному соглашению одна сторона (концессионер) обязуется за свой счет создать и (или) реконструировать определенное этим соглашением имущество (недвижимое имущество или недвижимое имущество и движимое имущество, технологически связанные между собой и предназначенные для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением) (далее - объект концессионного соглашения), право собственности на которое принадлежит или будет принадлежать другой стороне (концеденту), осуществлять деятельность с использованием (эксплуатацией) объекта концессионного соглашения, а концедент обязуется предоставить концессионеру на срок, установленный этим соглашением, права владения и пользования объектом концессионного   соглашения   для   осуществления   указанной   деятельности.

Согласно части 2 статьи 3 Закона № 115-ФЗ концессионное соглашение является договором, в котором содержатся элементы различных договоров, предусмотренных федеральными законами. К отношениям сторон концессионного соглашения применяются в соответствующих частях правила гражданского законодательства о договорах, элементы которых содержатся в концессионном соглашении, если иное не вытекает из настоящего Федерального      закона      или      существа      концессионного      соглашения.

В силу пункта 2 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации по требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только: 1) при существенном нарушении условий договора другой стороной; 2) в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или договором.

Как следует из части 1 статьи 15 Закона № 115-ФЗ концессионное соглашение может быть расторгнуто на основании решения суда по требованию стороны концессионного соглашения в случае существенного нарушения условий концессионного соглашения другой стороной концессионного соглашения, существенного изменения обстоятельств, из которых стороны концессионного соглашения исходили при его заключении, а также по иным предусмотренным данным федеральным законом, другими федеральными   законами    или   концессионным    соглашением   основаниям.

Частью 2 статьи 15 Закона № 115-ФЗ предусмотрен перечень нарушений условий концессионного соглашения концессионером, признаваемых существенными, и являющихся основаниями для расторжения такого соглашения       в       судебном       порядке      по      требованию      концедента.

Так, в силу названной статьи предусмотрено, что существенными нарушениями условий концессионного соглашения концессионером являются:

1)     нарушение сроков создания и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения по вине   концессионера;

         2)  использование (эксплуатация) объекта концессионного соглашения в целях, не установленных концессионным соглашением, нарушение порядка использования      (эксплуатации)      объекта      концессионного      соглашения;

         3) приводящее к причинению значительного ущерба концеденту неисполнение концессионером обязательств по осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением;

         4) прекращение или приостановление концессионером деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, без согласия концедента, за исключением случаев, предусмотренных частью 3.7 статьи 13 данного федерального  закона,  а также  положениями  иных  нормативных  правовых

актов;

         5) неисполнение или ненадлежащее исполнение концессионером установленных концессионным соглашением обязательств по предоставлению гражданам и другим потребителям товаров, работ, услуг, в том числе услуг по во до-, тепло-, газо- и энергоснабжению, услуг по водоотведению, услуг транспорта общего пользования.

        Таким образом, неисполнение концессионером обязательств по осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением (пункт 3 части 2 статьи 8 Закона № 115-ФЗ) признается существенным нарушением концессионного соглашения в том случае, если это приведет к причинению значительного ущерба концеденту (пункт 3 части 2 статьи 15 Закона № 115-ФЗ).

         Вместе с тем в качестве существенных нарушений условий концессионного соглашения, являющихся самостоятельными основаниями его расторжения, признаются нарушение сроков создания объекта концессионного соглашения по вине концессионера (пункт 1 части 2 статьи 15), а также неисполнение или ненадлежащее исполнение концессионером установленных концессионным соглашением обязательств (пункт 5 части 2 статьи 15).

         Истец в обоснование заявленных исковых требований, указывает на нарушение концессионером сроков создания и ввода в эксплуатацию второй части Иного движимого имущества, в соответствии с календарным планом (Приложение № 1 к Дополнительному соглашению № 3 от 23.03.2020 года к Концессионному соглашению) по вине АО «Ситроникс».

           Как было указано выше, пункт 1 части 2 статьи 15 Закона № 115-ФЗ к числу существенных нарушений концессионного соглашения концессионером относит нарушение сроков создания и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения по вине концессионера. Таким образом, квалифицирующим признаком существенности нарушения условий концессионного соглашения концессионером в названном случае является специфика принятых им на себя обязанностей, заключающихся в создании объектов, содержащихся в соглашении, заключенном сторонами рассматриваемого спора, которые были нарушены ответчиком. Значительность ущерба для концедента в указанной ситуации заменяется презюмируемой важностью для него инвестиционной составляющей обязанностей концессионера. Вина должника в нарушении обязательства предполагается, пока не доказано обратное. Отсутствие вины в неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательства доказывается должником (пункт 2 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункт 5 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской   Федерации   об   ответственности   за   нарушение   обязательств»).

           Таким образом, основанием для расторжения Концессионного Соглашения от 04.04.2017г. является нарушение Концессионером объема капитальных вложений, предусмотренных приложением № 10 к Соглашению, нарушение сроков  создания и (или) реконструкции объекта Соглашения по вине Концессионера установленных   Концессионным соглашением обязательств.

На основании изложенного и руководствуясь  статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

РЕШИЛ:

Исковые требования Министерства по делам гражданской обороны чрезвычайным ситуациям Республики Ингушетии удовлетворить в полном объеме.

Расторгнуть концессионное соглашение от 04.04.2017г., заключенное между Управлением РИ по обеспечению деятельности по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и Акционерным обществом «СИТРОНИКС».

Взыскать с Акционерного общества «СИТРОНИКС» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) государственную пошлину в доход федерального бюджета в размере 6 000 рублей.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления апелляционной инстанции.

Апелляционная жалоба на решение суда может быть подана в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца после принятия (изготовления в полном объеме).

Кассационная жалоба может быть подана в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа, в течение двух месяцев при условии, что решение суда первой инстанции было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Жалобы на решение суда первой инстанции подаются через Арбитражный суд Республики Ингушетия.

 

 

Судья                                                                                             М.М. Мержоев